АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-22208/2017

г. Симферополь

29  мая   2018  года

Резолютивная часть решения оглашена  28.05.2018

Полный текст решения изготовлен  29.05.2018

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГБУЗ РК «Советская районная больница»

к ответчику ООО «Каре-СБ»

о взыскании задолженности

участники процесса не явились, 

Обстоятельства дела:  Истец  обратился в Арбитражный суд Республики Крым  с исковым заявлением о взыскании штрафа в размере 225 945,00 руб. и обязать ответчика выполнить обязательства. 

            Исковые требования обосновываются непредставление отчетной и исполнительной документации подрядчиком по выполненным работам. 

            Ответчик отзыв не представил. 

            В судебном заседании, которое состоялось 21.05.2018, объявлен перерыв по 28.05.2018.

                 Рассмотрев материалы дела суд, -

                                                      УСТАНОВИЛ:

В целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в соответствии с протоколом о результатах конкурса на определение исполнителя работ № РП 00446 от 28.11.2016, на основании пункта 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утверждённого постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 г. № 219 и распоряжением Главы Республики Крым ФИО2 от 30.08.2016 № 515-рг «О проведении закупок», между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Советской районной больницей» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Каре-СБ» (Исполнитель) заключён контракт № 00446/5 от 02.12.2016 г. предметом которого является монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ).

Согласно п. 1.1. контракта Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в сроки, установленные настоящим Контрактом, выполнить работы по объекту: «Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) по объекту: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Кр >ш «Советская районная больница», расположенное по адресу: 

<

...>. Лечебный корпус № 1 (Литер К)» и передать их результат Заказчику.

Согласно п. 1.2. контракта, Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Контракта (пункт 1.7 Контракта).

В соответствии с п.п. 2.2., 2.3., Работы должны быть выполнены в объёмах согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту). Сроки и этапы выполнения Работ устанавливаются Календарным планом - графиком Работ (Приложение № 2 к Контракту) до 25 декабря 2016 года.

Цена Контракта в соответствии с п.п. 4.1., 4.2. составляет: 2 259 459 руб. (Два миллиона двести пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 00 коп.) без НДС.

Свои обязательства по оплате работ, согласно пункта 4.5 Контракта, Заказчик выполнил в полном объёме, сделал платеж в размере 2 259 459,00 руб. (Два миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 00 коп.) платежное поручение (прилагается)

Со своей стороны Подрядчик нарушил следующие условия контракта:

-  сроки выполнения работ, которые определены календарным планом- графиком работ с 02 декабря 2016 по 25 декабря 2016 года (Приложение № 2 к Контракту);

-  согласно пункта 7.1.10 Контракта своевременно и надлежащим образом оформлять и вести необходимую документацию и предоставлять её Заказчику. До настоящего времени не предоставлены акты с указанием выполненных работ и суммы израсходованных денежных средств (письмо Заказчика от 30.01.2017 года исх. № 184, в соответствии с пунктом 7.4.7 Контракта);

-  согласно пункта 7.1.12 извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента их возникновения. Заказчиком получено письмо от Подрядчика (исх. № 23 от 17.01.2017 г.) о гарантированном выполнении работ в срок до 31.03.2017 г. без указания причин о невозможности исполнения своих обязательств в срок, указанный в Контракте;

В соответствии с пунктами З.1., 3.2. Контракта, выполненные Работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по Акту о приёмке выполненных работ в 2-х экземплярах (Формы КС-2, КС-3) и комплектом исполнительной документации к выполненным Работам, установленных Техническим заданием (Приложение № 1к настоящему Контракту) и законодательством Российской Федерации.

По завершении выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию о проделанной Работе.

Доказательств предоставления отчётной и исполнительной документации Ответчиком  не предоставлено.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 No 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ,предусмотренных контрактом,  за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

                        Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

            В соответствии с п.8.2 контракта установлена фиксированная сумма штрафа в размере 10 процентов от суммы контракта.

            Согласно п. 15.1 Контракта он действует с момента заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31 декабря 2016 года.

            Согласно п. 15.2 Контракта окончание срок действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту, за исключением обязательств по оплате Работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, штрафов.

            Таким образом, требования истца о обязании ответчика выполнить свои обязательства на условиях предусмотренных удовлетворению не подлежат, поскольку с прекращением срока Действия Контракта также прекращаются и отношения между сторонами. 

            Таким образом, исковые требования законные,  и подлежат удовлетворению части. 

            Госпошлина за исковые требования (имущественные и неимущественное) составляет 13 519,00 руб.

            Истцом при подаче искового заявления оплачено 7 519,00 руб.

            Поскольку истцом неуплачены нематериальное требование в размере 6 000,00 руб., недоплаченная госпошлина подлежит взысканию в бюджет с ответчика в размере 6 000,00 руб. и, соответственно, взыскиваемая госпошлина с ответчика в пользу истца уменьшается на 6 000,00 руб.

            Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается  ответчиком, недоплаченная госпошлина подлежит взысканию в бюджет.  

            На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым, 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить частично.

            Взыскать с ООО «Каре-СБ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу  ГБУЗ РК «Советская районная больница» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  штраф в размере 225 945,00 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 1 519,00 руб.

            В части обязания ООО «Каре-СБ» выполнить свои обязательства на условиях предусмотренных контрактом № 00446/5 от 02.12.2016 в удовлетворении требований отказать.

            Взыскать с ООО «Каре-СБ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета госпошлину в размере 6 000,00 руб. 

            Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                      

         Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                            В.И. Гайворонский