32/2017-163916(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-21373/2015

г. Владивосток

09 октября 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинников В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения "Центр физической культуры и спорта г. Артема",  Администрации Артемовского городского округа  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ДАЛЬСТРОЙБИЗНЕС-2"  

об обязании устранить недостатки работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать ООО Дальстройбизнес-2» в 30 дневный срок с момента  вступления решения суда в законную силу произвести работы по  устранению выявленных строительных недостатков, а именно:  

1. Отвести грунтовые воды, выполнить устройство дренажа в районе  КТПН-419; отремонтировать устройство компенсации реактивной  мощности (КРМ) в КТПН-419.  

2. Герметично закрыть отверстие между ледовой ареной и коридором  со стороны раздевалок в районе раздевалки № 23 по техническому  паспорту от 05.09.2013.  

3. Устранить деформацию крыльца, заменить стеклопакет возле  входной двери с северной стороны в районе тамбура (помещение № 82 по  техническому паспорту); восстановить облицовочную плитку по  периметру всего здания «Ледовой арены» путем устройства  металлического каркаса для крепления керамогранита, пароизоляционного  слоя из мембраны ветро-влагозащитной и изоляции изделиями из  теплоизоляционных плит.  

4. Устранить зазоры в оконных конструкциях в вестибюле  тренажерного зала -помещение № 21 по техническому паспорту, в  тренажерном зале - помещение № 29 по техническому паспорту, в  хореографическом зале - помещение № 30 по техническому паспорту.  

Выполнить уклоны для стока атмосферных осадков на отливах по  периметру здания «Ледовой арены».  

5. Заделать стыки между стеновыми панелями в районе зрительного  зала -помещение № 27 - с северной стороны здания.  

6. Восстановить работу системы автоматики подъемных платформ  для инвалидов (помещения № 96, 73 по техническому паспорту).  

7. Отремонтировать дверной порог на центральном входе в здание в  соответствии с муниципальным контрактом № 60/38 А от 04.06.2013.  

8. Вывести дренажную систему на рельеф местности или в  городскую ливневую канализацию.  

9. Герметично заделать стыки примыкания кровли с южной стороны  над коридорами - помещения № 21, 74 по техническому паспорту - между  ледовой ареной (помещение № 27), раздевалками, служебными и  административными помещениями (помещения №№ 22, 28, 37, 42, 50, 53,  58, 59, 67, 68, 69) к стене.  

10. Восстановить узлы креплений наружных стеновых сэндвич -  панелей к металлическим стойкам фахверка с северной стороны здания в  соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.  Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».  

11. Восстановить работу освещения. 

В удовлетворении требования о восстановлении работы вентиляции  подогрева воздуха в районе зрительских трибун, расположенных в  помещении № 27 по техническому паспорту отказать.  

В удовлетворении требований муниципального казенного  учреждения "Центр физической культуры и спорта г. Артема" отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Дальстройбизнес-2» в доход федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч)  рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

Судья Овчинников В.В.