Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-271422/19-110-2107

город Москва

31 июля 2020 года.

Резолютивная часть решения изготовлена 29 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 31 июля 2020 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗНАМЕНКА, ДОМ 19, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕРСТРОЙ" (143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 25 932 696,13 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  26.06.2019№207/4/217д,

от ответчика- ФИО3 по дов.  от  15.01.2020

У С Т А Н О В И Л:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕРСТРОЙ" о взыскании 25 932 696,13 руб. неустойки по государственному контракту от 17.05.2017 №171/ЭА/2017/ДГЗ/З.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, при  этом заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам:

Как следует из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «РосИнтерСтрой» (ООО «РосИнтерСтрой») (далее - Исполнитель) был заключен государственный контракт от 17 мая 2017 г. № 171/ЭА/2017/ДГЗ/3 на выполнение работ по модернизации с дооборудованием ремонтной мастерской (службы горючего и смазочных материалов) войсковой части.

Согласно п. 2.1 Контракта Исполнитель обязуется, в установленный Контрактом срок, выполнить Работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом.

В соответствии с п.п. 13.2 Контракта Работы должны быть выполнены до 1 октября 2017 г., так как 30 сентября 2017 г. нерабочий день (суббота).

В соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания считается ближайший следующий за ним рабочий день, т.е. 2 октября 2017 г.

Датой выполнения Работ является дата подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту (п. 6.16 Контракта).

Исполнителем Работы выполнены 14 июня 2018 г., то есть с нарушением срока, установленного Контрактом, что подтверждается  Актом сдачи-приемки выполненных Работ по Контракту.

Просрочка исполнения обязательств по Контракту с 3 октября 2017 г. по 14 августа 2018 г. составляет 316 дней.

Срок исполнения обязательств по Контракту составляет 255 дней (с  03.10.2017 по  14.06.2018).

В соответствии с п. 9.2 Контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки, Исполнителем исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, за каждый факт просрочки.

По расчету истца сумма неустойки составляет 25 932 696 руб. 13 коп.

 Вместе с тем  суд, проверив  расчет  неустойки,  учитывая ставку р рефинансирования  на дату принятия решения(4,25%), размер  неустойки составляет 913 262 руб.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными,  поскольку указанные в отзыве обстоятельства  не являются основанием для освобождения  от ответственности,  учитывая то,  что  письмо о замене работ было направлено уже за пределами  установленного срока выполнения работ.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.СТ   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕРСТРОЙ"  в пользу  Министерства обороны Российской Федерации  913 262 руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕРСТРОЙ"  в  федеральный бюджет госпошлину в размере 5 376 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко