АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-21627/2020

31 октября 2022 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  24.10.2022

Полный текст решения изготовлен  31.10.2022

             Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ» к Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии Республики Крым» при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  Администрация города Феодосии о взыскании

При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 24.01.2022;

Обстоятельства дела:  Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать задолженность в размере 5 438 537,00 руб., пеню в сумме 540 178,45 руб. 

Исковые требования обосновываются неоплатой выполненных работ.

Ответчик иск не признает, по мотивам, изложенным в отзыве. 

В судебном заседании, которое состоялось 17.10.2022, объявлен перерыв по 24.10.2022.

Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

15.10.2018 между Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым» (Заказчик, Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ» (Подрядчик, Истец) по итогам аукциона в электронной форме (протокол от «26» сентября 2018 года № 0175300034118000138, извещение от «03» августа 2018 года                     № 0175300034118000138) заключен Муниципальный контракт №Ф.2018.477978 Ремонт дорожного покрытия в г. Феодосия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО городской округ Феодосия от 15.10.2018 (далее - Контракт).

Согласно п. 1.1. Контракта по настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Ремонт дорожного покрытия в г. Феодосия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО городской округ Феодосия (далее - Объект), в объеме, установленном в Описании объекта закупки (приложение № 3 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Описание объекта закупки), проектно-сметной документацией в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью), согласованным с Заказчиком (далее - График производства работ), по цене контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта. Заказчик обязуется осмотреть результат выполненных Работ на Объекте и принять их, оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Пунктом 2.1. Контракта предусмотрено, что цена Контракта составляет 5 438 038,00 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч тридцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 829 531,22 (Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсрт тридцать один рубль 22 копейки) (далее - Цена контракта).

В соответствии с п. 3.3. Контракта оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 19 Контракта, в следующем порядке:

Согласно пп. 3.3.1. Контракта Заказчик оплачивает работы Подрядчика поэтапно, за фактически выполненные в соответствии с Контрактом работы, исходя из объема таких работ и цены Контракта путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета, на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2, а также актов приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, согласованных (наличие на акте подписи и печати) организацией, привлеченной для осуществления строительного контроля (далее - организация технического надзора), подтверждающего выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2.

Согласно пп. 3.3.2. Контракта для осуществления оплаты в соответствии с п.п. 3.3.1 настоящего Контракта Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика:

-Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в трех экземплярах);

-Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в двух экземплярах);

-Счет на оплату выполненного объема работ и Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации).

Согласно п.п. 3.3.3. Контракта Подрядчик по завершении последнего этапа работ, предусмотренного Графиком производства - работ (приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью), вместе с документами, указанными в п.п. 3.3.2 настоящего Контракта, предоставляет в адрес Заказчика исполнительную документацию, составленную при выполнении работ.

Пунктом 3.4. Контракта предусмотрено, что Заказчик рассматривает документы, указанные в п.п. 3.3.2, 3.3.3 настоящего контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации у Заказчика сопроводительного письма Подрядчика, с которым они направлены.

Согласно п. 3.7. Контракта 3.7. обязательства Заказчика по оплате принятых работ, без замечаний, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 19 настоящего Контракта.

В соответствии с п. 4.1. Контракта срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента заключения контракта, в соответствии с требованиями Описания объекта закупки и детализируется по проектным разделам Г рафиком производства работ.

Согласно п.п. 5.2.5. Контракта Заказчик обязан принять выполненные Работы, а также оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

В соответствии с п.п. 5.3.2 Контракта Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Актом о приемке выполненных работ, составленном по форме КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3 и иной документации (при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика).

Согласно п. 7.1. Контракта после завершения этапа выполнения работ, предусмотренного Графиком производства работ (приложение № 1 к настоящему контракту, являющемся его неотъемлемой частью), Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

Пунктом 7.2. Контракта предусмотрено, что не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 7.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику следующую документацию:

Акты о приемке выполненных работ, 'составленные по форме КС-2 (в трех экземплярах);

Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в двух экземплярах);

исполнительные схемы;

акты освидетельствования скрытых Работ, согласованные организацией технического надзора;

сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций;

общий журнал работ.

Согласно п. 7.3. Контракта для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по фактическому объему, комплектности и качеству, уполномоченный представителе Заказчика проводит проверку выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных п.п. 3.3.2, 3.3.3, п. 7.2 настоящего Контракта. Направление указанных документов осуществляется Подрядчиком заказной корреспонденцией, с уведомлением о вручении, либо сдачей нарочно Заказчику.

Пунктом 7.4. Контракта предусмотрено, что Заказчик рассматривает в срок, установленный п. 7.3 настоящего контракта, результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту, согласно полученных по п. 7.3. настоящего контракта документов, на предмет соответствия объема работ, их качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Описании объекта закупки, проектно-сметной документации, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

Согласно п. 7.11. Контракта работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме Только после приемки всего объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, на основании, подписанного Сторонами, Акта приемки законченного ремонта Объекта.

Согласно п. 16.2. Контракта настоящий Контракт действует до 31 декабря 2018 года. По истечении срока действия Контракта обязательства Сторон по нему прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, с учетом их продления на срок устранения недостатков, а также обязательств по возмещению убытков и уплате штрафных санкций. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

Истец Письмом от 07.06.2019 №133 предоставил для подписания и оплаты акты выполненных работ на сумму 5 438 038,00 руб., а также иные документы (вх, от 07.06.2019 №01-6/82).

Письмом от 02.07.2019 №140 Истец повторно предоставил для подписания и оплаты акты выполненных работ на сумму 5 438 038,00 руб., а также иные документы (вх. от 04.07.2019 №01-6/125).

22.08.2020 Истец предоставил повторно исполнительскую документацию (два письма) - вх. 22.08.2019.

Поскольку оплата по выполненным работам не произведена истец обратился с настоящим исковым заявлением в суд. 

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статье 720 ГК РФ предусмотрено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо .возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Доводы ответчика о том, что работы выполнены не полностью и ненадлежащего качества не могут быть приняты во внимание.

Определением суда по делу назначена судебная экспертиза. 

Согласно заключения эксперта от 26.05.2022 № 1982/10-3  стоимость выполненных работ составляет 5 480 737,60 руб., качество выполненных работ соответствует требования муниципального Контракта, отклонений от действующих норм и правил не установлено. 

От ответчика возражений на экспертизу не поступало.

С учетом изложенного, требования о взыскании задолженности в размере 5 438 537,00 руб. подлежит удовлетворению. 

Истцом также заявлено о взыскании пени.

Пеня предусмотрена п. 12.4 Контракта. 

Согласно п. 3.4., 7.3. Контракта Заказника проводит проверку выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных п.п. 3.3.2, 3.3.3, п. 7.2 Контракта.

При этом, пунктом п.п. 3.3.1. Контракта предусмотрено, что Заказчик оплачивает работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2.

Истец письмом от 07.06.2019 №133 предоставил для подписания и оплаты предусмотренные Контрактом документы (вх. от 07.06.2019 №01-6/82).

Пятидневный срок для рассмотрения поданных документов у Ответчика истек 17.06.2019.

С учетом п. 3.3.1. Контракта, оплата должна была быть произведена до 08.07.2019.

Проверив расчет истца суд находит в нем ошибки.

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (ответ на вопрос № 3), закон не содержит прямого указания на применимую ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в случае взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства в судебном порядке. 

По смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

Таким образом, при расчете пени должна использоваться ставка ЦБ РФ в размере 7,5%, истцом в свою очередь используются ставки с 4,25% до 7,25%, что является правом истца и не превышает допустимую ко взысканию сумму. 

Истец также просит взыскать пеню по день фактического исполнения обязательств.

Данное требование не противоречит статье 330 ГК РФ, а также разъяснениям, изложенным в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Согласно п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Между тем, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. 

Согласно подпункту 2 пункту 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 30.12.2021г., с изменениями от 03.02.2022г.) «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022 до окончания срока моратория начисление неустойки на установленную судебным актом задолженность в порядке исполнения судебного акта не производится (аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях 11 ААС суда от 12.02.2022г. № А65-19850/2021, 17 ААС от 04.05.2022г. по делу № А60-59132/2021, от 11.05.2022г. по делу № А60-61091/2021).

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно счета  № 0000-000211 от 26.05.2022 стоимость проведенной экспертизы составляет 60 000,00 руб. 

Истцом по платежному поручению № 313757 от 22.06.2021 за производство экспертизы на депозитных счет Арбитражного суда Республики Крым внесено                55 518,00 руб.

Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу экспертного учреждения подлежат взысканию 4 482,00 руб. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии Республики Крым» (ИНН: 

<

***>  ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ» (ИНН: 

<

***>  ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 5 438 537,00 руб., пеню в сумме 540 178,45 руб.,  расходы по оплате госпошлины в сумме 52 894,00 руб., продолжить начисление пени на сумму задолженности в размере 5 438 537,00 руб. с 12.12.2020 по день фактического исполнения обязательства с учетом введения моратория на начисление пеней с 01.04.2022 по 30.09.2022г. Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии Республики Крым» (ИНН: 

<

***>  ОГРН: 

<

***>) в пользу ФБУ «КРЫМСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) расходы на проведение экспертизы в сумме 4 482,00 руб. 

Вернуть  ООО «СТРОЙСЕРВИС КРЫМ» (ИНН: 

<

***>  ОГРН: 

<

***>) излишне уплаченную госпошлину в сумме 3 393,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 314685 от 01.08.2022. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                     В.И. Гайворонский