АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, 

<

...>  

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва 

20.03.2025 Дело № А40-266682/24-11-1638 Судья Дружинина В. Г. (единолично)  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Ляпковой Н.А. проводит судебное заседание по иску 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (115035, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ПЯТНИЦКАЯ, Д. 19, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.08.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (107113, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, ПЕР ПЕСОЧНЫЙ, Д. 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.03.2003, ИНН: 

<

***>)  

о понуждении 

в заседании приняли участие: от истца: ФИО1 по доверенности № ДКН-16-37-79/24 от 28.12.2024, паспорт, от ответчика: ФИО2 по доверенности № 11/2025 от 28.01.2025, паспорт Руководствуясь ст. ст. 110, 167-176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ФГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности" провести работы по сохранению выявленных объектов культурного наследия "Жилой дом, 1-я пол. XIX в.; Жилой дом, 1820 г." и "Жилой дом, 1821 г.", расположенных по адресам: 

<

...> и д. 4, стр. 2, в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ, а именно:  

в течение четырех месяцев с даты вступления в силу решения по настоящему делу на основании выводов инженерно-технического обследования, согласованных проектов и выданных Департаментом разрешений провести первоочередные противоаварийные работы по сохранению выявленных объектов культурного наследия "Жилой дом, 1-я пол. XIX в.; Жилой дом, 1820 г." и "Жилой дом, 1821 г.", расположенных по адресам: 

<

...> и д. 4, стр. 2, по завершении которых получить акт приемки выполненных работ;  

в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения по настоящему делу на основании задания Департамента разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия "Жилой дом, 1-я пол. XIX в.; Жилой дом, 1820 г." и "Жилой дом, 1821 г.", расположенных по адресам: 

<

...> и д. 4, стр. 2, включая реставрацию и приспособление для современного использования, и согласовать ее в Департаменте в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства об охране объектов культурного наследия. В случае если работы по сохранению объектов культурного наследия затрагивают их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

в течение двадцати четырех месяцев с даты вступления в силу решения по настоящему делу по разрешению Департамента выполнить в соответствии с согласованной проектной документацией работы по сохранению выявленных объектов культурного наследия "Жилой дом, 1-я пол. XIX в.; Жилой дом, 1820 г." и "Жилой дом, 1821 г.", расположенных по адресам: 

<

...> и д. 4, стр. 2, предоставить в Департамент отчетную документацию и получить акты приемки выполненных работ. В случае если работы по сохранению объектов культурного наследия затрагивают их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, указанные работы провести в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.03.2003, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч - рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья: В.Г. Дружинина