2301/2023-267185(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-11905/2023

г. Владивосток

01 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 01 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Фокиной А.А.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Территориальная энергосетевая компания» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 11.03.2013)  

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 09.02.2000, дата  присвоения ОГРН 15.12.2002)  

о признании незаконным и отмене постановления от 15.06.2023 № 025/04/9.21-49/2023 о  назначении административного наказания (по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, штраф  100000 руб.),  

при участии в судебном заседании: от заявителя – представителя ФИО2 (по  доверенности от 26.05.2023), от Приморского УФАС – не явились, извещены,  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная энергосетевая  компания» (далее – заявитель, общество, ООО «ТЭСК», лицо, привлеченное к  административной ответственности, сетевая организация) обратилось в арбитражный  суд с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по  Приморскому краю (далее – Управление, антимонопольный орган, Приморское УФАС)  и просит суд признать незаконным и отменить постановление о назначении  административного наказания от 15.06.2023 по делу об административном  правонарушении № 025/04/9.21-49/2023 по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Заявитель в судебном заседании привел доводы, аналогичные изложенным в  письменном виде, требования поддержал в полном объёме, пояснил суду, что  оспариваемым постановлением Управления ООО «ТЭСК» признано виновным в  совершении административного правонарушения, ответственность за которое  предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, выразившегося в нарушении срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению; заявителю  назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100000 руб.  

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  судей по делу № А51-11905/2023 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных  дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА). 

Антимонопольный орган в судебное заседание представителя не направил, о  времени и месте заседания извещен надлежащим образом, доказательства извещения  имеются в материалах дела, ввиду чего суд рассмотрел дело в отсутствие Управления в  соответствии с частью 3 статьи 156, частью 2 статьи 210 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Сетевая организация просит отменить оспариваемое постановление, указывает на  пропуск срока давности привлечения к административной ответственности по заявке  ФИО3, а также указывает, что задержка исполнения мероприятий по  технологическому присоединению обусловлена созданием препятствий со стороны СНТ  «Коммунальник».  

Кроме того, общество сослалось на ограничение проверок в 2023 году, введенное  Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации  и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  (далее - Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336); по мнению заявителя, с  учетом данного ограничения после 10.03.2022 контрольные (надзорные) мероприятия,  проводимые Управлением по административному делу № 025/04/9.21-49/2023, должны  были быть окончены и производство по административному делу подлежало  прекращению.  

Управление в письменном отзыве предъявленные к нему требования оспорило,  полагает, что оспариваемое постановление вынесено антимонопольным органом  правомерно, с учетом всех обстоятельств дела, поддержало доводы, приведенные в  оспариваемом постановлении; в удовлетворении заявленных требований просит  отказать.  

По вопросу применения к спорным правоотношениям Постановления  Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 антимонопольный орган также возразил, указав,  что мероприятия государственного и муниципального контроля, ограничения на  которые введены названным нормативным актом, в отношении ООО «ТЭСК»  Управлением после 10.03.2022 не проводились, какие-либо предписания обществу не  выдавались, и правовых оснований для прекращения производства по делу об  административном правонарушении в данном случае не имелось.  

Как установлено судом из материалов дела и пояснений сторон, 01.12.2021 в адрес  гр. ФИО3 ООО «ТЭСК» направлен договор № 12-01-674/21 на  технологическое присоединение к электрическим сетям организации  энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) земельного участка, расположенного по  адресу: Приморский край, г. Находка, СНТ «Коммунальник», ул. Новая, дом 62,  кадастровый номер земельного участка: 25:31:010501:998.  

01.12.2021 сетевой организацией размещены Технические условия № 12-01-674/21  и счет на оплату № 915 на сумму 550 руб. Согласно пункту 5 Договора от 01.12.2021   № 12-01-674/21 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению  составляет 6 месяцев с момента заключения настоящего договора; договор считается  заключенным со дня оплаты заявителем счета (пункт 22 Договора). 01.12.2021 счет №  915 оплачен ФИО3, платежный документ размещен в личном кабинете,  соответственно, срок технологического присоединения по договору от 01.12.2021 № 1201-674/21 – до 04.05.2022 (с учетом переноса срока с нерабочего дня на следующий за  ним рабочий день).  

13.12.2021 в адрес гр. ФИО4 ООО «ТЭСК» направлен договор № 12-25698/21 на технологическое присоединение к электрическим сетям организации  энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) земельного участка, расположенного по  адресу: Приморский край, г. Находка, СНТ «Коммунальник», ул. Новая, дом 63,  кадастровый номер земельного участка: 25:31:010501:997.  

13.12.2021 сетевой организацией размещены Технические условия № 12-25-698/21  

и счет на оплату № 938 на сумму 550 руб. Согласно пункту 5 Договора от 13.12.2021   № 12-25-698/21 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению  составляет 6 месяцев с момента заключения настоящего договора; договор считается  заключенным со дня оплаты заявителем счета (пункт 22 Договора). 10.01.2022 счет №  938 оплачен Семайкиным В.И., платежный документ размещен в личном кабинете,  соответственно, срок технологического присоединения по договору от 13.12.2021 № 1225-698/21 – до 10.07.2023.  

19.12.2022 (вх. Управления № 9621/22 и 9622/2022) ФИО3 и ФИО4 обратились в Приморское УФАС с жалобой на действия ООО «ТЭСК»,  выразившиеся в нарушении установленного порядка подключения (технологического  присоединения) к электрическим сетям в части срока выполнения мероприятий по  договорам от 01.12.2021 № 12-01-674/21, от 13.12.2021 № 12-25-698/21 соответственно;  по состоянию на день подачи жалобы обязательства по обоим договорам сетевой  организации выполнены не были.  

В пояснениях по делу об административном правонарушении (от 01.02.2023 № 291,  от 09.02.2023 № б/н, исх. от 05.03.2023 № б/н, от 19.03.2023 № б/н, от 31.03.2023 № б/н)  сетевая организация сообщила, что задержка выполнения Технических условий со  стороны ООО «ТЭСК» объясняется отказом СНТ «Коммунальник» в согласовании  мероприятий по технологическому присоединению указанных заявителей, а также  разрешить допуск сотрудников ООО «ТЭСК» для выполнения мероприятий по  технологическому присоединению, в связи с чем заявителем подготовлено исковое  заявление в Арбитражный суд Приморского края.  

Посчитав, что своими действиями ООО «ТЭСК» нарушило требования Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004   № 861, 17.04.2023 Управление в присутствии защитника ОО «ТЭСК» по доверенности  ФИО2 составило протокол об административном правонарушении № 025/04/9.2149/2023, в котором действия ООО «ТЭСК» квалифицированы по части 1 статьи 9.21  КоАП РФ.  

Постановлением Управления от 15.06.2023 по делу об административном  правонарушении № 025/04/9.21-49/2023 ООО «ТЭСК» привлечено к административной  ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и ему назначено административное  наказание в виде административного штрафа в размере 100000 руб.  

Не согласившись с вынесенным постановлением, посчитав его незаконным и  нарушающим права и законные интересы общества, заявитель обратился в  арбитражный суд с требованием о признании его незаконным и отмене.  

Исследовав материалы дела, изучив доводы сторон, проанализировав в  соответствии с частью 7 статьи 210 АПК РФ законность оспариваемого постановления  в полном объеме, суд приходит к следующим выводам.  

Согласно части 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании  решения административного органа о привлечении к административной  ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и  обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих  полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение,  устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной  ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности,  не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а  также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  

В соответствии с частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ, частью 7 статьи 210 АПК РФ  судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело  в полном объеме.  

В силу части 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений  административных органов о привлечении к административной ответственности  обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к  административной ответственности, возлагается на административный орган,  принявший оспариваемое решение.  

В соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ по делу об административном  правонарушении подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события  административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия  (бездействия), за которые названным Кодексом или законом субъекта Российской  Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в  совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие и  отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба  причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие  производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства,  имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия  совершения административного правонарушения.  

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за  нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)  недискриминационного доступа или установленного порядка подключения  (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или)  магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям,  газораспределительным сетям или централизованным системам горячего  водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение  собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства  правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,  либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных  и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и  (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.  

Объективную сторону данного правонарушения образует, в том числе, и  нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям.  

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,  изложенной в Определении от 10.07.2009 № 6057/09, услуги по осуществлению  технологического присоединения не образуют отдельного вида экономической  деятельности, а являются нераздельной частью рынка передачи электрической энергии,  в связи с чем не составляют самостоятельного товарного рынка.  

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О  естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии относятся к  сфере деятельности субъектов естественных монополий.  

По сведениям антимонопольного органа, ООО «ТЭСК» осуществляет естественно-монопольный вид деятельности по передаче электрической энергии в границах  прилегания принадлежащих ему электрических сетей и объектов электросетевого  хозяйства, что подтверждается утвержденными Агентством по тарифам Приморского  края для указанного хозяйствующего субъекта тарифами и тарифными ставками,  следовательно, является субъектом естественной монополии.  

В силу изложенного ООО «ТЭСК» является субъектом административной  ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.  

Пункт 1 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 №  35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ) устанавливает, что  

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по  производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, и носит однократный характер.  

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ технологическое  присоединение должно быть завершено в сроки, определяемые в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им  федеральным органом исполнительной власти. При этом если для обеспечения  технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения  условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и  (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов  электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по  производству электрической энергии, сроки технологического присоединения  определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и  обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности,  предусматривающих осуществление указанных мероприятий.  

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством  Российской Федерации, устанавливает:  

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты  электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей  территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом  присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге  по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;  

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий  по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее  особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам;  

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического  присоединения, в том числе существенные условия такого договора;  

состав технических условий для технологического присоединения  энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;  

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления  технологического присоединения (абзац 6 части 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ).  

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.02.2004 № 861 (далее - Правила № 861).  

В силу пункта 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в  отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому  присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической  возможности технологического присоединения.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора,  заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в  сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является  обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил № 861).  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности  технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация  обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих  Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое  присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве  собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в  отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по  технологическому присоединению.  

В пункте 14 Правил № 861 предусмотрены требования к содержанию заявки  физического лица, поданной в целях технологического присоединения  энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт  включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с  осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых  предусматривается по одному источнику.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению относится к существенным  условиям договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в  пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое  присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых  составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических  сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором  расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более  300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской  местности.  

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение  технических условий заявителем и сетевой организацией (подпункт «г» пункта 18  Правил № 861).  

Разделом Х Правил № 861 урегулированы особенности технологического  присоединения заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, в  частности, предусмотрена возможность взаимодействия между сетевой организацией и  заявителями посредством личного кабинета потребителя, размещенного на сайте  сетевой организации.  

Согласно пунктам 103, 104, 105, 106 Правил № 861 договор между сетевой  организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих  Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой  организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое  присоединение и оплаты заявителем указанного счета (абзац 1 пункта 103).  

Наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14  настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими  заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.  

Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими  Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих  Правил (абзацы 1, 2 пункта 104).  

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих  Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки  размещает на своем официальном сайте или ином официальном сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом  Правительством Российской Федерации, в отдельном разделе (далее - личный кабинет  потребителя):  

условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей  категории заявителей;  

счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил; 

технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому  присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а  также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны  заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу  электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего  поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом «л» пункта 9 настоящих  Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве  субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию);  

в отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) настоящих Правил, -  проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности),  выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный  усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица  гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие  объекты;  

инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий,  обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического  присоединения и фактического приема напряжения и мощности (пункт 105).  

Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой  организацией счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить  указанный счет (пункт 106).  

Из совокупного анализа приведенных норм права следует, что в рассматриваемом  случае договор технологического присоединения по заявке ФИО3 от  01.12.2021 № 12-01-674/21 на технологическое присоединение к электрическим сетям  ЭПУ земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка,  СНТ «Коммунальник», ул. Новая, дом 62, кадастровый номер земельного участка:  25:31:010501:998, считается заключенным с даты оплаты ФИО3  выставленного ООО «ТЭСК» 01.12.2022 счета № 915 – то есть с 01.12.2021.  

Договор технологического присоединения по заявке ФИО4 от 13.12.2021   № 12-25-698/21 на технологическое присоединение к электрическим сетям ЭПУ  земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, СНТ  «Коммунальник», ул. Новая, дом 63, кадастровый номер земельного участка:  25:31:010501:997, считается заключенным с даты оплаты ФИО4  выставленного ООО «ТЭСК» 13.12.2022 счета № 938 – то есть с 10.01.2022.  

Таким образом, с учетом подпункта «б» пункта 16 Правил № 861 срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению в данном случае не мог превышать 6  месяцев со дня оплаты ФИО3 и ФИО4 счета, на что также  указано в пункте 5 Договоров, направленных заявителем сетевой организацией, и истек  04.05.2022 (с учетом переноса срока с нерабочего дня на следующий за ним рабочий  день) и 10.07.2022 соответственно.  

Между тем, как подтверждено материалами дела и не оспорено заявителем,  обязательства по присоединению к электросетевому оборудованию со стороны ООО  «ТЭСК» по договору ФИО3 от 01.12.2021 № 12-01-674/21, по договору  ФИО4 от 13.12.2021 № 12-25-698/21 ни в срок до 04.05.2022 и 10.07.2022  соответственно, ни по состоянию на 19.12.2022 (дата подачи ФИО3 и  ФИО4 жалоб в Приморское УФАС) не выполнены, помимо этого,  

доказательства выполнения данных обязательств к настоящему времени обществом  суду также не представлены.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении заявителем требований  пунктов 16, 18 Правил № 861 в части срока выполнения мероприятий по  технологическому присоединению, определенного договором, и выполнения  технических условий по договору и неосуществлению технологического присоединения  объекта к электрическим сетям, что обществом по существу не оспаривается.  

Довод ООО «ТЭСК» о том, что технологическое присоединение к электросетевому  оборудованию по указанным договорам от 01.12.2021 № 12-01-674/21, от 13.12.2021   № 12-25-698/21 было невозможно осуществить в установленный срок в связи с  воспрепятствованием СНТ «Коммунальник» на проведение соответствующих работ,  судом отклоняется как необоснованный, поскольку достоверных и достаточных  доказательств того, что сетевой организацией в периоде течения установленного срока  были предприняты все необходимые и достаточные меры по соблюдению требований  законодательства к выполнению мероприятий по технологическому присоединению по  обеим заявкам, заявителем не представлено (в частности, первые обращения общества к  СНТ «Коммунальник» последовали уже после истечения установленного срока  выполнения мероприятий по технологическому присоединению).  

Учитывая те мероприятия, которые необходимо было выполнить заявителю, суд  приходит к выводу, что доказательств того, что заявитель к их выполнению приступил,  но не смог их завершить в установленный срок в силу чрезвычайных событий и  обстоятельств, которые общество не могло предвидеть и предотвратить при  соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него  требовалась, в материалы дела не представлено.  

Одновременно, материалами дела подтверждается, что с исковыми заявлениями к  СНТ «Коммунальник» общество обратилось только 09.02.2023, то есть не только после  истечения установленного срока технологического присоединения, но и после  обращения ФИО3 и ФИО4 жалоб в Приморское УФАС.  

При этом, вступившими в законную силу решениями от 28.06.2023 по делам   № А51-2394/2023 и № А51-2393/2023 суд обязал СНТ «Коммунальник» не чинить  препятствий в технологическом присоединение объектов заявителей технологического  присоединения - гражданки ФИО3 и гражданина ФИО4 к  электрическим сетям, а также допустить сотрудников ООО «ТЭСК» на территорию  СНТ «Коммунальник» для исполнения договоров от 01.12.2021 № 12-01-674/21, от  13.12.2021 № 12-25-698/21, об осуществление технологического присоединения, однако  до сегодняшний день в материалы настоящего дела доказательств подключения  заявителей к электрическим сетям и подписания итоговых трехсторонних документов  обществом не представлено.  

С учетом изложенного, в действиях заявителя имеется и подтвержден  надлежащими доказательствами состав административного правонарушения,  предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.  

В соответствии с частями 1, 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит  административной ответственности только за те административные правонарушения, в  отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица,  привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.  

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо несет ответственность за  совершенное административное правонарушение, если будет установлено, что у него  имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ  или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная  ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их  соблюдению.  

Основанием для освобождения заявителя от ответственности могут служить  обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными  препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при  соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях  выполнения законодательно установленной обязанности.  

В рассматриваемом случае в деле не имеется доказательств, подтверждающих, что  заявитель предпринял все зависящие от него меры по надлежащему исполнению  требований действующего законодательства и недопущению совершения  административного правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых  обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил,  нарушение которых послужило основанием для привлечения к административной  ответственности, не установлено.  

Имеющиеся в деле доказательства суд находит допустимыми, относимыми,  достоверными и достаточными для признания общества виновным в совершении  вменяемого ему административного правонарушения.  

Оценивая доводы заявителя о пропуске срока давности привлечения к  административной ответственности, судом установлено, что Пленум Высшего  Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с  введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях» в пункте 18 постановления разъяснил, что при принятии решения по  делу об административном правонарушении, а также об оспаривании решения  административного органа о привлечении к административной ответственности суд  должен проверять, не истекли ли сроки, установленные частями 1, 3 статьи 4.5 КоАП  РФ.  

Данные сроки не подлежат восстановлению, поэтому суд, в случае их пропуска,  принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного органа  о привлечении к административной ответственности (часть 2 статьи 206 АПК РФ) либо  решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения  административного органа (часть 2 статьи 211 АПК РФ).  

В силу пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и с учётом  нормы части 1.1 статьи 4.5 КоАП РФ (применяемой с 25.04.2023) срок давности  привлечения к административной ответственности по общим правилам исчисления  сроков исчисляется со дня совершения административного правонарушения. В случае  совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия,  срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня,  следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения  соответствующей обязанности.  

Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при  применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности только  за оконченное правонарушение.  

Административное правонарушение считается оконченным с момента, когда в  результате действия (бездействия) правонарушителя имеются все предусмотренные  законом признаки состава административного правонарушения. В случае, если в  соответствии с нормативными правовыми актами обязанность должна быть выполнена  к определенному сроку, правонарушение является оконченным с момента истечения  этого срока.  

Поскольку ни Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  ни Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением  Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, не устанавливают особый  порядок исчисления сроков, суд полагает, что при их исчислении следует  руководствоваться общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (по  тексту - ГК РФ).  

Так, согласно статье 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени,  начинается на следующий день после календарной даты или наступления события,  которыми определено его начало; пунктом 1 статьи 192 ГК РФ определено, что срок,  исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.  В силу правил статьи 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий  день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  Частями 1.1-3.1 статьи 4.8 КоАП РФ установлены аналогичные правила исчисления  сроков.  

Между тем, согласно примечанию к статье 4.8, статье 4.5 КоАП РФ, с учетом  позиции Верховного суда Российской Федерации, выраженной в определении от  20.08.2020 № 306-ЭС20-10609 по делу № А12-37150/2019, срок давности привлечения к  административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, составляет один  год с момента совершения правонарушения.  

Ранее судом было установлено, что договор технологического присоединения от  01.12.2021 № 12-15-674/21 по заявке ФИО3 считается заключенным с даты  оплаты ФИО3 выставленного ООО «ТЭСК» 01.12.2022 счета № 915 – то есть  с 01.12.2022. С учетом подпункта «б» пункта 16 Правил № 861 срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению в данном случае не мог превышать 6  месяцев со дня оплаты ФИО3 счета, и истек 04.05.2022, поскольку  соответствующие месяц и число последнего года срока (01.05.2022) в соответствии с  производственным календарем за 2022 год являлся нерабочим днем (воскресенье –  Праздник Весны и Труда), следовательно, по общему правилу переносится на  ближайший следующий за ним рабочий день (среда 04.05.2022).  

Таким образом, датой совершения правонарушения по эпизоду гр. ФИО3 является 05.05.2022.  

При таких обстоятельствах, срок давности привлечения к административной  ответственности по эпизоду гр. ФИО3 действительно истек, однако такой  срок не истек по второму эпизоду (по заявке гр. ФИО4 по договору от  13.12.2021 № 12-25-698/21), что образует и событие, и состав административного  правонарушения, предусмотренной частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.  

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности судом не  установлено.  

Срок давности привлечения к административной ответственности,  предусмотренный статей 4.5 КоАП РФ, по эпизоду гр. ФИО4 по договору от  13.12.2021 № 12-25-698/21 на момент рассмотрения дела об административном  правонарушении и назначения административного наказания не истек.  

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном  правонарушении, предусмотренные статьей 24.5 КоАП РФ, судом не установлены.  

Довод общества о наличии оснований для прекращения производства по делу об  административном правонарушении в силу пункта 7 Постановления Правительства РФ  от 10.03.2022 № 336 отклоняется судом как необоснованный.  

Действительно, с 10.03.2022 названным Постановлением № 336 введено  ограничение на проведение в 2023 году плановых контрольных (надзорных)  мероприятий, плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля  (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых  

регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и  муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с учетом  исключений).  

Как следует из материалов дела, в ходе рассмотрения обращений ФИО3  и ФИО4 Управление на основании имеющегося обращений в соответствии с  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений  граждан Российской Федерации» 17.01.2023 известило общество о месте и времени  составления протокола об административном правонарушении, по ходатайствам  общества дата и время составления откладывались на более позднюю дату, 17.04.2023  был составлен протокол об административном правонарушении, 15.06.2023 было  рассмотрено дело об административном правонарушении, которое закончилось  вынесением оспариваемого постановления.  

Таким образом, в отношении общества велось производство по делу об  административном правонарушении, которое к государственному контролю (надзору),  муниципальному контролю не относится.  

Какие-либо мероприятия государственного и муниципального контроля в порядке,  предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля», в отношении ООО «ТЭСК» после 10.03.2022  Приморским УФАС в спорном случае не проводились.  

Одновременно суд отмечает, что частью 3.3 статьи 28.1 КоАП РФ прямо  предусмотрено, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных  статьей 9.21 настоящего Кодекса, могут быть возбуждены федеральным  антимонопольным органом, его территориальным органом без проведения контрольных  (надзорных) мероприятий в случае, если в материалах, сообщениях, заявлениях,  поступивших в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган,  содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного  правонарушения.  

Как следует из материалов дела и пояснений УФАС, в заявлениях ФИО3 и ФИО4 от 19.12.2022 и приложенных к ним документах, поступивших в  антимонопольный орган, содержались достаточные данные, указывающие на наличие в  действиях заявителя события административного правонарушения. Доказательства  того, что антимонопольный орган проводил дополнительные проверочные  мероприятия, в материалах дела отсутствуют. Пояснения заявителем были  представлены в порядке процедур, предусмотренных КоАП РФ, как объяснения лица, в  отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, что  свидетельствует о том, что общество воспользовалось всеми предоставленными ему  гарантиями прав.  

По изложенному суд не усматривает правовых оснований для прекращения  Управлением производства по делу об административном правонарушении   № 025/04/9.21-49/2023.  

С учетом установленных по делу обстоятельств арбитражный суд также приходит к  выводу о том, что освобождение заявителя от административной ответственности на  основании статьи 2.9 КоАП РФ не будет оправдывать установленной законом цели,  признаков малозначительности правонарушения при рассмотрении настоящего дела суд  не установил.  

В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом  естественной монополии установленного порядка подключения (технологического  присоединения) к электрическим сетям влечёт наложение административного штрафа  на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

В силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное  наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым  данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении  административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения  тайного постановления.  

Согласно статье 3.1 КоАП РФ административное наказание является  установленной государством мерой ответственности за совершение административного  правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых  правонарушений.  

В силу части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания  юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного  правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,  обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,  отягчающие административную ответственность.  

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером  совершенного административного правонарушения и его последствиями,  имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной  ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо,  рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты  на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях,  могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее  минимального размера административного штрафа, предусмотренного  соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае,  если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет  не менее ста тысяч рублей (часть 3.2).  

При этом согласно части 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении  административного наказания в соответствии с частью 3.2 данной статьи размер  административного штрафа не может составлять менее половины минимального  размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц  соответствующей статьей или частью статьи раздела II Кодекса.  

Оспариваемым постановлением антимонопольного органа обществу назначено  административное наказание в виде административного штрафа в размере 100000  рублей.  

В соответствии с частью 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ в случае, если санкцией статьи  (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской  Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение  административного наказания в виде административного штрафа лицу,  осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического  лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим  организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного  правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций -  получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего  предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том  числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения  административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего  предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера  (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной  

величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей  статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера  административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи  (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение  административного штрафа в фиксированном размере.  

Судом установлено, что ООО «ТЭСК» включено в Единый реестр субъектов  малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 по 10.07.2023 в категории  «Среднее предприятие», с 10.07.2023 в категории «Малое предприятие», то есть по  состоянию на дату совершения рассматриваемого правонарушения, следовательно, на  организацию распространяются правила, установленные частью 2 статьи 4.1.2 КоАП  РФ.  

Санкция части 1 статьи 9.21 КоАП РФ ограничений, предусмотренных частью 4  статьи 4.1.2 КоАП РФ, не имеет.  

Учитывая изложенное, а также вытекающий из Конституции Российской  Федерации принцип дифференцированности, соразмерности и справедливости  наказания, принимая во внимание в качестве смягчающего административную  ответственность обстоятельства совершение правонарушения впервые, при отсутствии  отягчающих административную ответственность обстоятельств суд считает  необходимым и достаточным применение к обществу наказания в виде  административного штрафа в размере половины минимального размера штрафа,  предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ для юридических лиц, - в размере  50000 рублей.  

При этом суд исходит из того, что наказание в виде штрафа в указанном размере с  учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, сможет обеспечить достижение  цели административного наказания.  

Оснований для применения в рассматриваемом случае части 1 статьи 4.1.1 и  частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ для замены административного наказания  предупреждением либо снижения санкций ниже низшего предела судом не установлено  в связи с несоблюдением всей совокупности необходимых для такого изменения меры  наказания условий (значительное нарушения срока технологического присоединения по  обеим заявкам, отсутствием доказательств технологического присоединяя по настоящее  время, причинен имущественный ущерб гражданам ввиду невозможности осуществлять  ведение садоводства или огородничества на земельных участках).  

Согласно части 2 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления  об оспаривании решения административного органа о привлечении к  административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое  решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют  основания для привлечения к административной ответственности или применения  конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или  должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о  признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части  либо об изменении решения.  

С учетом изложенного постановление антимонопольного органа от 15.06.2023   № 025/04/9.21-49/2023 по делу об административном правонарушении подлежит  изменению путем снижения назначенного обществу наказания в виде  административного штрафа до 50000 руб.  

Вопрос о распределении судебных расходов по данному делу судом не  рассматривается, поскольку в силу части 4 статьи 208 АПК РФ заявление об  оспаривании решения административного органа о привлечении к административной  ответственности государственной пошлиной не облагается.  

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

р е ш и л:

Изменить постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по  Приморскому краю № 025/04/9.21-49/2023 от 15.06.2023 о назначении наказания по делу  об административном правонарушении в части назначения обществу с ограниченной  ответственностью «Территориальная энергосетевая компания» административного  наказания, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях, и заменить административный штраф в размере  100000 (сто тысяч) рублей административным штрафом в размере 50000 (пятьдесят  тысяч) рублей; в удовлетворении остальной части требований отказать.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение десяти дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья А.А. Фокина