АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-323/2023

13 апреля 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 13 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.Г. Манаковой,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.С. Новиковой рассмотрел в судебном заседании дело  №А60-323/2023 по  иску 

общества с ограниченной ответственностью «УРЛИНИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, далее – общество «УРЛИНИ», истец)

к обществу с ограниченной ответственностью «Уралжилстройгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, далее – общество «Уралжилстройгаз», ответчик)

о взыскании 988 239 руб. 39 коп.

Лица, участвующие в деле явку в судебное заседание не обеспечили, извещены, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте проведения судебного заседания в карточке дела в Картотеке арбитражных дел.

Отводов суду не заявлено.

ООО "УРЛИНИ" обратилось с иском о взыскании с ООО "УРАЛЖИЛСТРОЙГАЗ" задолженности по  договору подряда № 10-08-2021 от 10.08.2021 в сумме 960668 руб. 18 коп., неустойки за период с 19.03.2022 по 30.12.2022 в сумме 27571 руб.20 коп. с продолжением начисления неустойки по день фактической оплаты долга.

До начала судебного заседания со стороны истца в материалы дела поступило ходатайство об уменьшении исковых требований, просит взыскать с ответчика задолженность по  договору подряда № 10-08-2021 от 10.08.2021 в сумме 902 195 руб. 67 коп., неустойки за период с 19.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 05.04.2022 в сумме          16 792 руб. 24 коп. Уменьшение исковых требований судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Со стороны истца, ответчика поступили ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие представителей.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

На основании договора подряда от 10.08.2021 № 10-08-21 истец выполнил работы на сумму 3 460 838 руб. 40 коп., а ответчик принял их результат, что подтверждается актами о приемки выполненных работ формы КС-2 от 17.01.2022 № 4, № 5, подписанных обеими сторонами без замечаний. 

Согласно п. 4.1 договора подряда от 10.08.2021 № 10-08-21 оплата выполненных работ производится на основании подписанного полномочными представителями сторон акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течении 35 календарных дней после подписания указанных в настоящем пункте документов.

Ответчиком произведена частичная оплата выполненных работ.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации).

  Приемка ответчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (ст. 711  Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.  

В соответствии с п. 4.4 договора подряда № 10-08-2021 генподрядчик при каждой оплате выполненных работ подрядчику производит гарантийное удержание в размере 5% от стоимости выполненных работ в счет гарантийной суммы по договору.

В соответствии с п. 4.6 договора подряда № 10-08-2021 сумма гарантийного удержания накапливается и перечисляется генподрядчиком подрядчику в следующем порядке:

- 2,5% по истечении 10 дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- 2,5 % по истечении 180 дней с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод дома в эксплуатацию было получено 07.06.2022.

Между тем,  доказательств оплаты выполненных работ  и гарантийного удержания в полном объеме  ответчик не представил.

Ответчиком представлен отзыв, в котором указывается на неисполнение истцом обязанности по оплате электроэнергии согласно акту потребления электроэнергии, в сумме 8473 руб. 21 коп. Также данная сумма указана в акте сверки взаимных расчетов, представленным ответчиком. Ответчик просит совершить взаимозачет данных сумм. Долг в сумме 902195 руб. 67  коп. не оспаривает. Также ответчик ссылается на неправомерность начисления процентов в период моратория.

Истцом при уменьшении исковых требований доводы ответчика учтены.

Таким образом, требование истца о взыскании задолженности по договору подряда от 10.08.2021 № 10-08-21 в сумме 902 195 руб. 67 коп. подлежит удовлетворению судом.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку, начисленную за период с 19.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 05.04.2022 в сумме 16 792 руб. 24 коп. с продолжением  ее начисления по день оплаты долга.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 10.4 договора от 10.08.2021 № 10-08-21 за нарушение генподрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 договора, более чем на 60 календарных дней подрядчик вправе потребовать от генподрядчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждые десять дней просрочки, начиная с 61 дня нарушения генподрядчиком срока оплаты до момента фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от суммы задолженности.

Расчет неустойки истца судом проверен, признан неверным, так как не учитывает, что пени в размере 0,01%  подлежат взысканию не за каждый день, а за каждые 10 дней (то есть 0,001% за каждый день), а также не учитывает, что пени подлежат начислению только с 61 дня нарушения срока платежа.

Поскольку акты выполненных работ, по которым взыскивается задолженность, подписаны 17.01.2022 года, то пени за просрочку платежа за период с 19.03.2022 по 31.03.2022 начислены истцом неправомерно (17.01.2022 + 35 дней на оплату + 60 дней), то есть  этот период входит в  льготный 60-дневный период, когда пени не начисляются.

По расчету истца гарантийное удержание составляло 4068794,05*5% =203439 руб. 70 коп. Учитывая положения п. 4.6. договора, половину (101719 руб. 85 коп.) ответчик должен был перечислить истцу 17.06.2022, и вторую половину – 05.12.2022, учитывая  получение разрешения  на ввод  объекта в эксплуатацию – 07.06.2022, а также положения ст. 193 ГК РФ.

Учитывая частичную оплату долга в сумме  50000 руб. 22.12.2022, а также возможность начисления пени на вторую половину гарантийного удержания только с 04.02.2023 (5 декабря  2022 + 60 дней – льготный период, когда пени не начисляются),  расчет   неустойки составляет (при этом судом при расчете используется размер 0,001%, что соответствует 0,01% за каждые 10 дней):

долг

с

по

дней

 

850 475,82

02.10.2022

22.12.2022

82

850 475,82 × 82 × 0.001%

697,39 р.

-50 000,00

22.12.2022

Оплата задолженности

800 475,82

23.12.2022

05.04.2023

104

800 475,82 × 104 × 0.001%

832,49 р.

101 719,85

04.02.2023

05.04.2023

61

101 719,85 × 61 × 0.001%

62,05 р.

Сумма основного долга: 902 195,67 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 1 591,93 руб.

 

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что ответчик доказательств оплаты задолженности не представил (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению судом частично в сумме 1 591 руб. 93 коп.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

При этом пени подлежат начислению  на сумму основного долга 902 195,67 руб., начиная с 06.04.2023   в размере 0,01% от суммы задолженности за каждые десять дней просрочки до момента фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от суммы задолженности.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 21 026 руб. 37 коп. подлежат возмещению за счет ответчика, в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Излишне уплаченная истцом государственная пошлина в размере 1385 руб. 00 коп., в соответствии со ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УРАЛЖИЛСТРОЙГАЗ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "УРЛИНИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  903787 (девятьсот три тысячи семьсот восемьдесят семь) руб. 60 коп., в том числе: долг в размере 902195 руб. 67 коп. и  неустойку за период с 02.10.2022 по 05.04.2022   в сумме 1591 руб. 93 коп., а так же  21026 руб. 37 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска. Продолжить начисление неустойки  на сумму   долга 902 195,67 руб., начиная с 06.04.2023   в размере 0,01% от суммы задолженности за каждые десять дней просрочки до момента фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от суммы задолженности.

В удовлетворении остальной части иска отказать

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью "УРЛИНИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1385 (одна тысяча триста восемьдесят пять) руб., излишне перечисленную по платежному поручению №  15 от  31.12.2022 , оригинал платежного поручения у истца.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

Судья                                                                                                             А.Г. Манакова