Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5841/2024

21 января 2025 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шапаловой А.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Администрации муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о понуждении устранить выявленные недостатки по муниципальным контрактам, взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств,  

в отсутствие сторон, 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный  

застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение  

тридцати дней с даты вступления решения в законную силу устранить выявленные  

недостатки: 

1) по муниципальному контракту от 19.12.2022 года Nº 0161300006322000523, а  

именно в квартире Nº 5, расположенной по адресу: ул.Хабаровская, д. 15 г. Долинск  

Сахалинская область: 

- произвести работы по герметичному закреплению обратного клапана  

водонагревателя в ванной; - заменить бачек унитаза; 

2) по муниципальному контракту от 20.12.2022 года Nº 0161300006322000614, а  

именно в квартире Nº 50, расположенной по адресу: ул.Хабаровская, д. 15б г. Долинск  

Сахалинская область: - заменить бачек унитаза; 

- заменить межкомнатные двери в количестве 5 штук; - заменить линолеум во всей квартире (S 49,05 м.кв.);  

- произвести работы по просушке и протравливанию поверхности антисептиками в  

местах образования плесени на стенах в квартире высотой 60 см от пола; 

- заменить стеклопакет на балконе, удалить со стеклопакетов следы от цемента,  

имеющиеся со стороны улицы; - установить заглушки на пороге балкона; - устранить причину протечки вентиляции на кухне. 

3) по муниципальному контракту от 30.10.2023 года Nº 0161300006323000773, а  

именно в квартире Nº 14, расположенной по адресу: ул.Хабаровская, д. 15а г. Долинск  

Сахалинская область: - произвести работы по регулировки притвора окон на балконе (2 рамы); 

- произвести работы по оштукатуриванию, заделыванию шпаклевкой  

образовавшейся трещины на стене в туалете общей площадью 15 см *2см и покраски; - устранить просвет под входной дверью; 

- произвести работы по оштукатуриванию, заделыванию шпаклевкой  

образовавшиеся трещины на потолке на балконе и последующей побелки; 

4) по муниципальному контракту от 30.10.2023 года Nº 0161300006323000768, а  

именно в отношении квартиры Nº 35, расположенной по адресу: ул. Хабаровская, д. 15а  

г.Долинск Сахалинская область: - заменить стеклопакет на балконе; - отрегулировать дверь на балконе; 

5) по муниципальному контракту от 22.05.2023 года Nº 0161300006323000194, а именно в отношении квартиры Nº 43, расположенной по адресу: ул. Хабаровская, д. 15а г. Долинск Сахалинской области:  

- произвести работы по снятию декоративного слоя с предварительной просушкой и протравливанием бетонной поверхности антисептиками общей площадью в местах намокания стен в туалете, покраска общей площадью примерно 15*15 см,  

- заменить ручку двери с встроенным замком в двери, ведущей в туалет; 

6) по муниципальному контракту от 22.05.2023 года Nº 0161300006323000186, а именно в отношении квартиры Nº 44, расположенной по адресу: ул. Хабаровская, д. 15а г.Долинск Сахалинская область:  

- заменить верхний замок входной двери; - закрепить крышку бочка унитаза; 

- произвести работы по оштукатуриванию, заделыванию шпаклевкой образовавшиеся трещины и над балконными окнами по всей площади и последующей побелки.  

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в размере 30 000 рублей.  

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 310 000 рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.В. Кучкина