АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-5349/2021

г. Чебоксары

28 января 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2022 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Гелиос-Строй", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428011, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Композитора ФИО1 д. 4, кв. 61

к обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428037, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Монтажный проезд д.6, литера Л

о взыскании 14330912 руб. 31 коп.,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Республики Бурятия "Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия", ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 670000, 

<

...>,

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 20.05.2021 (сроком на три года),

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.01.2022 №33 (сроком по 31.12.2022),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гелиос-Строй" обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ (т.4 л.д. 147), к обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой" о взыскании 14136487 руб. 20 коп. долга по оплате работ по строительству объекта "Детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района" в рамках договора субподряда №1052/ГС от 18.05.2020, 194425 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.05.2021 по 25.08.2021 и далее по день исполнения решения суда.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. Возражал против назначения по делу судебной экспертизы. Отказался от ходатайства о повторном истребовании от ИФНС России по г. Чебоксары книги покупок и продаж ООО "Спецстрой" за второй квартал 2021 года. Возражал против зачета неустойки по требованию ответчика.

Представитель ответчика исковые требования не признал по основаниям, приведенным в отзыве. Ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы поддержал. В отзыве от 03.08.2021 №251 (т. 4 л.д. 1) указал, что на 29.12.2020 субподрядчиком выполнено работ по строительству объекта на 96923577 руб. 49 коп., ООО "Спецстрой" произведена оплата на 104580849 руб. 08 коп. В связи с невыполнением субподрядчиком своих обязательств в установленный договором срок и риском ответчика попасть в список недобросовестных поставщиков услуг по государственному контракту от 06.05.2020 № 0102200001620001052, заключенным с ГКУ РБ "УКС ПРБ", ООО "Спецстрой" было принято решение завершить объект собственными силами. 12.05.2021 ООО "Спецстрой" в адрес ООО "Гелиос-Строй" направлено требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 654700 руб. 81 коп. Кроме того, в связи с тем, что ООО "Спецстрой" своими силами завершило объект, ООО "Гелиос-Строй" должно вернуть переплату (аванс) в размере 7657271 руб. 59 коп. (104580849 руб. 08 коп. (выплачено генподрядчиком) – 96923577 руб. 49 коп. (произведенные субподрядчиком работы на 29.12.2020).

Суд на основании статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении по делу судебной экспертизы в связи с необоснованностью.

Третье лицо ГКУ РБ "УКС ПРБ" представителя не направило. В письменных возражениях от 24.11.2021 подтвердило, что ООО "Гелиос-Строй" самостоятельно своими силами выполняло свои обязательства по договору субподряда вплоть до сдачи объекта заказчику. При этом ООО "Гелиос-Строй" непосредственно принимало участие при сдаче объекта заказчику. Работы по актам КС-2 №№64-68, КС-3 №14 от 18.02.2021 и актам КС-2 №№69-99, КС-3 №15 от 26.04.2021, которые ответчик отказывается подписывать и оплачивать истцу, выполнило ООО "Гелиос-строй". Единственной подрядной организацией ответчика было ООО "Гелиос-Строй". Оплату по государственному контракту, заключенному с ответчиком, ГКУ РБ "УКС ПРБ", как заказчик, произвело. Ответчик денежные средства по указанным работам получил в полном размере. Все документы, в том числе акты КС-2 и КС-2 от имени ответчика с заказчиком подписывал представитель по доверенности ФИО4, действующий на тот момент штатный сотрудник ООО "Гелиос-Строй". Кроме того, ответчик принял готовый объект от истца по акту приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 от 27.04.2021. В противном случае ответчик не мог бы передать готовый объект заказчику по акту по форме КС-11 от 28.04.2021.

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьего лица.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

18.05.2020 общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (генподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью "Гелиос-Строй" (субподрядчик) заключили договор субподряда №1052/ГС, согласно которому субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта "Детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района" (далее - "Объект"), а также иные Работы, определенные в договоре и Технической документации, и сдать результат Работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке, предусмотренном договором.

Заказчик объекта - Государственное казенное учреждение Республики Бурятия "Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия" (далее - ГКУ РБ "УКС ПРБ"), ОГРН 

<

***> (пункт 1.1 договора).

Место выполнения Работ: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй (пункт 1.2 договора).

В соответствии с пунктом 1.4 договора описание и основные характеристики Объекта, обязательные для субподрядчика требования к выполнению Работ и результату Работ установлены в Технической документации, под которой подразумевается комплект документов, определяющих объем и содержание Работ и предъявляемые к ним требования, включающий в том числе Техническое задание, Проектную документацию, Исходно-разрешительную документацию и Организационно-технологическую документацию.

Цена договора (цена Работ) составляет 118717336 руб. 28 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по налоговой ставке 20 % (пункт 5.1 договора).

Цена договора включает все расходы субподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, все затраты по содержанию Объекта, в том числе затраты на охрану и коммунальные услуги на период строительства Объекта, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения генподрядчиком всех своих обязательств по договору (пункт 5.2 договора).

Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что расчеты за выполненные работы между генподрядчиком и субподрядчиком производятся с применением к стоимости работ в актах о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2, понижающего коэффициента, определенного в сметном расчете (Приложение №6 к договору).

Пунктом 5.4 договора установлено, что генподрядчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) субподрядчику в размере 30% от цены договора не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора на основании выставленного субподрядчиком счета.

Из положений пункта 5.5 договора следует, что текущие платежи до 95% объемов работ от цены договора производятся генподрядчиком в следующем порядке:

- стоимость работ оплачивается генподрядчиком за фактически выполненные субподрядчиком объемы работ, за вычетом ранее выплаченного аванса. Оплата данных работ производится путем перечисления генподрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания документа, подтверждающего приемку генподрядчиком объема работ, выполненных субподрядчиком.

- оставшаяся стоимость 5 % объемов работ от цены договора оплачивается генподрядчиком за вычетом ранее выплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки объекта капитального строительства и выставления субподрядчиком итогового счета.

В пункте 6.1 договора стороны определили, что субподрядчик должен приступить к выполнению своих обязанностей по договору с даты заключения договора. Срок окончания выполнения работ: не позднее 30.11.2020.

В подтверждение выполнения работ на сумму 118717336 руб. 28 коп. истец представил в материалы дела:

1) акты формы КС-2 от 25.06.2020 №1, от 26.06.2020 №2, от 25.06.2020 №3, от 25.06.2020 №4, от 25.07.2020 №5, от 25.07.2020 №6, от 25.07.2020 №7, от 15.08.2020 №8, от 15.08.2020 №9, от 15.08.2020 №10, от 15.08.2020 №11, от 15.09.2020 №12, от 15.09.2020 №13, от 15.09.2020 №14, от 15.09.2020 №15, от 23.09.2020 №17, от 05.10.2020 №18, от 05.10.2020 №19, от 05.10.2020 №20, от 05.10.2020 №21, от 05.10.2020 №22, от 05.10.2020 №23, от 21.10.2020 №24, от 21.10.2020 №25, от 21.10.2020 №26, от 21.10.2020 №27, от 30.10.2020 №28, от 30.10.2020 №29, от 30.10.2020 №30, от 30.10.2020 №31, от 30.10.2020 №32, от 30.10.2020 №33, от 11.11.2020 №34, от 11.11.2020 №35, от 11.11.2020 №36, от 11.11.2020 №37, от 23.11.2020 №38, от 23.11.2020 №39, от 23.11.2020 №40, от 23.11.2020 №41, от 23.11.2020 №42, от 23.11.2020 №43, от 10.12.2020 №44, от 10.12.2020 №45, от 10.12.2020 №46, от 10.12.2020 №47, от 10.12.2020 №48, от 18.12.2020 №49, от 18.12.2020 №50, от 18.12.2020 №51, от 18.12.2020 №52, от 18.12.2020 №53, от 18.12.2020 №54, от 29.12.2020 №54, от 29.12.2020 №55,  от 29.12.2020 №56, от 29.12.2020 №57, от 29.12.2020 №59, от 29.12.2020 №60, от 19.12.2020 №61, от 18.02.2021 №62, от 18.02.2021 №63, от 18.02.2021 №64, от 18.02.2021 №65, от 18.02.2021 №66, от 18.02.2021 №67, от 18.02.2021 №68, от 26.04.2021 №69, от 26.04.2021 №70, от 26.04.2021 №71, от 26.04.2021 №72, от 26.04.2021 №73, от 26.04.2021 №74, от 26.04.2021 №75, от 26.04.2021 №76, от 26.04.2021 №77, от 26.04.2021 №78, от 26.04.2021 №79, от 26.04.2021 №80, от 26.04.2021 №81, от 26.04.2021 №82, от 26.04.2021 №83, от 26.04.2021 №84, от 26.04.2021 №85, от 26.04.2021 №86, от 26.04.2021 №87, от 26.04.2021 №88, от  26.04.2021 №89, от 26.04.2021 №90, от 26.04.2021 №91, от 26.04.2021 №92, от 26.04.2021 №93, от 26.04.2021 №94, от 26.04.2021 №95, от 26.04.2021 №96, от 26.04.2021 №97, от 26.04.2021 №98, от 26.04.2021 №99 (т.1 л.д. 28-239, т. 2 л.д. 1-108, л.д.122-163, л.д. 166-261, т.3 л.д. 1-56);

2) справки формы КС-3 

от 25.06.2020 №1 на сумму 6360985,08 руб., 

от 25.07.2020 №2 на сумму 13996274,04, 

от 15.08.2020 №3 на сумму 10399580,28 руб., 

от 15.09.2020 №4 на сумму 6920785,80, 

от 23.09.2020 №5 на сумму 4220039,52 руб., 

от 05.10.2020 №6 на сумму 3128600,16 руб., 

от 21.10.2020 №7 на сумму 5506749,36 руб., 

от 30.10.2020 №8 на сумму 5346435,24 руб., 

от 11.11.2020 №9 на сумму 5737188,96 руб., 

от 23.11.2020 №10 на сумму 8373384,72 руб., 

от 10.12.2020 №11 на сумму 4180421,88 руб., 

от 18.12.2020 №12 на сумму 4208625 руб., 

от 29.12.2020 №13 на сумму 18544507,45 руб., 

от 18.02.2021 №14 на сумму 4830572,16 руб., 

от 26.04.2021 №15 на сумму 16963186,63 руб. (т.2 л.д. 109-121, л.д. 164, т. 3 л.д. 57), 

3) акт приемки законченного строительством объекта от 27.04.2021 (т.3 л.д. 59).

Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 25.06.2020 №1, от 25.07.2020 №2, от 15.08.2020 №3, от 15.09.2020 №4, от 23.09.2020 №5, от 05.10.2020 №6, от 21.10.2020 №7, от 30.10.2020 №8, от 11.11.2020 №9, от 23.11.2020 №10, от 10.12.2020 №11, от 18.12.2020 №12, от 29.12.2020 №13 и акты о приемке выполненных работ формы КС-2 к ним подписаны ответчиком. 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 18.02.2021 №14, от 26.04.2021 №15 и акты о приемке выполненных работ формы КС-2 к ним ответчиком не подписаны, направлены истцом в адрес ответчика письмом от 20.04.2021 №исх 02/30.04.21 (т.4 л.д. 3-5). Согласно сведениям с сайта Почты России почтовое отправление №42802958020347 получено ответчиком 14.05.2021.

Оплата произведена ответчиком в сумме 104580849 руб. 08 коп. по платежным поручениям от 30.12.2020 №744, от 25.12.2020 №728, от 16.12.2020 №715, от 27.11.2020 №692, от 16.11.2020 №690, от 09.11.2020 №672, от 30.10.2020 №667, от 30.10.2020 №666, от 29.10.2020 №662, от 30.09.2020 №644, от 21.09.2020 №633, от 27.08.2020 №614, от 27.08.2020 №612, от 29.07.2020 №586, от 06.07.2020 №567, от 21.05.2020 №419 (т. 4 л.д. 6-21).

Согласно расчету истца (т. 3 л.д. 90) задолженность ответчика составляет 14136487 руб. 20 коп.

Ссылаясь на необоснованное уклонение ответчика от оплаты работ, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ, пунктом 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

При этом в силу части 2 статьи 65 АПК РФ обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на заказчика; при непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является надлежащим и достаточным доказательством фактического выполнения подрядчиком работ, перечисленных в акте.

Отказ ответчика от подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 18.02.2021 №14, от 26.04.2021 №15 и актов к ним в отзыве от 03.08.2021 №251 (т. 4 л.д. 1) мотивирован тем, что ответчик выполнил работы собственными силами. 

В подтверждение выполнения работ истец представил:

- договор субподряда от 20.08.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с индивидуальным предпринимателем ФИО5, с приложением №1 от 13.10.2020 к договору, дополнительное соглашение №1 от 13.10.2020 к договору, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от 15.12.2020 №10, от 28.12.2020 №11, от 01.02.2021 №12, от 25.02.2021 №13, от 02.03.2021 №14, от 17.03.2021 №15, акт сверки взаимных расчетов (т. 5 л.д. 3-33);

- договор субподряда от 13.08.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с индивидуальным предпринимателем ФИО6, с приложением №1 от 13.08.2020 к договору и приложением №2, акты формы КС-2 от 25.02.2021 №5, от 26.03.2021 №6, от 05.04.2021 №7, справки формы КС-3 от 25.02.2021 №5, от 26.03.2021 №6, от 05.04.2021 №7 (т. 5 л.д. 34-56);

- договор субподряда от 14.08.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с ООО "Самат", с приложениями №1 и №2, дополнительное соглашение №1 от 01.09.2020, дополнительное соглашение №2, акты формы КС-2 от 20.02.2021 №1, от 21.12.2020 №8, справки формы КС-3 от 20.02.2021 №1, от 21.12.2020 №8, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 22.03.2021 (т. 5 л.д. 57-77);

- договор субподряда от 12.08.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с ООО "Конвент", с приложениями №1 и №2, акт формы КС-2 от 26.03.2021 №1 (т. 5 л.д. 78-103);

- договор субподряда на озеленение прилегающей территории от 26.10.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с ООО "Партнер Азия-1", с приложением №1, акты формы КС-2 от 23.04.2021 №1, от 29.06.2021 №2, справки формы КС-3 от 23.04.2021 №1, от 29.06.2021 №2, гарантийное письмо от 23.04.2021, справка по озеленению от 23.04.2021 (т. 5 л.д. 104-117);

- договор №2020/М-08/14 на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования от 06.08.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с ООО "Сиблифтсервис", с приложениями №1 и №2, счета на оплату от 08.09.2020 №634, от 08.09.2020 №47 (т. 5 л.д. 118-123);

- договор поставки №2020/П-07/16 от 29.07.2020, заключенный ООО "Гелиос-Строй" с ООО "Сиблифтсервис", с приложениями №1 и №2, счета на оплату от 29.07.2020 №39, универсальные передаточные документы от 17.03.2021 №5, от 27.11.2020 №65, акт приема-передачи оборудования от 20.10.2020 (т. 5 л.д. 124-133).

Третье лицо - государственное казенное учреждение Республики Бурятия "Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия" (ГКУ РБ "УКС ПРБ") в письменных пояснениях от 24.11.2021 (т. 5 л.д. 160) указало, что ООО "Гелиос-Строй" самостоятельно своими силами выполняло обязательства по договору субподряда вплоть до сдачи объекта заказчику. Объект сдан ответчиком заказчику по акту формы КС-11 от 28.04.2021.

Согласно подписанным обеими сторонами актам освидетельствования скрытых работ от 12.01.2021 №064/АС, от 15.01.2021 №066/АС, от 15.01.2021 №067/АС, от 15.01.2021 №070/АС, от 13.01.2021 №072/АС, от 01.02.2021 №075/АС, от 20.01.2021 №076/АС, от 08.01.2021 №006/ВК, от 07.01.2021 №011/ВК, от 09.01.2021№012/ВК, от 10.01.2021 №013/КВ, от 21.01.2021 №1/ПС, от 23.01.2021 №2/ПС, от 26.01.2021 №1/СС, от 30.01.2021 №3/СС, от 02.02.2021 №4/СС, от 05.02.2021 №5/СС, от 09.02.2021 №6/СС, от 18.01.2021 №016/ОВ, от 18.01.2021 №017/ОВ, от 21.01.2021 №018/ОВ, от 22.01.2021 №019/ОВ, от 22.01.2021 №020/ОВ, акту о технической готовности электромонтажных работ от 10.02.2021 №1, актам индивидуального испытания оборудования от 10.01.2021 №1/Э, от 11.01.2021 №2/Э, от 12.01.2021 №3/Э (тома 2, 3, 7, 9, 12, 20 Исполнительной документации по объекту "Детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района") работы на объекте в 2021 году выполнялись ООО "Гелиос-Строй". 

Ответчик надлежащие доказательства выполнения работ собственными силами суду не представил.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта выполнения работ, их объема и стоимости.

Доказательства оплаты долга в сумме 14136487 руб. 20 коп. ответчик суду не представил.

Таким образом, требование истца о взыскании долга в сумме 14136487 руб. 20 коп. является правомерным.

Письмом от 15.06.2021 №199 (т. 4 л.д. 166) ООО "Спецстрой" уведомило ООО "Гелиос-Строй" о зачете неустойки, предъявленной заказчиком в связи с нарушением сроков сдачи объекта "Детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района", в счет оплаты долга в сумме 14136487 руб. 20 коп. в порядке статьи 410 ГК РФ. 

Письмом от 02.08.2021 №01/02.08.21 (т. 4 л.д. 163) ООО "Гелиос-Строй" отказало ответчику в проведении зачета.

Согласно пункту 15.2 договора субподряда №1052/ГС от 18.05.2020 генподрядчик вправе потребовать от субподрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней), выставленных заказчиком в адрес генподрядчика по выполняемым субподрядчиком работам по договору. Сроки, размер и порядок уплаты таких неустоек (штрафов, пеней) определяются на основании требований заказчика к генподрядчику.

Письмом от 30.04.2021 №1179 (т. 4 л.д. 160-161) ГКУ РБ "УКС ПРБ" выставлено требование к ООО "Спецстрой" об оплате неустойки в связи с нарушением сроков сдачи объекта в сумме 654700,81 руб. за период с 01.12.2020 по 26.04.2021.

Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Поскольку стороны согласовали право генподрядчика требовать уплаты неустоек на основании выставленных заказчиком требований, и такое требование заказчиком выставлено, ответчик вправе заявить о проведении зачета.

Проверив расчет неустойки, суд с учетом пропорционального уменьшения объема исполненных обязательств применительно к договору субподряда №1052/ГС от 18.05.2020 признает требование истца о взыскании долга в сумме 14`136`487 руб. 20 коп. прекращенным зачетом частично в сумме 589`230 руб. 73 коп.:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

-6 360 985,08

25.06.2020

Оплата задолженности на 6 360 985,08 руб.

-20 357 259,12

25.07.2020

Оплата задолженности на 13 996 274,04 руб.

-30 756 839,40

15.08.2020

Оплата задолженности на 10 399 580,28 руб.

-37 677 625,20

15.09.2020

Оплата задолженности на 6 920 785,80 руб.

-41 897 664,72

23.09.2020

Оплата задолженности на 4 220 039,52 руб.

-45 026 264,88

05.10.2020

Оплата задолженности на 3 128 600,16 руб.

-50 533 014,24

21.10.2020

Оплата задолженности на 5 506 749,36 руб.

-55 879 449,48

30.10.2020

Оплата задолженности на 5 346 435,24 руб.

-61 616 638,44

11.11.2020

Оплата задолженности на 5 737 188,96 руб.

-69 990 023,16

23.11.2020

Оплата задолженности на 8 373 384,72 руб.

48 727 312,84

01.12.2020

Новая задолженность на 118 717 336,00 руб.

48 727 312,84

01.12.2020

10.12.2020

10

5

48 727 312,84 × 10 × 1/300 × 5%

81 212,19 р.

44 546 890,96

10.12.2020

Оплата задолженности на 4 180 421,88 руб.

44 546 890,96

11.12.2020

18.12.2020

8

5

44 546 890,96 × 8 × 1/300 × 5%

59 395,85 р.

40 338 265,96

18.12.2020

Оплата задолженности на 4 208 625,00 руб.

40 338 265,96

19.12.2020

29.12.2020

11

5

40 338 265,96 × 11 × 1/300 × 5%

73 953,49 р.

21 793 758,51

29.12.2020

Оплата задолженности на 18 544 507,45 руб.

21 793 758,51

30.12.2020

18.02.2021

51

5

21 793 758,51 × 51 × 1/300 × 5%

185 246,95 р.

16 963 186,35

18.02.2021

Оплата задолженности на 4 830 572,16 руб.

16 963 186,35

19.02.2021

26.04.2021

67

5

16 963 186,35 × 67 × 1/300 × 5%

189 422,25 р.

-0,28

26.04.2021

Оплата задолженности на 16 963 186,63 руб.

Сумма неустойки: 589 230,73 руб.

Таким образом, требование о взыскании долга подлежит удовлетворению частично в сумме 13`547`256 руб. 47 коп.

Истец также просит взыскать с ответчика 194425 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.05.2021 по 25.08.2021 и далее по день исполнения решения суда.

Статьей 395 ГК РФ предусматривается, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Поскольку факт несвоевременного исполнения ответчиком обязательства по оплате работ судом установлен, требование истца о взыскании начисленных в связи с этим процентов за пользование чужими денежными средствами суд признает правомерным и подлежащим удовлетворению.

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, суд удовлетворяет требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 593`110 руб. 02 коп. за период с 01.06.2021 по 21.01.2022 (день вынесения решения).

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

 

с

по

дней

 

13 547 256,47 р.

01.06.2021

14.06.2021

14

5,00

13 547 256,47 × 14 × 5% / 365

25 981,04 р.

13 547 256,47 р.

15.06.2021

25.07.2021

41

5,50

13 547 256,47 × 41 × 5.5% / 365

83 696,06 р.

13 547 256,47 р.

26.07.2021

12.09.2021

49

6,50

13 547 256,47 × 49 × 6.5% / 365

118 213,73 р.

13 547 256,47 р.

13.09.2021

24.10.2021

42

6,75

13 547 256,47 × 42 × 6.75% / 365

105 223,21 р.

13 547 256,47 р.

25.10.2021

19.12.2021

56

7,50

13 547 256,47 × 56 × 7.5% / 365

155 886,24 р.

13 547 256,47 р.

20.12.2021

21.01.2022

33

8,50

13 547 256,47 × 33 × 8.5% / 365

104 109,74 р.

Сумма основного долга: 13 547 256,47 р.

Сумма процентов: 593 110,02 р.

Требование о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты долга соответствует статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и также подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета по правилам статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гелиос-Строй" 13`547`256 (Тринадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 47 копеек долга, 593`110 (Пятьсот девяносто три тысячи сто десять) рублей 02 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2021 по 21.01.2022, 93`396 (Девяносто три тысячи триста девяносто шесть) рублей расходов по государственной пошлине; с 22.01.2022 начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить по день фактической уплаты долга исходы из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

В остальной части в иске отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Гелиос-Строй" из федерального бюджета 11`860 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №822 от 26.08.2021.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова