71/2020-1677(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-17153/2019

город Вологда

13 января 2020 года

 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л:

внести в муниципальный контракт от 12.02.2019 «Выполнение работ по  объекту «Капитальный ремонт ул. Набережная с благоустройством площади  Ленина в г. Великий Устюг», заключенный между обществом с ограниченной  ответственностью «Интелстрой» и муниципальным казенным учреждением  «Горстройзаказчик», следующие изменения:  

пункт 3.1 Контракта изложить в следующей редакции:  

«3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта и до 23  декабря 2019г».  

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

 Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Ю.В. Гуляева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.03.2019 5:14:31

Код для идентификации: 

Кому выдана Гуляева Юлия Валентиновна