ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-41977/21-118-301

г. Москва

21 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2021 года

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи  А.Г. Антиповой

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом в судебном заседании дело по иску Министерства обороны Российской Федерации

к АО ЦНПО «КАСКАД»

о взыскании неустойки по государственному контракту от 30.09.2016 №1619187310981442210022405 в размере 33 000 605,83 руб.,

при участии:

от  истца: ФИО2 по дов. № 207/4/316д от 25.11.2020 г. (диплом),

от ответчика: не явился,

УСТАНОВИЛ:

Министерства обороны Российской Федерации обратилось с иском о взыскании с АО ЦНПО «КАСКАД» неустойки по государственному контракту от 30.09.2016 №1619187310981442210022405 в размере 33 000 605,83 руб.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, суд установил, что предъявленный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (заказчик) и АО ЦНПО «КАСКАД» (исполнитель) заключен государственный контракт от 30 сентября 2016 г. №1619187310981442210022405 на выполнение работ «Сервисное обслуживание (технический и авторский надзор, продление сроков эксплуатации) технологического оборудования и технических систем Ракетных войск стратегического назначения» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016-2019 годах.

Согласно пункту 2.1 Контракта исполнитель обязуется в пределах цены Контракта, в установленный Контрактом срок выполнить работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом.

Цена Контракта составляет 2 490 313 099,79 руб.

Срок выполнения работ в 2019 году - с 26 ноября 2018 г. по 25 ноября 2019 г., что составляет 365 дней.

Пунктом 9.16 Контракта предусмотрено, что датой выполнения работ является дата подписания получателем акта сдачи-приемки выполненных работ.

Положениями ст. 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По состоянию на 26.11.2018 г. исполнителем выполнены работы на общую сумму 1 808 357 683,56 руб., что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ №№ 1/16, 2-25, 27.

Работы, предусмотренные к выполнению в 2019 году, выполнены исполнителем с нарушение срока на 193 дня, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными получателями в период с 26 ноября 2019 г. по 04 июня 2020 г.

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 12.2 Контракта, в случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей: (цена Контракта - стоимость фактически выполненных работ) х размер ставки рефинансирования1 (ключевой ставки), установленной ЦБ РФ, определяемый с учетом коэффициента х количество дней просрочки.

При этом, расчет коэффициента (К) складывается из следующих показателей:

К = количество дней просрочки/срок исполнения обязательства по Контракту х 100%, что составляет:

При К, равном 0-50 (50-100 и 100 и более) процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 (0,02, 0,03) ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

Из представленного истцом расчета следует, что размер начисленной неустойки составляет 33 000 605,83 руб.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия с требованием оплаты неустойки, оставлена без исполнения.

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

В установленном порядке ответчиком отзыв по существу заявленных требований не представлен.

Таким образом, предъявленный иск ответчиком в установленном порядке не оспорен, процессуальная обязанность по представлению отзыва ответчиком не исполнена.

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах, учитывая, что требования истца обоснованы, документально подтверждены, исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании ст.ст. 309, 310, 330, 779, 781 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 110, 111, 123, 156, 167-171 АПК РФ арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО ЦНПО «КАСКАД» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 33 000 605 руб. 83 коп.

Взыскать с АО ЦНПО «КАСКАД» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 188 003 руб.

Решение может быть обжаловано в сроки и порядке, предусмотренные ст. 181, 257, 259, 273, 276 АПК РФ.

Судья                                                                                     А.Г. Антипова