7/2021-93972(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

15 июля 2021 года Дело № А28-16373/2020  

Арбитражный суд Кировской области в составе: судья Вычугжанин Р.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истца – Администрация Подосиновского района Кировской области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику – общество с ограниченной ответственностью  ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ по муниципальному контракту   № 0340300002018000023-0169189-04 от 22.08.2018,  

c участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью "ПКФ  "ПРОЕКТИРОВЩИК" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью  ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки  (дефекты), допущенные при строительстве квартир (многоквартирного дома) по  адресу: 

<

...>, а именно:  

 1) в срок не позднее 01.08.2021 устранить следующие недостатки (дефекты):  

1.1) выполнить воздуховоды системы естественной вентиляции из  оцинкованной стали с утеплителем, выходящие на чердак и кровлю, из негорючих  материалов, имеющих степень огнестойкости ЕI30 с установкой дефлекторов  ЦАГИ на оголовках, согласно проектной документации;  

1.2) смонтировать организованный водосток над крыльцами входов в  квартиры согласно проектной документации;  

1.3) выполнить дополнительный слой теплоизоляции толщиной 100 мм и  шириной 1 м по периметру перекрытия вдоль наружных стен здания из  

минераловатных плит плотностью не менее 40 кг/куб.м по «ГОСТ 9573-2012.  Межгосударственный стандарт. Плиты из минеральной ваты на синтетическом  связующем теплоизоляционные. Технические условия», согласно проектной  документации;  

1.4) выполнить заземление и молниезащиту в соответствии с проектом;  

 2) в срок не позднее 15.09.2021 устранить следующие недостатки (дефекты):  

2.1) выполнить перекладку печи дровяного отопления квартиры № 1 с целью  исключения пустых швов в кладке, устранить пустые швы в кладке печи дровяного  отопления квартиры № 3 согласно обязательным строительным (техническим)  правилам и нормам;  

2.2) выполнить ряды снегозадержания на каждом скате крыши дома в  соответствии с проектной документацией, а также обязательными строительными  (техническими) правилами и нормами;  

2.3) обработать огнезащитным составом деревянную конструкцию крыши  согласно обязательным строительным (техническим) правилам и нормам;  

2.4) привести в соответствие обязательными строительными (техническими)  правилами и нормами отмостку по периметру дома и крыльцо квартиры № 1;  

 2.5) обеспечить герметичность каждого канализационного выгреба (колодца)  на территории дома.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000  (шесть тысяч) рублей 00 копеек государственной пошлины по делу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный  апелляционный суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через  Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Р.А. Вычугжанин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.08.2020 7:09:56Кому выдана Вычугжанин Роман Александрович