АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-13134/2023

г. Ярославль

19 августа 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена  05 августа 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Столеровой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью "Ремэнергострой" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

об устранении недостатков работ выполненных по договору подряда

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

при участии

от истца - ФИО1 по доверенности от 20.03.2024, диплом

от ответчика - не явились

от третьего лица - ФИО1 по доверенности от 08.09.2023, диплом 

 

установил:

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой" об устранении недостатков работ, выявленные на площади Свободы, выполненных по муниципальному контракту № 0171200001921000698 от 31.05.2021:

1)  дефект покрытия в виде выбоин на покрытие проезжей части в районе дома № 8на пл. Свободы /ул. Любимская г. Пошехонье, превышающие предельно допустимые размеры (нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017):

-  длина - 25 см, ширина - 27 см, глубина - 6,5 см, площадью = 0,067 кв.м;

-  длина 25 см, ширина - 15 см, глубина - 6 см, площадью = 0,037 кв.м.                                   

2)  множественные повреждения дорожного покрытия на пл. Свободы г. Пошехонье в виде выбоин, просадок, поперечных и продольных трещин, для восстановления ровности покрытия проезжей части (нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017);                                                                                     

3)    нанести на проезжей части пл. Свободы г. Пошехонье отсутствующую дорожную разметку 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.6, согласно локального сметного расчета (сметы) № 07-01-02, п.п. 1-16 Разметка проезжей части производится термопластиком - термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками;            

4)    в районе дома № 8 на пл. Свободы/ул. Любимская, г. Пошехонье отклонение по крышки люка относительно поверхности проезжей части, всего на 5 см (п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017);

5)    выявленные на пл. Свободы г. Пошехонье разрушение и провал плиточного покрытия, лужестоя (фото 4) покраски металлических конструкций сцены в связи с образованием ржавчиной (фото 5), очитки от битума бордюрного камня, устранения разрушений плитки у лестницы сцены и бордюрного камня (фото 6), закрытия электрических проводов на опорах освещения (фото 7);

6)  установить дорожные знаки согласно локального сметного расчета (сметы) № 07-01-02, п.п. 17-46, Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой:

-   дорожные знаки, п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на щитах со светоотражающейфлуоресцентной пленки желто-зеленого цвета;

- дорожные знаки п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» с обратной стороной дорожных знаков «Пешеходный переход»;

-  установить расстояние между дорожными знаками п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» в соответствии с нормативными требованиями;

-  установить расстояние от нижнего края дорожных знаков до поверхности дорожного покрытия (высота установки знаков) в соответствии с нормативными требованиями;

-  на парковочных местах установить дорожные знаки 6.4 «Парковка», с одной из табличек 8.6.1-8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» и 8.17 «Инвалиды»;

-  нанести дорожную горизонтальную разметку в соответствии с нормативными требованиями и с разработанной схемой организации дорожного движения на пл. Свободы, г. Пошехонье;

-  заменить знаки малого типоразмера (в соответствии с требованиями Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 марта 2022 г. N 101-ст);                           

-  заменить стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением в количестве 11 (одиннадцати) штук, которые имеют повреждения в виде трещин на сварочных швах (в том числе которые переломились на сварочных швах и демонтированы); 

-  устранить нарушения окрасочного слоя у металлических стоек в количестве 45 штук;    

7)  восстановить работу 15 камер видеонаблюдения, установленных на кронштейне согласно локального сметного расчета (сметы) № 05-01-01 п.п. 1-53 (из установленных в количестве 18 ед., работают только 3 камеры (на амфитеатр, сцену, и аллею Героев);     

8)  произвести подсыпку грунта и посев газона обыкновенного на площади Свободы в зоне парка Пионера на 1 000 кв. метров, осуществить посадку кустарника - дерен сибирский белый в количестве 317 штук;

9) нарушения обшивки амфитеатра и сцены в виде изворачивания досок, щелей.

Определением суда от 29.05.2024 произведена замена истца - Администрации городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области на ее правопреемника  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство». Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Ответчик в судебное заседание не явился, письменный отзыв не представил.

Заслушав представителя истца и третьего лица, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между Муниципальным учреждением Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области (далее - МУ Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского МР) и ООО «Ремэнергострой» заключен муниципальный контракт (далее - Контракт) N 0171200001921000698 от 31.05.2021 на выполнение работ по благоустройству исторической части города Пошехонье - площади Свободы «Город пяти рек и семи мостов» (далее – работы, объект, строительная (ремонтная) площадка).

В соответствии с 1.3.  Контракта Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды, объем, и другие условия определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), которое является его неотъемлемой частью.

Пунктом 3.1. Контракта определен срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 01 октября 2021 года.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ  № 1 – 34 работы выполнены, акты подписаны сторонами.

В соответствии с пунктами 12.1-12.3 Контракта Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим характеристикам, установленным требованиям, качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, а также действующими нормативными документами и техническими условиями. 

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками. 

Осмотр гарантийного объекта проводится 2 раза в год: май, октябрь. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком, в установленном порядке сроки. 12.2. 

Гарантийный срок, в период которого Подрядчик обязуется устранить за свой счёт все выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки в выполненных работах, устанавливается на: - земляное полотно – 5 лет. - основание дорожной одежды – 5 лет, - покрытие из тротуарной плитки – 5 лет, - сооружения (сцена, амфитеатр, туалет) – 5 лет, - светильники наружного освещения – 5 лет, - нижний слой асфальтобетонного покрытия – 6 лет, - верхний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет, - дорожные знаки – 2 года, - малые архитектурные формы – 2 года.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта на объект (Приложение №6 к Контракту), который передается Заказчику вместе с технической исполнительной документацией. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты по принятым Заказчиком работам Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего 16 дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

В период гарантийного срока при осмотре выявлены недостатки, а именно:          

1) В районе дома №8 на пл.Свободы /ул. Любимская г. Пошехонье, покрытие проезжей части имеет дефект покрытия в виде выбоин, превышающие предельно допустимые размеры длинной 15 см и более, глубиной см и более (нарушение п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017):

-   длина — 25 см, ширина27 см, глубина 6,5 см, площадью = 0,067 кв.м;

-   длина 25 см, ширина 15 см, глубина 6 см, площадью = 0,037 кв.м.

2)   Имеются множественные повреждения дорожного покрытия в виде выбоин, просадок,поперечных и продольных трещин, не превышающих предельно-допустимые размеры, тем самымотсутствует ровность покрытия проезжей части (нарушение п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017).    i

3)  На проезжей части пл.Свободы г.Пошехонье отсутствует дорожная разметка 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.6, а так же имеется износ более 50% горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (нарушение п.4.1.з'Г0СТ Р 52766-2007 и п.6.3 ГОСТ Р 50597-2017). Согласно, ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО ФИО2 (сметы) № 07-01-02, пп. 1-16 Разметка проезжей части производится термопластиком - термопластик НП-|1-170 со стекло микрошариками.

4)  В районе дома №8 на пл.Свободы/ул. Любимская, г.Пошехонье имеется отклонение покрышки люка относительно поверхности проезжей части, всего на 5 см (п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017).

5)  В ходе осуществления рабочей группы по осуществлению Губернаторского контроля 26.05.2023 года, выявлено: 

-  разрушение и провал плиточного покрытия, лужестоя (фото 4) покраски металлических конструкций сцены в связи с образованием ржавчиной (фото 5), очитки от битума бордюрного камня, устранения разрушений плитки у лестницы сцены и бордюрного камня (фото 6), закрытия электрических проводов на опорах освещения (фото 7).

6) Нарушения в установке дорожных знаков (предписание ОГИБДЦ №174, прилагается, с указанием пунктов ГОСТ) и согласно, ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (сметы) № 07-01-02, пп. 17-46, Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой:

-    дорожные знаки, п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» установлены на щитах без светоотражающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета;                                                                          1

-    отсутствуют дорожные знаки п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на обратной стороне дорожных знаков «Пешеходный переход»;                                                                                                     i

- расстояние между дорожными знаками п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» не соответствует нормативным требованиям (ширина пешеходного перехода более 6 м);

-  расстояние от нижнего края дорожных знаков до поверхности дорожного покрытия (высота установки знаков) не соответствует нормативным требованием;                                                                I

-  парковочные места не обозначены дорожными знаками 6.4 «Парковка», с одной из табличек 8.6.1-8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» и 8.17 «Инвалиды»;

-  дорожная горизонтальная разметка нанесена с нарушением нормативных требований и не соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения на пл.Свободы, г. Пошехонье. 

           По итогам данного осмотра в адрес Подрядчика направлена претензия.

  Неисполнение требований заказчика об устранении недостатков послужило поводом для обращения в суд с настоящим иском.

  Неисполнение требований Заказчика об устранении недостатков послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

В силу ч.1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

В соответствии с положениями ч.2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Из материалов дела следует, что в период гарантийного срока истцом выявлен ряд недостатков.

Факт наличия недостатков подтверждается доказательствами, представленными в материалы дела.

Учитывая изложенное, при доказанности факта наличия недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, отсутствия доказательств их устранения, суд считает требования истца об устранении недостатков обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате госпошлины судом распределены в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ремэнергострой" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в рамках гарантийных обязательств течение одного месяца после вступления решения в законную силу устранить за свой счет и своими силами выявленные дефекты на площади Свободы г. Пошехонье, образовавшиеся в период гарантийного срока по муниципальному контракту № 0171200001921000698 от 31 мая 2021 г., а именно устранить следующие недостатки (дефекты):

1)  дефект покрытия в виде выбоин на покрытие проезжей части в районе дома № 8на пл. Свободы /ул. Любимская г. Пошехонье, превышающие предельно допустимые размеры (нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017):

-  длина - 25 см, ширина - 27 см, глубина - 6,5 см, площадью = 0,067 кв.м;

-  длина 25 см, ширина - 15 см, глубина - 6 см, площадью = 0,037 кв.м.                                   

2)  множественные повреждения дорожного покрытия на пл. Свободы г. Пошехонье в виде выбоин, просадок, поперечных и продольных трещин, для восстановления ровности покрытия проезжей части (нарушение п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017);                                                                                     

6)    нанести на проезжей части пл. Свободы г. Пошехонье отсутствующую дорожную разметку 1.1, 1.1.2, 1.5, 1.6, согласно локального сметного расчета (сметы) № 07-01-02, п.п. 1-16 Разметка проезжей части производится термопластиком - термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками;            

7)    в районе дома № 8 на пл. Свободы/ул. Любимская, г. Пошехонье отклонение по крышки люка относительно поверхности проезжей части, всего на 5 см (п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017);

8)    выявленные на пл. Свободы г. Пошехонье разрушение и провал плиточного покрытия, лужестоя (фото 4) покраски металлических конструкций сцены в связи с образованием ржавчиной (фото 5), очитки от битума бордюрного камня, устранения разрушений плитки у лестницы сцены и бордюрного камня (фото 6), закрытия электрических проводов на опорах освещения (фото 7);

6)  установить дорожные знаки согласно локального сметного расчета (сметы) № 07-01-02, п.п. 17-46, Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой:

-   дорожные знаки, п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на щитах со светоотражающейфлуоресцентной пленки желто-зеленого цвета;

- дорожные знаки п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» с обратной стороной дорожных знаков «Пешеходный переход»;

-  установить расстояние между дорожными знаками п.5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» в соответствии с нормативными требованиями;

-  установить расстояние от нижнего края дорожных знаков до поверхности дорожного покрытия (высота установки знаков) в соответствии с нормативными требованиями;

-  на парковочных местах установить дорожные знаки 6.4 «Парковка», с одной из табличек 8.6.1-8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» и 8.17 «Инвалиды»;

-  нанести дорожную горизонтальную разметку в соответствии с нормативными требованиями и с разработанной схемой организации дорожного движения на пл. Свободы, г. Пошехонье;

-  заменить знаки малого типоразмера (в соответствии с требованиями Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 марта 2022 г. N 101-ст);                           

-  заменить стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением в количестве 11 (одиннадцати) штук, которые имеют повреждения в виде трещин на сварочных швах (в том числе которые переломились на сварочных швах и демонтированы); 

-  устранить нарушения окрасочного слоя у металлических стоек в количестве 45 штук;    

9)  восстановить работу 15 камер видеонаблюдения, установленных на кронштейне согласно локального сметного расчета (сметы) № 05-01-01 п.п. 1-53 (из установленных в количестве 18 ед., работают только 3 камеры (на амфитеатр, сцену, и аллею Героев);     

10)произвести подсыпку грунта и посев газона обыкновенного на площади Свободы в зоне парка Пионера на 1 000 кв. метров, осуществить посадку кустарника - дерен сибирский белый в количестве 317 штук;

9) нарушения обшивки амфитеатра и сцены в виде изворачивания досок, щелей.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет», - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Л.А. Шадринова