ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-307376/18-5-1844

10 января 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена 02 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 10 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем ФИО1, после перерыва помощником ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску: Акционерного общества «Управление по строительству № 111» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 19.08.2002, адрес: 142770, г. Москва, г.п. Сосенское, 

<

...>)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «МВ Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:  11.11.2013, адрес: 119501, 

<

...>, эт. 2, IV, к.2)

третье лицо: ФИО3

о взыскании 19 725 996 руб. 86 коп.

по встречному иску: Общества с ограниченной ответственностью «МВ Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации:  11.11.2013, адрес: 119501, 

<

...>, эт. 2, IV, к.2) 

к ответчику Акционерное общество «Управление по строительству № 111» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 19.08.2002, адрес: 142770, г. Москва, г.п. Сосенское, 

<

...>)

о взыскании 3 068 303,54 руб.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО4 дов. № 65/2 от 08.07.2019;

от ответчика: ФИО5 по дов. № 15072019 от 15.07.2019, после перерыва ФИО5 по дов. № 15072019 от 15.07.2019, ФИО6 паспорт, выписка

от третьего лица: не явился, извещен.

В судебном заседании 26.09.2019г. судом в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 02.10.2019г. до 12 час. 00 мин.

УСТАНОВИЛ:

АО «Управление по строительству № 111» (АО «СУ-111») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «МВ Строй» о взыскании неосновательного обогащения в размере 18 725 996 руб. 86 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г. в размере 3 523 607 руб. 40 коп., с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Иск заявлен со ссылкой на ст. ст. 309, 310, 329, 395, 407, 421, 431, 1102 ГК РФ и мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору в части сроков выполнения работ.  

Определением суда от 04.03.2019г. к рассмотрению совместно с первоначальным, судом, в порядке ст. 132 АПК РФ, принято встречное исковое заявление ООО «МВ Строй» к АО «Управление по строительству № 111» о взыскании задолженности по договору подряда № 78/666/2018 от 10.04.2018г. в размере 3 068 303 руб. 54 коп.

Встречный иск мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком по встречному иску обязательств по договору в части принятия и оплаты выполненных работ.  

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 27.07.2010г. № 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления к производству, о времени и месте судебного заседания опубликована на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы: www.msk.arbitr.ru, а также на сайте http://kad.arbitr.ru.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал, против удовлетворения встречных исковых требований возражал.

Ответчик против удовлетворения иска возражал по доводам, изложенным в отзыве. Встречное исковое заявление поддержал.

Третье лицо, уведомленное надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке ст.ст. 121-123 АПК РФ,  в заседание не явилось, заявлений, ходатайств не подало, позицию по иску не представило, в связи с чем, судебное заседание проведено в отсутствие представителя третьего лица в порядке ст. 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, встречные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между АО «СУ-111» (истец, заказчик) и ООО «МВ Строй» (ответчик, подрядчик) был заключен договор подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г., согласно которому подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика, собственными и/или привлеченными силами и средствами работы:

- по разработке рабочей документации для устройства фасадных систем («Документация», «Работы по проектированию»);

- по изготовлению и устройству (монтажу) фасадных систем, металлических конструкций, устройству наружных стен, внутренней отделке балконов и лоджий, отделке балконных плит, устройству оконных отливов («Работы по строительству»),

а также работы прямо договором не предусмотренные, но необходимые для надлежащего выполнения работ.

Работы выполнялись для создания объекта - многоквартирный жилой дом № 8 (в составе корпусов 8.1, 8.2, 8.3) с благоустройством территории, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:2097 по адресу: г. Москва, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское, в целях реализации заказчиком проекта комплексной застройки объектами жилого назначения, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры территории земельных участков, образованных в результате разделения земельного участка № 78 (кадастровый номер 50:21:0120114:67), по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское.

Договором определено, что стоимость договора равна сумме цены работ по проектированию (377 960 руб. 48 коп., в том числе НДС 18%) и цены работ по строительству (78 870 569 руб. 98 коп., в том числе НДС 18%), и составляет 79 248 530 руб. 46 коп., в том числе НДС 18%.

Истец произвел оплату в размере 19 514 080 руб. 31 коп. из которых: авансовый платеж в размере 18 928 936 руб. 80 коп., оплата выполненных работ в размере 585 143 руб. 51 коп.

Ответчиком работы были выполнены и приняты истцом по акту о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31.05.2018г. на сумму 845 583 руб. 10  коп.

Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктами 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. договора установлены следующие сроки выполнения работ: дата начала выполнения работ по проектированию: 10.04.2018г., дата окончания выполнения работ по проектированию: 01.05.2018г., дата начала выполнения работ по строительству: 10.04.2018г., дата окончания выполнения работ по строительству: 08.08.2018г.

При этом работы по строительству выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 12 к договору), в котором предусмотрены в том числе и промежуточные сроки.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как указывает истец, ответчиком были существенно нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные условиями договора работы не выполнены. Стоимость выполненных ответчиком и принятых истцом работ составила 845 583 руб. 10  коп.

В соответствии с п. 3.2. договора, при оплате стоимости работ по строительству, фактически выполненных в соответствующем отчетном периоде, заказчиком удерживается обеспечительный взнос в размере 6,8% от стоимости фактически выполненных в каждом отчетном  периоде работ по строительству.

Из оплаты выполненных работ, принятых по акту о приемке выполненных работ № 1 от 31.05.2018г. был удержан обеспечительный взнос в размере 57 499 руб. 65 коп.

Таким образом, авансовый платеж, не подтвержденный выполненными работами, составил 18 725 996 руб. 86 коп., из расчета: 19 514 080,31 - (845 583,10-57 499,65).

Руководствуясь ст. 715 ГК РФ, п. 12.2. договора, письмом исх. № 2553 от 25.07.2018г., истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора, просил произвести возврат авансового платежа, не подтвержденного выполненными работами в размере 18 725 996 руб. 86 коп.

Письмом исх. № 4110 от 18.10.2018г. повторно просил произвести возврат авансового платежа, не подтвержденного выполненными работами в размере 18 725 996 руб. 86 коп., произвести оплату неустойки за нарушение сроков выполнения в размере 3 581 107 руб. 05 коп.

Однако требование исполнено ответчиком не было.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал на выполнение работ. Заявил встречный иск о взыскании с истца задолженности за выполненные работы в сумме 3 068 303 руб. 54 коп.

Ответчик ссылается на то, что за период с 10.04.2018г. по 30.07.2018г. ООО «МВ Строй» выполнило работы на общую сумму 24 230 025 руб. 59 коп., что подтверждается актами выполненных работ КС-2 № 1 от 31.05.2018г. на сумму 845 583 руб. 10 коп., и КС-2 № 2 от 15.06.2018г. на сумму 23 384 442 руб. 49 коп.

ООО «СУ-111» произвело оплату работ на общую сумму 19 514 080 руб. 31 коп., в том числе 26.04.2018г. аванс в размере 18 928 936 руб. 80 коп., 25.06.2018г. оплата работ в размере 585 143 руб. 51 коп.

Обеспечительный взнос, в соответствии с п. 3.2. договора, составляет: 24 230 025,59 руб. х 6,8% = 1 647 641,74 руб.

Таким образом, по расчету ответчика задолженность истца по договору составляет: 24 230 025,59 руб. - 19 514 080,31 руб. - 1 647 641,74 руб. = 3 068 303,54 руб.

Согласно пояснениям ответчика, данная задолженность подтверждается подписанными сторонами актами выполненных работ № 1, № 2, справками о стоимости выполненных работ, накопительной ведомостью.

Также ответчик считает односторонний отказ истца от договора необоснованным.

Истец в части выполнения ответчиком работ, указанных в акте КС-2 от 15.06.2018г. и их принятия истцом возражал.

Как указывает истец, и следует из материалов дела, письмом исх. № 2553 от 25.07.2018г. истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Согласно п. 12.2. договора заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор, в том числе, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (начальных, промежуточных, конечных).

Согласно п. 2, п. 3 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ по договору подтверждается материалами дела.

Ответчик указал, что нарушение срока выполнения работ произошло ввиду несвоевременной передачи истцом документации для производства работ (во второй половине мая 2018г.)

Между тем, в силу п. 1 ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.

Согласно п. 2 указанной статьи подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п.1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

В соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.2 ст.401 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.03.2011 №14344/10, п. 3 ст. 405 ГК РФ должник может быть освобожден от ответственности перед кредитором за нарушение срока исполнения  обязательства только в случае, если должник по зависящим не от него, а от кредитора причинам не может исполнить обязательство в срок.

Как следует из материалов дела, ответчик к выполнению работ приступил, в ходе их выполнения не заявлял о приостановке работ в связи с невозможностью их выполнения в срок. Дополнительных соглашений об изменении сроков выполнения работ, в порядке п. 4.6. договора, не заключалось. В материалы дела не представлены доказательства, которые бы подтверждали безусловное отсутствие вины ответчика в нарушении сроков окончания работ.

При этом, согласно акту КС-2 № 1 от 31.05.2018г, периодом производства работ является 10.04.2018г – 31.05.2018г., то есть работы выполнялись ответчиком с даты, предусмотренной договором.

Таким образом, выполнение работ в предусмотренном договором объеме и сроки, а также отсутствие вины в нарушении сроков выполнения работ ответчик не доказал, в связи с чем, односторонний отказ истца от договора правомерен.

Кроме того, согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

На основании п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Таким образом, договор подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г., в соответствии с условиями договора, прекратил свое действие с 31.07.2018г.

При расторжении договора сторона не лишена права истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Кодекса. Правила, предусмотренные гл. 60 Кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Сторонами не оспариваются факт оплаты истцом работ на сумму 19 514 080 руб. 31 коп. и приемка истцом выполненных работ на сумму 845 583 руб. 10 коп. (КС-2 № 1 от 31.05.2018г.).

Ответчик в отзыве на иск указывает, что ООО «МВ Строй» также выполнило работы на сумму 25 205 459 руб. 89 коп., что следует из акта выполненных работ по форме КС-2 от 15.06.2018 г. на сумму 1 821 017 руб. 40 коп. и на сумму 23 384 442 руб. 49 коп., которые подлежат оплате со стороны ООО «Управление по строительству № 111».

При этом, ответчик представил в материалы дела копии акта КС-2 и справки КС-3 на сумму 23 384 442 руб. 49 коп., а также копию накопительной ведомости, содержащие подписи представителей истца.

Однако истец отрицает факт подписания указанной документации. Заявил ходатайство о фальсификации доказательств, а именно акта о приемке выполненных работ №2 от 15.06.2018г. и сводного сметного отчета о выполненных работах.

Заявление истца о фальсификации доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ судом отклонено. Фальсификация - это сознательное искажение представляемых доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений.

Субъективная сторона фальсификации доказательств может быть только в форме прямого умысла. Субъекты фальсификации доказательств - лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом.

Статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса предусмотрена обязанность суда принять предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательств в случае возражений лица, представившего доказательство, в отношении которого заявлено о фальсификации, относительно исключения данного доказательства из числа доказательств.

В соответствии с частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации в уголовном порядке наказанию подлежит лицо, участвующее в деле или его представитель, которым сфальсифицированы доказательства.

Системное толкование указанных выше норм закона позволяет прийти к выводу о том, что, проверяя заявление о фальсификации, суд фактически проводит проверку в отношении конкретного лица, а именно лица, участвующего в деле или его представителя, представившего подложные доказательства, а не по факту достоверности доказательства.

Заявителем в обоснование обстоятельств, свидетельствующих о факте их подделки (фальсификации), сведений не представлено.

﻿Кроме того, в рассматриваемом случае суд, учитывая установление фактических обстоятельств дела, пояснений сторон, не усматривает необходимости назначения и проведения судебной экспертизы, так как ее результаты фактически не подтвердят либо опровергнут доводы стороны, заявленные в обоснование подданного заявления, кроме того не установлен прямой умысел лица, участвующего в деле, в совершении подобного рода действий, надлежащего оригинала документа о фальсификации которого заявлено также не представлено, в связи с чем, суд в порядке ст. 161 АПК РФ отклоняет заявление истца о фальсификации доказательств как необоснованное.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что оригиналы акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 15.06.2018г. и сметного отчета на сумму 23 384 442 руб. 49 коп., подписанных истцом, ответчиком не представлены. 

Таким образом, допустимых и относимых доказательств подписания актов КС-2 от 15.06.2018г. на сумму 1 821 017 руб. 40 коп. и на сумму 23 384 442 руб. 49 коп. уполномоченным представителем истца, ответчиком в материалы дела не представлено. 

При этом ответчик указал, что подписанные оригиналы документов истцом в адрес ответчика не передавались и в судебном заседании была продемонстрирована копия акта КС-2, скан-копия которого, была направлена в адрес ответчика по электронной почте.

Однако достоверных и бесспорных доказательств направления именно спорных актов в адрес ответчика в электронном виде, не представлено.

Кроме того, согласно материалам дела, истцом в адрес ответчика был направлен мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ №2 от 15.06.2018г., которым ответчику были возвращены полученные не подписанные со стороны истца акты.

Суд отклоняет доводы ответчика о том, что работы, указанные в актах от 15.06.2018г. являются сданными ответчиком в одностороннем порядке, в связи со следующим.

Как указано выше, письмом исх. № 2553 от 25.07.2018г. истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что спорная документация (акт, справка, ведомость) была направлена ответчиком в адрес истца только в январе 2019г., то есть после расторжения договора.

Ответчиком не представлено документов, подтверждающих направление в адрес истца письма 119 от 16.07.2018г. с приложением спорного акта. 

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 7.2.2 договора установлено, что за 5 (Пять) календарных дней до окончания отчетного периода подрядчик был обязан уведомить заказчика о готовности работ к приемке, представив следующий комплект документов: акт о приемке выполненных работ; справку о стоимости выполненных работ; накопительную ведомость; надлежащим образом оформленную счет-фактуру; исполнительную документацию, подтверждающую выполнение в отчетном периоде предъявленных к сдаче работ; отчет об израсходовании материалов и/или оборудования - в случае если заказчиком предоставлены в монтаж материалы и/или оборудование согласно п. 6.2.8 договора. 

АО «СУ-111» произвело осмотр работ и в ответ на направленные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 направило мотивированный отказ от подписания акта и справки о приемке выполненных работ №2 от 15.06.2018г. на сумму 23 384 442,49 руб., полученных письмом вх. № 362 от 22.01.2019г. по следующим основаниям:

1) не предоставлена исполнительная документация;

2) не были устранены замечания к качеству работ: 

- Работы по устройству кладки выполнены с нарушением технологии, что нарушает СП 5.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», и не соответствует рабочей документации.

- Качество работ по устройству кладки не соответствует требованиям установленным СП 5.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», рабочей документации, поскольку при строительстве кладки имеется пустошовка, отсутствует заполнение усадочного шва минватой и зачеканка цементно-песчаным раствором. Присутствуют сквозные трещины в блоках, отсутствует базальтовая сетка в первом ряду кладки, внутреннее и наружное расположение блоков чередуется беспорядочно, толщина вертикальных и горизонтальных швов местами составляет 20 мм вместо 10, размеры простенков не соответствуют проектным, имеются сверхнормативные отклонения по вертикальности конструкций. Из-за отсутствия исполнительной документации невозможно подтвердить плановое расположение стен и перегородок на этажах.

В адрес истца акт о приемке выполненных работ №2 от 15.06.2018г. на сумму 23 384 442,49 руб., был направлен совместно с письмом вх. №362 от 22.01.2019г., однако какая-либо документация, относящаяся к исполнительной документации - в письме отсутствовала. При получении корреспонденции от ООО «МВ строй» АО «СУ-111» оформляла акты вскрытия конверта. Отсутствие исполнительной документации в представленном письме подтверждается актом вскрытия конверта от 22.01.2019г.

Представленные ответчиком в материалы дела реестры передачи исполнительной документации, в том числе по д. 8, с учетом объема и перечня работ, указанных в спорном акте КС-2, не подтверждают передачу полного объема исполнительной документации (в том числе в отношении работ по кладке перегородок с использованием ячеистобетонных блоков толщиной 425 мм.). 

При этом, указанная документация была направлена в адрес истца после обращения истца в суд с настоящим иском.

Мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ №2 от 15.06.2018г. на сумму 23 384 442,49 рублей был направлен письмом исх. № 298 от 29.01.2019г.

При изложенных обстоятельствах, суд считает отказ истца от принятия работ по акту КС-2 № 2 от 15.06.2018г. обоснованным и правомерным.

Кроме того, по результатам работы комиссии, проведенной 06.08.2018г. были составлен акт приема-передачи №2 от 06.08.2018г., которым зафиксирован фактически выполненный ответчиком объем в рамках исполнения заключенного договора: 

- кладка стен из ячеистобетонных блоков марка D600, толщина 425 мм наружные стены - 72,34 м3; 

- кладка стен из ячеистобетонных блоков марка D600, толщина 200 мм, наружные стены - 35,86 м3.

Приемка работ по строительству осуществляется заказчиком с участием инженеров  технического надзора и руководителем строительства.

Указанный  акт  подписан  сотрудником  технического  надзора  АО  «СУ-111»  ФИО7 и руководителем строительства ООО «МВ строй» - ФИО8

На основании изложенного следует, что работы, которые были фактически выполнены ответчиком, были приняты истцом путем подписания акта о приемке выполненных работ № 1 от 31.05.2018г.

Выполнение объемов работ, указанных в спорном акте о приемке выполненных работ № 2 от 15.06.2018г. документально не подтверждено.

Ответчиком было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Истец против удовлетворения заявленной экспертизы возражал.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения, возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения о его удовлетворении либо отклонении. При этом удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу ст. 71 АПК РФ подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами. 

Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон договора подряда о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

В данном случае, с учетом предмета заявленного спора и фактических обстоятельств, суд считает, что основания для назначения экспертизы, предусмотренные ст. ст. 82 АПК РФ, отсутствуют, дело может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам.

﻿Установив факт направления подрядчиком одностороннего акта о приемке выполненных работ по истечении шести месяцев после отказа заказчика от исполнения договора, отсутствие надлежащих доказательств выполнения им работ до расторжения договора и соответствия подготовленной документации установленным требованиям, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска о взыскании неотработанного аванса в размере 18 725 996 руб. 86 коп.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 9.1. договора подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г., в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (начальных, промежуточных, конечных) предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплатить пени в размере 0,1 % от цены работ по проектированию/цены работ по строительству за каждый день просрочки.

Договором определено, что стоимость договора равна сумме цены работ по проектированию и цены работ по строительству и составляет 79 248 530,46 рублей, в том числе НДС 18%.

Пунктами 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. договора установлены следующие сроки выполнения работ: дата начала выполнения работ по проектированию: 10.04.2018г. Дата окончания выполнения работ по проектированию: 01.05.2018г. Дата начала выполнения работ по строительству: 10.04.2018г. Дата окончания выполнения работ по строительству: 08.08.2018г.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение промежуточный сроков выполнения работ по договору подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г. в размере 3 523 607 рублей 40 копеек.

Письмом исх. №4110 истец просил ответчика произвести оплату неустойки, но требование не было исполнено.

Согласно условиям договора подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г. (п. 9.6.), в случае неуплаты подрядчиком неустойки (пени/штрафа), штрафных санкций, сумма неустойки (пени/штрафа), штрафных санкций/обоснованно понесенных затрат может быть удержана заказчиком в одностороннем порядке из любых платежей, причитающихся подрядчику.

Письмом исх. №4609 от 09.11.2018г, истец уведомил ответчика об удержании неустойки в размере 57 499,65 рублей из суммы обеспечения договора, по итогам удержания, обеспечительный взнос по договору подряда №78/666/2018 от 10.04.2018г. составил 0 (ноль) рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору, подлежащая оплате подрядчиком, составила 3 523 607,40 рублей, из расчета: 3 581 107,05-57 499,65.

Поскольку судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по своевременному выполнению работ, суд считает начисление неустойки за нарушение ответчиком срока выполнения работ обоснованным и правомерным.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен и признан верным.

Вместе с тем, ответчиком заявлено о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

При этом бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000 № 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, а также длительность неисполнения обязательства.

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. 

Вместе с тем, для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период; снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга, исходя из однократной учетной ставки Банка России (абзац 2 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным уменьшить размер неустойки по договору подряда № 78/666/2018 от 10.04.2018г. за период с 02.05.2018г. по 25.07.2018г. до суммы 700 000 руб. 00 коп.

При изложенных обстоятельствах, суд считает исковые требования истца подлежащими удовлетворению, встречные требования необоснованными, неправомерными и не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску и встречному иску относится на истца.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 12, 65, 110, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МВ Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Управление по строительству № 111» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неосновательное обогащение 18 725 996 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 86 коп., неустойку 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00 коп., а также 134 248 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок восемь) руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МВ Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 38 342 (тридцать восемь тысяч триста сорок два) руб. 00 коп. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

                              Е.Н. Киселева