Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело №А12-36463/2018

«12» декабря 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 5 декабря 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2018 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Песковатского сельского Городищенского района Волгоградской области (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Рай-грасс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) об обязании за собственный счет устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 27.07.2017 № 724725,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 06.11.2018 г.,  

от ответчика - не явился, извещён;

В Арбитражный суд Волгоградской области обратилась Администрация Песковатского сельского Городищенского района Волгоградской области  (далее – администрация, истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Рай-грасс» (далее – ООО «Рай-грасс», ответчик) с исковыми требованиями об обязании в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу за собственный счёт устранить недостатки выполненных работ по контракту от 27.07.2017 г. № 724725, установленные актом обследования объекта благоустройства от 19.07.2018 г., а именно, осуществить:

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм - декоративная отделка под «пластушку»;

приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью;

доставку автомобилем бортовым грузоподъемностью до 5т. строительных материалов к месту производства работ на расстояние 75 км (с учётом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.  

Ответчик в судебное заседание не явился; направил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного пп. 14.1-14.2. договора; отзыв по существу исковых требований  не представил. 

Суд не находит оснований для оставления искового заявления без рассмотрения на основании п. 1 ч. 2 ст. 148 АПК РФ, так как в материалах дела имеются претензионные письма истца от 25.04.2018 г., 03.07.2018 г. 

Изучив основания заявленных требований, исследовав материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между Администрацией Песковатского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области (Заказчик) и ООО «Рай-грасс» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 27.07.2017 г. № 724725 на выполнение работ по благоустройству территорий по ул. Спортивная -14 Песковатского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. 

В соответствии с п. 3.1 Контракта общая стоимость выполненных работ составила 3 074 400 руб.

Приёмка-сдача выполненных работ сторонами произведена путём подписания актов от 03.11.2017 г. на весь объём работ. Оплата выполненных работ также произведена в полном объеме в 2017 году.

Вместе с тем, 19.07.2018 г. в результате обследования объекта благоустройства (при участии представителя Подрядчика) были выявлены следующие недостатки: декоративная штукатурка на стене (в частности, ступеней) пришла в негодность на площади 2,2 кв. м. 

ООО «Рай-Грасс» было предложено устранить выявленные дефекты в срок до 02.08.2018 г. 

В соответствии с п. 7 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Контракта (п. 14.6 Контракта), гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания сторонами в установленном порядке акта приемки работ по форме КС-2 (т.е. с 03.11.2017 г. ) и составляет 5 лет. 

Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме и в срок, предусмотренный Контрактом и Техническим заданием Заказчика. Подрядчик гарантирует качество работ на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ. В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приемке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиям законодательства РФ и требованиями Заказчика. Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком своими силами, средствами и материалами.

В силу п. 5.4.14 Контракта Подрядчик обязан устранять выявленные недостатки за собственный счет и в сроки, установленные Заказчиком, в случае выявления фактов некачественного выполнения работ.

Такой срок Заказчиком был установлен в акте обследования объекта благоустройства от 19.07.2018 г., подписанным представителем Подрядчика, - не позднее 02.08.2018 г.

В связи с неустранением ответчиком недостатков работ в установленный срок истец обратился в суд с настоящим иском. 

В силу ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьёй 722 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 307).

Согласно ст. 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.

На основании вышеизложенных норм права суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Рай-грасс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу за собственный счёт устранить недостатки выполненных работ по контракту от 27.07.2017 г. № 724725, установленные актом обследования объекта благоустройства от 19.07.2018 г., а именно, осуществить:

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм - декоративная отделка под «пластушку»;

- приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью;

- доставку автомобилем бортовым грузоподъемностью до 5т. строительных материалов к месту производства работ на расстояние 75 км.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рай-грасс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                      Л.В. Напалкова