12/2025-182010(1) 

Ул. Ленина дом 74, 

<

...>,телефон 

<

***>, факс 

<

***>, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Арбитражный суд Тюменской области 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А70-7013/2024

г. Тюмень

09 октября 2025 года.

Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В. В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: 

<

...> кабинет 715, дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Энергопрогресс Приуралья» 

К обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тюменьстрой»  

О понуждении к устранению дефектов 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тюменьстрой» в срок до 31 мая 2026 года устранить недостатки (дефекты) общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>: выполнить работы по оборудованию индивидуального теплового пункта, расположенного на первом этаже многоквартирного дома и проветриваемого подполья системой сбора и отвода случайных и аварийных стоков в соответствии с проектной документацией (раздел 5.3. «Система водоотведения 1/18-2017-ИОСЗ), а именно: устройство пола с уклоном 0, 01 к водосборному трапу Ду 100 мм и установка трапа; организация отвода от трапа по проветриваемому подполью в сеть хозяйственно-бытовой канализации; выполнение участка трубопровода из стальных труб диамет-ром 108х4,5 мм (сталь 09Г2С) по ГОСТ 30732-2006 с внутренней антикоррозийной изоляцией, в ППУ-изоляции в оцинкованной оболочке, с греющим кабелем марки 17FSR2-СТ по ТУ-5768-004-01297858-03; устройство подвода крана холодной воды для подмеса с обеспечением снижения температуры сбрасываемых вод до нормативного значения не более +40 С.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Энергопрогресс Приуралья» справку на возврат государственной пошлины в размере 4 200 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тюменьстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Энергопрогресс Приуралья» государственную пошлину в размере 1 800 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопрогресс Приуралья» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тюменьстрой» расходы на проведение судебной экспертизы в размере 500 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через арбитражный суд Тюменской области.  

Судья В. В. Лоскутов