Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, e-mail:penza.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г.Пенза           Дело №А49-13224/2017

Резолютивная часть решения оглашена       22.11.2017 г.            

Полный текст решения изготовлен               27.11.2017 г.  

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Телегина А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании при ведении протокола заседания секретарем ФИО1 дело 

по иску:

специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт» (ФИО2 ул., д.25, Пенза г., 440015;  ОГРН 

<

***>);

к ответчику:

обществу с ограниченной ответственностью «Строительная инвестиция» (Ладожская ул., 126-165, Пенза г., 440071; ОГРН 

<

***>);

о взыскании         4695390,77 руб.;

при участии в заседании представителей

от истца:

ФИО3, представителя  по доверенности;

от ответчика:

не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

СМУП «Пензалифт» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ООО «Строительная инвестиция» о взыскании суммы4695390,77 руб., в т.ч.:

- 895969,02 руб. – долг по договору №1/3-004 от 20.02.2017 г., 25356,72 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 30.05.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 1499443,50 руб. – долг по договору № 1/3-008 от 24.11.2016 г., 74115,37 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 2.02.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 1508208,33 руб. – долг по договору №1/3-009 от 24.11.2016 г., 23449,54 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 2.08.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 216779,70 руб. – долг по договору №1/4-001 от 15.03.2017 г., 8194,57 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 5.05.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 113396,94 руб. – долг по договору №1/4-003 от 15.03.2017 г., 2518,03 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 6.07.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 72249,60 руб. – долг по договору №1/4-015 от 23.05.2016 г., 6782,08 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 11.10.2016 г. по 4.10.2017 г.;

- 218700 руб. – долг по договору №1/8-01-16 от 19.01.2016 г., 30227,37 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные за период с 7.04.2016 г. по 4.10.2017 г.

Истцом также заявлено о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга по указанным договорам, начиная с 5.10.2017 г. и по момент полного погашения долга.

Как указал истец, по условия названных договоров он передал товар и выполнил работы на общую сумму 4524747,09 руб.

Работы и товар ответчиком приняты без замечаний, однако  им не оплачены. 

Поскольку досудебная претензия с требованием об уплате долга оставлена ответчиком без удовлетворения, истец вынужден обратиться в суд с вышеназванным иском.

В обоснование заявленных требований истец сослался на ст.ст. 191, 193, 307, 309, 310, 314,395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 22.11.2017 г. истец требования в заявленном размере поддержал по доводам, изложенным в иске.

Ответчик в судебное заседание 22.11.2017 г. не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил.

Принимая во внимание, что ответчик уведомлен о рассмотрении дела, на основании ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в его отсутствие.

Исследовав  материалы дела, заслушав пояснения истца, арбитражный суд установил следующее.

Между ООО «Строительная инвестиция» (заказчиком) и СМУП «Пензалифт» (исполнителем) заключены договоры: №1/8-01-16 от 19.01.2016 г., №1/4-015 от 23.05.2016 г., №1/3-009 от 24.11.2016 г., №1/3-008 от 24.11.2016 г., № 1/3-004 от 20.02.2017 г., №1/4-001 от 15.03.2017 г., №1/4-003 от 15.03.2017 г. 

По условиям договора №1/8-01-16 от 19.01.2016 г. истец обязался поставить ответчику товар, наименование и количество которого указывается в спецификации (п.1.1. договора)

Срок поставки товара определен сторонами в п.4.1. договора и составляет не более 30 календарных дней после подписания договора и представления точных размеров изделий.

Стоимость поставляемого товара составляет 729000 руб. (п.3.1. договора, спецификация к договору).

Согласно п.3.2 названного договора оплата за поставляемую продукцию производится в следующем порядке: 70% от суммы договора – предоплата, 30% - после поставки и подписания товарных накладных, но не позднее 40 календарных дней с момента внесения первого платежа.

Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями договора, истец передал ответчику товар стоимостью  729000 руб. 

Факт принятия ответчиком товара подтверждается  представленной в материалы дела товарной накладной №820 от 23.03.2016 г. на сумму 729000 руб.

По условиям договора №1/4-015 от 23.05.2016 г. (п.1.2) истец обязался выполнить работы по монтажу и наладке оборудования системы диспетчерской связи и приборов безопасности лифтов в многоэтажном жилом доме по ул.Лозицкой стр.2 в г.Пензе (4 лифта).

Срок выполнения работ два месяца с момента начала выполнения работы (п.1.4. договора).

Согласно п.1.5. подрядчик приступает к выполнению работ в течение 30 рабочих дней с момента поступления предварительной оплаты.

Цена настоящего договора определена сторонами в сумме 144499,21 руб. (п.3.1. договора).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 50% от цены договора – предоплата до начала выполнения работ, окончательный расчет производится в течение пяти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

Работы истцом выполнены на сумму 144499,21 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемки выполненных работ №2642 от 30.09.2016 г. 

По условиям договора №1/3-009 от 24.11.2016 г. (п.1.2) истец обязался выполнить работы по монтажу, пуско-наладке, полном техническом освидетельствовании и декларировании соответствия пассажирских лифтов г/п 630 кг на 10 остановок в количестве 5 единиц по адресу: многоквартирный жилой дом №3 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с.Засечное Пензенского района Пензенской области.

Срок выполнения монтажных работ одного лифта составляет 30 дней с даты подписания сторонами последнего из следующих актов: акта готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования, акта приемки оборудования в монтаж на площадку монтажа и при условии обеспечения заказчиком за свой счет готовности строительной площадки к приему лифтового оборудования и монтажу (п.1.1.1 договора).

Срок выполнения пуско-наладочных работ одного лифта составляет 20 дней после завершения строительно-отделочных работ и подписания соответствующего акта (п.1.4.2 договора).

Срок выполнения полного технического освидетельствования и декларирования соответствия одного лифта составляет 30 дней с даты подачи заявки в инженерный центр на получение акта технического освидетельствования лифта.

Цена настоящего договора определена сторонами в сумме 2130010,74 руб. (п.3.1. договора и п.1 дополнительного соглашения к договору от 15.05.2017 г.).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 10% от цены договора – предоплата не менее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения монтажных работ; окончательный расчет производится поэтапно на основании подписанных актов приема-сдачи выполненных работ в течение пяти банковских дней с даты завершения устранения подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки каждого этапа, оговоренных в настоящем договоре работ.

Работы истцом выполнены на сумму 1508208,33 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемки выполненных работ №1860 от 25.07.2017 г.

По условиям договора №1/3-008 от 24.11.2016 г. (п.1.2) истец обязался выполнить работы по монтажу, пуско-наладке, полном техническом освидетельствовании и декларировании соответствия пассажирских лифтов г/п 630 кг на 10 остановок в количестве 4 единиц по адресу: многоквартирный жилой дом №4 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с.Засечное Пензенского района Пензенской области.

Срок выполнения монтажных работ одного лифта составляет 30 дней с даты подписания сторонами последнего из следующих актов: акта готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования, акта приемки оборудования в монтаж на площадку монтажа и при условии обеспечения заказчиком за свой счет готовности строительной площадки к приему лифтового оборудования и монтажу (п.1.1.1 договора).

Срок выполнения пуско-наладочных работ одного лифта составляет 20 дней после завершения строительно-отделочных работ и подписания соответствующего акта (п.1.4.2 договора).

Срок выполнения полного технического освидетельствования и декларирования соответствия одного лифта составляет 30 дней с даты подачи заявки в инженерный центр на получение акта технического освидетельствования лифта.

Цена настоящего договора определена сторонами в сумме 1499443,50 руб. (п.3.1. договора и п.1 дополнительного соглашения к договору от 9.01.2017 г.).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 10% от цены договора – предоплата не менее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения монтажных работ; окончательный расчет производится поэтапно на основании подписанных актов приема-сдачи выполненных работ в течение пяти банковских дней с даты завершения устранения подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки каждого этапа, оговоренных в настоящем договоре работ.

Работы истцом выполнены на сумму 1499443,50 руб., что подтверждается подписанными сторонами актами о приемки выполненных работ №216 от 25.01.2017 г., №1596 от 26.06.2017 г.

По условиям договора №1/3-004 от 20.02.2017 г. (п.1.2) истец обязался выполнить работы по монтажу, ручному монтажу, пуско-наладке, монтажу и наладке оборудования системы диспетчерской связи лифтов, декларированию соответствия пассажирских лифтов г/п 400 кг на 12 остановок в количестве 1 единицы и 630 кг на 12 остановок в количестве 1 единицы по адресу: г.Пенза, многоквартирный жилой дом (стр.№4А) со встроенными помещениями в мкр. №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

 Срок выполнения монтажных работ одного лифта составляет 30 дней с даты подписания сторонами последнего из следующих актов: акта готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования, акта приемки оборудования в монтаж на площадку монтажа и при условии обеспечения заказчиком за свой счет готовности строительной площадки к приему лифтового оборудования и монтажу (п.1.1.1 договора).

Срок выполнения пуско-наладочных работ одного лифта составляет 20 дней после завершения строительно-отделочных работ и подписания соответствующего акта (п.1.4.2 договора).

Срок выполнения монтажа и пуско-наладки диспетчерской связи одного лифта составляет 5 дней после завершения пуско-наладочных работ (п.1.4.3. договора).

Срок оформления декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» составляет 7 дней после получения акта полного освидетельствования лифта и присвоения почтового адреса объекту недвижимого имущества (п.1.4.4. договора).

Цена настоящего договора определена сторонами в сумме 895969,02 руб. (п.3.1. договора).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 10% от цены договора – предоплата не менее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения монтажных работ; окончательный расчет производится поэтапно на основании подписанных актов приема-сдачи выполненных работ в течение пяти банковских дней с даты завершения устранения подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки каждого этапа, оговоренных в настоящем договоре работ.

Работы истцом выполнены на сумму 895969,02 руб., что подтверждается подписанными сторонами актами о приемки выполненных работ №1300 от 22.05.2017 г., №1553 от 19.06.2017 г., №1601 от 28.06.2017 г.

По условиям договора №1/4-003 от 15.03.2017 г. (п.1.2) истец обязался выполнить работы по монтажу и наладке оборудования системы диспетчерской связи и приборов безопасности лифтов в многоэтажном жилом доме №4 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с.Засечное Пензенского района Пензенской области (4 лифта).

Срок выполнения работ один месяц с момента начала выполнения работы (п.1.4. договора).

Цена настоящего договора определена сторонами в сумме 113396,94 руб. (п.3.1. договора).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 50% от цены договора – предоплата до начала выполнения работ, окончательный расчет производится в течение пяти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

Работы истцом выполнены на сумму 113396,94 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемки выполненных работ №1600 от 28.06.2017 г. 

По условиям договора №1/4-001 от 15.03.2017 г. (п.1.2) истец обязался выполнить работы по монтажу и наладке оборудования системы диспетчерской связи и приборов безопасности лифтов в многоквартирном жилом доме №6 со встроенно-пристроенными офисными помещениями в микрорайоне №3 3-й очереди строительства жилого района Арбеково в г.Пензе (8 лифтов).

Срок выполнения работ один месяц с момента начала выполнения работы (п.1.4. договора).

Цена настоящего договора определена сторонами в сумме 216779,70 руб. (п.3.1. договора).

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 50% от цены договора – предоплата до начала выполнения работ, окончательный расчет производится в течение пяти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

Работы истцом выполнены на сумму 216779,70 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемки выполненных работ №1042 от 26.04.2017 г.

За нарушение условий исполнения настоящих договоров стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ (п.5.1 договоров).

Как указал истец, ответчик свои обязательства по оплате товара и работ по указанным выше договорам не исполнил.

Предъявленная истцом претензия об исполнении договорных обязательств, ответчиком оставлена без ответа.

Поскольку принятые товар и работы ответчиком не оплачены, истец обратился в суд с настоящим иском.

Договор № 1/8-01-16 от 19.01.2016 г. по своей правовой природе является договором поставки.

Договоры №1/4-015 от 23.05.2016 г., №1/3-009 от 24.11.2016 г., №1/3-008 от 24.11.2016 г., № 1/3-004 от 20.02.2017 г., №1/4-001 от 15.03.2017 г., №1/4-003 от 15.03.2017 г. по своей правовой природе являются договорами сложного правового состава, включающее в себя элементы договора  возмездного оказании услуг и договора подряда. 

В силу ст.ст.307 и 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон возникают в силу договора и должны исполняться надлежащим образом.

Односторонний отказ от исполнения обязательства в силу требований ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается.

Согласно ст.506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно п.1. ст.516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Согласно п.1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Факт поставки товара истцом и принятия его ответчиком на сумму 218700 руб. подтвержден материалами дела.

Факт выполнения работ по договору на общую сумму 4306047,09 руб. подтверждается актами приемки выполненных работ.

Сроки для оплаты товара и выполненных работ, установленные договорами, истекли.

Доказательств оплаты по договорам ответчиком не представлено.

При названных обстоятельствах суд признает за истцом право на взыскание с ответчика долга по договорам 1/8-01-16 от 19.01.2016 г., №1/4-015 от 23.05.2016 г., №1/3-009 от 24.11.2016 г., №1/3-008 от 24.11.2016 г., № 1/3-004 от 20.02.2017 г., №1/4-001 от 15.03.2017 г., №1/4-003 от 15.03.2017 г. в общей сумме 4524747,09 руб.

В связи с просрочкой оплаты товара и выполненных работ по указанным договорам истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 170643,68 руб., в т.ч.:

- 25356,72 руб. по договору №1/3-004 от 20.02.2017 г., рассчитанные за период с 30.05.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 74115,37 руб. по договору № 1/3-008 от 24.11.2016 г., рассчитанные за период с 2.02.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 23449,54 руб. по договору №1/3-009 от 24.11.2016 г., рассчитанные за период с 2.08.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 8194,57 руб. по договору №1/4-001 от 15.03.2017 г., рассчитанные за период с 5.05.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 2518,03 руб. по договору №1/4-003 от 15.03.2017 г., рассчитанные за период с 6.07.2017 г. по 4.10.2017 г.;

- 6782,08 руб. по договору №1/4-015 от 23.05.2016 г., рассчитанные за период с 11.10.2016 г. по 4.10.2017 г.;

- 30227,37 руб. по договору №1/8-01-16 от 19.01.2016 г., рассчитанные за период с 7.04.2016 г. по 4.10.2017 г.

В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов представлен в материалы дела. 

Ответчик возражений по сумме процентов, механизму их расчета и периода просрочки не представил. 

Расчет судом проверен и признан обоснованным.

При таких обстоятельствах арбитражный суд признает право истца на взыскание с ответчика процентов в общей сумме 170643,68 руб., рассчитанных по состоянию на 4.10.2017 г.

Поскольку истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 4524747,09 руб. по момент его погашения, то началом  периода для их последующего начисления следует признать  5.10.2017 г. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь  ст.ст. 307, 309, 395, 506, 516, 702, 711, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд признает заявленные истцом требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в сумме 4695390,77 руб.,  в т.ч. долг – 4524747,09 руб., проценты – 170643,68 руб., с последующим их взысканием, начиная с 5.10.2017 г. по момент фактического погашения долга.

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

В связи с тем, что истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлине, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 46477 руб. 

Одновременно, судом установлено, что в оглашённой резолютивной части решения во втором абзаце содержится описка.

Государственная пошлина в сумме 46477 руб., взысканная в пользу истца (как указано в резолютивной части решения) подлежит взысканию в доход федерального бюджета. 

В названных обстоятельствах  арбитражный суд  на основании ст.179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным, не затрагивая существа судебного акта, исправить допущенную описку, изложив резолютивную часть решения в иной редакции.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования специализированного муниципального предприятия «Пензалифт» удовлетворить, судебные расходы отнести на ответчика. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные инвестиции» в пользу  специализированного муниципального предприятия «Пензалифт» сумму 4695390,77   руб., в т.ч долг -    4524747,09  руб., проценты – 170643,68 руб.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Строительные инвестиции» в пользу  специализированного муниципального предприятия «Пензалифт» проценты по учетной ставке Банка России, начисляемые  на сумму взысканного выше долга (с учетом его последующего гашения), начиная с 5.10.2017г. и по момент полного погашения долга.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные инвестиции» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 46477 руб.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его изготовления в полном объеме.

 Судья              А.П.Телегин