9_14307832  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-89392/2022

г. Москва

02 августа 2023 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-89392/2022 по иску ООО "ЭТАЛОН СБ"  (ОГРН 

<

***>) к ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" (ОГРН 

<

***>) о взыскании  2 240 581,06 руб. основного долга по договору подряда № ЮС-ЭСБ-08/20 от 11.08.2020, 302 400  руб. неустойки, 60000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также по встречному иску  ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" к ООО "ЭТАЛОН СБ" о взыскании 924 548 руб. 06 коп. стоимости  невозвращенного давальческого материала, 306 563 руб. 03 коп. суммы неотработанных  авансовых денежных средств и процентов, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ, с учетом  частичного зачета сумм гарантийного удержания за работы, выполненные подрядчиком в 2020  году; о взыскании 4 512 210 руб. 45 коп. неустойки, их них: 893 652 руб. 07 коп. за нарушение  сроков завершения отдельных этапов работ (промежуточных сроков), 3 618 558 руб. 38 коп. за  нарушение сроков завершения работ за период с 22.05.2021 по 23.01.2022 (247 дней); о признании  обязательства ООО «Ю.Эс.Бразерс» по выплате ООО «Эталон СБ» остатка сумм гарантийного  удержания по работам, выполненным в 2020 году в размере 402 475,796 руб. прекращенными,  

 с участием в деле третьего лица - ООО «СвязьСтройИнвес», при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" в пользу ООО "ЭТАЛОН СБ" 2 240 581,06 руб.  основного долга по договору подряда № ЮС-ЭСБ-08/20 от 11.08.2020, 302 400 руб. неустойки,  60 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 35 715 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "ЭТАЛОН СБ" в пользу ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" 114 960 руб. 34 коп.  стоимости невозвращенного давальческого материала, а также 1035 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

В результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с ООО  "Ю.Эс. БРАЗЕРС" в пользу ООО "ЭТАЛОН СБ" 2 428 020 руб. 72 коп. задолженности по договору  подряда № ЮС-ЭСБ-08/20 от 11.08.2020, 60 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а  также 34 680 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить ООО "ЭТАЛОН СБ" из средств федерального бюджета 2 953 руб.  государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 271 от 28.10.2022.  

Возвратить ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" из средств федерального бюджета 1 204 руб.  государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 53 от 03.02.2023.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не  подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин