Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47032/2019

01 июля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  20 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  01 июля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РЕСПЕКТ НВ" (адрес:  Россия 143005, ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, НОВО-СПОРТИВНАЯ ДОМ/10, КВАРТИРА 76, ОГРН: 1055006351454);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Капитал стройиндустрия" (адрес:  Россия 199406, г Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, БЕРИНГА ДОМ/5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 23-Н КАБИНЕТ 1, ОГРН:  1027804893049);

о взыскании 8326191.67

при участии

-от истца: ФИО2 по доверенности от 17.10.18, ФИО3 по доверенности от 27.05.19,

-от ответчика: ФИО4 по доверенности от 19.11.18,

установил:

ООО "РЕСПЕКТ НВ" предъявило иск о взыскании с ООО "Капитал стройиндустрия" 7 916 825 руб. 80 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 409 365 руб. 87 коп. пеней за просрочку платежа на основании договора субподряда №160418/суб-ПЛН от 16.04.18.

Ответчик иск отклонил по мотивам, изложенным в отзыве.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор субподряда №160418/суб-ПЛН от 16.04.18 на выполнение работ по монтажу внутренних и наружных сетей электроснабжения и иных работ на объекте «Здание поликлиники для взрослых» по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, севернее 

<

...>.

В соответствии с п. 3.1 договора цена является ориентировочной и составляет 19 011 105 руб. 81 коп.

Срок окончания работ – 30.09.18 (п. 7.2).

Согласно п. 3.10 договора авансовый платеж составляет 6 000 000 руб. 00 коп.

Ответчик – подрядчик перечислил истцу – субподрядчика в качестве авансового платежа только 2 700 000 руб. 00 коп.

Истец приступил к выполнению работ и выполнил свои обязательства по договору.

09.08.18 истец передал ответчику акты о приемке выполненных работ на общую сумму 10 616 825 руб. 80 коп. (вх. №18-977). Ответчик акты не подписал, мотивированных возражений не направил.

 20.12.18 истец повторно передал ответчику акты выполненных работ и исполнительную документацию (вх. №18-1676).

Ответчик акты не подписал, претензий о выявленных недостатках не направил.

При изложенных обстоятельствах в соответствии со ст. 753 ГК РФ работы считаются принятыми и подлежат оплате.

В настоящее время задолженность ответчика по оплате работ составляет 7 916 825 руб. 80 коп.

В соответствии с п. 5.12 договора ответчику начислены пени за несвоевременную оплату работ за период с 20.09.18 по 10.04.19 в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ в сумме 409 365 руб. 87 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Капитал стройиндустрия" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РЕСПЕКТ НВ" 8 326 191 руб. 67 коп., из них:  7 916 825 руб. 80 коп. основного долга и 409 365 руб. 87 коп. пеней, а также 64 631 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.