РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-233059/20-105-1100

г. Москва

25 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2021 года

Текст решения изготовлен в полном объеме 25 мая 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1

рассматривает  в судебном заседании дело по иску

истец:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ" (119017, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.08.2002, ИНН: 

<

***>)

ответчик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН" (115563, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2015, ИНН: 

<

***>)

О взыскании пени в размере 14 329 598 руб. 70 коп.

При участии представителей:

от истца –ФИО2 дов. от 19.11.20, диплом

от ответчика – ФИО3 дов. от 24.11.20, диплом

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ"  обратилось в суд с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН" о взыскании неустойки по контракту № 319/1627-Д от 12 марта 2018 года в размере 14 329 598 руб. 70 коп.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 309, 310 ГК РФ и мотивированы не надлежащим исполнением обязательств по № 319/1627-Д от 12 марта 2018 года.

Истец заявил об уточнении размере исковых требований в  порядке ст. 49 АПК РФ с учетом изменившейся ставки рефинансирования ЦБ РФ  с 26.04.2021 года (5%) в размере 16 332 059 руб. 76 коп.

Ответчик исковые требования не признает согласно доводам, изложенным в отзыве, заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

12.03.2018 г. между ФГУП «НО РАО» (далее – Истец, Заказчик) и АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» (далее – Ответчик, Исполнитель) был заключен контракт № 319/1627-Д на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция пункта приповерхностного захоронения твердых радиоактивных отходов г. Новоуральск» (далее - Контракт). Цена контракта составила 1 202 136 253, 89 руб.

Согласно п. 4.3. Контракта, Ответчик обязался сдать результат работ по этапам в установленные сроки. Стоимость этапов, сроки их выполнения и основания для приемки выполненных работ определены в Приложении № 3 к Контракту (График исполнения по объекту: Пункт приповерхностного захоронения твердых радиоактивных отходов г. Новоуральск), с учетом изменений, внесенных в Контракт Дополнительным соглашением № 1 от 15.11.2018 г. (далее – ДС1) (Приложение № 1 к ДС1), Дополнительным соглашением № 4 от 13.08.2019 (далее – ДС4) (Приложение № 2 к ДС4). 

В соответствии с пунктами 17.1., 17.2. Контракта, Исполнитель обязан по каждому этапу предоставлять заказчику учетную документацию на завершенные строительством Этапы. Исполнительная документация комплектуется и передается Заказчику на полный комплекс выполненных работ. Учетная документация по фактически выполненному этапу включает в себя: Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), исполнительную документацию, первичную бухгалтерскую документацию.

Согласно указанного Графика, Ответчик должен был выполнить работы в следующие сроки:

1.По этапу 1 (подэтап 1.6.) «Подготовительные работы 2018 года (вынос существующих сетей 6 кВ и кабелей 0,4 кВ, разборка существующего ограждения - 150 м, разборка тропы наряда - 225,6 м2)» в срок до 30.06.2018 г. Цена подэтапа 449 426,54 рублей.

2.По этапу 2 (подэтап 2.3.) «СФЗ в существующем здании 1» в срок до 30.09.2018г. Цена подэтапа 294 869,55 рублей.

3.По этапу 12 (подэтапы 12.3, 12.4) «Изоляционные работы. Стен карт №11, №12 (в том числе глиняный замок)» в срок до 30.09.2019 г. Общая цена подэтапов 17 351 797,09 рублей.

4.По этапу 13 (подэтап 13.2) «Обратная засыпка внутренней пазухи между картами №11, №12» в срок до 25.11.2019 г. Цена подэтапа 2 092 443,29 рублей.

5.По этапу 15 (подэтап 15.1) «Обратная засыпка пазух котлована карт №11, №12 » в срок до 25.11.2019 г. Цена подэтапа 3 322 656,49 рублей.

6.По этапу 18 (подэтап 18.2) «Устройство фундаментов для ангара карты №11 по осям "1-2" и "26» в срок до 25.11.2019 г. Цена подэтапа 1 655 776,91 рублей.

7.По этапу 19 (подэтап 19.2) «Устройство фундаментов для ангара карты №12 по осям "1-2" и "26» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 1 700 695,49 рублей.

8.По этапу 21 «Монтаж, испытание грузоподъемного оборудования в ангаре карты №11» в срок до 30.03.2020г. Цена этапа 719 709,50 рублей.

9.По этапу 22 (подэтапы 22.4, 22.5, 22.6, 22.8, 22.9, 22.10) «Монтаж ангара карты №12. 2019 год (колонны, подкрановые балки, фермы, связи, прогоны, ограждающие конструкции, покрытие, огнезащита металлоконструкций, бетонные полы, монтаж силового электрооборудования)» в срок до 25.11.2019. Общая цена подэтапов 21 697 370,48 рублей.  

10.По этапу 25 (подэтапы 25.1, 25.2, 25.3, 25.4) «Изоляционные работы. Стен карты №13 (в том числе глиняный замок)» в срок до 25.11.2019г. Общая цена поэтапов 11 333 802,76 рублей.

11.По этапу 26 (подэтапы 26.1, 26.2) «Устройство фундаментов для ангара карты №13 по осям "1" и "11» часть 1» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 1 893 156,61 рублей.

12.По этапу 27 «Подпорная стенка ПС3» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 518 145,36 рублей.

13.По этапу 28 «Обратная засыпка пазух котлована карты №13» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 4 429 671,04 рублей.

14.По этапу 30 «Подпорная стенка ПС9» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 3 849 133,31 рублей.

15.По этапу 32 (подэтапы 32.1, 32.2, 32.3, 32.4) «Наружные сети водоснабжения» в срок до 30.06.2019 г. Общая цена подэтапов 2 876 838,87 рублей.

16.По этапу 33 (подэтапы 33.10, 33.13, 33.14, 33.15, 33.17, 33.18, 33.20, 33.21) «Наружные сети водоотведения» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 19 709 733,18 рублей.

17.По этапу 34 (подэтапы 34.1, 34.2, 34.3) «Наружные сети связи» в срок до 30.06.2019 г. Общая цена подэтапов 638 007,85 рублей.

18.По этапу 35 «Строительство периметра защищённой зоны. 2019 год (ограждение территории - 250 м, тропа наряда - 224 м2)» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 4 578 594,73 рублей.

19.По этапу 37 (подэтапы 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.17, 37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.23, 37.24, 37.25, 37.26, 37.27, 37.28, 37.29, 37.30, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.35, 37.36) «Строительство здания 16» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 105 504 488,24 рублей.

20.По этапу 38 «Устройство температурно-усадочных швов подпорных стен ПС2 - ПС9» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 32 158,53 рублей. 

21.По этапу 40 «Монтаж, испытание грузоподъемного оборудования в здании №16» в срок до 25.11.2019 г. Цена этапа 436 491,67 рублей.

22.По этапу 41 (подэтап 41.5) «Накопительная емкость 100м3. Сооружение 14А» в срок 30.06.2019 г. Цена подэтапа 125 016,41 рублей.

23.По этапу 42 (подэтапы 42.3, 42.4, 42.5, 42.6) «Блок-контейнер для щитов управления насосами. Сооружение 14Б» в срок до 30.06.2019 г. Общая цена подэтапов 1 423 558,68 рублей.

24.По этапу 43 (подэтап 43.3) «КОС ЛС "Дамба". Сооружение 14В» в срок до 30.06.2019 г. Цена подэтапа 64 067,57 рублей.

25.По этапу 44 (подэтапы 44.4, 44.5) «Накопительная емкость 150м3. Сооружение 15А» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 3 373 092,52 рублей.

26.По этапу 45 (подэтапы 45.4, 45.5) «Блок-контейнер для щитов управления насосами. Сооружение 15Б» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 600 754,08 рублей.

27.По этапу 46 (подэтапы 46.3, 46.4) «Пожарный резервуар 2х70м3 (2соор.) Сооружение 17А, 17Б» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 3 105 646,53 рублей.

28.По этапу 47 (подэтапы 47.3, 47.4) «Септик "Тритон Н-25". Сооружение 18» в срок 30.06.2019 г. Общая цена подэтапов 1 734 060,72 рублей.

29.По этапу 48 (подэтапы 48.2, 48.3, 48.4) «Пожарный резервуар 2х82м3 (2соор.) Сооружение 19А, 19Б» в срок до 30.09.2019 г. Общая цена подэтапов 3 661 157,30 рублей.

30.По этапу 49 (подэтапы 49.1, 49.3, 49.4) «Наблюдательные скважины и высотная геодезическая сеть» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 3 486 968,87 рублей.  

31.По этапу 51 (подэтапы 51.1, 51.2) «Пожарный резервуар 2х82м3 (2соор.) Сооружение 20А, 20Б» в срок до 30.03.2020 г. Общая цена подэтапов 3 721 436,27 рублей. 

32.По этапу 52 (подэтапы 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6) «Монтаж ангара карты №11. 2020 год (вентиляция, двери, ворота, окна, система наружного водостока, отмостка, лотки, металлические площадки, лестницы, электроосвещение, технические средства охраны, физическая защита)» в срок до 30.03.2020 г. Общая цена подэтапов 13 023 515,58 рублей.

33.По этапу 53 (подэтапы 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6) «Монтаж ангара карты №12. 2020 год (вентиляция, двери, ворота, окна, система наружного водостока, отмостка, лотки, металлические площадки, лестницы, электроосвещение, технические средства охраны, физическая защита)» в срок до 30.03.2020 г. Общая цена подэтапов 12 393 916,00 рублей.

34.По этапу 54 (подэтапы 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.14, 54.15, 54.16) «Монтаж ангара карты №13. 2020 год (колонны, подкрановые балки, фермы, связи, прогоны, ограждающие конструкции, покрытие, огнезащита металлоконструкций, бетонные полы, монтаж силового электрооборудования, вентиляция, двери, ворота, окна, система наружного водостока, отмостка, лотки, металлические площадки, лестницы, электроосвещение, технические средства охраны, физическая защита)» в срок до 30.05.2020 г. Общая цена подэтапов 42 455 029,61 рублей.

35.По этапу 55 «Монтаж ограждения территории вокруг сооружений 14, 18» в срок до 30.03.2020 г. Цена этапа 343 513,33 рублей.

36.По этапу 56 «Тротуары» в срок до 30.05.2020 г. Цена этапа 1 010 243,21 рублей.

37.По этапу 57 «Озеленение территории» в срок до 30.05.2020 г. Цена этапа 3 098 611,50 рублей.

38.По этапу 58 «Лестницы» в срок до 30.05.2020 г. Цена этапа 551 476,45 рублей.

39.По этапу 59 «Водоотводные лотки» в срок до 30.05.2020 г. Цена этапа 2 332 263,97 рублей.

40.По этапу 60 «Малые архитектурные формы» в срок до 30.05.2020. Цена этапа 46 405,91 рублей.

41.По этапу 61 «Строительство периметра защищенной зоны. 2020 год (ограждение территории -344 м, ворота, тропа наряда - 336 м2, технические средства охраны, наружное охранное освещение) в срок до 30.05.2020 г. Цена этапа 14 604 818,26 рублей.

42.По этапу 62 «Проезды» в срок до 30.05.2020 г. Цена этапа 22 242 341,91 рублей.

43.По этапу 71 (подэтапы 71.1, 71.2, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7) «Вертикальная планировка. 2019 год» в срок до 25.11.2019 г. Общая цена подэтапов 10 405 910,08 рублей.

44.По этапу 72 (подэтапы 72.1, 72.2, 72.3) «Вертикальная планировка. 2020 год» в срок до 30.05.2020 г. Общая цена подэтапов 9 354 672,90 рублей.

Однако, Ответчиком были нарушены сроки выполнения работ.

Как указано истцом, в связи с неисполнением Ответчиком условий Контракта в части сроков выполнения работ, на основании соглашения сторон, в соответствии пп. в) п. 1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 25.09.2020 между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 5 к Контракту об исключении из Контракта части работ, а именно: этап 22 (подэтап 22.8  на сумму 570 299,40 рублей), (подэтап 22.9 на сумму 754 723,11 рублей), (подэтап 22.10 исключен полностью); этап 33 (подэтап 33.20 на сумму 650 219,01 рублей); этап 49 (подэтап 49.1 исключен полностью); этап 53 (подэтап 53.1 на сумму 568 755,64 рублей), (подэтап 53.2. на сумму 60 138,28 рублей), (подэтап 53.4 на сумму 878 026,27 рублей);  этап 54 (подэтап 54.6 на сумму 839 828,21 рублей), (подэтап 54.7 исключен в полном объеме), (подэтап 54.11 на сумму 687,08 рублей), (подэтап 54.14 на сумму 456 074,13 рубля); этапы 56, 57, 58, 59, 62 исключены в полном объеме; этап 56 исключен в полном объеме; из этапа 61 исключены работы на сумму 971 683,03 рубля. 

В соответствии с условиями дополнительного соглашения № 5 стоимость работ по контракту с учетом дополнительного соглашения № 5 составила 1 119 397 532руб. 88 коп.

С учетом уточнения размера исковых требований истец начислил  пени в размере 16 332 059 руб. 76 коп.

В соответствии с п. 32.1 Контракта Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия об исполнении обязательств по Контракту и уплате пени от 07.07.2020 г. № 319-4/3784. В ответ на данную претензию Ответчик представил ответ-возражения от 20.07.2020 г. № 200-10/1-3/9415, где указал, что считает требования необоснованными, в связи с тем, что часть работ Ответчиком не выполнена в срок по независящим от него причинам.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответственность за нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по Контакту в соответствии с Графиком исполнения предусмотрена пунктом 28.8 Контракта, согласно которому Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ответчик исковые требования не признает, согласно доводам изложенным в отзыве, заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявления, являются несостоятельными, поскольку не соответствуют нормам права, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора и фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате  неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации за потери, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним.

Судом с учетом заявления ответчика о несоразмерности  заявленных требований размер заявленной истцом неустойки снижен до 14 329 598 руб. 70 коп. м учетом ставки ЦБ РФ 4,25%.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 15,  309, 310, 330, 333 ГК РФ, ст.ст.  65, 110,  156, 167, 170, 171, 176, 180, 181  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН" в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ" неустойку в размере 14 329 598 руб. 70 коп. (Четырнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей семьдесят копеек) , расходы по оплате госпошлине в размере 94 648 руб. (Девяносто четыре тысячи шестьсот сорок восемь рублей).

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 10 012 руб. (Десять тысяч  двенадцать рублей). 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова