Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-274152/19-14-1948

г. Москва

23 января 2020 года

Резолютивная часть объявлена 16 января 2020 г.

Дата изготовления решения в полном объеме             23 января 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе 

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. 

Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи 

рассмотрев дело по иску ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ОГРН 

<

***>) 

к ответчику АО "ГИПРОКИСЛОРОД" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 26 458 567,05 рублей. 

 

при участии представителей:  

от истца – ФИО1 приказ от 03.11.2014г. 

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 21.10.2019г. 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «ГИПРОКИСЛОРОД» о взыскании суммы задолженности в размере 25 995 981,03 руб., процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 462 586,02 руб.

В судебном заседании представитель истца огласил пояснения по иску, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признал, возражал по доводам представителя истца, огласил отзыв на иск.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению полностью по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 26.01.2016 г. между АО «ГИПРОКИСЛОРОД» и ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» был заключен договор № 15032/12252С3 на разработку проектной и рабочей документации для строительства Объекта «Терминал по производству и перезагрузке СРГ в порту Высоцк. Этап III».

Согласно п. 2.1 договора, в соответствии с условиями настоящего договора генпроектировщик поручает, обязуется принять и оплатить, а подрядчик обязуется выполнить Проектные работы по проектированию, в том числе, но не ограничиваясь:

2.1. Разработать Проектную и Рабочую документацию для строительства Объекта. Конкретные разделы Проектной и Рабочей документации, требования к ним определены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору). В рамках работ по разработке ПД и РД подрядчик обязуется:

2.1.1.4. Разработать Рабочую документацию для строительства Объекта по разделам в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и Проектной документацией, получившей положительное заключение ГГЭ.

В соответствии с п. 3.1 договора, сроки выполнения работ по договору установлены в Календарном плане выполнения Проектных работ (Приложение № 3 к договору).

Дополнительными соглашениями № 1 от 10.02.2016 г. и № 2 от 01.03.2019 г. в Календарный план выполнения проектных работ вносились изменения. Календарный план выполнения проектных работ принимался в новой редакции. Последняя редакция Календарного плана выполнения работ - Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 01.03.2019 г.

ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» надлежащим образом исполнило взятые на себя обязательства, выполнил работы по договору и передал их ответчику, что подтверждается следующими документами:

- по Этапу 7 Акт приема-передачи документации № 6 от 14.03.2018 г. (с перечнем препровождающей документации), передаточный документ № 7701/25Р-01-5530 от 03.07.2018 г. (с отметкой о получении документации); № 77-01/25Р-01-1143 от 06.02.2019;

- по Этапу 8 Акт приема-передачи документации № 7 от 08.06.2018 г., передаточные документы № 7701/25Р-01-5531 от 03.07.2018 г. (с отметкой о получении документации), № 77-01/25Р-01-1143 от 06.02.2019 г.;

- по Этапу 9 Передаточный документ № 7701/25Р-01-5532 от 03.07.2018 г. (с отметкой о получении документации), № 77-01/25Р-01-1143 от 06.02.2019 г.;

- по Этапу 10 Передаточный документ № 77-01/25Р-01-1195 от 06.02.2019 г.

Согласно п. 2.5 договора, документов подтверждающим выполнение подрядчиком проектных работ по договору (за исключением работ, выполняемых в течение Гарантийного срока) является подписание сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

Подтверждением выполнения истцом работ в полном объеме и надлежащем качестве являются:

- по Этапу 7 Акт № 7 сдачи-приемки выполненных Проектных работ от 14.03.2018 г. на сумму 57 395 200 руб.;

- по Этапу 8 Акт № 8 сдачи-приемки выполненных Проектных работ от 08.06.2018 г. на сумму 57 395 200 руб.;

- по Этапу 9 Акт № 9 сдачи-приемки выполненных Проектных работ от 10.10.2018 г. на сумму 57 395 200 руб.;

- по Этапу 10 Акт № 10 сдачи-приемки выполненных Проектных работ от 28.12.2018 г. на сумму 18 301 790,56 руб.

В соответствии с указанными Актами сдачи-приемки выполненных работ ответчик подтвердил, что переданная Рабочая документация удовлетворяет условиям договора и Технического задания и оформлена надлежащим образом. Истец выполнил работы по Этапу 7 - Этапу 10 на общую сумму 190 487 390,56 руб.

Согласно п. 7.1.8 договора, генпроектировщик обязан оплатить подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором.

В соответствии с п. 5.1.1, п. 5.1.2 договора (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.02.2016 г.) платежи генпроектировщика подрядчику определяются в соответствии с Графиком платежей по Проектным работам. Оплата производится поэтапно на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Проектных работ по соответствующему этапу Календарного плана выполнения Проектных работ (Приложение № 3 к договору) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика после получения денежных средств от генподрядчика за выполнение соответствующей части Проектных работ, но не позднее 180 календарных дней с момента подписания указанного выше Акта.

В соответствии с п. 5.1.3 договора, генпроектировщик производит удержание в размере 10% от стоимости каждого этапа работ, подлежащей оплате подрядчику за выполненные Проектные работы по соответствующему этапу работ. Удержанные суммы выплачиваются подрядчику в порядке, предусмотренном п. 5.1.4 договора.

На основании п. 5.1.4.2 договора, одна половина суммы удержаний, произведенных генпроектировщиком из платежей за проектные работы, относящиеся к разработке рабочей документации, выплачиваются подрядчику после получения денежных средств от генподрядчика, но не позднее 180 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу № 10 Календарного плана выполнения Проектных работ.

Согласно п. 5.1.2 и п. 5.1.4.2 договора и Графика платежей по Проектным работам предельный срок оплаты выполненных работ по Этапу 10 «Рабочая документация 26.06.2019 г., предельный срок оплаты первых 50% от суммы удержаний по Этапам РД (по Этапу 7 - Этапу 10) - 26.06.2019 г.

Таким образом, ответчик обязан был по состоянию на 26.06.2019 г. произвести расчет с ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» за выполненные работ по договору:

- оплатить 90: от стоимости работ по Этапу 7 - Этапу 10 в сумме 171 438 651,50 руб.;

- оплатить первые 50% от суммы удержаний по Этапам РД (Этапу 7 - Этапу 10) в сумме 9 524 369,53 руб.;

В нарушение п. 2.1, п. 7.1.8, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.1.4.2 договора, ответчик выполнил свои обязательства по договору в части оплаты не в полном объеме.

По Этапу 7 - Этапу 9 Календарного плана выполнения работ, работы оплачены в соответствии с п. 5.1.3 частично в размере 90% от стоимости каждого этапа работ (с учетом удержания 10%) в сумме 154 967 040 руб.

До настоящего времени ответчик не произвел оплату Работ, выполненных по Этапу 10 Календарного плана выполнения работ в сумме 16 471 611,50 руб. с НДС (с учетом удержания согласно п. 5.1.3 договора); первых 50% от суммы удержаний по Этапам РД (по Этапу 7 - Этапу 10) в сумме 9 524 369,53 руб.

По состоянию на 23.09.2019 г. общая сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 25 995 981,03 руб. с НДС.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 711 ГК РФ предусмотрено, что сдача заказчику результата работ является основанием возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены доказательства погашения спорной задолженности.

При указанных обстоятельствах исковые требования в части взыскания долга подлежат удовлетворению в сумме 25 995 981,03 руб.

Также истцом заявлено требование о взыскании суммы процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 462 586,02 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Расчет процентов судом проверен, ответчиком не оспорен и подлежит удовлетворению судом в полном объеме.

Доводы отзыва ответчика судом внимательно изучены и подлежат отклонению, как противоречащие фактическим обстоятельствам дела и основанные на неправильном толковании норм материального права.

В силу п. 6 ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Ответчик в возражение исковых требований ссылается, что между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 3 к договору, в соответствии с которым, стороны пришли к соглашению, что «Оплата первых 50% от суммы удержаний по этапам РД после выполнения всех этапов работ по РД» и работы по Этапу 10 «Рабочая документация. Сметная документация и ведомости объемов работ», предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) будут оплачены Генпроектировщиком с учетом применения понижающего коэффициента в размере 0,85 к стоимости оплаты первых 50% от суммы удержаний и к стоимости работ по Этапу 10 согласно п. 4 Дополнительного соглашения.

Пунктом 4 Дополнительного соглашения предусмотрено, что ответчик обязуется уплатить Истцу сумму 22 096 583,88 руб., в том числе НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления наиболее поздней из дат:

- подписания настоящего Дополнительного соглашения последней из двух Сторон, при этом, данная дата указывается в п. 8 настоящего Дополнительного соглашения (рядом с подписью уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения лица);

- предоставления подрядчиком генпроектировщику оригинала корректирующего счета-фактуры на изменение стоимости выполненных работ по Этапу 10 и подписания сторонами оригинала акта сдачи-приемки выполненных Проектных работ№ 10 от 28.12.2018 г.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статьи 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Пунктом 3 статьи 434 ГК РФ установлено, что письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (пункт 3 статьи 438 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьей 68 АПК РФ установлено, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Судом не принимается ссылка ответчика на якобы заключенное между сторонами дополнительное соглашение № 3, поскольку такое соглашение сторонами не заключалось и не было оформлено в порядке, предусмотренном условиями спорного договора (п. 1.14, п. 21.1, п. 23.2, п. 24.1.7) и действующего законодательства.

Оригинал указанного дополнительного соглашения № 3 сторонами двусторонне не подписан, из текста приложенной копии невозможно установить дату его подписания; ответчиком оригинал данного дополнительного соглашения суду и в материалы дела не представлен.

Таким образом, ответчик, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ, не представил надлежащих, достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих факт заключения дополнительного соглашения № 3 между сторонами спора.

С учетом изложенного, заявленные требования требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина распределяется по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "ГИПРОКИСЛОРОД" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ОГРН 

<

***>) 25 995 981,03руб. – задолженности, 462 586,02руб. – процентов и 155 293руб. – государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Судья: О.В. Лихачева