АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

28 июля 2021 года

Дело № А33-15112/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 21 июля 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 28 июля 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 04.02.2013, Красноярский край, г. Норильск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 23.03.2004, Красноярский край, г. Норильск)

о взыскании задолженности и процентов, 

в присутствии от истца: ФИО1, по доверенности от 20.04.2021,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору № 45/2017 от 18.09.2017 в размере 10 712 411,92 руб., процентов в размере 1 189 850,59 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 17.06.2021 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание явку представителей не обеспечил. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца настаивала на  требованиях по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" (заказчик) 18.09.2017 заключен договор № 45/2017, подписано дополнительное соглашение от 14.11.2017.

В соответствии с пунктом 1.1 договора заказчик, являясь ответственным за эксплуатацию лифта, поручает, а подрядчик в качестве специализированной  лифтовой  организации,  обязуется  в  соответствии  с  Правилами организации   безопасного   использования   и   содержания лифтов, подъемных   платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся  пешеходных дорожек)  и  эскалаторов, за исключением  эскалаторов  в  метрополитенах,  утвержденными  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года № 743 (далее по тексту - Правила); в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824; ГОСТ Р 53780-2010             «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты.  Общие требования безопасности при эксплуатации»; СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» выполнить работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту лифта и диспетчерского оборудования (далее лифтового оборудования и ЛДСС), по адресам, указанным в приложении № 2 к договору, являющимся неотъемлемой его частью. Заказчик ежемесячно оплачивает подрядчику фактически выполненные работы, на условиях, предусмотренных договором, а также обязуется   создать   необходимые   условия для надлежащего выполнения подрядчиком работ, предусмотренных договором с учётом требований Регламента.

Согласно пункту 5.1 договора стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов определяется на основании приложения № 1 к договору, являющегося его неотъемлемой частью. Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения.

В силу пункта 5.2 договора стоимость выполняемых работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования в период 01.09.2017 по 31.12.2017, составляет в месяц за один лифт: 9 000,00 руб. без НДС.

Пунктом 5.3. договора (в редакции дополнительного соглашения) предусмотрено, что расчеты за выполненные работы согласно подпункту 5.1, 5.2 производятся в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании ежемесячных актов выполненных работ и выставленного счета. Оплата производится путем перечисления заказчиком платежным поручением на расчетный счет подрядчика денежных средств в размере 5,87% от денежных средств, поступивших на расчетный счет заказчика за услугу "содержание и ремонт" по домам оборудованным лифтами за отчетный период".

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим в Российской Федерации законодательством (пункт 7.2 договора).

На основании пункта 8.1 договора все споры, возникшие по договору, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не урегулирования в течение трёх месяцев, в установленном законодательством порядке.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ от 30.06.2018 № 6, от 31.07.2018 № 7, от 31.08.2018 № 8, от 30.09.2018 № 9, от 31.10.2018 № 10, от 30.11.2018 № 11, от 31.12.2018 № 12, от 31.01.2019 № 1, от 28.02.2019 № 2, от 31.03.2019 № 3, от 30.04.2019 № 4, от 31.05.2019 № 5, от 30.06.2019 № 6, от 31.07.2019 № 7, от 31.08.2019 № 8, от 30.09.2019 № 9, от 31.10.2019 № 10, от 30.11.2019 № 11, от 31.12.2019 № 12, от 31.01.2020 № 1, от 29.02.2020 № 2, от 31.03.2020 № 3, от 30.04.2020 № 4, от 31.05.2020 № 5, от 30.06.2020 № 6, от 31.07.2020 № 7, от 31.08.2020 № 8, от 30.09.2020 № 9, от 31.10.2020 № 10, от 30.11.2020 № 11, от 31.12.2020 № 12, от 31.01.2021 № 1, от 28.02.2021 № 2, от 31.03.2021 № 3, от 30.04.2021 № 4.

Задолженность за период с января 2020 года по апрель 2021 года составляет 10 712 441,92 руб.   

Заказчиком допущена просрочка оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по указанным актам, в связи с чем подрядчик начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за общий период с 31.07.2018 по 07.06.2021 в сумме 1 189 850,59 руб.

В претензии от 27.08.2020 № 175 подрядчик просил оплатить задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами. Претензия вручена заказчику 28.08.2020      (вх. № 2621).

Заказчик в ответ на претензию в письме от 03.09.2020 № 2550 сообщил, что намерен произвести оплату задолженности в максимально кратчайшие сроки.

Задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами не оплачены, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Из материалов дела следует, что между обществом с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" (заказчик) 18.09.2017 заключен договор № 45/2017, подписано дополнительное соглашение от 14.11.2017.

Договор является смешанным договором, содержащим признаки договора возмездного оказания услуг и договора подряда. К возникшим на основе заключенного договора правоотношениям применимы положения глав 37, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В силу статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, общие положения о подряде (статьи 702 - 729) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ от 30.06.2018 № 6, от 31.07.2018 № 7, от 31.08.2018 № 8, от 30.09.2018 № 9, от 31.10.2018 № 10, от 30.11.2018 № 11, от 31.12.2018 № 12, от 31.01.2019 № 1, от 28.02.2019 № 2, от 31.03.2019 № 3, от 30.04.2019 № 4, от 31.05.2019 № 5, от 30.06.2019 № 6, от 31.07.2019 № 7, от 31.08.2019 № 8, от 30.09.2019 № 9, от 31.10.2019 № 10, от 30.11.2019 № 11, от 31.12.2019 № 12, от 31.01.2020 № 1, от 29.02.2020 № 2, от 31.03.2020 № 3, от 30.04.2020 № 4, от 31.05.2020 № 5, от 30.06.2020 № 6, от 31.07.2020 № 7, от 31.08.2020 № 8, от 30.09.2020 № 9, от 31.10.2020 № 10, от 30.11.2020 № 11, от 31.12.2020 № 12, от 31.01.2021 № 1, от 28.02.2021 № 2, от 31.03.2021 № 3, от 30.04.2021 № 4.

Каких-либо замечаний по объемам выполненных работ (оказанных услуг), их стоимости ответчиком не указано, претензий к качеству выполненных работ (оказанных услуг) - не заявлено. Принятие выполненных работ (оказанных услуг) подтверждается подписью руководителя ответчика и заверено печатью заказчика.

Задолженность за период с января 2020 года по апрель 2021 года составляет 10 712 441,92 руб.   

В связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательства по оплате задолженности истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за общий период с 31.07.2018 по 07.06.2021 в сумме 1 189 850,59 руб.

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 4.3 договора заказчик оплачивает оказанные услуги по факту выполненных работ, исходя из фактически заготовленного объема, в течение 3 банковских дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг и выставления исполнителем счета на оплату. По соглашению сторон возможна предоплата.

Учитывая, что со стороны ответчика имела место просрочка исполнения обязательства по оплате работ/услуг, суд пришел к выводу об обоснованности требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчиком, представленные истцом доказательства, не опровергнуты, возражений по существу – не заявлено (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Соблюдение истцом претензионного порядка разрешения спора подтверждается материалами дела.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-рации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения дела с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 82 511,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 23.03.2004, г. Норильск)                      в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 04.02.2013, г. Норильск) 10 712 411,92 руб. задолженности, 1 189 850,59 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 82 511,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова