АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2019 года

Дело № А33-9609/2019

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 20 июня 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 25 июня 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального государственного унитарного предприятия «Главное промышленно-строительное управление» Федеральной службы исполнения наказаний (ИНН 5919420184, ОГРН 1025901972470, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский импорт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Абакан, Республика Хакасия)

о взыскании неустойки,

в присутствии:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 09.01.2019 № 1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,

установил:

федеральное государственное унитарное предприятие «Главное промышленно-строительное управление» Федеральной службы исполнения наказаний (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский импорт» (далее – ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору субподряда от 12.05.2017 № 46-р с 01.07.2017 по 27.07.2017 в размере 309 468 руб. 43 коп.; с 01.08.2017 по 23.05.2018 в размере 3 392 690 руб. 94 коп., а всего 3 702 159 руб. 37 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 03.04.2019 возбуждено производство по делу.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебное заседание проводится в его отсутствие.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (генподрядчик) и ответчиком (субподрядчик) на основании протокола подведения итогов от 11.05.2017 №360 подписан договор субподряда от 12.05.2017 №46-р (далее – договор), по условиям которого Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить строительно-монтажные работы по устройству переходной галереи (общестроительные работы, отопление, электромонтажные работы, сети связи) со стоимостью материалов на строительном объекте: «Тюрьма (г. Минусинск, Красноярский край), реконструкция учреждения» (далее - объект), в соответствие с условиями договора, технической документацией, локальным сметным расчетом № 02-01-02 «Общестроительные работы. Переходная галерея» (приложение № 1 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-07 «Отопление. Переходная галерея» (приложение № 2 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-09 «Электроснабжение и электроосвещение. Переходная галерея» (приложение № 3 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-10 «Охранно-пожарная сигнализация (СОТС2.С). Переходная галерея» (приложение № 4 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-11 «Пожарная сигнализация. Переходная галерея» (приложение № 5 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-12 «Система контроля и управления доступом (СКУД). Переходная галерея» (приложение № б к договору), локальным сметным расчетом № 02-07-14 «Видеонаблюдение. Переходная галерея» (приложение № 7 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-02/2 «Общестроительные работы. Переходная галерея» (приложение № 8 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-07/1 «Отопление переходной галереи» (приложение № 9 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-09/2 «Электроснабжение и электроосвещение переходной галереи» (приложение № 10 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-10/3 «Охранная и тревожная- сигнализация. Переходная галерея» (приложение № 11 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-11/2 «Пожарная сигнализация. Переходная галерея» (приложение № 12 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-12/2 «Система контроля и управления доступом (СКУД). Переходная галерея» (приложение № 13 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-14/3 «Видеонаблюдение» (приложение № 14 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-16/2 «Монтаж лифтов. Переходная галерея» (приложение № 15 к договору), локальным сметным расчетом № 02-01-02-3 «Корректировка ЛСР» (приложение № 16), являющимися неотъемлемой   частью   договора,   а   генподрядчик   обязуется   создать   субподрядчику необходимые условия для выполнения, принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную договором цену (пункт 1.1 в редакции дополнительного соглашения от 22.05.2018 №6).

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что субподрядчик выполняет работы своими силами и средствами, с использованием своего оборудования, инструментов, материалов и строительных конструкций, не обремененных правами третьих лиц.

Пунктом 2.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента подписания договора, окончание выполнения работ: «30» июня 2017 года.

Генподрядчик обязался: 

- передать субподрядчику на весь срок производства работ строительную площадку (участок на строительной площадке) необходимый для выполнения работ, площадь и состояние которого соответствуют содержащимся в договоре условиям, а при отсутствии таких условий, обеспечивающем своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок, по акту-допуску унифицированной формы (пункт 4.1.1 договора);

- передать субподрядчику техническую документацию со штампом «В производство работ» в 1 экземпляре, необходимую для производства работ, за подписью ответственного лица, назначенного приказом (пункт 4.1.2 договора);

- в течение 10 рабочих дней с момента поступления извещения субподрядчика о готовности результата работ к приемке, принять результат выполненных работ, подписать акты выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и один экземпляр указанных документов направить субподрядчику, либо отказаться от подписания акта и справки и направить субподрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ (пункт 4.1.5 договора);

- оплатить субподрядчику выполненные работы, результат которых соответствует требованиям выданной технической документации, условиям договора о качестве и объеме, иным условиям договора, а также соответствует требованиям технических регламентов, строительных норм и правил и иных обязательных стандартов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для результата работ такого рода, в том числе требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации об энергосбережении и энергоэффективности, в порядке, установленном разделом 3 договора (пункт 4.1.6 договора).

Субподрядчик обязался выполнить работы качественно, в объеме и содержании, в соответствие с условиями договора и требованиями, установленными технической документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и иными обязательными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации к результату работ такого рода, в том числе требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации об энергосбережении и энергоэффективности, а при отсутствии и (или) неполноте таких требований и условий, в соответствие с требованиями, обычно предъявляемыми к такому результату работ, и сдать результат выполненных работ, в порядке, установленном настоящим договором (пункт 4.3.9 договора).

В силу пункта 5.12 договора, в течение 10 рабочих дней генподрядчик проводит приемку выполненных в соответствующем месяце работ и по результатам приемки подписывает акт о приемки выполненных работ (формы КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и по одному экземпляру направляет субподрядчику, либо в такой же срок составляет и направляет субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ, содержащий указание на перечень выявленных в ходе приемки недостатков и/или отступлений.

В силу пункта 2.2 договора, работы считаются выполненными в соответствующей части, после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2).

Пунктом 3.2.4 договора предусмотрено, генподрядчик, оплачивает выполненные работы, отраженные в завершающем акте, в течение 10 рабочих дней, с момента приемки выполненных работ, с учетом подпункта 3.2.6 договора.

В соответствии с пунктом 3.1 договора, цена выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом (приложения № 1 к договору) и является твердой в течение всего срока действия договора. 

Общая стоимость (цена) работ составляет 22 923 587,42 (двадцать два миллиона девятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 42 копейки, в том числе НДС - 3 496 818 руб. 42 копейки, и включает в себя причитающееся Субподрядчику вознаграждение и все издержки Субподрядчика, необходимые для выполнения работ, обусловленных договором, в том числе на приобретение материалов, изделий, конструкций и оборудования необходимого для выполнения работ, их доставку на объект, погрузочно-разгрузочные работы, издержки на доставку персонала на объект и обратно, на выполнение  работ, на уборку объекта, погрузку, разгрузку и переработку строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, издержки на обеспечение спецтехникой, иные издержки, в том числе на выполнение дополнительных, не учтенных технической документацией и/или сметой работ, расходы на электроснабжение, с учетом расходов на страхование, уплату налогов сборов и иных обязательных платежей (пункт 1.3 договора в редакции дополнительного соглашения от 22.05.2018 №6).

Согласно пункту 3.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 15.05.2017 №1, генподрядчик в течение 10 дней, с момента подписания договора, производит уплату субподрядчику аванса в размере 30% от общей стоимости работ, предусмотренные в пункте 1.3 договора, что в абсолютном выражении составляет 6 776 010,29 руб. на основании выставленного субподрядчиком счета на оплату. Окончательный расчет в размере 70% стоимости фактически выполненных работ генподрядчик производит субподрядчику в следующем порядке:

- после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые оформляются и предоставляются субподрядчиком до 20-го числа отчетного месяца, в порядке, установленном разделом 5 договора, генподрядчик производит оплату работ, выполненных субподрядчиком в соответствующем месяце работ, в течение 10 рабочих дней, с учетом положений подпунктов 3.2.6 договора (пункт 3.2.1 договора);

- последний (завершающий) акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставляются субподрядчиком в конечный срок выполнения работ (пункт 3.2.2 договора).

Дополнительным соглашением №2 от 09.06.2017 к договору стороны установили, что генподрядчик в течение 5 дней, с момента подписания соглашения производит уплату субподрядчику аванса, в размере 20% от общей стоимости работ, предусмотренные в пункте 1.3 договора, что в абсолютном выражении составляет 4 517 340,19 руб. на основании выставленного субподрядчиком счета на оплату. Погашение настоящего авансового платежа, выплаченного генподрядчиком, осуществляется субподрядчиком, единовременно, в июне 2017 года, на основании актов о приемке выполненных работ, формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ н затрат, формы КС-3, которые субподрядчик обязан предоставить генподрядчику в соответствие с пунктом 3.2 договора.

Дополнительным соглашением №3 от 26.06.2017 к договору стороны установили, что генподрядчик в течении 5 дней с момента подписания соглашения, производит оплату субподрядчику аванса в размере 1 500 000 руб. на основании выставленного субподрядчиком счета на оплату. Погашение данного авансового платежа осуществляется субподрядчиком единовременно, в июне 2017 года, на основании актов о приемке выполненных работ, формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат, формы КС-3, которые субподрядчик обязан предоставить генподрядчику в соответствии с пунктом 3.2 договора.

Дополнительным соглашением №4 от 26.06.2017 к договору стороны установили, что генподрядчик в течении 5 дней с момента подписания соглашения, производит оплату субподрядчику аванса в размере 2 000 000 руб. на основании выставленного субподрядчиком счета на оплату. Погашение данного авансового платежа осуществляется субподрядчиком единовременно, в июне 2017 года, на основании актов о приемке выполненных работ, формы КС-2, и справок о стоимости выполненных работ и затрат, формы КС-3, которые субподрядчик обязан предоставить генподрядчику в соответствии с пунктом 3.2 договора

В силу пункта 7.3 договора, за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик несет ответственность в виде неустойки, в размере 0,05 % от общей стоимости работ, установленной пунктом 1.3 договора, за каждый день просрочки исполнения.

Генподрядчик, вправе применить гарантийное удержание, в размере 5% от суммы, подлежащей уплате субподрядчику, по актам о приемки выполненных работ (формы КС-2) и справкам о приемке выполненных работ (формы КС-3), оформляемым в соответствие с подпунктами 3.2.1, 3.2.2 договора (пункт 3.2.6 договора). Суммы, удержанные генподрядчиком при оплате работ, в качестве гарантийного удержания, выплачиваются генподрядчиком субподрядчику в срок до «30» июля 2018 года (пункт 3.2.7 договора в редакции дополнительного соглашения от 22.05.2018 №6).

Уплата неустойки осуществляется после предъявления заинтересованной стороной претензии, ответ на которую должен быть дан в срок, не превышающий 10 дней, с момента ее получения (пункт 7.11 договора).

В материалы дела представлены утвержденные сторонами локальные сметные расчеты.

Платежным поручением от 15.05.2017 №746 истец перечислил ответчику 6 776 010,29 руб., от 09.06.2017 №938 – 4 517 340,19 руб., от 26.06.2017 №1049 – 1 500 000 руб., от 29.06.2017 №1082 – 2 000 000 руб. 

Сторонами подписаны акты приемки выполненных работ:

- от 10.06.2017 №1 на сумму 816 136,38 руб.,

- от 10.06.2017 №2 на сумму 2 123 216,48 руб.,

 - от 30.06.2017 №3 на сумму 10 637 881,72 руб.,

- от 30.06.2017 №4 на сумму 3 286 794,42 руб.,

- от 30.06.2017 №5 на сумму 1 016 657,32 руб..

- от 11.06.2017 №6 на сумму 321 808,42 руб.,

- от 30.06.2017 №7 на сумму 425 400,62 руб., 

- от 30.06.2017 №8 на сумму 163 389,88 руб., 

- от 30.06.2017 №10 на сумму 172 688,28 руб., 

- от 30.06.2017 №11 на сумму 108 797,18 руб., 

- от 22.08.2017 №12 на сумму 405 642, 70 руб.,

- от 26.09.2017 №12/1 на сумму 139 812,30 руб.,

- от 22.08.2017 №13 на сумму – 4 730,62 руб.,

- от 22.08.2017 №14 на сумму 108 305,12 руб.,

- от 26.09.2017 №14/1 на сумму 19 556,14 руб.,

- от 22.08.2017 №15 на сумму 40 604,98 руб. 

- от 26.09.2017 №15/1 на сумму 3 642,66 руб.,

- от 26.09.2017 №16 на сумму 130 280,26 руб.,

- от 26.09.2017 №16/1 на сумму – 63544,18 руб.,

- от 26.09.2017 №17 на сумму 102 222,22 руб.,

- от 26.09.2017 №17/1 на сумму 39 161,84 руб.,

- от 26.09.2017 №18 на сумму 37 774,16 руб.,

- от 26.09.2017 №18/1 на сумму 142 542,82 руб.,

- от 26.09.2017 №19 на сумму 274 174,18 руб.,

- от 26.09.2017 №19/1 на сумму 335 878,74 руб.,

- от 23.05.2018 №20 на сумму 1 955 282,42 руб. 

Сторонами подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат:

- от 10.06.2017 №1 на сумму 2 939 352,86 руб.,

- от 30.06.2017 №2 на сумму 10 637 881,72 руб., 

- от 30.06.2017 №3 на сумму 5 679 747,10 руб.,

- от 22.08.2017 №4 на сумму 549 822,18 руб., 

- от 26.09.2017 №5 на сумму 1 161 501,14 руб.,

От 23.05.2018 №6 на сумму 1 955 282,42 руб. 

В претензии от 16.02.2018 №137/2-556 истец просил ответчика оплатить 652 848 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком работ в установленный договором и дополнительными соглашениями к нему срок, истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору субподряда от 12.05.2017 № 46-р с 01.07.2017 по 27.07.2017 в размере 309 468 руб. 43 коп.; с 01.08.2017 по 23.05.2018 в размере 3 392 690 руб. 94 коп., а всего 3 702 159 руб. 37 коп.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу положений статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По своей правовой природе заключенный сторонами договор является договором строительного подряда, отношения сторон регулируются его положениями, а также нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими нормами об обязательствах части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В силу пункта 7.3 договора, за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик несет ответственность в виде неустойки, в размере 0,05 % от общей стоимости работ, установленной пунктом 1.3 договора, за каждый день просрочки исполнения.

Пунктом 2.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента подписания договора, окончание выполнения работ: «30» июня 2017 года.

На основании пункта 7.3 договора за нарушение сроков выполнения работ истцом начислена неустойка в сумме 3 702 159,37 руб.:

- за период с 01.07.2017 по 27.07.2017 в размере 309 468 руб. 43 коп.; 

- за период с 01.08.2017 по 23.05.2018 в размере 3 392 690 руб. 94 коп.

Расчет истца судом проверен. Расчет составлен верно, ответчиком не оспорен.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, требование истца о взыскании неустойки, рассчитанной на основании пункта 7.3 договора, заявлено истцом обосновано и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский импорт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Абакан, Республика Хакасия) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 3 702 159 рублей 37 копеек пени, а также 16 057 рублей  расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский импорт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Абакан, Республика Хакасия) в доход федерального бюджета 25 454 рубля государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.Н. Мальцева