АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело А27-684/2024

 

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

 

22 мая 2024 года                                                                                                          г. Кемерово

Резолютивная часть решения суда объявлена 07 мая 2024 г.

Решение суда в полном объеме изготовлено 22 мая 2024 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Н.К. Фуртуна, при ведении протокола секретарем судебного заседания В.А. Федосовой, рассмотрев в судебном заседании дело  по исковому заявлению департамента лесного комплекса Кузбасса (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Деловое партнерство» о взыскании неустойки по договору от 23.05.2022 № 13 в сумме 366240 руб.

  при участии:

  от истца – ФИО1, доверенность от 11.01.2024, 

у с т а н о в и л:

Департамент лесного комплекса Кузбасса (далее – истец, департамент) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Деловое партнерство» (далее – ответчик, общество) о взыскании неустойки по договору от 23.05.2022 № 13 в сумме 366240 руб. за нарушение условий договора купли - продажи лесных насаждений от 23.05.2022 № 13, выразившееся в невыполнении очистки лесосеки от порубочных остатков.

Требования мотивированы тем, что ответчик не произвел очистку лесосеки от порубочных остатков, что подтверждается актом заключительного осмотра лесосеки от 14.09.2023 № 11.

В судебном заседании представитель истца на иске настаивал.

Ответчик о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом,  отзыв на заявление не представлен, им представлены возражения в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, требования по существу не оспорены.

В соответствии со ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные доказательства, заслушав пояснения представителя истца, суд считает следующее.

Между департаментом лесного комплекса Кузбасса (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Деловое партнерство» (арендатор) 23.05.2022 заключен договор купли-продажи лесных насаждений № 13 (далее – договор), согласно которому Продавец обязуется передать лесные насаждения, расположенные на землях, находящихся в федеральной собственности, в собственность Покупателю для заготовки древесины в соответствии с частью 4 ст. 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а Покупатель обязуется принять лесные насаждения и уплатить за них плату в соответствии с разделом III Договора. Местоположение лесных насаждений: Кемеровская область. Ведовское лесничество, Евтинское участковое лесничество, урочище МО «Менчерепское с/п», квартал № 4 (выдел 29), лесосека № 1.

В соответствии с пунктом 7, 8 сроки и условия вывоза древесины одновременно с заготовкой, до 22 мая 2023 г.; очистка лесосеки от порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой древесины следующим способом: сбор порубочных остатков в валы и кучи для последующего перегнивания в следующие сроки - до 22 мая 2023 г

Подпунктом «в» пункта 15 Договора установлена обязанность Покупателя соблюдать правила заготовки древесины, ухода за лесами, пожарной безопасности в лесах, санитарной безопасности в лесах, а также заготовки и cбора не древесных лесных ресурсов в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. 

Согласно подпункту «е» пункта 15 Договора Покупатель обязан обеспечить вывоз древесины в срок, установленный Договором. 

На основании подпункта «ж» пункта 15 Договора Покупатель обязан осуществлять выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков в срок, установленный пунктом 8 Договора, в соответствии с правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации лесничествах, установленными в соответствии с частью 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации, правилами ухода за лесами, установленными в соответствии с частью 3 статьи 64 Лесного кодекса Российской Федерации, правилами санитарной безопасности в лесах, установленными в соответствии с частью 3 статьи 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, правилами заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, установленными в соответствии с частью 5 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации, а также видами лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, установленными в соответствии с частью 4 статьи 16.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

Согласно акту от 14.09.2023 № 11 заключительного осмотра лесосеки произведен осмотр места осуществления лесосечных работ (осмотр лесосеки) в квартале № 4 лесотаксационном выделе (ах) № 29, выполненных на основании: Договор купли-продажи лесных насаждений от 23.05.2022 г. № 13, в рамках которого установлено наличие на лесосеке порубочных остатков на площади 8,4 Га.

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия от 13.10.2023 № 210, которая в добровольном порядке не удовлетворена, что послужило основанием для обращения Департамента в Арбитражный суд Кемеровской области с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктами 1, 9 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. Правила заготовки древесин устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В силу подпункта «к» пункта 12 Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки.

Согласно подпункту в статьи 20 Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», в лесах не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации.

Сопоставив условия договора в части возложения на покупателя обязательств по своевременной очистке лесосек с приведенными нормами закона и Правил, суд пришел к выводу о соответствии их требованиям действующего законодательства.

В результате мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах истцом было установлено, что указанное условие ответчиком выполнено не в полном объеме, а именно на площади 8,4 Га установлено наличие порубочных остатков.

Нарушение условий договора зафиксировано в ранее упоминаемом акте осмотра.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 договора установлено, что за невыполнение и несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков предусмотрена неустойка в размере 4-кратной стоимости затрат, необходимых для очистки данной территории по нормативам затрат на выполнение государственными и автономными учреждениями мероприятий по защите лесов, состоящих из очистки от захламления, определенные в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Приказом Департамента лесного комплекса Кузбасса от 17.02.2023 № 01-06/279 затраты на очистку мест рубок от порубочных остатков составляют 10900 руб. за 1 гектар.

За невыполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков истец начислил ответчику неустойку в общей сумме 366240 руб.

Материалами дела подтверждается, что ответчик нарушил лесохозяйственные требования, поскольку не провел очистку лесосеки на территории общей площадью 8,4 га.

Судом расчет неустойки был проверен и признан правильным.

Доказательств надлежащего исполнения покупателем пункта 8 договоров купли-продажи лесных насаждений, а именно обязанности по очистке лесосеки от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины, ответчиком не представлено.

Учитывая изложенное, требование о взыскании неустойки в заявленной сумме подлежит удовлетворению.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ, подпункта 2 пункта 2 статьи 333.17, подпункта 1 и 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение иска подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Удовлетворить исковые требования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Деловое партнерство» (ИНН 

<

***>) в пользу  департамента лесного комплекса Кузбасса (ИНН 

<

***>) неустойку по договору от 23.05.2022 № 13 в размере  366240 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Деловое партнерство» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение спора судом в размере 10325 руб.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                                              Н.К. Фуртуна