АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск «11» мая 2022 года Дело № А19-2440/2022 Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ИРКУТСКА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664025, ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 14),  

КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА  (664011, 

<

...>, ИНН: 

<

***>)  

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ Г.ИРКУТСКА  «ИРКУТСКАВТОДОР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664035,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, РАБОЧЕГО ШТАБА УЛИЦА, 138)  

о взыскании 400 000 руб., об обязании устранить недостатки,  

 Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ИРКУТСКА  «ИРКУТСКАВТОДОР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664035,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, РАБОЧЕГО ШТАБА УЛИЦА, 138)  устранить выявленные недостатки, указанные в актах выявленных дефектах по  введенному в эксплуатации объекту по муниципальному контракту № 010-64-257/18 от  03.04.2018 в срок до 15.10.2022 со дня вступления в законную силу решения суда, а  именно:  

• устранить недостатки согласно акту № 67 совместного обследования ремонта  автомобильной дороги ул. Генерала Доватора на участке от ул. Трактовая до ул. Генерала  Доватора, д. 14 в городе Иркутске (МК № 010-64-257/18 от 03.04.2018):  

- разрушение покрытия проезжей части (выбоины, сетка трещин, выкрашивания)  на пересечении ул. Трактовая (лево) - выбоины 10 м2, остановка «Парус» - выбоина 1м2,  заезд к «Мои документы» - разрушение стыка 2м2, путем герметизации узких трещин,  которая включает в себя три технологические операции, к которым относят, продувку  трещины сжатым воздухом, прогрев трещины, заливку трещины битумной эмульсией или  мастикой, имеющей высокую проникающую способность (в соответствии с ГОСТ 2224590 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»).  

- разрушение покрытия вокруг колодца (ул. Генерала Доватора, 2 (ось) - 1 шт.),  путем снятия деформированного асфальтобетонного покрытия и укладке нового слоя в  соответствии с требованиями нормативно-технических документов (в соответствии с  ГОСТ 32972-2021. ГОСТ 8020-2016);  

- отклонение вертикали бортового камня от кромки асфальтобетонного покрытия  (частично на всем протяжении участка), путем проливки битумной мастикой шва на  расстоянии которого имеется отклонение, если отклонение и разрушение бортовых  камней существенное, только путем замены бортового камня (в соответствии с ГОСТ  6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». ГОСТ  32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические  условия)»;  

• устранить недостатки согласно акту № 20 совместного обследования ремонта  автомобильной дороги по ул. Декабрьских Событий на участке от ул. Карла Маркса до ул.  Декабрьских Событий, 112 в г. Иркутске (МК № 010-64-257/18 от 03.04.2018):  

- просадка колодца (переезд через трамвайные пути ул. Декабрьских Событий, 1091 шт; пересечение с ул. Трудовых Резервов - 2 шт; ул. Декабрьских Событий, 92 - 1 шт; на  остановке «Площадь Декабрьских Событий» - 1 шт; ул. Декабрьских Событий, 78 - 1 шт;  ул. Декабрьских Событий, 76- 1 шт (тротуар); пересечение ул. Декабрьских Событий и ул.  Тимирязева - 1 шт; перекресток ул. Декабрьских Событий и ул. Дзержинского - 1 шт; ул.  Декабрьских Событий, 44 - 1 шт; ул. Декабрьских Событий, 27/1 - 1 шт, путем  выполнения мероприятий по замене плиты, проверить крепление опорного кольца, а  также кладки шахты колодца (в соответствии с Приказ Роскоммунхоза от 24.12.1993 г. №  65 «Об утверждении «Технических правил ремонта и содержания городских дорог»);  

- разрушение резинопола на трамвайных путях (пересечение с ул. Трудовых  Резервов - 20м2; пересечение с ул. Плеханова - 5м2; перекресток ул. Декабрьских  Событий и ул. Ямская - 2 м"; переулок ул. Декабрьских Событий и ул. Иосифа Уткина - 1  м2; перекресток ул. Декабрьских Событий и ул. Красногвардейская - 2м2; перекресток  Декабрьских Событий и ул. Фридриха Энгельса - 1м2; перекресток ул. Декабрьских  

Событий и ул. Тимирязева - 2 м2, путем замены плит резинового покрытия (в основном  это межрельсовые пространства) для безопасного и беспрепятственного проезда  автотранспортным средствам ;  

- отсутствует обратная засыпка ПГС (ул. Декабрьских Событий, 85-90м), путем  заполнения образовавшейся ямы, траншеи, пазухи фундамента, песчанно-гравийной  смесью;  

- разрушение асфальтового покрытия и бортового камня на тротуаре (ул.  Декабрьских Событий, 82- 1м2 путем герметизации узких трещин, которая включает в  себя три технологические операции, к которым относят, продувку трещины сжатым  воздухом. прогрев трещины, заливку трещины битумной эмульсией или мастикой,  имеющей высокую проникающую способность (в соответствии с ГОСТ 22245-90 «Битумы  нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»), путем замены бортового камня (в  соответствии с ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые.  Технические условия». ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного  камня. Технические условия);  

- просадка покрытия на тротуаре (перекресток ул. Декабрьских Событий и ул.  Фридриха Энгельса - 8 м2, путем выполнения мероприятий по заделке просадки  основания дорожной конструкции и ликвидации причин, вызвавших просадку, после чего  проводится полная замена асфальтобетонного покрытия на всю площадь просадки а также  путем прокладки материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой  или мятой глиной с предварительной, расчисткой поврежденных мест и подсыпкой  песком (в соответствии с Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об  утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»);  

- заасфальтированы отдушины у дома на тротуаре (ул. Декабрьских Событий, 66),  путем разбора асфальтированного участка с доступ к отдушинам дома;  

- просадка решетки ливневой канализации (перекресток ул. Декабрьских Событий  и ул. Дзержинского) путем выполнения мероприятий по замене плиты, проверить  крепление опорного кольца, а также кладки шахты колодца (в соответствии с Приказ  Роскоммунхоза от 24.12.1993 г. № 65 «Об утверждении "Технических правил ремонта и  содержания городских дорог»);  

• устранить недостатки согласно акту № 27 совместного обследования ремонта  автомобильной дороги по ул. ФИО2 от ул. Варламова до км + 234 м пересечения ул.  Варламова и ул. ФИО2 в юго-восточной части 3-го поселка в г. Иркутске (МК № 010- 64-257/18 от 03.04.2018):  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части (напротив «ТопПрокат»  - выбоина 8 кв.м.; ул. ФИО2, 49/1 -выбоина 18 кв.м.; напротив гаражного кооператива   № 11- выбоина 4 кв.м.; ДПК «Ветеран труда», 14 - выбоина 2 кв.м.; ДПК «Ветеран труда»,  21-3 кв.м.; напротив опоры ЛЭП - вдоль бортового камня - 2 кв.м.; ул. ФИО2, 31 -  выбоины - 6 кв.м. путем герметизации узких трещин, которая включает в себя три  технологические операции, к которым относят, продувку трещины сжатым воздухом,  прогрев трещины, заливку трещины битумной эмульсией или мастикой, имеющей  высокую проникающую способность (в соответствии с ГОСТ 22245-90 «Битумы  нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»);  

- отклонение по вертикали бортового камня от кромки проезжей части (ДПК  «Ветеран труда, 25), путем проливки битумной мастикой шва на расстоянии которого  имеется отклонение, если отклонение и разрушение бортовых камней существенное,  только путем замены бортового камня (в соответствии с ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные  и железобетонные бортовые. Технические условия». ГОСТ 32018-2012 «Изделия  строительно-дорожные из природного камня. Технические условия)»;  

• устранить недостатки согласно акту № 28 совместного обследования ремонта  автомобильной дороги по ул. ФИО2, участок 1 автомобильной дороги общего  пользования Иркутск - садоводство «Дорожный строитель» (от 0 кв. + 234 м пересечения  ул. Варламова и ул. ФИО2 в юго-восточной части 3-его поселка г. Иркутска до  границы городской черты г. Иркутске (МК № 010-64-257/18 от 03.04.2018):  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части (ул. ФИО2, 28/11А  - выбоины - 4 кв.м.) путем герметизации узких трещин, которая включает в себя три  технологические операции, к которым относят, продувку трещины сжатым воздухом,  прогрев трещины, заливку трещины битумной эмульсией или мастикой, имеющей  высокую проникающую способность (в соответствии с ГОСТ 22245-90 «Битумы  нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»);  

- раскрытие продольные трещины (ул. ФИО2, 28/11 А) путем герметизации  узких трещин, которая включает в себя три технологические операции, к которым  относят, продувку трещины сжатым воздухом, прогрев трещины, заливку трещины  битумной эмульсией или мастикой, имеющей высокую проникающую способность (в  соответствии с ГОСт 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические  условия»);  

• устранить недостатки согласно акту № 71 совместного обследования ремонта  автомобильной дороги по ул. Муравьева на участке от ул. Красный Путь до ул.  Авиастроителей в г. Иркутске (МК № 010-64-257/18 от 03.04.2018 г.):  

- отклонение вертикали бортового камня от кромки асфальтобетонного покрытия  (частично на всем протяжении участка) путем проливки битумной мастикой шва на  расстоянии которого имеется отклонение, если отклонение и разрушение бортовых  камней существенное, только путем замены бортового камня (в соответствии с ГОСТ  6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». ГОСТ  32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические  условия)»;  

- просадка решетки ливневой канализации (ул. Муравьева, 9 (лево); пересечение с  ул. Сибирских Партизан (вправо) путем выполнения мероприятий по замене плиты,  проверить крепление опорного кольца, а также кладки шахты колодца (в соответствии с  Приказ Роскоммунхоза от 24.12.1993 г. № 65 «Об утверждении "Технических правил  ремонта и содержания городских дорог»);  

- просадка проезжей части (пересечение с ул. Мира (право) - 1 кв.м., путем  выполнения мероприятий по заделке просадки основания дорожной конструкции и  ликвидации причин, вызвавших просадку, после чего проводится полная замена  асфальтобетонного покрытия на всю площадь просадки;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части (выбоины, сетка  трещин, выкрашивания) ул. Сибирских Партизан, 18 - выкрашивание 0,5 кв.м, путем  герметизации узких трещин, которая включает в себя три технологические операции, к  которым относят, продувку трещины сжатым воздухом, прогрев трещины, заливку  трещины битумной эмульсией или мастикой, имеющей высокую проникающую  способность (в соответствии с ГОСт 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие.  Технические условия»);  

- просадка колодца (пересечение с ул. Волгоградская (ось); напротив рынка (ось);  пересечение с ул. Украинской - 1 шт., путем выполнения мероприятий по замене плиты,  проверить крепление опорного кольца, а также кладки шахты колодца (в соответствии с  Приказ Роскоммунхоза от 24.12.1993 г. № 65 «Об утверждении «Технических правил  ремонта и содержания городских дорог»);  

• устранить недостатки согласно акту № 68 совместного обследования ремонта  автомобильной дороги по ул. Полярная на участке от ул. Новаторов до Морского проезда  в г. Иркутске (МК № 010-64-257/18 от 03.04.2018 г.):  

- отклонение вертикали бортового камня от кромки асфальтобетонного покрытия  (частично на всем протяжении участка) путем проливки битумной мастикой шва на  расстоянии которого имеется отклонение, если отклонение и разрушение бортовых  камней существенное, только путем замены бортового камня (в соответствии с ГОСТ  

6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». ГОСТ  32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия);  

- разрушение покрытия проезжей части (выбоины, сетка трещин, выкрашивания)  (пересечение с ул. Новаторов (право) - выбоины 2 кв.м.) путем герметизации узких  трещин, которая включает в себя три технологические операции, к которым относят  продувку трещины сжатым воздухом, прогрев трещины, заливку трещины битумной  эмульсией или мастикой, имеющей высокую проникающую способность (в соответствии  с ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»).  

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г.ИРКУТСКА  «ИРКУТСКАВТОДОР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664035,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, РАБОЧЕГО ШТАБА УЛИЦА, 138) в пользу  КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА  (664011, 

<

...>, ИНН: 

<

***>) 200 000 руб. - штраф по  муниципальному контракту № 010-64-257/18 от 03.04.2018.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г.ИРКУТСКА  «ИРКУТСКАВТОДОР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664035,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, РАБОЧЕГО ШТАБА УЛИЦА, 138) в доход  федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 13  000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

 Судья Е.Ю. Колосова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.04.2022 0:04:00

 Кому выдана Колосова Елена Юрьевна