АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-839/2024 

Дата принятия решения –  25 апреля 2024 года.

Дата объявления резолютивной части –  16 апреля 2024 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола помощником судьи Шакуровой Л.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Акционерного общества "Татэлектромонтаж", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Центр инжиниринга и управления проектами", г.Нижнекамск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 8 459 112 руб. 48 коп. задолженности,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – временного управляющего ФИО1,

с участием:

от истца  – ФИО2 представитель по доверенности от 12.05.2023

от ответчика  – не явился, извещен.

от третьего лица – не явился, извещен. 

установил:

Истец - Акционерное общество "Татэлектромонтаж" обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринга и управления проектами» о  взыскании 8 604 947 руб. 34 коп. задолженности.

Истец в судебном заседании заявил об уменьшении исковых требований до 8 459 112 руб. 48 коп. Судом уменьшение принято в порядке ст.49 АПК РФ.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен согласно ст. 123 АПК РФ, возражений не представил.

Третье лицо ходатайств не заявило.  

Суд, руководствуясь ч.3,5 ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело без участия ответчика и третьего лица.

Исследовав материалы дела, суд находит правовые основания для удовлетворения требований истца по следующим основаниям. 

 Из материалов дела следует, что 14 мая 2020 г. между ООО «Центр инжинирования и управления проектами» (Ответчик, Заказчик) и АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Истец, Подрядчик) был заключен договор подряда №196/20.

 В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить внутренние и наружные электромонтажные работы на объекте: «ж/д№21, мкр. 49, г. Нижнекамск» (п.1.1 Договора).

 Согласно п.2.3 договора, оплата производится за фактически выполненные работы на основании акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3, подписанных и утвержденных Заказчиком, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента предоставления Подрядчиком счёт - фактуры Заказчику. По соглашению сторон возможны иные формы оплаты, не запрещённые действующим законодательством.

Согласно п.3.1 договора, срок выполнения работ: начало работ 01.08.2020 г., окончание работ 31.12.2020 г.

Также между сторонами 1.09.2020г. заключен договор подряда №474/20.

В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить внутренние и наружные электромонтажные работы на объекте: «ж/д №8, мкр. 35, г. Нижнекамск» (п.1.1 Договора).

Срок выполнения работ: начало работ 01.09.2020 г., окончание работ 31.12.2020 г. (п.3.1 Договора).

В соответствии с п. 2.3 Договора оплата производится за фактически выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок формы КС-3, подписанных и утвержденных Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента предоставления Подрядчиком счета-фактуры Заказчику. По соглашению сторон возможны иные формы оплаты, не запрещенные законодательством.

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика перед истцом составила 8 459 112 руб. 48 коп. , что также подтверждается подписанным сторонами актом сверки (л.д 26). 

     В 2020-2021 годы между Истцом и Ответчиком было заключено еще 8 однотипных договоров подряда:№13/20 от 24.03.2020, №14/20 от 24.03.2020, №17/20 от 24.03.2020, №197/20 от 14.05.2020, №446/20 от 01.08.2020, №532/20 от 01.10.2020, №533/20 от 01.10.202 и  №171/21 от 08.09.2021. 

Согласно представленных актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами, по каждому договору Истцом выполнено работ на сумму:

№13/20 от 24.03.2020 - 3 270 530,40 руб. (поз. 2, 18, 140, 142 реестра)

№14/20 от 24.03.2020 - 6 676 524 руб. (поз.1, 17, 28, 51, 52, 74, 159 реестра)

№17/20 от 24.03.2020 - 4 990 534,80 руб. (поз. 132, 158, 167 реестра)

№196/20 от 14.05.2020 - 12 624 357,60 руб. (поз. 197, 209, 213, 220, 237, 309, 322, 326, 330, 343, 345 реестра)

№197/20 от 14.05.2020 - 313 609,20 руб. (поз. 210 реестра)

№446/20 от 01.08.2020 - 442 212 руб. (поз. 160 реестра)

№474/20 от 01.09.2020 - 12 253 678,80 руб. (поз. 187, 243, 271, 289, 302, 331, 344, 357, 366, 371 реестра)

№532/20 от 01.10.2020 - 310 684,80 руб. (поз. 218 реестра)

№533/20 от 01.10.2020 - 8 631 439,20 руб. (поз. 177, 186, 219, 257, 270, 283 реестра)

№171/21 от 08.09.2021. - 108 159,60 руб. (поз. 272 реестра)

Итого выполнено работ Истцом на сумму 49 621 730,40 руб.

Кроме того, Истцом на объекты строительства поставлялись в адрес Ответчика собственные материалы и оборудование на сумму 365 072,85 руб.

Таким образом, общая задолженность по оплате выполненных работ и поставке составила 49 986 803,25 руб.

Задолженность сальдируется на общую сумму 41 229 960,39 руб. в соответствии с произведенными Ответчиком оплатами, подписанными сторонами актами об оказанных Ответчиком услугах и поставкой материалов и оборудования Ответчиком в адрес Истца.

Следовательно, долг Ответчика перед Истцом составляет 8 756 842,86 руб.

Всеми договорами подряда предусмотрено (п.2.2), что Заказчик удерживает сумму в размере 0,6% от стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком, для обеспечения гарантии качества выполненных работ в период эксплуатации Объекта на котором производились работы в течение гарантийного срока, указанного в настоящем договоре. Сумма гарантийного удержания подлежит возврату Подрядчику в течение 3 дней с момента подписания акта об отсутствии дефектов после завершения установленных договором сроков гарантийных обязательств Подрядчика.

В обоих договорах (п.6.2) установлено, что гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ, выполненного Подрядчиком в соответствии и на условиях настоящего договора, составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня введения объекта в эксплуатацию.

Поскольку указанный срок гарантии еще не истек, Истец заминусовал  сумму гарантийного удержания в размере 0,6% * 49 621 730,40 руб. = 297 730,38 руб.

С учетом изложенного задолженность Ответчика перед Истцом составляет 8 756 842,86 руб. -297 730,38 руб. = 8 459 112,48 руб.

Претензия истца  о погашении задолженности оставлена без ответа, требование без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.307, 309 ГК РФ стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований закона и условий обязательства.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства отсутствия задолженности перед истцом, либо наличия ее в ином размере.

Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, требование истца о взыскании 8 459 112 руб. 48 коп. долга, в силу ст. ст. 307, 309, 702 ГК РФ, подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины согласно ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Центр инжиниринга и управления проектами", г.Нижнекамск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Татэлектромонтаж", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 8 459 112 руб. 48 коп. долга и 65 295 руб. госпошлины.

Выдать Акционерному обществу "Татэлектромонтаж", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из бюджета 1 460 руб. уплаченной госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяЮ.Н. Галеева