АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-10217/2021

г. Барнаул

06 декабря 2021 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании исковое заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной  ответственностью «Аспект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 656043, 

<

...>, В, помещение 1) к обществу с ограниченной  ответственностью инвестиционно-строительной компании «Крафт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 656060, 

<

...>) об обязании устранения дефектов, о взыскании за  неисполнение в течении 30 дней решения суда 50000 рублей, с увеличением  взыскиваемой суммы на 50000 рублей за каждые последующие 30 дней до момента  фактического исполнения судебного акта, при участии от истца – ФИО2 по  доверенности от 15.03.2021, от иных лиц, участвующих в деле – не явились.  

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Аспект»  

(ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной компании «Крафт» (ОГРН 

<

***>) об обязании устранения  

дефектов удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительную  

компанию «Крафт» (ОГРН 

<

***>) в течении одного месяца со дня вступления  

настоящего решения в законную силу устранить следующие выявленные недостатки: 

1. Указать в протоколе проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми  элементами от 15.05.2020 ЭТЛ ООО «Протон» наличие цепи между заземлителем и  устройством уравнивания потенциалов, заземлителем и корпусами дренажных  насосов (п. 4, 5 «Порядка», п.2.7.13 ПТЭЭП).  

2. Провести контрольно-профилактические испытания электрооборудования ВРУ-8,  ВРУ-9, PП-8, PП-9 и ЩУ арендаторов (п. 4, 5 «Порядка»).  

3. Внести изменения в проектООО TM «Призма» шифр 03-2013-ЭОМ-5 заменить для  прокладки внутри здания от этажных до квартирных щитов запроектированный  

кабельВВГнг-LЅ Зх10, на кабель АВВГнг-LЅ Зх10(п. 4, 5 «Порядка», п. 1.8.1  

ПТЭЭП). 

4. Представить однолинейные схемы этажных щитов многоквартирного жилого дома  

(п. 5 «Порядка»). 

5. Уложить в подвальном помещении электрические кабели в лотки (также около  

ВРУ- 9), в местах отсутствия лотковустановить лотки. Расстояние между кабелем и  

трубопроводами менее 50 мм. При расстоянии менее 250 мм. защитить кабели от  

механических повреждений. 

6. Расположить ВРУ-4 в соответствии с проектом в электрощитовой 3 (расположено в  

электрощитовой 6 секции). 

7. В ВРУ-4 провод ф. «В» линии ABP прижать к токопроводусоответствующей фазы.  8. РЕN-проводники питающих силовых кабелей подключены в N шинам ВРУ.  

9. Сечение N-проводника от РЕ шины к N шине ВРУ менее сечения фазного провода.  10. Подключить питающие силовые кабели подключены к ВРУ в полном объёме.  

11. ВРУ-4 переместить на расстоянии более 1 м. от проходящего трубопровода.  

12. На дверях РУ нанести в полном объёме диспетчерские наименования и  

предупреждающие знаки. 13. Привести в соответствие ЩС-4 проекту. 14. Привести в соответствие ЩС-5 проекту. 15. Заменить проложенный провод ПуГВк щитам ABP на кабельBBГнг-FRLS. 16. Снабдить электрические кабели бирками в полном объёме. 

17. Подключить щит ЩHПT, по проекту от ППУ-3(подключен от ППУ-4).  

18. Заземлить металлические лотки заземлены в полном объёме, часть лотков  

заземлить последовательно. 19. В щитах на автоматах подписать номер линии, на дверцах однолинейную схему. 20. Установить в щитах ППУ вводные автоматы. 

21. Привести в соответствие с проектом ППУ-5 rp.1 установлен автомат 50 А, по  

проекту 25 А. 22. В ППУ-5 проложитьBBГнг-FRLS, вместо проложенного ВВГнг-LЅ. 

23. Установить в РП-6.1 автомат 160 А, вместо установленного на 125 А.  24. Привести в соответствие проекту автоматы в ABP-7 и PП-7.  

25. В ЩС-7 подключить РЕ-проводник. 

26. В провести освещение в подвальных помещениях, где отсоветует.  27. В ЩО и ЩАО подключить все группы, провести наружное освещение.  

28. Заземлить корпуса ЩО и ЩАО в полном объеме. 

29. Провести видимое заземление электродвигателей и металлоконструкций в  

помещении пожарных насосов. 

30. Заменить в ЩАО группы, выполненные кабелем ВВГнг-LS на кабельBBГнr-FRLS.  31. В ВРУ-8, ВРУ-9 заземлить броню питающего кабеля (проверить наличие  

заземляющих выводов на питающих кабелях в ВРУ- 1 до ВРУ-7).  

32. В ВРУ-8, ВРУ-9 установить перемычки между РЕ и N шинами и между РЕ шиной  

и ГЗШ. 

33. В ВРУ-8, ВРУ-9 установить бирки на вводных и отходящих кабелях.  34. В ВРУ-8, ВРУ-9 установить однолинейные схемы на дверцах.  

35. Заменить ППУ-3 группы, выполненные кабелем ВВГнг-LЅ на кабельВBГнr-FRLS.  36. В PП-2 установить кабель питающий ЩО-2, согласно биркам ЩО-2 подключен от  

ППУ-2. Согласно проекту на ЩО-2 ВВГнг-LЅ 5х10, на ЩАО-2 BBГнr-FRLS 5x2,5,  

по биркам наоборот. 37. В PП-2 привести в соответствие бирки на отходящих линиях. 38. В ЩС-2 установить кабель на ЩУ-ИТП. 39. Заменить на ABP- 1 провод 5x50, на по проекту BBГнr-FRLS 5x70. 40. В PП-1 РЕ- прикрепить шину к корпусу шкафа. 41. Закрепить корпус щита в насосной. 

42. Окрасить стальные полосы заземления металлоконструкций в насосной в черный  

цвет. 

43. В этажных щитах прокалывающие зажимы для СИП заменить на соединительные  

зажимы. 

44. В этажных щитах установить перемычку между РЕ-шиной и корпусом ПB1 х l0.  45. В этажных щитах слаботочку (сети слабого тока) убрать из силовой части щита.  46. Заделать проёмы, в которых проложены кабели между этажами.  

47. На тех. этаже подключить электродвигатели насосов дымоудаления, 48. На тех. этаже провести электрическое освещение. 

В случае неисполнения настоящего решения суда об обязании устранить дефекты в  

течении 30 дней взыскивать с общества с ограниченной ответственностью  

инвестиционно-строительной компании «Крафт» (ОГРН 

<

***>) в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 

<

***>) по  50000 рублей ежемесячно, с последующим увеличением взыскиваемой суммы на  

20000 рублей за каждые последующие 30 дней до момента фактического исполнения  

судебного акта. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной компании «Крафт» (ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета  

Российской Федерации 6000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.  

Судья М.А. Кулик 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 12.10.2020 9:33:19

 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич