АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

14 февраля 2019 года

Дело № А33-33166/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 07 февраля 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 14 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Промлесстрой» (ИНН 2466221023, ОГРН 1092468022789, г. Минусинск)

к министерству лесного хозяйства Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о внесении изменений в договор, 

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 22.10.2018 (срок действия до 31.12.2019), личность установлена паспортом (до и после перерыва),

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 28.12.2018 (срок действия до 31.12.2019), личность установлена паспортом (до и после перерыва),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Промлесстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к министерству лесного хозяйства Красноярского края (далее – ответчик) о внесении изменений в договор аренды лесного участка №637-з от 17.10.2012.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 30.11.2018 возбуждено производство по делу.

Представитель истца ходатайствовал об объявлении перерыва в судебном заседании для подготовки заявления об уточнении исковых требований, представил письменные пояснения, огласил последнее. 

Представленные документы в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика представил дополнительный отзыв на иск.

Представленные документы в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщены к материалам дела.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 17 час. 00 мин. 07.02.2019, о чем вынесено протокольное определение. Сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 325 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу 

<

...>.

Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

Судебное заседание после перерыва продолжено 07.02.2019 в 17 час. 00 мин. с участием представителей истца и ответчика. 

Представитель истца письменно заявил об уточнении исковых требований, согласно которому просит: внести следующие изменения в договор аренды лесного участка № 637-з от 17.10.2012: 

Пункт 5 Договора изложить в следующей редакции:

«5. Ежегодная арендная плата составляет 2 695 491 (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто один) рубль».

Приложение № 2 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 2 

к договору аренды лесного 

участка от 17.10.2012 № 637-з

1. Распределение земель

Общая

площадь 

всего

В том числе

лесные земли

нелесные земли

занятые лесными насаждениями

лесные

культуры

лесные питомники, плантации

не занятые лесными насаждениями*

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса – всего:

7918,8

7502,8

58

-

237

7739,8

25

37

16,8

101

179,8

Эксплуатационные леса – всего:

7080

7043

12

-

9

7052

11

11

-

6

28

Всего по лесничеству:

14998,8

14545,8

70

-

246

14791,8

36

48

16,8

107

207,8

*в том числе несомкнувшихся лесных культур – 112 га (защитные леса – 105 га, эксплуатационные леса – 7 га)

2.Характеристика насаждений

Целевое 

назначение лесов

Лесничество

Участковое лесничество

Лесной квартал

Хозяйство, 

преобладающая 

порода

Площадь (га) / запас древесины (тыс.куб.м) - всего

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м)

молодняки

средневоз-

растные

приспевающие

спелые и 

перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса

Ермаковское

Ермаковское, 

кварталы №№ №№ 46-57, 59, 63- 65, 68-100, 115, 116

 

Хвойные

Сосна

5575

1889,8

63

1,0

4480

1539,6

805

267,9

227

81,3

Пихта

617

96,7

617

96,7

Лиственница

15

2,3

15

2,3

Кедр

8

8

Итого:

6215

1988,8

86

3,3

5097

1636,3

805

267,9

227

81,3

Мягколиственные

Береза

854

196,1

6

0,1

116

14,2

62

8,2

670

173,6

Осина

433

80,7

45

6,7

7

1,4

381

72,6

Итого:

1287

276,8

6

0,1

161

20,9

69

9,6

1051

246,2

Всего по защитным лесам:

7502

2265,6

92

3,4

5258

1657,2

874

277,5

1278

327,5

Эксплуатационные леса

Хвойные

Сосна

1378

379,1

25

2,7

1090

312,2

214

51,9

49

12,3

Пихта

1093

239,5

840

179,4

52

10,9

201

49,2

Кедр

266

66,1

53

4,0

74

17,6

139

44,5

Итого:

2737

684,7

78

6,7

1930

491,6

340

80,4

389

106,0

Мягколиственные

Береза

1380

206,1

68

2,0

250

25,3

144

23,2

918

155,6

Осина

2926

520,2

241

6,5

249

27,2

141

24,1

2295

462,4

Итого:

4306

726,3

309

8,5

499

52,5

285

47,3

3213

618,0

Всего по эксплуатационным лесам:

7043

1411,0

387

15,2

2429

544,1

625

127,7

3602

724,0

Всего по лесному участку

14545

3676,6

479

18,6

7687

2201,3

1499

405,2

4880

1051,5

3.Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов

Хозяйство, преобладающая порода

Состав 

Возраст

Бонитет

Полнота

Средний запас древесины 

лесных насаждений

(куб.м/га)

средневоз-растные

приспевающие

спелые и

перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Защитные леса

Сосна

8,6С 1,4Б + К, П, Ос

88

1,4

0,86

344

333

366

Пихта

5,4П 0,7К 0,3С 0,1Е1,9Б 1,6Ос

71

2,9

0,55

156

-

-

Лиственница

6,4Л 3,6Б

39

3,0

0,92

-

-

-

Кедр

10,0К

11

2,0

0,80

-

-

-

Итого хвойных

7,7С 0,5П 0,1К 1,5Б  0,2Ос +Л, Е

86

1,6

0,83

321

333

366

Береза

7,0Б 0,5Ос 2,4С 0,1П + К, Л, Ив

71

2,2

0,83

124

132

260

Осина

5,4Ос 2,5Б 1,1С 0,9П 0,1К

67

1,9

0,60

149

200

194

Итого мягколиственных

5,4Б 2,1Ос 2,0с 0,4П 0,1К + Л, Ив

69

2,1

0,75

131

139

236

Всего

6,7С 0,5П 0,1К 2,2Б 0,5Ос + Л, Е, Ив

83

1,7

0,81

315

318

259

Эксплуатационные леса

Сосна

6,1С  0,3П 2,4Б 1,2Ос + К ,Ив

76

1,5

0,77

286

242

217

Пихта

6,0П 0,5К 0,3С 1,9Ос 1,3Б +Е

78

2,4

0,67

214

206

245

Кедр

3,8К 3,1П 0,4С 1,6Ос 1,1Б 

171

2,9

0,57

-

238

320

Итого хвойных

3,2С 2,9П 0,6К 1,8Б 1,5Ос +Е, Ив

86

2,0

0,71

255

236

268

Береза

5,4Б 2,3Ос 1,8С 0,3П 0,1К, 0,1Ив

61

2,2

0,63

101

161

169

Осина

5,8Ос 2,2Б 1,0С 0,9П 0,1К +Ив

62

2,0

0,61

109

171

201

Итого мягколиственных

4,7Ос 3,2Б 1,3С 0,7П 0,1К +Ив

61

2,1

0,62

105

166

192

Всего

3,5Ос 2,7Б 2,0С 1,5П 0,3К + Е, Ив

71

2,1

0,65

224

204

200

Всего по участку:

4,5С 1,0П 0,2К 2,4Б 1,9Ос + Л, Е Ив

77

1,9

0,74

286

270

215

4.Объекты лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое

лесничество

Лесной квартал

Лесотаксационный

выдел

Наименование

объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ермаковское

Ермаковское

47

27

Дорога лесная

га

0,1

2

-//-

-//-

47

28

-//-

га

0,2

3

-//-

-//-

49

9

-//-

га

0,8

4

-//-

-//-

50

19

-//-

га

1,4

5

-//-

-//-

65

21

-//-

га

0,1

6

-//-

-//-

68

19

-//-

га

0,7

7

-//-

-//-

68

20

-//-

га

0,2

8

-//-

-//-

69

15

-//-

га

0,5

9

-//-

-//-

70

11

-//-

га

0,1

10

-//-

-//-

93

32

-//-

га

0,2

11

-//-

-//-

94

60

-//-

га

0,2

12

-//-

-//-

98

30

-//-

га

3,5

13

-//-

-//-

99

44

-//-

га

1,5

14

-//-

-//-

99

43

-//-

га

6,0

15

-//-

-//-

100

44

-//-

га

3,7

16

-//-

-//-

100

45

-//-

га

1,2

17

-//-

-//-

71

22

-//-

га

0,5

18

-//-

-//-

72

17

-//-

га

1,1

19

-//-

-//-

73

14

-//-

га

0,3

20

-//-

-//-

74

18

-//-

га

0,3

21

-//-

-//-

75

14

-//-

га

0,6

22

-//-

-//-

76

17

-//-

га

0,4

23

-//-

-//-

77

17

-//-

га

0,2

24

-//-

-//-

77

18

-//-

га

0,9

25

-//-

-//-

78

16

-//-

га

1,3

26

-//-

-//-

79

16

-//-

га

0,1

27

-//-

-//-

79

17

-//-

га

0,3

28

-//-

-//-

80

16

-//-

га

0,4

29

-//-

-//-

81

17

-//-

га

0,6

30

-//-

-//-

81

18

-//-

га

0,1

31

-//-

-//-

82

18

-//-

га

1,5

32

-//-

-//-

83

19

-//-

га

0,9

33

-//-

-//-

84

16

-//-

га

0,8

34

-//-

-//-

85

18

-//-

га

0,6

35

-//-

-//-

86

17

-//-

га

0,9

36

-//-

-//-

87

19

-//-

га

0,6

37

-//-

-//-

88

22

-//-

га

0,6

38

-//-

-//-

88

23

-//-

га

0,1

39

-//-

-//-

89

35

-//-

га

0,4

40

-//-

-//-

90

37

-//-

га

0,8

41

-//-

-//-

90

38

-//-

га

0,5

42

90

20

-//-

га

0,6

Итого:

35,8

43

Ермаковское

Ермаковское

46

13

Квартальная просека

га

0,3

44

-//-

-//-

46

14

-//-

га

0,2

45

-//-

-//-

45

15

-//-

га

0,5

46

-//-

-//-

45

16

-//-

га

0,1

47

-//-

-//-

47

24

-//-

га

1,5

48

-//-

-//-

47

25

-//-

га

0,6

49

-//-

-//-

47

26

-//-

га

0,4

50

-//-

-//-

48

8

-//-

га

0,9

51

Ермаковское

Ермаковское

49

8

Квартальная просека

га

1,3

52

-//-

-//-

50

17

-//-

га

0,2

53

-//-

-//-

50

18

-//-

га

1,1

54

-//-

-//-

51

43

-//-

га

0,1

55

-//-

-//-

51

44

-//-

га

3,1

56

-//-

-//-

52

49

-//-

га

0,1

57

-//-

-//-

52

48

-//-

га

0,7

58

-//-

-//-

52

47

-//-

га

0,6

59

-//-

-//-

53

11

-//-

га

0,5

60

-//-

-//-

54

17

-//-

га

1,3

61

-//-

-//-

55

13

-//-

га

1,1

62

-//-

-//-

56

18

-//-

га

0,1

63

-//-

-//-

56

17

-//-

га

1,1

64

-//-

-//-

57

29

-//-

га

0,6

65

-//-

-//-

57

30

-//-

га

1,1

66

-//-

-//-

59

18

-//-

га

1,4

67

-//-

-//-

59

19

-//-

га

0,1

68

-//-

-//-

63

14

-//-

га

0,7

69

-//-

-//-

63

15

-//-

га

0,4

70

-//-

-//-

63

16

-//-

га

0,3

71

-//-

-//-

64

15

-//-

га

0,1

72

-//-

-//-

64

13

-//-

га

0,7

73

-//-

-//-

66

14

-//-

га

0,4

74

-//-

-//-

65

20

-//-

га

0,1

75

-//-

-//-

65

18

-//-

га

0,2

76

-//-

-//-

65

19

-//-

га

0,4

77

-//-

-//-

68

15

-//-

га

1,0

78

-//-

-//-

68

16

-//-

га

0,1

79

-//-

-//-

69

13

-//-

га

0,4

80

-//-

-//-

69

14

-//-

га

0,1

81

-//-

-//-

70

9

-//-

га

0,1

82

-//-

-//-

70

10

-//-

га

0,4

83

-//-

-//-

71

20

-//-

га

0,1

84

-//-

-//-

71

21

-//-

га

0,7

85

-//-

-//-

72

16

-//-

га

1,7

86

-//-

-//-

73

13

-//-

га

0,2

87

-//-

-//-

74

17

-//-

га

0,1

88

-//-

-//-

75

13

-//-

га

0,2

89

-//-

-//-

76

15

-//-

га

0,4

90

-//-

-//-

76

16

-//-

га

0,8

91

-//-

-//-

77

15

-//-

га

0,5

92

-//-

-//-

77

16

-//-

га

0,4

93

-//-

-//-

78

15

-//-

га

0,7

94

-//-

-//-

79

14

-//-

га

0,3

95

-//-

-//-

79

15

-//-

га

0,1

96

-//-

-//-

80

14

-//-

га

0,6

97

-//-

-//-

80

15

-//-

га

0,3

98

-//-

-//-

81

15

-//-

га

0,4

99

-//-

-//-

81

16

-//-

га

0,4

100

-//-

-//-

82

17

-//-

га

0,1

101

-//-

-//-

83

18

-//-

га

0,1

102

-//-

-//-

84

14

-//-

га

0,7

103

-//-

-//-

84

15

-//-

га

0,1

104

-//-

-//-

85

16

-//-

га

0,1

105

-//-

-//-

85

17

-//-

га

0,8

106

Ермаковское

Ермаковское

86

15

Квартальная просека

га

0,9

107

-//-

-//-

86

16

-//-

га

0,1

108

-//-

-//-

87

18

-//-

га

0,1

109

-//-

-//-

88

19

-//-

га

0,1

110

-//-

-//-

89

24

-//-

га

0,3

111

-//-

-//-

89

31

-//-

га

0,1

112

-//-

-//-

89

32

-//-

га

0,1

113

-//-

-//-

89

33

-//-

га

0,4

114

-//-

-//-

90

19

-//-

га

0,3

115

-//-

-//-

90

35

-//-

га

0,1

116

-//-

-//-

90

36

-//-

га

0,3

117

-//-

-//-

91

44

-//-

га

1,1

118

-//-

-//-

91

45

-//-

га

0,2

119

-//-

-//-

92

43

-//-

га

0,2

120

-//-

-//-

92

44

-//-

га

0,6

121

-//-

-//-

93

30

-//-

га

1,0

122

-//-

-//-

93

31

-//-

га

0,2

123

-//-

-//-

94

58

-//-

га

0,3

124

-//-

-//-

94

59

-//-

га

1,4

125

-//-

-//-

95

48

-//-

га

0,3

126

-//-

-//-

96

46

-//-

га

0,3

127

-//-

-//-

97

5

-//-

га

0,1

128

-//-

-//-

97

6

-//-

га

0,3

129

-//-

-//-

98

28

-//-

га

0,1

130

-//-

-//-

98

29

-//-

га

1,3

131

-//-

-//-

99

41

-//-

га

0,2

132

-//-

-//-

99

42

-//-

га

1,0

133

-//-

-//-

100

42

-//-

га

0,2

134

-//-

-//-

100

43

-//-

га

1,0

135

-//-

-//-

115

62

-//-

га

0,2

136

-//-

-//-

115

63

-//-

га

1,1

137

-//-

-//-

116

82

-//-

га

0,3

Итого:

48,4

Всего объектов лесной инфраструктуры:

84,2

5.Особо защитные участки лесов

N№

п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Назначение

Площадь (га)

1

2

3

4

5

6

7

1

Ермаковское

Ермаковское

46

7, 9, 10, 13

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

20,9

2

-//-

-//-

47

2, 3, 6-12, 14, 15, 20-22, 27

81,7

3

-//-

-//-

59

17

1,5

4

-//-

-//-

63

2-13

-//-

60,4

5

-//-

-//-

64

4-12

-//-

123,7

6

-//-

-//-

65

3, 5-17, 21

-//-

102,4

7

-//-

-//-

68

1-11, 19

-//-

147,2

8

-//-

-//-

69

1-10, 12

-//-

121,2

9

-//-

-//-

70

1-8, 11

-//-

51,5

10

-//-

-//-

76

5

-//-

14,1

11

Ермаковское

Ермаковское

77

1-5, 17

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

39,9

12

-//-

-//-

78

1-5

43,4

13

-//-

-//-

79

1, 16

1,7

14

-//-

-//-

80

2

5,8

15

-//-

-//-

81

1-4, 17

14,0

Итого:

829,4

16

Ермаковское

Ермаковское

50

14, 15

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов, оврагов

7,7

17

-//-

-//-

51

41

6,8

18

-//-

-//-

52

10, 11, 35-37, 42, 45

28,3

19

-//-

-//-

83

17

3,0

20

-//-

-//-

84

13

-//-

5,0

21

-//-

-//-

85

14, 15

-//-

4,0

22

-//-

-//-

86

14

-//-

5,0

23

-//-

-//-

87

15-17

-//-

5,0

24

-//-

-//-

88

15, 18

-//-

5,1

25

-//-

-//-

89

19, 23, 30

-//-

5,5

26

-//-

-//-

90

31, 33

-//-

10,3

27

-//-

-//-

91

20, 38, 41-43

-//-

30,6

28

-//-

-//-

92

23, 42

-//-

19,4

29

-//-

-//-

93

21, 23, 29

-//-

19,1

30

-//-

-//-

94

7, 9, 23, 36, 56, 57

-//-

71,0

31

-//-

-//-

95

3, 8, 9, 17, 45

-//-

117,3

32

-//-

-//-

96

8, 14, 39, 44, 45

-//-

85,5

33

-//-

-//-

99

5, 39, 40

-//-

31,9

34

-//-

-//-

100

3, 11, 32, 35, 39-41

-//-

45,2

35

-//-

-//-

115

3, 8, 15, 23, 36, 39, 60, 61

-//-

97,6

36

-//-

-//-

116

8, 11, 16, 24, 27, 44, 60, 64, 73, 74, 80, 81

-//-

147,9

Итого:

751,2

37

Ермаковское

Ермаковское

50

9

Постоянный лесосеменной участок

5,0

Итого:

5,0

Всего:

1585,6

6. Объекты лесного семеноводства

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта лесного семеноводства

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

7. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

Права третьих лиц отсутствуют.

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

____________________________

(подпись, печать)

Приложение № 3 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 3 к договору 

аренды лесного участка 

от 17.10.2012 № 637-з

Ежегодный объем заготовки древесины*

Хозяйство

Ежегодный объем заготовки древесины (тыс. куб. м)

всего

в том числе

сплошные рубки

выборочные рубки

I. Защитные леса

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

Хвойное

0,6

0,6

Твердолиственное

Мягколиственное

5,3

5,3

Итого

5,9

5,9

2. При уходе за лесами

Хвойное

9,035

9,035

Твердолиственное

Мягколиственное

0,089

0,089

Итого

9,124

9,124

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений

Хвойное

Твердолиственное

Мягколиственное

Итого

Всего по разделу I

15,024

15,024

II. Эксплуатационные леса

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

Хвойное

2,1

1,8

0,3

Твердолиственное

Мягколиственное

19,7

19,7

Итого

21,8

21,5

0,3

2. При уходе за лесами

Хвойное

1,904

1,904

Твердолиственное

Мягколиственное

0,119

0,119

Итого

2,023

2,023

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений

Хвойное

Твердолиственное

Мягколиственное

Итого

Всего по разделу II

23,823

21,5

2,323

III. Всего в защитных и эксплуатационных лесах

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

Хвойное

2,7

1,8

0,9

Твердолиственное

Мягколиственное

25,0

19,7

5,3

Итого

27,7

21,5

6,2

2. При уходе за лесами

Хвойное

10,939

10,939

Твердолиственное

Мягколиственное

0,208

0,208

Итого

11,147

11,147

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений

Хвойное

Твердолиственное

Мягколиственное

Итого

Всего по разделу III

38,847

21,5

17,347

Примечания: 

* объёмы использования лесов, в том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесных дорог, устройство противопожарных разрывов и т. п.) определяются при  разработке проекта освоения (изменения и дополнения в проект освоения лесов).

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

____________________________

(подпись, печать)

Приложение № 4 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 4 к договору 

аренды лесного участка 

от 17.10.2012 № 637-з

С Р О К И

внесения арендной платы

Календарный план

(кварталы года)

Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, - всего

В том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет

субъекта Российской Федерации

I

15 марта – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

II

15 июня – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

III

15 сентября – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

IV

15 декабря – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

Итого

2695491

1951333

744158

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки по участку и расчет арендной платы

Лесопользователь:

ООО «ПромЛесСтрой»

Договор аренды:      

от 17.10.2012 № 637-з

Лесничество:

Ермаковское лесничество

Лесотаксовый район:

Первый Восточно-Сибирский лесотаксовый район

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Сплошная рубка

71

92

24

25

212

13 209

Хвойное

71

92

24

25

212

13 209

СОСНА

Сплошная рубка

1

71

90,54

92

64,62

24

32,4

25

2,34

212

13 209

СОСНА

1

71

90,54

92

64,62

24

32,4

25

2,34

212

13 209

Мягколиственное

Сплошная рубка

88

250

75

375

788

10 767

Мягколиственное

88

250

75

375

788

10 767

БЕРЕЗА

Сплошная рубка

1

42

45,18

192

32,4

68

16,56

240

2,7

542

9 892

БЕРЕЗА

1

42

45,18

192

32,4

68

16,56

240

2,7

542

9 892

ОСИНА

Сплошная рубка

1

46

9

58

6,66

7

3,6

135

0,36

246

874

ОСИНА

1

46

9

58

6,66

7

3,6

135

0,36

246

874

159

144,72

342

103,68

99

52,56

400

5,4

1 000

23 976

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Сплошная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

23 976

1,05

1 199

25 175

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

25 175

2,38

34 742

59 917

Итого:

59 917

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Выборочная рубка

32

332

121

372

957

38 196

Хвойное

132

332

121

372

957

38 196

СОСНА

Выборочная рубка

1

132

90,54

332

64,62

121

32,4

372

2,34

957

38 196

СОСНА

1

132

90,54

332

64,62

121

32,4

372

2,34

957

38 196

Мягколиственное

Выборочная рубка

45

178

63

199

485

8 132

Мягколиственное

45

178

63

199

485

8 132

БЕРЕЗА

Выборочная рубка

1

36

45,18

150

32,4

53

16,56

168

2,7

407

7 818

БЕРЕЗА

1

36

45,18

150

32,4

53

16,56

168

2,7

407

7 818

ОСИНА

Выборочная рубка

1

9

9

28

6,66

10

3,6

31

0,36

78

315

ОСИНА

1

9

9

28

6,66

10

3,6

31

0,36

78

315

177

144,72

510

103,68

184

52,56

571

5,4

1 442

46 328

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Выборочная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

46 328

0,5

-23 164

23 164

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

23 164

2,38

31 966

55 130

Итого:

55 130

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Выборочная рубка

45

423

165

514

1 147

37 547

Хвойное

45

423

165

514

1 147

37 547

СОСНА

Выборочная рубка

1

33

90,54

364

64,62

138

32,4

460

2,34

995

32 057

СОСНА

1

33

90,54

364

64,62

138

32,4

460

2,34

995

32 057

ПИХТА

Выборочная рубка

1

9

81,9

56

58,14

26

29,7

52

2,34

143

4 887

ПИХТА

1

9

81,9

56

58,14

26

29,7

52

2,34

143

4 887

КЕДР

Выборочная рубка

1

3

108,54

3

77,58

1

38,88

2

2,7

9

603

КЕДР

1

3

108,54

3

77,58

1

38,88

2

2,7

9

603

Мягколиственное

Выборочная рубка

98

322

131

518

1 069

10 513

Мягколиственное

98

322

131

518

1 069

10 513

БЕРЕЗА

Выборочная рубка

1

16

45,18

178

32,4

81

16,56

264

2,

539

8 544

БЕРЕЗА

1

16

45,18

178

32,4

81

16,56

264

2,7

539

8 544

ОСИНА

Выборочная рубка

1

82

9

144

6,66

50

3,6

254

0,36

530

1 968

ОСИНА

1

82

9

144

6,66

50

3,6

254

0,36

530

1 968

143

335,16

745

239,4

296

121,14

1 032

10,44

2 216

48 060

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Выборочная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

48 060

0,5

-24 030

24 030

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

24 030

2,38

33 161

57 191

Итого:

57 191

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Выборочная рубка

1 221

3 172

1 085

3 871

9 349

359 723

Хвойное

1 221

3 172

1 085

3 871

9 349

359 723

СОСНА

Выборочная рубка

1

1 221

90,54

3 170

64,62

1 083

32,4

3 869

2,34

9 343

359 537

СОСНА

1

1 221

90,54

3 170

64,62

1 083

32,4

3 869

2,34

9 343

359 537

ЛИСТВЕННИЦА

Выборочная рубка

1

72,54

1

51,84

2

25,74

2

2,34

5

108

ЛИСТВЕННИЦА

1

72,54

1

51,84

2

25,74

2

2,34

5

108

КЕДР

Выборочная рубка

1

108,54

1

77,58

38,88

2,7

1

78

КЕДР

1

108,54

1

77,58

38,88

2,7

1

78

Мягколиственное

Выборочная рубка

285

1 486

444

2 125

4 340

72 178

Мягколиственное

285

1 486

444

2 125

4 340

72 178

БЕРЕЗА

Выборочная рубка

1

266

45,18

1 452

32,4

433

16,56

2 027

2,7

4 178

71 706

БЕРЕЗА

1

266

45,18

1 452

32,4

433

16,56

2 027

2,7

4 178

71 706

ОСИНА

Выборочная рубка

1

19

9

34

6,66

11

3,6

98

0,36

162

472

ОСИНА

1

19

9

34

6,66

11

3,6

98

0,36

162

472

1 506

325,8

4 658

233,1

1 529

117,18

5 996

10,44

13 689

431 901

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Выборочная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

431 901

0,5

-215 950

215 951

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

215 951

2,38

298 012

513 963

Итого:

513 963

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Сплошная рубка

1 775

2 846

596

463

5 680

355 497

Хвойное

1 775

2 846

596

463

5 680

355 497

СОСНА

Сплошная рубка

1

1 170

90,54

1 368

64,62

318

32,4

196

2,34

3 052

205 094

СОСНА

1

1 170

90,54

1 368

64,62

318

32,4

196

2,34

3 052

205 094

ПИХТА

Сплошная рубка

1

460

81,9

1 378

58,14

253

29,7

253

2,34

2 344

125 897

ПИХТА

1

460

81,9

1 378

58,14

253

29,7

253

2,34

2 344

125 897

КЕДР

Сплошная рубка

1

145

108,54

100

77,58

25

38,88

14

2,7

284

24 506

КЕДР

1

145

108,54

100

77,58

25

38,88

14

2,7

284

24 506

Мягколиственное

Сплошная рубка

2 910

4 337

836

6 737

14 820

150 758

Мягколиственное

2 910

4 337

836

6 737

14 820

150 758

БЕРЕЗА

Сплошная рубка

1

636

45,18

2 146

32,4

526

16,56

2 215

2,7

5 523

112 956

БЕРЕЗА

1

636

45,18

2 146

32,4

526

16,56

2 215

2,7

5 523

112 956

ОСИНА

Сплошная рубка

1

2 274

9

2 191

6,66

310

3,6

4 522

0,36

9 297

37 802

ОСИНА

1

2 274

9

2 191

6,66

310

3,6

4 522

0,36

9 297

37 802

4 685

335,16

7 183

239,4

1 432

121,14

7 200

10,44

20 500

506 255

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Сплошная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

506 255

1,05

25 313

531 568

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

531 568

2,38

733 564

1 265 132

Сверхминимальные ставки

Арендная плата в части превышения мин. ставки согласно протокола конкурса

406 473

   /   1,3    *      2,38

744 158

Итого:

Минимальные ставки

1 951 333

Сверхминимальные ставки

744 158

Всего арендной платы

 2 695 491

Расчет выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ:

№ 310 от 22.05.2007 г.

Приложение № 5 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 5 к договору 

аренды лесного участка о

т 17.10.2012 № 637-з

АКТ №

приема-передачи лесных участков в аренду

г. Красноярск«____»____________ 2019 г.

Арендодатель в лице __________________________________________

и Арендатор в лице ______________________________________________ составили настоящий акт о том, что на основании договора аренды лесных участков от 01.12.2014 № 699-з первый передал, а второй принял Лесные участки из состава земель лесного фонда, общей площадью 14998,8 га , предоставляемые в аренду по настоящему договору, имеют местоположение: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, кварталы №№ 46-57, 59 (за искл. выделов №№ 2, 3, 8, 10), 63, 64, 65 (за искл. выделов №№ 1-6, 11, 13, 14), 68-100, 115, 116, в том числе:

площадью 286 га (уточненная площадь по результатам межевания 2860000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 46, 47, кадастровый номер 24:13:0000000:1049;

площадью 1227 га (уточненная площадь по результатам межевания 12270000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 48, 49, 50, 51, 52, кадастровый номер 24:13:0201001:110;

площадью 834 га (уточненная площадь по результатам межевания 8340000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 53, 54, 55, 56, 57, кадастровый номер 24:13:0000000:400;

площадью 3782 га (уточненная площадь по результатам межевания 37820000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край. Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 68-90, кадастровый номер 24:13:0000000:1059;

площадью 511,8 га (уточненная площадь по результатам межевания 5118000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 59 (за исключением части выделов 3, 2, 8, 10), 63, 64, 65 (за исключением части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14), кадастровый номер 24:13:0000000:1057;

1. Распределение земель

Общая

площадь 

всего

В том числе

лесные земли

нелесные земли

занятые лесными насаждениями

лесные

культуры

лесные питомники, плантации

не занятые лесными насаждениями*

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса – всего:

7918,8

7502,8

58

-

237

7739,8

25

37

16,8

101

179,8

Эксплуатационные леса – всего:

7080

7043

12

-

9

7052

11

11

-

6

28

Всего по лесничеству:

14998,8

14545,8

70

-

246

14791,8

36

48

16,8

107

207,8

*в том числе несомкнувшихся лесных культур – 112 га (защитные леса – 105 га, эксплуатационные леса – 7 га)

2.Характеристика насаждений

Целевое 

назначение лесов

Лесни

чество

Участ

ковое лесни

чество

Лес

ной квар

тал

Хозяйство, 

преобладающая 

порода

Площадь (га) / запас древесины (тыс.куб.м) - всего

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м)

молодняки

средневоз-

растные

Приспе

вающие

спелые и 

перестой

ные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса

Ермако

вское

Ермаковское, 

кварталы 

№№ №№

46-57, 

59, 63- 65,

68-100, 

115, 116

 

Хвойные

Сосна

5575

1889,8

63

1,0

4480

1539,6

805

267,9

227

81,3

Пихта

617

96,7

617

96,7

Лиственница

15

2,3

15

2,3

Кедр

8

8

Итого:

6215

1988,8

86

3,3

5097

1636,3

805

267,9

227

81,3

Мягколиственные

Береза

854

196,1

6

0,1

116

14,2

62

8,2

670

173,6

Осина

433

80,7

45

6,7

7

1,4

381

72,6

Итого:

1287

276,8

6

0,1

161

20,9

69

9,6

1051

146,2

Всего по защитным лесам:

7502

2265,6

92

3,4

5258

1657,2

874

277,5

1278

327,5

Эксплуатационные леса

Хвойные

Сосна

1378

379,1

25

2,7

1090

312,2

214

51,9

49

12,3

Пихта

1093

239,5

840

179,4

52

10,9

201

49,2

Кедр

266

66,1

53

4,0

74

17,6

139

44,5

Итого:

2737

684,7

78

6,7

1930

491,6

340

80,4

389

106,0

Мягколиственные

Береза

1380

206,1

68

2,0

250

25,3

144

23,2

918

155,6

Осина

2926

520,2

241

6,5

249

27,2

141

24,1

2295

462,4

Итого:

4306

726,3

309

8,5

499

52,5

285

47,3

3213

618,0

Всего по эксплуатационным лесам:

7043

1411,0

387

15,2

2429

544,1

625

127,7

3602

724,0

Всего по лесному участку

14545

3676,6

479

18,6

7687

2201,3

1499

405,2

4880

1051,5

3.Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов

Хозяйство, преобладающая порода

Состав 

Возраст

Бонитет

Полнота

Средний запас древесины 

лесных насаждений

(куб.м/га)

средневоз-растные

приспеваю-

щие

спелые и

перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Защитные леса

Сосна

8,6С 1,4Б + К, П, Ос

88

1,4

0,86

344

333

366

Пихта

5,4П 0,7К 0,3С 0,1Е1,9Б 1,6Ос

71

2,9

0,55

156

-

-

Лиственница

6,4Л 3,6Б

39

3,0

0,92

-

-

-

Кедр

10,0К

11

2,0

0,80

-

-

-

Итого хвойных

7,7С 0,5П 0,1К 1,5Б  0,2Ос +Л, Е

86

1,6

0,83

321

333

366

Береза

7,0Б 0,5Ос 2,4С 0,1П + К, Л, Ив

71

2,2

0,83

124

132

260

Осина

5,4Ос 2,5Б 1,1С 0,9П 0,1К

67

1,9

0,60

149

200

194

Итого мягколиственных

5,4Б 2,1Ос 2,0с 0,4П 0,1К + Л, Ив

69

2,1

0,75

131

139

236

Всего

6,7С 0,5П 0,1К 2,2Б 0,5Ос + Л, Е, Ив

83

1,7

0,81

315

318

259

Эксплуатационные леса

Сосна

6,1С  0,3П 2,4Б 1,2Ос + К ,Ив

76

1,5

0,77

286

242

217

Пихта

6,0П 0,5К 0,3С 1,9Ос 1,3Б +Е

78

2,4

0,67

214

206

245

Кедр

3,8К 3,1П 0,4С 1,6Ос 1,1Б 

171

2,9

0,57

-

238

320

Итого хвойных

3,2С 2,9П 0,6К 1,8Б 1,5Ос +Е, Ив

86

2,0

0,71

255

236

268

Береза

5,4Б 2,3Ос 1,8С 0,3П 0,1К, 0,1Ив

61

2,2

0,63

101

161

169

Осина

5,8Ос 2,2Б 1,0С 0,9П 0,1К +Ив

62

2,0

0,61

109

171

201

Итого мягколиственных

4,7Ос 3,2Б 1,3С 0,7П 0,1К +Ив

61

2,1

0,62

105

166

192

Всего

3,5Ос 2,7Б 2,0С 1,5П 0,3К + Е, Ив

71

2,1

0,65

224

204

200

Всего по участку:

4,5С 1,0П 0,2К 2,4Б 1,9Ос + Л, Е Ив

77

1,9

0,74

286

270

215

4.Объекты лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое

лесничество

Лесной квартал

Лесотаксационный

выдел

Наименование

объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ермаковское

Ермаковское

47

27

Дорога лесная

га

0,1

2

-//-

-//-

47

28

-//-

га

0,2

3

-//-

-//-

49

9

-//-

га

0,8

4

-//-

-//-

50

19

-//-

га

1,4

5

-//-

-//-

65

21

-//-

га

0,1

6

-//-

-//-

68

19

-//-

га

0,7

7

-//-

-//-

68

20

-//-

га

0,2

8

-//-

-//-

69

15

-//-

га

0,5

9

-//-

-//-

70

11

-//-

га

0,1

10

-//-

-//-

93

32

-//-

га

0,2

11

-//-

-//-

94

60

-//-

га

0,2

12

-//-

-//-

98

30

-//-

га

3,5

13

-//-

-//-

99

44

-//-

га

1,5

14

-//-

-//-

99

43

-//-

га

6,0

15

-//-

-//-

100

44

-//-

га

3,7

16

-//-

-//-

100

45

-//-

га

1,2

17

-//-

-//-

71

22

-//-

га

0,5

18

-//-

-//-

72

17

-//-

га

1,1

19

-//-

-//-

73

14

-//-

га

0,3

20

-//-

-//-

74

18

-//-

га

0,3

21

-//-

-//-

75

14

-//-

га

0,6

22

-//-

-//-

76

17

-//-

га

0,4

23

-//-

-//-

77

17

-//-

га

0,2

24

-//-

-//-

77

18

-//-

га

0,9

25

-//-

-//-

78

16

-//-

га

1,3

26

-//-

-//-

79

16

-//-

га

0,1

27

-//-

-//-

79

17

-//-

га

0,3

28

-//-

-//-

80

16

-//-

га

0,4

29

-//-

-//-

81

17

-//-

га

0,6

30

-//-

-//-

81

18

-//-

га

0,1

31

-//-

-//-

82

18

-//-

га

1,5

32

-//-

-//-

83

19

-//-

га

0,9

33

-//-

-//-

84

16

-//-

га

0,8

34

-//-

-//-

85

18

-//-

га

0,6

35

-//-

-//-

86

17

-//-

га

0,9

36

-//-

-//-

87

19

-//-

га

0,6

37

-//-

-//-

88

22

-//-

га

0,6

38

-//-

-//-

88

23

-//-

га

0,1

39

-//-

-//-

89

35

-//-

га

0,4

40

-//-

-//-

90

37

-//-

га

0,8

41

-//-

-//-

90

38

-//-

га

0,5

42

90

20

-//-

га

0,6

Итого:

35,8

43

Ермаковское

Ермаковское

46

13

Квартальная просека

га

0,3

44

-//-

-//-

46

14

-//-

га

0,2

45

-//-

-//-

45

15

-//-

га

0,5

46

-//-

-//-

45

16

-//-

га

0,1

47

-//-

-//-

47

24

-//-

га

1,5

48

-//-

-//-

47

25

-//-

га

0,6

49

-//-

-//-

47

26

-//-

га

0,4

50

-//-

-//-

48

8

-//-

га

0,9

51

Ермаковское

Ермаковское

49

8

Квартальная просека

га

1,3

52

-//-

-//-

50

17

-//-

га

0,2

53

-//-

-//-

50

18

-//-

га

1,1

54

-//-

-//-

51

43

-//-

га

0,1

55

-//-

-//-

51

44

-//-

га

3,1

56

-//-

-//-

52

49

-//-

га

0,1

57

-//-

-//-

52

48

-//-

га

0,7

58

-//-

-//-

52

47

-//-

га

0,6

59

-//-

-//-

53

11

-//-

га

0,5

60

-//-

-//-

54

17

-//-

га

1,3

61

-//-

-//-

55

13

-//-

га

1,1

62

-//-

-//-

56

18

-//-

га

0,1

63

-//-

-//-

56

17

-//-

га

1,1

64

-//-

-//-

57

29

-//-

га

0,6

65

-//-

-//-

57

30

-//-

га

1,1

66

-//-

-//-

59

18

-//-

га

1,4

67

-//-

-//-

59

19

-//-

га

0,1

68

-//-

-//-

63

14

-//-

га

0,7

69

-//-

-//-

63

15

-//-

га

0,4

70

-//-

-//-

63

16

-//-

га

0,3

71

-//-

-//-

64

15

-//-

га

0,1

72

-//-

-//-

64

13

-//-

га

0,7

73

-//-

-//-

64

14

-//-

га

0,4

74

-//-

-//-

65

20

-//-

га

0,1

75

-//-

-//-

65

18

-//-

га

0,2

76

-//-

-//-

65

19

-//-

га

0,4

77

-//-

-//-

68

15

-//-

га

1,0

78

-//-

-//-

68

16

-//-

га

0,1

79

-//-

-//-

69

13

-//-

га

0,4

80

-//-

-//-

69

14

-//-

га

0,1

81

-//-

-//-

70

9

-//-

га

0,1

82

-//-

-//-

70

10

-//-

га

0,4

83

-//-

-//-

71

20

-//-

га

0,1

84

-//-

-//-

71

21

-//-

га

0,7

85

-//-

-//-

72

16

-//-

га

1,7

86

-//-

-//-

73

13

-//-

га

0,2

87

-//-

-//-

74

17

-//-

га

0,1

88

-//-

-//-

75

13

-//-

га

0,2

89

-//-

-//-

76

15

-//-

га

0,4

90

-//-

-//-

76

16

-//-

га

0,8

91

-//-

-//-

77

15

-//-

га

0,5

92

-//-

-//-

77

16

-//-

га

0,4

93

-//-

-//-

78

15

-//-

га

0,7

94

-//-

-//-

79

14

-//-

га

0,3

95

-//-

-//-

79

15

-//-

га

0,1

96

-//-

-//-

80

14

-//-

га

0,6

97

-//-

-//-

80

15

-//-

га

0,3

98

-//-

-//-

81

15

-//-

га

0,4

99

-//-

-//-

81

16

-//-

га

0,4

100

-//-

-//-

82

17

-//-

га

0,1

101

-//-

-//-

83

18

-//-

га

0,1

102

-//-

-//-

84

14

-//-

га

0,7

103

-//-

-//-

84

15

-//-

га

0,1

104

-//-

-//

85

16

-//-

га

0,1

105

-//-

-//-

85

17

-//-

га

0,8

106

Ермаковское

Ермаковское

86

15

Квартальная просека

га

0,9

107

-//-

-//-

86

16

-//-

га

0,1

108

-//-

-//-

87

18

-//-

га

0,1

109

-//-

-//-

88

19

-//-

га

0,1

110

-//-

-//-

89

24

-//-

га

0,3

111

-//-

-//-

89

31

-//-

га

0,1

112

-//-

-//-

89

32

-//-

га

0,1

113

-//-

-//-

89

33

-//-

га

0,4

114

-//-

-//-

90

19

-//-

га

0,3

115

-//-

-//-

90

35

-//-

га

0,1

116

-//-

-//-

90

36

-//-

га

0,3

117

-//-

-//-

91

44

-//-

га

1,1

118

-//-

-//-

91

45

-//-

га

0,2

119

-//-

-//-

92

43

-//-

га

0,2

120

-//-

-//-

92

44

-//-

га

0,6

121

-//-

-//-

93

30

-//-

га

1,0

122

-//-

-//-

93

31

-//-

га

0,2

123

-//-

-//-

94

58

-//-

га

0,3

124

-//-

-//-

94

59

-//-

га

1,4

125

-//-

-//-

95

48

-//-

га

0,3

126

-//-

-//-

96

46

-//-

га

0,3

127

-//-

-//-

97

5

-//-

га

0,1

128

-//-

-//-

97

6

-//-

га

0,3

129

-//-

-//-

98

28

-//-

га

0,1

130

-//-

-//-

98

29

-//-

га

1,3

131

-//-

-//-

99

41

-//-

га

0,2

132

-//-

-//-

99

42

-//-

га

1,0

133

-//-

-//-

100

42

-//-

га

0,2

134

-//-

-//-

100

43

-//-

га

1,0

135

-//-

-//-

115

62

-//-

га

0,2

136

-//-

-//-

115

63

-//-

га

1,1

137

-//-

-//-

116

82

-//-

га

0,3

Итого:

48,4

Всего объектов лесной инфраструктуры:

84,2

5.Особо защитные участки лесов

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный 

выдел

Назначение

Площадь (га)

11

2

3

4

5

6

7

11

Ермаковское

Ермаковское

46

7, 9, 10, 13

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

20,9

22

-//-

-//-

47

2, 3, 6-12, 14, 15, 20-22, 27

81,7

33

-//-

-//-

59

17

1,5

44

-//-

-//-

63

2-13

-//-

60,4

55

-//-

-//-

64

4-12

-//-

123,7

56

-//-

-//-

65

3, 5-17, 21

-//-

102,4

67

-//-

-//-

68

1-11, 19

-//-

147,2

78

-//-

-//-

69

1-10, 12

-//-

121,2

89

-//-

-//-

70

1-8, 11

-//-

51,5

110

-//-

-//-

76

5

-//-

14,1

111

Ермаковское

Ермаковское

77

1-5, 17

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

39,9

212

-//-

-//-

78

1-5

43,4

113

-//-

-//-

79

1, 16

1,7

114

-//-

-//-

80

2

5,8

115

-//-

-//-

81

1-4, 17

14,0

Итого:

829,4

116

Ермаковское

Ермаковское

50

14, 15

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов, оврагов

7,7

117

-//-

-//-

51

41

6,8

118

-//-

-//-

52

10, 11, 35-37, 42, 45

28,3

119

-//-

-//-

83

17

3,0

220

-//-

-//-

84

13

-//-

5,0

221

-//-

-//-

85

14, 15

-//-

4,0

222

-//-

-//-

86

14

-//-

5,0

223

-//-

-//-

87

15-17

-//-

5,0

224

-//-

-//-

88

15, 18

-//-

5,1

225

-//-

-//-

89

19, 23, 30

-//-

5,5

226

-//-

-//-

90

31, 33

-//-

10,3

227

-//-

-//-

91

20, 38, 41-43

-//-

30,6

228

-//-

-//-

92

23, 42

-//-

19,4

229

-//-

-//-

93

21, 23, 29

-//-

19,1

330

-//-

-//-

94

7, 9, 23, 36, 56, 57

-//-

71,0

331

-//-

-//-

95

3, 8, 9, 17, 45

-//-

117,3

332

-//-

-//-

96

8, 14, 39, 44, 45

-//-

85,5

333

-//-

-//-

99

5, 39, 40

-//-

31,9

334

-//-

-//-

100

3, 11, 32, 35, 39-41

-//-

45,2

335

-//-

-//-

115

3, 8, 15, 23, 36, 39, 60, 61

-//-

97,6

336

-//-

-//-

116

8, 11, 16, 24, 27, 44, 60, 64, 73, 74, 80, 81

-//-

147,9

Итого:

751,2

37

Ермаковское

Ермаковское

50

9

Постоянный лесосеменной участок

5,0

Итого:

5,0

Всего:

1585,6

6.Объекты лесного семеноводства

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта лесного семеноводства

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

7.Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

__________________________

(подпись, печать)

2. Приложение №6 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 6 к договору

 аренды лесного участка

от 17.10.2012 № 637-з

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Целевое назначение лесов

Виды мероприятий

Единица измерения

Годовой объем

Срок исполнения

1

2

3

4

5

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

Противопожарное обустройство лесов

Защитные леса, эксплуатационные леса 

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

1,0

2,3,4 кв.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

1,3

2,3,4 кв.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

13,8

2,3,4 кв.

Установка и размещение стендов и др. знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах

шт.

2

2,3,4 кв.

Строительство посадочных площадок для самолётов, вертолётов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов 

шт.

−

−

Прокладка просек, противопожарных разрывов

км

−

−

Устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения

шт.

-

-

Устройство противопожарных минерализованных полос (шириной не менее 1,4 м)

км

2,5

2,3,4 кв.

Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление

км

2,5

2,3,4 кв.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных горючих материалов

га

−

−

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт.

2

2,3 кв.

Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов)

шт.

−

−

Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт.

1

2,3,4 кв.

Строительство и содержание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) 

шт.

1

2,3 кв.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, создание резерва горюче-смазочных материалов

Защитные леса, эксплуатационные леса 

Приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения инвентаря (согласно приказу Минприроды России от 28.03.2014 № 161 в редакции приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.2015 № 321)

Место базирования ПСПИ: с. Ермаковское

Мобильные средства пожаротушения:

Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования))

шт.

1

2,3 кв.

Защитные леса, эксплуатационные леса

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)

шт.

2

2,3 кв.

Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием

шт.

2

2,3 кв.

Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн

шт.

-

2,3 кв.

Пожарное оборудование:

Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л

шт.

1

2,3 кв.

Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)

пог.м

200

2,3 кв.

Торфяные стволы

комплект

-

2,3 кв.

Пожарный инструмент:

Воздуходувки

шт.

2

2,3 кв.

Бензопилы

шт.

2

2,3 кв.

Ранцевые лесные опрыскиватели 

(ранцы противопожарные)

шт.

7

2,3 кв.

Топоры

шт.

3

2,3 кв.

Лопаты

шт.

10

2,3 кв.

Емкость для доставки воды объемом 10-15 л

шт.

2

2,3 кв.

Системы связи и оповещения:

Электромегафоны

шт.

1

2,3 кв.

Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) диапазона

шт.

2

2,3 кв.

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)

комплект

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров

2,3 кв.

Аптечка первой помощи

шт.

по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров

2,3 кв.

Индивидуальные перевязочные пакеты

шт.

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров

2,3 кв.

Защитные леса, эксплуатационные леса

Огнетушащие вещества:

Смачиватели, пенообразователи

кг

7

2,3 кв.

Дополнительные:

Зажигательные аппараты

шт.

2

2,3 кв.

Бидоны или канистры для питьевой воды

шт.

2

2,3 кв.

Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход

шт.

1

2,3 кв.

Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с.

шт.

-

2,3 кв.

Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены

Создание резерва горюче-смазочных материалов

тонн

1

1,2 кв.

Создание добровольно-пожарных дружин

кол./чел.

1/10

2,3 кв.

Подготовка руководителей тушения лесных пожаров

чел.

1

1,2 кв.

Обучение работников тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок

чел.

10

2,3 кв.

Мониторинг пожарной опасности в лесах, разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров

Защитные леса, эксплуатационные леса 

Мониторинг лесных пожаров

га

14999

2,3 кв.

Утверждение маршрутов наземного патрулирования

шт./км

2/15

2,3 кв.

Разработка планов тушения лесных пожаров

шт.

1

2,3 кв.

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

Обеспечение мер санитарной безопасности на арендованном лесном участке (оформление листков сигнализации, выполнение санитарно - оздоровитель-ных и других мероприятий)

га

14999

2,3 кв.

Лесовосстановительные мероприятия

Подготовка почвы под лесные культуры

га

В соответствии с проектом освоения лесов

Создание лесных культур

га

Проведение мер содействия естественному возобновлению леса

га

Уход за лесными культурами

га

Дополнение лесных культур

га

Выращивание (приобретение) посадочного материала

тыс. шт.

Заготовка лесных семян

кг

Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных древесных насаждений

га

в том числе за счёт:

- искусственного лесовосстановления

(лесных культур)

га

- естественного лесовосстановления

(мер содействия естественному возобновлению леса)

га

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

____________________________

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

____________________________

(подпись, печать)

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика пояснил согласно отзыву на иск.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между Агентством лесной отрасли Красноярского края и открытым акционерным обществом «ВостсибНИИгипрозем» заключен договор аренды лесных участков №637-з от 17.10.2012, по условиям которого арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании протокола от 21.09.2012 № 2 о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование на срок 49 лет, лесные участки, определенные пунктом 2 настоящего Договора (далее - лесные участки).

В пункте 2 договора указано, что лесные участки из состава земель лесного фонда, общей площадью 14998.8 га, предоставляемые в аренду по настоящему договору, имеют местоположение: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, кварталы №№ 46-57, 59 (за искл. выделов №№ 2, 3, 8, 10), 63, 64, 65 (за искл. выделов №№ 1-6, 11,13, 14), 68-100. И5,116, в том числе:

- площадью 286 га, отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 46, 47, имеющий номер учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0497-2009-04-3318-1,

- площадью 1227 га, отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№48, 49, 50, 51, 52, имеющий номер: учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0495-2009-04-3318-1,

- площадью 834 га, отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в. кварталах №№53, 54, 55, 56, 57, имеющий номер учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0498-2009-04-3318-1,

- площадью 3782га, отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край. Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 68-90, имеющий номер учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0499-2009-04-3318-1,

- площадью   511,8га,   отнесенный   к   защитным   лесам,   расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 59 (за исключением части выделов 3, 2, 8, 10) 63, 64, 65 (за исключением части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14), имеющий номер учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0500-2009-04-3318-1,

-  площадью 8358 га, отнесенный к эксплуатационным и защитным лесам,

расположенный:     Красноярский     край,     Ермаковский     район,     Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 91-100, 115, 115, 116, имеющий номер учетной записи в государственном лесном реестре №24-

0501-2009-04-3318-1.

Из пункта 3 договора следует, что границы лесных участков определены на кадастровой карте (плане) лесного участка, являющейся неотъемлемой частью договора или на схеме расположения лесного участка согласно Приложению № 1. Характеристика лесного участка приводится в Приложении № 2.

В пункте 4 договора указано, что арендатору передаются лесные участки для видов использования в целях и в объемах согласно Приложению № 3.

Из пункта 5 следует, что ежегодная арендная плата составляет 1159 213 рублей.

В соответствии с пунктом 6 договора, арендатор вносит арендную плату независимо от освоения лесосеки ежеквартально равными частями в размере ¼  части годового размера арендной платы с 1 до 15 числа последнего месяца текущего квартала согласно приложению № 4 к договору по реквизитам, указанным арендодателем и представляет в течение 15 дней арендодателю копию платежного поручения (квитанцию), подтверждающую своевременное внесение платежей.

Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации договора аренды лесного участка.

Первый платеж (за оставшуюся часть квартала, считаемую со дня регистрации Договора) вносится в течение 10 дней со дня регистрации договора.

Датой поступления платежа, указанного в п. 5 настоящего Договора, считается день поступления денежных средств на счет по указанным Арендодателем реквизитам по оформленному надлежащим образом платежному документу с обязательным указанием кодов бюджетной классификации, номера и даты настоящего Договора, периода, за который производится оплата, назначения платежа.

В соответствии с пунктом 7 договора, арендная плата рассчитывается на основании минимального размера арендной платы, определяемого в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации, с применением корректирующих коэффициентов, установленных нормативными правовыми актами.

В силу пункта 8 договора, размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу площади лесного участка, или за единицу объема лесных ресурсов, устанавливаемых в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации. Арендная плата подлежит обязательной уплате арендатором в новом размере без дополнительного согласования и внесения изменений в договор.

Разница в сумме арендной платы, образовавшаяся в результате перерасчета арендной платы, вносится Арендатором одновременно со следующим платежом арендной платы (пункт 9 договора).

В соответствии с подпунктами пункта 13 договора арендатор обязан: в) в установленном порядке разработать и представить арендодателю проектосвоения лесов; д)представлять арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесных участках; е)осуществлять меры противопожарного обустройства лесов на основании проект лесов; з)осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия), лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении N 6.

Все изменения к договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами (пункт 20).

Из пункта 21 договора следует, что внесение изменений в договор, заключенный по результатам аукциона, на основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 договора по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в разделе VI договора.

Срок действия договора устанавливается на 49 лет, с 17.10.2012 по 16.10.2061 (пункт 26 договора).

Согласно пункту 27 договора спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, или вопросы, не оговоренные в договоре, разрешаютсяпутем переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто,указанные вопросы подлежат передаче на рассмотрение Арбитражному суду Красноярского края. 

Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации в установленном порядке 02.11.2012. 

В приложениях №1 и №2 к договору отражена схема расположения и границы лесного участка, а также характеристика лесного участка и его насаждений, средние таксационные показатели насаждений лесного участка.

Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке определены в приложении №3 к договору.

В приложении №4 к договору определены сроки внесения арендной платы.

В приложении №6 стороны согласовали объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразвидению.

Факт пользования истцом лесным участком сторонами не оспаривается, что отражено в акте приема-передачи лесных участков в аренду от 29.10.2012.

Дополнительным соглашением №1 от 07.12.2012 стороны изложили приложения №3, №6 в новой редакции.

Дополнительным соглашением №2 от 11.03.2013 стороны изложили пункт 2 в следующей редакции: «2. Лесные участки из состава земель лесного фонда, общей площадью 14998,8 га , предоставляемые . в аренду по настоящему договору, имеют местоположение: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, кварталы №№ 46-57, 59 (за искл. выделов №№ 2, 3, 8,10), 63, 64, 65 (за искл. выделов №№ 1-6, 11, 13,14), 68-100, 115, 116, в том числе:

площадью 286 га (уточненная площадь по результатам межевания 2860000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 46,47, кадастровый номер 24:13:0000000:1049;

площадью 1227 га (уточненная площадь по результатам межевания 12270000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№48, 49, 50, 51, 52, кадастровый номер 24:13:0201001:110;

площадью 834 га (уточненная площадь по результатам межевания 8340000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, * Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 53, 54, 55, 56, 57, кадастровый номер 24:13:0000000:400;

площадью 3782 га (уточненная площадь по результатам межевания 37820000 кв.м) , отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 68-90, кадастровый номер 24:13:0000000:1059;

площадью 511,8 га (уточненная площадь по результатам межевания 5118000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 59 (за исключением части выделов 3, 2, 8, 10), 63, 64, 65 (за исключением части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14), кадастровый номер 24:13:0000000:1057;

площадью 8358 га (уточненная площадь по результатам межевания 83580000 кв.м), отнесенный к эксплуатационным и защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№91-100, 115, 116, кадастровый номер 24:13:0000000:1058.».

Дополнительным соглашением №3 от 27.08.2013 заключенным между Агентсвом лесной отрасли Красноярского края (арендодатель), ОАО «Восточно-сибирский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству» (арендатор) и ООО «Промлестрой» (перенаниматель) стороны согласовали, что арендатор с согласия арендодателя уступает все свои права и обязанности, в том числе обязательные платежи и пени по договору аренды лесного участка от 17.10.2012 № 637-з Перенанимателю. Настоящее соглашение является согласием арендодателя.

В пункте 2 дополнительного соглашения №3 от 27.08.2013 указано, что все права и обязанности по соглашению передаются арендатором перенанимателю в полном объеме, существующем на момент заключения настоящего дополнительного соглашения.

В пункте 3 дополнительного соглашения №3 от 27.08.2013 указано, что перенаниматель гарантирует арендодателю, что работы по охране, защите и воспроизводству лесов, предусмотренные приложением № 6 к договору аренды лесного участка от 17.10.2012 № 637-3, проектом освоения лесов, будут исполнятся в объемах и сроки, установленные договором и проектом освоения лесов.

В пункте 4 дополнительного соглашения №3 от 27.08.2013 указано, что перенаниматель обязуется надлежащим образом осуществлять все принятые на себя обязательства по договору аренды лесного участка от 17.10.2012 №637-з.

Из иска следует, что в 2014 году на основании таксационного описания филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» подготовлен проект освоения лесного участка, переданного в аренду истцу для заготовки древесины, содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках лесов по итогам таксации лесов.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 13.08.2015 № 5/348-од материалы введены в действие.

Истцом в материалы дела представлена справка о количественных и качественных характеристиках лесов по данным таксации лесов 2014 года по лесному участку, переданному в аренду ООО «ПромЛесСтрой» в Ермаковском участковом лесничестве Ермаковского лесничества.

Ссылаясь на то, что по результатам лесопатологического обследования установлено существенное изменение количественных и качественных характеристик лесного участка, урегулировать спор путем подписания сторонами дополнительного соглашения не представляется возможным, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал на следующее:

- согласно заявлению об уточнении исковых требований истцом предлагается к утверждению сумма арендной платы в размере 2 695 491, в том числе: 1 951 333 руб. в федеральный бюджет, 744 158 руб. в краевой бюджет. Ежегодный объем заготовки древесины устанавливается в размере 38847 куб. м. При этом, согласно договору аренды лесного участка от 17.10.2012 № 637-з изначально установлен в Приложении 3 Договора ежегодный объем заготовки составляет 34000 куб.м.;

- увеличение объема заготовки составляет 4847 куб.м или 9%, что министерство полагает существенным изменением, которое не может быть внесено в договор аренды лесного участка, заключенного на аукционе, на основании соглашения сторон без решения суда;

- истцом применен 1 разряд такс. В этой части у министерства отсутствуют возражения. По результатам проверки расчета арендной платы, представленной истцом, возражений в части математической правильности расчетов не имеется. Расчет арендной платы в федеральный бюджет (минимальный размер арендной платы) является правильным 1 951 333 руб. Однако, при расчете истцом арендной платы в бюджет Красноярского края использован иной, нежели установленный договором аренды расчет в части арендной платы, превышающей минимальный размер арендной платы и установленный по результатам аукциона;

- при расчете арендной платы в бюджет Красноярского края с учетом установленного конкурсного коэффициента 1,539991 размер арендной платы в Краевой бюджет должен составлять 1 053 702 руб. = (1 951 333 руб. * 1,539991 к.коэф.) - 1 951 333 руб., а общий размер арендной платы -3 005 035 руб.;

- при расчете арендной платы в бюджет Красноярского края истец проиндексировал размер арендной платы в бюджет Красноярского края, полученной по результатам аукциона на коэффициент индексации 2,38, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363: (406 473 руб. / 1,3 коэф2012) * 2,38 коэф2019 = 744 158 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации, заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Кодекса.

Из части 1 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации следует, что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся, в том числе, полномочия по владению, пользованию, распоряжению лесными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации.

Статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации закрепляется передача отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов.

Судом установлено, что согласно абзацу 2 части 1 Постановления Правительства Красноярского края от 23.10.2013 № 550-п «Об органах исполнительной власти Красноярского края», принято решение реорганизовать министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края путем присоединения к нему агентства лесной отрасли Красноярского края, службы по контролю в сфере природопользования Красноярского края, службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края.

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц агентство лесной отрасли Красноярского края 10.01.2014 прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края.

Пунктом 2 распоряжения Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р министерство лесного хозяйства Красноярского края является правопреемником министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края в части обязательств, связанных с осуществлением полномочий в области лесных отношений, в том числе обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений. 

Положение о министерстве лесного хозяйства утверждено постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 374-п. 

В Едином государственном реестре юридических лиц министерство лесного хозяйства зарегистрировано 03.08.2016.  

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края, в редакции постановления Правительства Красноярского края от 26.07.2016 №371-п, названное министерство не осуществляет никаких полномочий в области лесных отношений. 

Таким образом, лицом, наделенным полномочиями по администрированию платы за пользование участками лесного фонда на территории Красноярского края является Министерство лесного хозяйства Красноярского края. 

Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами (часть 2 статьи 3 Лесного кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор аренды лесного участка 637-з от 17.10.2012, правоотношения  по которому регламентированы нормами главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации.

На основании пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как предусмотрено статьей 422 Российской Федерации, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. 

Статьей 72 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору аренды участок лесного фонда предоставляется лесопользователю (арендатору) за плату на определенный срок для осуществления одного или нескольких видов лесопользования. 

Согласно части 3 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона.

Согласно пункту 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.

В соответствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации, право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных участков, а также право безвозмездного пользования лесными участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и земельным законодательством, Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Нормы главы 6 Лесного кодекса Российской Федерации регулируют отношения по предоставлению гражданам и юридическим лицам в пользование лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Статьей 71 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что юридическим лицам лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование в соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федерации. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договора, договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается по результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора, за исключением случаев, установленных частью 3 настоящей статьи.

В соответствии с частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей на момент заключения договора, при заключении договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по результатам аукциона изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается.

Согласно части 3 статьи 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений», договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенный по результатам торгов, может быть изменен по решению суда в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка.

Частью 2 статьи 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что Изменение условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенного по результатам торгов, не допускается, за исключением случаев изменения целевого назначения или разрешенного использования лесов, существенного изменения параметров использования лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов) или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при его заключении, если такое изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий) и стало основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр.

Из приведенных норм права следует, что Лесным кодексом Российской Федерации был установлен и продолжает действовать запрет на изменение условий договора аренды лесного участка, заключенного по результатам аукциона, по волеизъявлению его участников. Такое изменение может быть осуществлено только в судебном порядке при наличии установленных законом оснований.

В соответствии со статьей 78 Лесного кодекса Российской Федерации, регламентирующей организацию проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении лесных участков или лесных насаждений, о площади и границах лесных участков, об объеме подлежащих заготовке лесных ресурсов, об обременениях лесных участков, об ограничении использования лесов, о кадастровых номерах лесных участков, о видах и об установленных лесохозяйственным регламентом параметрах использования лесов.

Следовательно, организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, которая наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении аукциона, должна содержать достоверные сведения.

В соответствии с частью 1 статьи 78 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент проведения аукциона, договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, договоры купли-продажи лесных насаждений заключаются по результатам аукционов, проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины).

Согласно пункту 4 части 4 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент проведения аукциона, извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о начальной цене предмета аукциона (начальном размере арендной платы или начальной цене заготавливаемой древесины), определяемой в соответствии со статьями 73 и 76 настоящего Кодекса, но не ниже минимального размера арендной платы или минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а в случае заключения договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 настоящего Кодекса не ниже размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 76 настоящего Кодекса.

В силу пункта 3 части 6 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент проведения аукциона, организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, которая наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении аукциона, должна содержать сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаге аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в размере, не превышающем пяти процентов от начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины).

В соответствии с частью 1 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент проведения аукциона, аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины) на «шаг аукциона». Если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины) ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, аукцион признается несостоявшимся. Организатор аукциона обязан осуществлять аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Если предметом аукциона являлась арендная плата, то по результатам проведения аукциона заключается договор аренды лесного участка, в котором размер арендной платы определяется по цене, предложенной победителем.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что на основании таксационного описания филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» подготовлен проект освоения лесного участка, переданного в аренду обществу, содержаний сведения об изменении количественных и качественных характеристик лесов по итогам таксации лесов, в подтверждение чего представил справку о количественных и качественных характеристиках лесов.

Ответчик справку о количественных и качественных характеристиках лесов арендованных ответчиком не оспорил, указав, что увеличение объема заготовки является существенным изменением, которое не может быть внесено в договор аренды лесного участка, заключенного на аукционе, на основании соглашения сторон без решения суда. 

Ответчик, согласившись с расчетом арендной платы в федеральный бюджет, разрядом такс, указал на неверность расчета истца в бюджет Красноярского края и  применение коэффициента индексации 2,38, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363.

Согласно проекту дополнительного соглашения к договору аренды размер ежегодной  арендной платы составляет 2 695 491, в том числе: 1 951 333 руб. в федеральный бюджет, 744 158 руб. в краевой бюджет. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, ежегодный объем заготовки составляет 34 000 куб.м., при этом из проекта дополнительного соглашения следует, что ежегодный объем заготовки древесины устанавливается в размере 38 847 куб. м. 

Таким образом, увеличение объема заготовки составляет 4847 куб.м (9%), что по мнению суда является существенным изменением, которое не может быть внесено в договор аренды лесного участка, заключенного на аукционе, на основании соглашения сторон. Данный факт также не оспаривается ответчиком.

В силу статьи 73 Лесного кодекса Российской Федерации размер арендной платы определяется на основе минимального размера арендной платы, устанавливаемого в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи (часть 1). Для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (часть 4). Размер арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса, определяется в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации (часть 5).

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (далее – Постановление № 310).

В случае изменения ставок платы за объем древесины либо корректировки их для арендатора путем изменения разрядов такс, изменяться может только регулируемая (минимальная) часть арендной платы - арендная плата в бюджет Субъекта Федерации - Красноярского края.

Размер арендной платы в бюджет Субъекта Федерации - Красноярского края может изменяться в том случае, если заключенный сторонами договор аренды содержит соответствующее закону условие о возможности изменения определенного по итогам аукциона размера арендной платы путем корректировки на установленный в нормативном акте соответствующим органом коэффициент индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, то есть пропорционально изменению минимальных ставок платы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, условия договора аренды лесных участков от 17.10.2012 №637-з предусмотрено, что арендная плата рассчитывается на основании минимального размера арендной платы, определяемого в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации, с применением корректирующих коэффициентов, установленных нормативными правовыми актами.

В силу пункта 8 договора, размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу площади лесного участка, или за единицу объема лесных ресурсов, устанавливаемых в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации. Арендная плата подлежит обязательной уплате арендатором в новом размере без дополнительного согласования и внесения изменений в договор.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363 установлены коэффициенты индексации за единицу объема лесных ресурсов: в 2012 году - 1,3, в 2019 году - 2,38.

Определение  в расчете арендной платы в бюджет Красноярского края коэффициента  индексации равном 2,38 установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 №1363, по мнению суда, не противоречит действующему законодательству.

 Правовая позиция о возможности изменения определенного по итогам аукциона размера арендной платы путем корректировки на установленный в нормативном акте соответствующим органом коэффициент к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, то есть пропорционально изменению минимальных ставок платы, сформулирована в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2016 № 303-ЭС15-19719 и изложена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2017.

Внесение изменений сторонами в договор обусловлено изменением количественных и качественных характеристик лесного участка, что является существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. В связи с изложенным спор о внесении изменений в договор аренды от 17.10.2012 подлежит урегулированию судом в соответствии в соответствии с пунктом 3 статьи 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации. Учитывая установленные по делу обстоятельства, анализируя приведенные нормы права, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Проанализировав представленный истцом проект изменения условий договора аренды лесного участка и приложений к нему, оценив в совокупности и взаимосвязи, представленные в материалы дела доказательства, учитывая фактические обстоятельства дела,  суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

При изложенных обстоятельствах исковые требования об обязании заключить дополнительное соглашение к договору аренды лесных участков от 17.10.2012 № 6374-з подлежит удовлетворению в редакции истца. 

В соответствии с частями 1-5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению судом.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

На основании части 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

С учетом заявления истца, расходы по государственной пошлине относятся на него.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать министерство лесного хозяйства Красноярского края (г. Красноярск) в течение десяти дней с момента вступления настоящего решения в законную силу заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Промлесстрой» (г. Минусинск) дополнительное соглашение о внесении следующих изменений в договор аренды лесного участка № 637-з от 17.10.2012:

Пункт 5 Договора изложить в следующей редакции:

«5. Ежегодная арендная плата составляет 2 695 491 (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто один) рубль».

Приложение № 2 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 2 

к договору аренды лесного 

участка от 17.10.2012 № 637-з

2. Распределение земель

Общая

площадь 

всего

В том числе

лесные земли

нелесные земли

занятые лесными насаждениями

лесные

культуры

лесные питомники, плантации

не занятые лесными насаждениями*

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса – всего:

7918,8

7502,8

58

-

237

7739,8

25

37

16,8

101

179,8

Эксплуатационные леса – всего:

7080

7043

12

-

9

7052

11

11

-

6

28

Всего по лесничеству:

14998,8

14545,8

70

-

246

14791,8

36

48

16,8

107

207,8

*в том числе несомкнувшихся лесных культур – 112 га (защитные леса – 105 га, эксплуатационные леса – 7 га)

2.Характеристика насаждений

Целевое 

назначение лесов

Лесничество

Участковое лесничество

Лесной квартал

Хозяйство, 

преобладающая 

порода

Площадь (га) / запас древесины (тыс.куб.м) - всего

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м)

молодняки

средневоз-

растные

приспевающие

спелые и 

перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса

Ермаковское

Ермаковское, 

кварталы №№ №№ 46-57, 59, 63- 65, 68-100, 115, 116

 

Хвойные

Сосна

5575

1889,8

63

1,0

4480

1539,6

805

267,9

227

81,3

Пихта

617

96,7

617

96,7

Лиственница

15

2,3

15

2,3

Кедр

8

8

Итого:

6215

1988,8

86

3,3

5097

1636,3

805

267,9

227

81,3

Мягколиственные

Береза

854

196,1

6

0,1

116

14,2

62

8,2

670

173,6

Осина

433

80,7

45

6,7

7

1,4

381

72,6

Итого:

1287

276,8

6

0,1

161

20,9

69

9,6

1051

246,2

Всего по защитным лесам:

7502

2265,6

92

3,4

5258

1657,2

874

277,5

1278

327,5

Эксплуатационные леса

Хвойные

Сосна

1378

379,1

25

2,7

1090

312,2

214

51,9

49

12,3

Пихта

1093

239,5

840

179,4

52

10,9

201

49,2

Кедр

266

66,1

53

4,0

74

17,6

139

44,5

Итого:

2737

684,7

78

6,7

1930

491,6

340

80,4

389

106,0

Мягколиственные

Береза

1380

206,1

68

2,0

250

25,3

144

23,2

918

155,6

Осина

2926

520,2

241

6,5

249

27,2

141

24,1

2295

462,4

Итого:

4306

726,3

309

8,5

499

52,5

285

47,3

3213

618,0

Всего по эксплуатационным лесам:

7043

1411,0

387

15,2

2429

544,1

625

127,7

3602

724,0

Всего по лесному участку

14545

3676,6

479

18,6

7687

2201,3

1499

405,2

4880

1051,5

3.Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов

Хозяйство, преобладающая порода

Состав 

Возраст

Бонитет

Полнота

Средний запас древесины 

лесных насаждений

(куб.м/га)

средневоз-растные

приспевающие

спелые и

перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Защитные леса

Сосна

8,6С 1,4Б + К, П, Ос

88

1,4

0,86

344

333

366

Пихта

5,4П 0,7К 0,3С 0,1Е1,9Б 1,6Ос

71

2,9

0,55

156

-

-

Лиственница

6,4Л 3,6Б

39

3,0

0,92

-

-

-

Кедр

10,0К

11

2,0

0,80

-

-

-

Итого хвойных

7,7С 0,5П 0,1К 1,5Б  0,2Ос +Л, Е

86

1,6

0,83

321

333

366

Береза

7,0Б 0,5Ос 2,4С 0,1П + К, Л, Ив

71

2,2

0,83

124

132

260

Осина

5,4Ос 2,5Б 1,1С 0,9П 0,1К

67

1,9

0,60

149

200

194

Итого мягколиственных

5,4Б 2,1Ос 2,0с 0,4П 0,1К + Л, Ив

69

2,1

0,75

131

139

236

Всего

6,7С 0,5П 0,1К 2,2Б 0,5Ос + Л, Е, Ив

83

1,7

0,81

315

318

259

Эксплуатационные леса

Сосна

6,1С  0,3П 2,4Б 1,2Ос + К ,Ив

76

1,5

0,77

286

242

217

Пихта

6,0П 0,5К 0,3С 1,9Ос 1,3Б +Е

78

2,4

0,67

214

206

245

Кедр

3,8К 3,1П 0,4С 1,6Ос 1,1Б 

171

2,9

0,57

-

238

320

Итого хвойных

3,2С 2,9П 0,6К 1,8Б 1,5Ос +Е, Ив

86

2,0

0,71

255

236

268

Береза

5,4Б 2,3Ос 1,8С 0,3П 0,1К, 0,1Ив

61

2,2

0,63

101

161

169

Осина

5,8Ос 2,2Б 1,0С 0,9П 0,1К +Ив

62

2,0

0,61

109

171

201

Итого мягколиственных

4,7Ос 3,2Б 1,3С 0,7П 0,1К +Ив

61

2,1

0,62

105

166

192

Всего

3,5Ос 2,7Б 2,0С 1,5П 0,3К + Е, Ив

71

2,1

0,65

224

204

200

Всего по участку:

4,5С 1,0П 0,2К 2,4Б 1,9Ос + Л, Е Ив

77

1,9

0,74

286

270

215

4.Объекты лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое

лесничество

Лесной квартал

Лесотаксационный

выдел

Наименование

объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ермаковское

Ермаковское

47

27

Дорога лесная

га

0,1

2

-//-

-//-

47

28

-//-

га

0,2

3

-//-

-//-

49

9

-//-

га

0,8

4

-//-

-//-

50

19

-//-

га

1,4

5

-//-

-//-

65

21

-//-

га

0,1

6

-//-

-//-

68

19

-//-

га

0,7

7

-//-

-//-

68

20

-//-

га

0,2

8

-//-

-//-

69

15

-//-

га

0,5

9

-//-

-//-

70

11

-//-

га

0,1

10

-//-

-//-

93

32

-//-

га

0,2

11

-//-

-//-

94

60

-//-

га

0,2

12

-//-

-//-

98

30

-//-

га

3,5

13

-//-

-//-

99

44

-//-

га

1,5

14

-//-

-//-

99

43

-//-

га

6,0

15

-//-

-//-

100

44

-//-

га

3,7

16

-//-

-//-

100

45

-//-

га

1,2

17

-//-

-//-

71

22

-//-

га

0,5

18

-//-

-//-

72

17

-//-

га

1,1

19

-//-

-//-

73

14

-//-

га

0,3

20

-//-

-//-

74

18

-//-

га

0,3

21

-//-

-//-

75

14

-//-

га

0,6

22

-//-

-//-

76

17

-//-

га

0,4

23

-//-

-//-

77

17

-//-

га

0,2

24

-//-

-//-

77

18

-//-

га

0,9

25

-//-

-//-

78

16

-//-

га

1,3

26

-//-

-//-

79

16

-//-

га

0,1

27

-//-

-//-

79

17

-//-

га

0,3

28

-//-

-//-

80

16

-//-

га

0,4

29

-//-

-//-

81

17

-//-

га

0,6

30

-//-

-//-

81

18

-//-

га

0,1

31

-//-

-//-

82

18

-//-

га

1,5

32

-//-

-//-

83

19

-//-

га

0,9

33

-//-

-//-

84

16

-//-

га

0,8

34

-//-

-//-

85

18

-//-

га

0,6

35

-//-

-//-

86

17

-//-

га

0,9

36

-//-

-//-

87

19

-//-

га

0,6

37

-//-

-//-

88

22

-//-

га

0,6

38

-//-

-//-

88

23

-//-

га

0,1

39

-//-

-//-

89

35

-//-

га

0,4

40

-//-

-//-

90

37

-//-

га

0,8

41

-//-

-//-

90

38

-//-

га

0,5

42

90

20

-//-

га

0,6

Итого:

35,8

43

Ермаковское

Ермаковское

46

13

Квартальная просека

га

0,3

44

-//-

-//-

46

14

-//-

га

0,2

45

-//-

-//-

45

15

-//-

га

0,5

46

-//-

-//-

45

16

-//-

га

0,1

47

-//-

-//-

47

24

-//-

га

1,5

48

-//-

-//-

47

25

-//-

га

0,6

49

-//-

-//-

47

26

-//-

га

0,4

50

-//-

-//-

48

8

-//-

га

0,9

51

Ермаковское

Ермаковское

49

8

Квартальная просека

га

1,3

52

-//-

-//-

50

17

-//-

га

0,2

53

-//-

-//-

50

18

-//-

га

1,1

54

-//-

-//-

51

43

-//-

га

0,1

55

-//-

-//-

51

44

-//-

га

3,1

56

-//-

-//-

52

49

-//-

га

0,1

57

-//-

-//-

52

48

-//-

га

0,7

58

-//-

-//-

52

47

-//-

га

0,6

59

-//-

-//-

53

11

-//-

га

0,5

60

-//-

-//-

54

17

-//-

га

1,3

61

-//-

-//-

55

13

-//-

га

1,1

62

-//-

-//-

56

18

-//-

га

0,1

63

-//-

-//-

56

17

-//-

га

1,1

64

-//-

-//-

57

29

-//-

га

0,6

65

-//-

-//-

57

30

-//-

га

1,1

66

-//-

-//-

59

18

-//-

га

1,4

67

-//-

-//-

59

19

-//-

га

0,1

68

-//-

-//-

63

14

-//-

га

0,7

69

-//-

-//-

63

15

-//-

га

0,4

70

-//-

-//-

63

16

-//-

га

0,3

71

-//-

-//-

64

15

-//-

га

0,1

72

-//-

-//-

64

13

-//-

га

0,7

73

-//-

-//-

66

14

-//-

га

0,4

74

-//-

-//-

65

20

-//-

га

0,1

75

-//-

-//-

65

18

-//-

га

0,2

76

-//-

-//-

65

19

-//-

га

0,4

77

-//-

-//-

68

15

-//-

га

1,0

78

-//-

-//-

68

16

-//-

га

0,1

79

-//-

-//-

69

13

-//-

га

0,4

80

-//-

-//-

69

14

-//-

га

0,1

81

-//-

-//-

70

9

-//-

га

0,1

82

-//-

-//-

70

10

-//-

га

0,4

83

-//-

-//-

71

20

-//-

га

0,1

84

-//-

-//-

71

21

-//-

га

0,7

85

-//-

-//-

72

16

-//-

га

1,7

86

-//-

-//-

73

13

-//-

га

0,2

87

-//-

-//-

74

17

-//-

га

0,1

88

-//-

-//-

75

13

-//-

га

0,2

89

-//-

-//-

76

15

-//-

га

0,4

90

-//-

-//-

76

16

-//-

га

0,8

91

-//-

-//-

77

15

-//-

га

0,5

92

-//-

-//-

77

16

-//-

га

0,4

93

-//-

-//-

78

15

-//-

га

0,7

94

-//-

-//-

79

14

-//-

га

0,3

95

-//-

-//-

79

15

-//-

га

0,1

96

-//-

-//-

80

14

-//-

га

0,6

97

-//-

-//-

80

15

-//-

га

0,3

98

-//-

-//-

81

15

-//-

га

0,4

99

-//-

-//-

81

16

-//-

га

0,4

100

-//-

-//-

82

17

-//-

га

0,1

101

-//-

-//-

83

18

-//-

га

0,1

102

-//-

-//-

84

14

-//-

га

0,7

103

-//-

-//-

84

15

-//-

га

0,1

104

-//-

-//-

85

16

-//-

га

0,1

105

-//-

-//-

85

17

-//-

га

0,8

106

Ермаковское

Ермаковское

86

15

Квартальная просека

га

0,9

107

-//-

-//-

86

16

-//-

га

0,1

108

-//-

-//-

87

18

-//-

га

0,1

109

-//-

-//-

88

19

-//-

га

0,1

110

-//-

-//-

89

24

-//-

га

0,3

111

-//-

-//-

89

31

-//-

га

0,1

112

-//-

-//-

89

32

-//-

га

0,1

113

-//-

-//-

89

33

-//-

га

0,4

114

-//-

-//-

90

19

-//-

га

0,3

115

-//-

-//-

90

35

-//-

га

0,1

116

-//-

-//-

90

36

-//-

га

0,3

117

-//-

-//-

91

44

-//-

га

1,1

118

-//-

-//-

91

45

-//-

га

0,2

119

-//-

-//-

92

43

-//-

га

0,2

120

-//-

-//-

92

44

-//-

га

0,6

121

-//-

-//-

93

30

-//-

га

1,0

122

-//-

-//-

93

31

-//-

га

0,2

123

-//-

-//-

94

58

-//-

га

0,3

124

-//-

-//-

94

59

-//-

га

1,4

125

-//-

-//-

95

48

-//-

га

0,3

126

-//-

-//-

96

46

-//-

га

0,3

127

-//-

-//-

97

5

-//-

га

0,1

128

-//-

-//-

97

6

-//-

га

0,3

129

-//-

-//-

98

28

-//-

га

0,1

130

-//-

-//-

98

29

-//-

га

1,3

131

-//-

-//-

99

41

-//-

га

0,2

132

-//-

-//-

99

42

-//-

га

1,0

133

-//-

-//-

100

42

-//-

га

0,2

134

-//-

-//-

100

43

-//-

га

1,0

135

-//-

-//-

115

62

-//-

га

0,2

136

-//-

-//-

115

63

-//-

га

1,1

137

-//-

-//-

116

82

-//-

га

0,3

Итого:

48,4

Всего объектов лесной инфраструктуры:

84,2

5.Особо защитные участки лесов

N№

п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Назначение

Площадь (га)

11

2

3

4

5

6

7

11

Ермаковское

Ермаковское

46

7, 9, 10, 13

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

20,9

22

-//-

-//-

47

2, 3, 6-12, 14, 15, 20-22, 27

81,7

33

-//-

-//-

59

17

1,5

44

-//-

-//-

63

2-13

-//-

60,4

55

-//-

-//-

64

4-12

-//-

123,7

66

-//-

-//-

65

3, 5-17, 21

-//-

102,4

77

-//-

-//-

68

1-11, 19

-//-

147,2

78

-//-

-//-

69

1-10, 12

-//-

121,2

89

-//-

-//-

70

1-8, 11

-//-

51,5

110

-//-

-//-

76

5

-//-

14,1

111

Ермаковское

Ермаковское

77

1-5, 17

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

39,9

112

-//-

-//-

78

1-5

43,4

113

-//-

-//-

79

1, 16

1,7

114

-//-

-//-

80

2

5,8

115

-//-

-//-

81

1-4, 17

14,0

Итого:

829,4

116

Ермаковское

Ермаковское

50

14, 15

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов, оврагов

7,7

117

-//-

-//-

51

41

6,8

118

-//-

-//-

52

10, 11, 35-37, 42, 45

28,3

119

-//-

-//-

83

17

3,0

220

-//-

-//-

84

13

-//-

5,0

221

-//-

-//-

85

14, 15

-//-

4,0

222

-//-

-//-

86

14

-//-

5,0

223

-//-

-//-

87

15-17

-//-

5,0

224

-//-

-//-

88

15, 18

-//-

5,1

225

-//-

-//-

89

19, 23, 30

-//-

5,5

226

-//-

-//-

90

31, 33

-//-

10,3

227

-//-

-//-

91

20, 38, 41-43

-//-

30,6

228

-//-

-//-

92

23, 42

-//-

19,4

229

-//-

-//-

93

21, 23, 29

-//-

19,1

330

-//-

-//-

94

7, 9, 23, 36, 56, 57

-//-

71,0

331

-//-

-//-

95

3, 8, 9, 17, 45

-//-

117,3

332

-//-

-//-

96

8, 14, 39, 44, 45

-//-

85,5

333

-//-

-//-

99

5, 39, 40

-//-

31,9

334

-//-

-//-

100

3, 11, 32, 35, 39-41

-//-

45,2

335

-//-

-//-

115

3, 8, 15, 23, 36, 39, 60, 61

-//-

97,6

336

-//-

-//-

116

8, 11, 16, 24, 27, 44, 60, 64, 73, 74, 80, 81

-//-

147,9

Итого:

751,2

337

Ермаковское

Ермаковское

50

9

Постоянный лесосеменной участок

5,0

Итого:

5,0

Всего:

1585,6

6. Объекты лесного семеноводства

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта лесного семеноводства

Единица измерения

Объем

11

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

7. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта

Единица измерения

Объем

11

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

Права третьих лиц отсутствуют.

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

____________________________

(подпись, печать)

Приложение № 3 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 3 к договору 

аренды лесного участка 

от 17.10.2012 № 637-з

Ежегодный объем заготовки древесины*

Хозяйство

Ежегодный объем заготовки древесины (тыс. куб. м)

всего

в том числе

сплошные рубки

выборочные рубки

I. Защитные леса

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

Хвойное

0,6

0,6

Твердолиственное

Мягколиственное

5,3

5,3

Итого

5,9

5,9

2. При уходе за лесами

Хвойное

9,035

9,035

Твердолиственное

Мягколиственное

0,089

0,089

Итого

9,124

9,124

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений

Хвойное

Твердолиственное

Мягколиственное

Итого

Всего по разделу I

15,024

15,024

II. Эксплуатационные леса

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

Хвойное

2,1

1,8

0,3

Твердолиственное

Мягколиственное

19,7

19,7

Итого

21,8

21,5

0,3

2. При уходе за лесами

Хвойное

1,904

1,904

Твердолиственное

Мягколиственное

0,119

0,119

Итого

2,023

2,023

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений

Хвойное

Твердолиственное

Мягколиственное

Итого

Всего по разделу II

23,823

21,5

2,323

III. Всего в защитных и эксплуатационных лесах

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

Хвойное

2,7

1,8

0,9

Твердолиственное

Мягколиственное

25,0

19,7

5,3

Итого

27,7

21,5

6,2

2. При уходе за лесами

Хвойное

10,939

10,939

Твердолиственное

Мягколиственное

0,208

0,208

Итого

11,147

11,147

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений

Хвойное

Твердолиственное

Мягколиственное

Итого

Всего по разделу III

38,847

21,5

17,347

Примечания: 

* объёмы использования лесов, в том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесных дорог, устройство противопожарных разрывов и т. п.) определяются при  разработке проекта освоения (изменения и дополнения в проект освоения лесов).

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

____________________________

(подпись, печать)

     Приложение № 4 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 4 к договору 

аренды лесного участка 

от 17.10.2012 № 637-з

С Р О К И

внесения арендной платы

Календарный план

(кварталы года)

Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, - всего

В том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет

субъекта Российской Федерации

I

15 марта – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

II

15 июня – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

III

15 сентября – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

IV

15 декабря – 25%

673872,75

487833,25

186039,50

Итого

2695491

1951333

744158

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки по участку и расчет арендной платы

Лесопользователь:

ООО «ПромЛесСтрой»

Договор аренды:      

от 17.10.2012 № 637-з

Лесничество:

Ермаковское лесничество

Лесотаксовый район:

Первый Восточно-Сибирский лесотаксовый район

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Сплошная рубка

71

92

24

25

212

13 209

Хвойное

71

92

24

25

212

13 209

СОСНА

Сплошная рубка

1

71

90,54

92

64,62

24

32,4

25

2,34

212

13 209

СОСНА

1

71

90,54

92

64,62

24

32,4

25

2,34

212

13 209

Мягколиственное

Сплошная рубка

88

250

75

375

788

10 767

Мягколиственное

88

250

75

375

788

10 767

БЕРЕЗА

Сплошная рубка

1

42

45,18

192

32,4

68

16,56

240

2,7

542

9 892

БЕРЕЗА

1

42

45,18

192

32,4

68

16,56

240

2,7

542

9 892

ОСИНА

Сплошная рубка

1

46

9

58

6,66

7

3,6

135

0,36

246

874

ОСИНА

1

46

9

58

6,66

7

3,6

135

0,36

246

874

159

144,72

342

103,68

99

52,56

400

5,4

1 000

23 976

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Сплошная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

23 976

1,05

1 199

25 175

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

25 175

2,38

34 742

59 917

Итого:

59 917

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Выборочная рубка

32

332

121

372

957

38 196

Хвойное

132

332

121

372

957

38 196

СОСНА

Выборочная рубка

1

132

90,54

332

64,62

121

32,4

372

2,34

957

38 196

СОСНА

1

132

90,54

332

64,62

121

32,4

372

2,34

957

38 196

Мягколиственное

Выборочная рубка

45

178

63

199

485

8 132

Мягколиственное

45

178

63

199

485

8 132

БЕРЕЗА

Выборочная рубка

1

36

45,18

150

32,4

53

16,56

168

2,7

407

7 818

БЕРЕЗА

1

36

45,18

150

32,4

53

16,56

168

2,7

407

7 818

ОСИНА

Выборочная рубка

1

9

9

28

6,66

10

3,6

31

0,36

78

315

ОСИНА

1

9

9

28

6,66

10

3,6

31

0,36

78

315

177

144,72

510

103,68

184

52,56

571

5,4

1 442

46 328

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Выборочная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

46 328

0,5

-23 164

23 164

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

23 164

2,38

31 966

55 130

Итого:

55 130

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Выборочная рубка

45

423

165

514

1 147

37 547

Хвойное

45

423

165

514

1 147

37 547

СОСНА

Выборочная рубка

1

33

90,54

364

64,62

138

32,4

460

2,34

995

32 057

СОСНА

1

33

90,54

364

64,62

138

32,4

460

2,34

995

32 057

ПИХТА

Выборочная рубка

1

9

81,9

56

58,14

26

29,7

52

2,34

143

4 887

ПИХТА

1

9

81,9

56

58,14

26

29,7

52

2,34

143

4 887

КЕДР

Выборочная рубка

1

3

108,54

3

77,58

1

38,88

2

2,7

9

603

КЕДР

1

3

108,54

3

77,58

1

38,88

2

2,7

9

603

Мягколиственное

Выборочная рубка

98

322

131

518

1 069

10 513

Мягколиственное

98

322

131

518

1 069

10 513

БЕРЕЗА

Выборочная рубка

1

16

45,18

178

32,4

81

16,56

264

2,

539

8 544

БЕРЕЗА

1

16

45,18

178

32,4

81

16,56

264

2,7

539

8 544

ОСИНА

Выборочная рубка

1

82

9

144

6,66

50

3,6

254

0,36

530

1 968

ОСИНА

1

82

9

144

6,66

50

3,6

254

0,36

530

1 968

143

335,16

745

239,4

296

121,14

1 032

10,44

2 216

48 060

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Выборочная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

48 060

0,5

-24 030

24 030

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

24 030

2,38

33 161

57 191

Итого:

57 191

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Выборочная рубка

1 221

3 172

1 085

3 871

9 349

359 723

Хвойное

1 221

3 172

1 085

3 871

9 349

359 723

СОСНА

Выборочная рубка

1

1 221

90,54

3 170

64,62

1 083

32,4

3 869

2,34

9 343

359 537

СОСНА

1

1 221

90,54

3 170

64,62

1 083

32,4

3 869

2,34

9 343

359 537

ЛИСТВЕННИЦА

Выборочная рубка

1

72,54

1

51,84

2

25,74

2

2,34

5

108

ЛИСТВЕННИЦА

1

72,54

1

51,84

2

25,74

2

2,34

5

108

КЕДР

Выборочная рубка

1

108,54

1

77,58

38,88

2,7

1

78

КЕДР

1

108,54

1

77,58

38,88

2,7

1

78

Мягколиственное

Выборочная рубка

285

1 486

444

2 125

4 340

72 178

Мягколиственное

285

1 486

444

2 125

4 340

72 178

БЕРЕЗА

Выборочная рубка

1

266

45,18

1 452

32,4

433

16,56

2 027

2,7

4 178

71 706

БЕРЕЗА

1

266

45,18

1 452

32,4

433

16,56

2 027

2,7

4 178

71 706

ОСИНА

Выборочная рубка

1

19

9

34

6,66

11

3,6

98

0,36

162

472

ОСИНА

1

19

9

34

6,66

11

3,6

98

0,36

162

472

1 506

325,8

4 658

233,1

1 529

117,18

5 996

10,44

13 689

431 901

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Выборочная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

431 901

0,5

-215 950

215 951

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

215 951

2,38

298 012

513 963

Итого:

513 963

Минимальные ставки

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Товарная структура ежегодной расчетной лесосеки

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Крупная

Средняя

Мелкая

Дрова

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

Порода

Форма рубкиСпособ рубки

Разряд такс

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем

Ставка

Объем всего, м.куб.

Арендная плата по минимальной ставке, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хвойное

Сплошная рубка

1 775

2 846

596

463

5 680

355 497

Хвойное

1 775

2 846

596

463

5 680

355 497

СОСНА

Сплошная рубка

1

1 170

90,54

1 368

64,62

318

32,4

196

2,34

3 052

205 094

СОСНА

1

1 170

90,54

1 368

64,62

318

32,4

196

2,34

3 052

205 094

ПИХТА

Сплошная рубка

1

460

81,9

1 378

58,14

253

29,7

253

2,34

2 344

125 897

ПИХТА

1

460

81,9

1 378

58,14

253

29,7

253

2,34

2 344

125 897

КЕДР

Сплошная рубка

1

145

108,54

100

77,58

25

38,88

14

2,7

284

24 506

КЕДР

1

145

108,54

100

77,58

25

38,88

14

2,7

284

24 506

Мягколиственное

Сплошная рубка

2 910

4 337

836

6 737

14 820

150 758

Мягколиственное

2 910

4 337

836

6 737

14 820

150 758

БЕРЕЗА

Сплошная рубка

1

636

45,18

2 146

32,4

526

16,56

2 215

2,7

5 523

112 956

БЕРЕЗА

1

636

45,18

2 146

32,4

526

16,56

2 215

2,7

5 523

112 956

ОСИНА

Сплошная рубка

1

2 274

9

2 191

6,66

310

3,6

4 522

0,36

9 297

37 802

ОСИНА

1

2 274

9

2 191

6,66

310

3,6

4 522

0,36

9 297

37 802

4 685

335,16

7 183

239,4

1 432

121,14

7 200

10,44

20 500

506 255

Арендная плата по видам рубок (тыс. руб)

арендная плата

величина повышающего коэффициента

сумма увеличения арендной платы (тыс. руб)

Всего арендной платы (тыс. руб.)

Сплошная рубка:

Минимальные ставки

с учетом корректирующего коэффициента ликвидного запаса древесины на корню

506 255

1,05

25 313

531 568

с учетом коэффициента индексации устанавливаемый Правительством Российской Федерации ежегодно

531 568

2,38

733 564

1 265 132

Сверхминимальные ставки

Арендная плата в части превышения мин. ставки согласно протокола конкурса

406 473

   /   1,3    *      2,38

744 158

Итого:

Минимальные ставки

1 951 333

Сверхминимальные ставки

744 158

Всего арендной платы

 2 695 491

Расчет выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ:

№ 310 от 22.05.2007 г.

Приложение № 5 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 5 к договору 

аренды лесного участка о

т 17.10.2012 № 637-з

АКТ №

приема-передачи лесных участков в аренду

г. Красноярск«____»____________ 2019 г.

Арендодатель в лице __________________________________________

и Арендатор в лице ______________________________________________ составили настоящий акт о том, что на основании договора аренды лесных участков от 01.12.2014 № 699-з первый передал, а второй принял Лесные участки из состава земель лесного фонда, общей площадью 14998,8 га , предоставляемые в аренду по настоящему договору, имеют местоположение: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, кварталы №№ 46-57, 59 (за искл. выделов №№ 2, 3, 8, 10), 63, 64, 65 (за искл. выделов №№ 1-6, 11, 13, 14), 68-100, 115, 116, в том числе:

площадью 286 га (уточненная площадь по результатам межевания 2860000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 46, 47, кадастровый номер 24:13:0000000:1049;

площадью 1227 га (уточненная площадь по результатам межевания 12270000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 48, 49, 50, 51, 52, кадастровый номер 24:13:0201001:110;

площадью 834 га (уточненная площадь по результатам межевания 8340000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 53, 54, 55, 56, 57, кадастровый номер 24:13:0000000:400;

площадью 3782 га (уточненная площадь по результатам межевания 37820000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край. Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 68-90, кадастровый номер 24:13:0000000:1059;

площадью 511,8 га (уточненная площадь по результатам межевания 5118000 кв.м), отнесенный к защитным лесам, расположенный: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковское лесничество, Ермаковское участковое лесничество, в кварталах №№ 59 (за исключением части выделов 3, 2, 8, 10), 63, 64, 65 (за исключением части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14), кадастровый номер 24:13:0000000:1057;

2. Распределение земель

Общая

площадь 

всего

В том числе

лесные земли

нелесные земли

занятые лесными насаждениями

лесные

культуры

лесные питомники, плантации

не занятые лесными насаждениями*

итого

дороги

просеки

болота

другие

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса – всего:

7918,8

7502,8

58

-

237

7739,8

25

37

16,8

101

179,8

Эксплуатационные леса – всего:

7080

7043

12

-

9

7052

11

11

-

6

28

Всего по лесничеству:

14998,8

14545,8

70

-

246

14791,8

36

48

16,8

107

207,8

*в том числе несомкнувшихся лесных культур – 112 га (защитные леса – 105 га, эксплуатационные леса – 7 га)

2.Характеристика насаждений

Целевое 

назначение лесов

Лесни

чество

Участ

ковое лесни

чество

Лес

ной квар

тал

Хозяйство, 

преобладающая 

порода

Площадь (га) / запас древесины (тыс.куб.м) - всего

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м)

молодняки

средневоз-

растные

Приспе

вающие

спелые и 

перестой

ные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Защитные леса

Ермако

вское

Ермаковское, 

кварталы 

№№ №№

46-57, 

59, 63- 65,

68-100, 

115, 116

 

Хвойные

Сосна

5575

1889,8

63

1,0

4480

1539,6

805

267,9

227

81,3

Пихта

617

96,7

617

96,7

Лиственница

15

2,3

15

2,3

Кедр

8

8

Итого:

6215

1988,8

86

3,3

5097

1636,3

805

267,9

227

81,3

Мягколиственные

Береза

854

196,1

6

0,1

116

14,2

62

8,2

670

173,6

Осина

433

80,7

45

6,7

7

1,4

381

72,6

Итого:

1287

276,8

6

0,1

161

20,9

69

9,6

1051

146,2

Всего по защитным лесам:

7502

2265,6

92

3,4

5258

1657,2

874

277,5

1278

327,5

Эксплуатационные леса

Хвойные

Сосна

1378

379,1

25

2,7

1090

312,2

214

51,9

49

12,3

Пихта

1093

239,5

840

179,4

52

10,9

201

49,2

Кедр

266

66,1

53

4,0

74

17,6

139

44,5

Итого:

2737

684,7

78

6,7

1930

491,6

340

80,4

389

106,0

Мягколиственные

Береза

1380

206,1

68

2,0

250

25,3

144

23,2

918

155,6

Осина

2926

520,2

241

6,5

249

27,2

141

24,1

2295

462,4

Итого:

4306

726,3

309

8,5

499

52,5

285

47,3

3213

618,0

Всего по эксплуатационным лесам:

7043

1411,0

387

15,2

2429

544,1

625

127,7

3602

724,0

Всего по лесному участку

14545

3676,6

479

18,6

7687

2201,3

1499

405,2

4880

1051,5

3.Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое назначение лесов

Хозяйство, преобладающая порода

Состав 

Возраст

Бонитет

Полнота

Средний запас древесины 

лесных насаждений

(куб.м/га)

средневоз-растные

приспеваю-

щие

спелые и

перестойные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Защитные леса

Сосна

8,6С 1,4Б + К, П, Ос

88

1,4

0,86

344

333

366

Пихта

5,4П 0,7К 0,3С 0,1Е1,9Б 1,6Ос

71

2,9

0,55

156

-

-

Лиственница

6,4Л 3,6Б

39

3,0

0,92

-

-

-

Кедр

10,0К

11

2,0

0,80

-

-

-

Итого хвойных

7,7С 0,5П 0,1К 1,5Б  0,2Ос +Л, Е

86

1,6

0,83

321

333

366

Береза

7,0Б 0,5Ос 2,4С 0,1П + К, Л, Ив

71

2,2

0,83

124

132

260

Осина

5,4Ос 2,5Б 1,1С 0,9П 0,1К

67

1,9

0,60

149

200

194

Итого мягколиственных

5,4Б 2,1Ос 2,0с 0,4П 0,1К + Л, Ив

69

2,1

0,75

131

139

236

Всего

6,7С 0,5П 0,1К 2,2Б 0,5Ос + Л, Е, Ив

83

1,7

0,81

315

318

259

Эксплуатационные леса

Сосна

6,1С  0,3П 2,4Б 1,2Ос + К ,Ив

76

1,5

0,77

286

242

217

Пихта

6,0П 0,5К 0,3С 1,9Ос 1,3Б +Е

78

2,4

0,67

214

206

245

Кедр

3,8К 3,1П 0,4С 1,6Ос 1,1Б 

171

2,9

0,57

-

238

320

Итого хвойных

3,2С 2,9П 0,6К 1,8Б 1,5Ос +Е, Ив

86

2,0

0,71

255

236

268

Береза

5,4Б 2,3Ос 1,8С 0,3П 0,1К, 0,1Ив

61

2,2

0,63

101

161

169

Осина

5,8Ос 2,2Б 1,0С 0,9П 0,1К +Ив

62

2,0

0,61

109

171

201

Итого мягколиственных

4,7Ос 3,2Б 1,3С 0,7П 0,1К +Ив

61

2,1

0,62

105

166

192

Всего

3,5Ос 2,7Б 2,0С 1,5П 0,3К + Е, Ив

71

2,1

0,65

224

204

200

Всего по участку:

4,5С 1,0П 0,2К 2,4Б 1,9Ос + Л, Е Ив

77

1,9

0,74

286

270

215

4.Объекты лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое

лесничество

Лесной квартал

Лесотаксационный

выдел

Наименование

объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ермаковское

Ермаковское

47

27

Дорога лесная

га

0,1

2

-//-

-//-

47

28

-//-

га

0,2

3

-//-

-//-

49

9

-//-

га

0,8

4

-//-

-//-

50

19

-//-

га

1,4

5

-//-

-//-

65

21

-//-

га

0,1

6

-//-

-//-

68

19

-//-

га

0,7

7

-//-

-//-

68

20

-//-

га

0,2

8

-//-

-//-

69

15

-//-

га

0,5

9

-//-

-//-

70

11

-//-

га

0,1

10

-//-

-//-

93

32

-//-

га

0,2

11

-//-

-//-

94

60

-//-

га

0,2

12

-//-

-//-

98

30

-//-

га

3,5

13

-//-

-//-

99

44

-//-

га

1,5

14

-//-

-//-

99

43

-//-

га

6,0

15

-//-

-//-

100

44

-//-

га

3,7

16

-//-

-//-

100

45

-//-

га

1,2

17

-//-

-//-

71

22

-//-

га

0,5

18

-//-

-//-

72

17

-//-

га

1,1

19

-//-

-//-

73

14

-//-

га

0,3

20

-//-

-//-

74

18

-//-

га

0,3

21

-//-

-//-

75

14

-//-

га

0,6

22

-//-

-//-

76

17

-//-

га

0,4

23

-//-

-//-

77

17

-//-

га

0,2

24

-//-

-//-

77

18

-//-

га

0,9

25

-//-

-//-

78

16

-//-

га

1,3

26

-//-

-//-

79

16

-//-

га

0,1

27

-//-

-//-

79

17

-//-

га

0,3

28

-//-

-//-

80

16

-//-

га

0,4

29

-//-

-//-

81

17

-//-

га

0,6

30

-//-

-//-

81

18

-//-

га

0,1

31

-//-

-//-

82

18

-//-

га

1,5

32

-//-

-//-

83

19

-//-

га

0,9

33

-//-

-//-

84

16

-//-

га

0,8

34

-//-

-//-

85

18

-//-

га

0,6

35

-//-

-//-

86

17

-//-

га

0,9

36

-//-

-//-

87

19

-//-

га

0,6

37

-//-

-//-

88

22

-//-

га

0,6

38

-//-

-//-

88

23

-//-

га

0,1

39

-//-

-//-

89

35

-//-

га

0,4

40

-//-

-//-

90

37

-//-

га

0,8

41

-//-

-//-

90

38

-//-

га

0,5

42

90

20

-//-

га

0,6

Итого:

35,8

43

Ермаковское

Ермаковское

46

13

Квартальная просека

га

0,3

44

-//-

-//-

46

14

-//-

га

0,2

45

-//-

-//-

45

15

-//-

га

0,5

46

-//-

-//-

45

16

-//-

га

0,1

47

-//-

-//-

47

24

-//-

га

1,5

48

-//-

-//-

47

25

-//-

га

0,6

49

-//-

-//-

47

26

-//-

га

0,4

50

-//-

-//-

48

8

-//-

га

0,9

51

Ермаковское

Ермаковское

49

8

Квартальная просека

га

1,3

52

-//-

-//-

50

17

-//-

га

0,2

53

-//-

-//-

50

18

-//-

га

1,1

54

-//-

-//-

51

43

-//-

га

0,1

55

-//-

-//-

51

44

-//-

га

3,1

56

-//-

-//-

52

49

-//-

га

0,1

57

-//-

-//-

52

48

-//-

га

0,7

58

-//-

-//-

52

47

-//-

га

0,6

59

-//-

-//-

53

11

-//-

га

0,5

60

-//-

-//-

54

17

-//-

га

1,3

61

-//-

-//-

55

13

-//-

га

1,1

62

-//-

-//-

56

18

-//-

га

0,1

63

-//-

-//-

56

17

-//-

га

1,1

64

-//-

-//-

57

29

-//-

га

0,6

65

-//-

-//-

57

30

-//-

га

1,1

66

-//-

-//-

59

18

-//-

га

1,4

67

-//-

-//-

59

19

-//-

га

0,1

68

-//-

-//-

63

14

-//-

га

0,7

69

-//-

-//-

63

15

-//-

га

0,4

70

-//-

-//-

63

16

-//-

га

0,3

71

-//-

-//-

64

15

-//-

га

0,1

72

-//-

-//-

64

13

-//-

га

0,7

73

-//-

-//-

64

14

-//-

га

0,4

74

-//-

-//-

65

20

-//-

га

0,1

75

-//-

-//-

65

18

-//-

га

0,2

76

-//-

-//-

65

19

-//-

га

0,4

77

-//-

-//-

68

15

-//-

га

1,0

78

-//-

-//-

68

16

-//-

га

0,1

79

-//-

-//-

69

13

-//-

га

0,4

80

-//-

-//-

69

14

-//-

га

0,1

81

-//-

-//-

70

9

-//-

га

0,1

82

-//-

-//-

70

10

-//-

га

0,4

83

-//-

-//-

71

20

-//-

га

0,1

84

-//-

-//-

71

21

-//-

га

0,7

85

-//-

-//-

72

16

-//-

га

1,7

86

-//-

-//-

73

13

-//-

га

0,2

87

-//-

-//-

74

17

-//-

га

0,1

88

-//-

-//-

75

13

-//-

га

0,2

89

-//-

-//-

76

15

-//-

га

0,4

90

-//-

-//-

76

16

-//-

га

0,8

91

-//-

-//-

77

15

-//-

га

0,5

92

-//-

-//-

77

16

-//-

га

0,4

93

-//-

-//-

78

15

-//-

га

0,7

94

-//-

-//-

79

14

-//-

га

0,3

95

-//-

-//-

79

15

-//-

га

0,1

96

-//-

-//-

80

14

-//-

га

0,6

97

-//-

-//-

80

15

-//-

га

0,3

98

-//-

-//-

81

15

-//-

га

0,4

99

-//-

-//-

81

16

-//-

га

0,4

100

-//-

-//-

82

17

-//-

га

0,1

101

-//-

-//-

83

18

-//-

га

0,1

102

-//-

-//-

84

14

-//-

га

0,7

103

-//-

-//-

84

15

-//-

га

0,1

104

-//-

-//

85

16

-//-

га

0,1

105

-//-

-//-

85

17

-//-

га

0,8

106

Ермаковское

Ермаковское

86

15

Квартальная просека

га

0,9

107

-//-

-//-

86

16

-//-

га

0,1

108

-//-

-//-

87

18

-//-

га

0,1

109

-//-

-//-

88

19

-//-

га

0,1

110

-//-

-//-

89

24

-//-

га

0,3

111

-//-

-//-

89

31

-//-

га

0,1

112

-//-

-//-

89

32

-//-

га

0,1

113

-//-

-//-

89

33

-//-

га

0,4

114

-//-

-//-

90

19

-//-

га

0,3

115

-//-

-//-

90

35

-//-

га

0,1

116

-//-

-//-

90

36

-//-

га

0,3

117

-//-

-//-

91

44

-//-

га

1,1

118

-//-

-//-

91

45

-//-

га

0,2

119

-//-

-//-

92

43

-//-

га

0,2

120

-//-

-//-

92

44

-//-

га

0,6

121

-//-

-//-

93

30

-//-

га

1,0

122

-//-

-//-

93

31

-//-

га

0,2

123

-//-

-//-

94

58

-//-

га

0,3

124

-//-

-//-

94

59

-//-

га

1,4

125

-//-

-//-

95

48

-//-

га

0,3

126

-//-

-//-

96

46

-//-

га

0,3

127

-//-

-//-

97

5

-//-

га

0,1

128

-//-

-//-

97

6

-//-

га

0,3

129

-//-

-//-

98

28

-//-

га

0,1

130

-//-

-//-

98

29

-//-

га

1,3

131

-//-

-//-

99

41

-//-

га

0,2

132

-//-

-//-

99

42

-//-

га

1,0

133

-//-

-//-

100

42

-//-

га

0,2

134

-//-

-//-

100

43

-//-

га

1,0

135

-//-

-//-

115

62

-//-

га

0,2

136

-//-

-//-

115

63

-//-

га

1,1

137

-//-

-//-

116

82

-//-

га

0,3

Итого:

48,4

Всего объектов лесной инфраструктуры:

84,2

5.Особо защитные участки лесов

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный 

выдел

Назначение

Площадь (га)

11

2

3

4

5

6

7

11

Ермаковское

Ермаковское

46

7, 9, 10, 13

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

20,9

22

-//-

-//-

47

2, 3, 6-12, 14, 15, 20-22, 27

81,7

33

-//-

-//-

59

17

1,5

44

-//-

-//-

63

2-13

-//-

60,4

55

-//-

-//-

64

4-12

-//-

123,7

56

-//-

-//-

65

3, 5-17, 21

-//-

102,4

67

-//-

-//-

68

1-11, 19

-//-

147,2

78

-//-

-//-

69

1-10, 12

-//-

121,2

89

-//-

-//-

70

1-8, 11

-//-

51,5

110

-//-

-//-

76

5

-//-

14,1

111

Ермаковское

Ермаковское

77

1-5, 17

Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

39,9

212

-//-

-//-

78

1-5

43,4

113

-//-

-//-

79

1, 16

1,7

114

-//-

-//-

80

2

5,8

115

-//-

-//-

81

1-4, 17

14,0

Итого:

829,4

116

Ермаковское

Ермаковское

50

14, 15

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов, оврагов

7,7

117

-//-

-//-

51

41

6,8

118

-//-

-//-

52

10, 11, 35-37, 42, 45

28,3

119

-//-

-//-

83

17

3,0

220

-//-

-//-

84

13

-//-

5,0

221

-//-

-//-

85

14, 15

-//-

4,0

222

-//-

-//-

86

14

-//-

5,0

223

-//-

-//-

87

15-17

-//-

5,0

224

-//-

-//-

88

15, 18

-//-

5,1

225

-//-

-//-

89

19, 23, 30

-//-

5,5

226

-//-

-//-

90

31, 33

-//-

10,3

227

-//-

-//-

91

20, 38, 41-43

-//-

30,6

228

-//-

-//-

92

23, 42

-//-

19,4

229

-//-

-//-

93

21, 23, 29

-//-

19,1

330

-//-

-//-

94

7, 9, 23, 36, 56, 57

-//-

71,0

331

-//-

-//-

95

3, 8, 9, 17, 45

-//-

117,3

332

-//-

-//-

96

8, 14, 39, 44, 45

-//-

85,5

333

-//-

-//-

99

5, 39, 40

-//-

31,9

334

-//-

-//-

100

3, 11, 32, 35, 39-41

-//-

45,2

335

-//-

-//-

115

3, 8, 15, 23, 36, 39, 60, 61

-//-

97,6

336

-//-

-//-

116

8, 11, 16, 24, 27, 44, 60, 64, 73, 74, 80, 81

-//-

147,9

Итого:

751,2

37

Ермаковское

Ермаковское

50

9

Постоянный лесосеменной участок

5,0

Итого:

5,0

Всего:

1585,6

6.Объекты лесного семеноводства

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта лесного семеноводства

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

7.Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

N п/п

Лесничество

Участковое лесничество/урочище (при наличии)

Лесной квартал

Лесотаксационный выдел

Наименование объекта

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

__________________________

(подпись, печать)

2. Приложение №6 договора аренды изложить в редакции:

Приложение № 6 к договору

 аренды лесного участка

от 17.10.2012 № 637-з

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Целевое назначение лесов

Виды мероприятий

Единица измерения

Годовой объем

Срок исполнения

1

2

3

4

5

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

Противопожарное обустройство лесов

Защитные леса, эксплуатационные леса 

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

1,0

2,3,4 кв.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

1,3

2,3,4 кв.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

13,8

2,3,4 кв.

Установка и размещение стендов и др. знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах

шт.

2

2,3,4 кв.

Строительство посадочных площадок для самолётов, вертолётов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов 

шт.

−

−

Прокладка просек, противопожарных разрывов

км

−

−

Устройство пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения

шт.

-

-

Устройство противопожарных минерализованных полос (шириной не менее 1,4 м)

км

2,5

2,3,4 кв.

Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление

км

2,5

2,3,4 кв.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных горючих материалов

га

−

−

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт.

2

2,3 кв.

Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов)

шт.

−

−

Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт.

1

2,3,4 кв.

Строительство и содержание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) 

шт.

1

2,3 кв.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, создание резерва горюче-смазочных материалов

Защитные леса, эксплуатационные леса 

Приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения инвентаря (согласно приказу Минприроды России от 28.03.2014 № 161 в редакции приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.2015 № 321)

Место базирования ПСПИ: с. Ермаковское

Мобильные средства пожаротушения:

Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования))

шт.

1

2,3 кв.

Защитные леса, эксплуатационные леса

Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)

шт.

2

2,3 кв.

Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием

шт.

2

2,3 кв.

Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн

шт.

-

2,3 кв.

Пожарное оборудование:

Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л

шт.

1

2,3 кв.

Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)

пог.м

200

2,3 кв.

Торфяные стволы

комплект

-

2,3 кв.

Пожарный инструмент:

Воздуходувки

шт.

2

2,3 кв.

Бензопилы

шт.

2

2,3 кв.

Ранцевые лесные опрыскиватели 

(ранцы противопожарные)

шт.

7

2,3 кв.

Топоры

шт.

3

2,3 кв.

Лопаты

шт.

10

2,3 кв.

Емкость для доставки воды объемом 10-15 л

шт.

2

2,3 кв.

Системы связи и оповещения:

Электромегафоны

шт.

1

2,3 кв.

Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) диапазона

шт.

2

2,3 кв.

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)

комплект

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров

2,3 кв.

Аптечка первой помощи

шт.

по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров

2,3 кв.

Индивидуальные перевязочные пакеты

шт.

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров

2,3 кв.

Защитные леса, эксплуатационные леса

Огнетушащие вещества:

Смачиватели, пенообразователи

кг

7

2,3 кв.

Дополнительные:

Зажигательные аппараты

шт.

2

2,3 кв.

Бидоны или канистры для питьевой воды

шт.

2

2,3 кв.

Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход

шт.

1

2,3 кв.

Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с.

шт.

-

2,3 кв.

Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены

Создание резерва горюче-смазочных материалов

тонн

1

1,2 кв.

Создание добровольно-пожарных дружин

кол./чел.

1/10

2,3 кв.

Подготовка руководителей тушения лесных пожаров

чел.

1

1,2 кв.

Обучение работников тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок

чел.

10

2,3 кв.

Мониторинг пожарной опасности в лесах, разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров

Защитные леса, эксплуатационные леса 

Мониторинг лесных пожаров

га

14999

2,3 кв.

Утверждение маршрутов наземного патрулирования

шт./км

2/15

2,3 кв.

Разработка планов тушения лесных пожаров

шт.

1

2,3 кв.

Обеспечение санитарной безопасности в лесах

Обеспечение мер санитарной безопасности на арендованном лесном участке (оформление листков сигнализации, выполнение санитарно - оздоровитель-ных и других мероприятий)

га

14999

2,3 кв.

Лесовосстановительные мероприятия

Подготовка почвы под лесные культуры

га

В соответствии с проектом освоения лесов

Создание лесных культур

га

Проведение мер содействия естественному возобновлению леса

га

Уход за лесными культурами

га

Дополнение лесных культур

га

Выращивание (приобретение) посадочного материала

тыс. шт.

Заготовка лесных семян

кг

Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных древесных насаждений

га

в том числе за счёт:

- искусственного лесовосстановления

(лесных культур)

га

- естественного лесовосстановления

(мер содействия естественному возобновлению леса)

га

Арендодатель:

Министерство лесного хозяйства

Красноярского края

____________________________

 (подпись, печать)

Арендатор:

ООО «ПромЛесСтрой»

____________________________

(подпись, печать)

В случае уклонения Министерства лесного хозяйства Красноярского края от заключения дополнительного соглашения считать дополнительное соглашение заключенным на вышеуказанных условиях с момента вступления в законную силу решения по настоящему делу.

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.А. Горбатова