Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-68021/2022

01 ноября 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  27 октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  01 ноября 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Михайлова П.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Экологические Современные Технологии Атмосферы" (адрес:  Россия 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-кт 143 А, пом. 21-Н, комн. 40-45, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: акционерное общество "УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ" (адрес: Россия 188477, тер. Морской Торговый Порт Усть-Луга (ВИС), Ленинградская обл. Кингисеппский р-н, комплекс наливных грузов, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании задолженности 

при участии

- от истца: ФИО2 доверенность от 15.07.2022,

- от ответчика: ФИО3 доверенность от 24.01.2022,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические современные технологии атмосферы» обратилось с иском к акционерному обществу «Усть-Луга Ойл» см с требованием:

1. Взыскать с АО «Усть-Луга Ойл» в пользу ООО «Экологические современные технологии атмосферы» задолженность по договору подряда № 71/11-05/20 от 10.04.2020 г. в размере 1 249 762 рубля 00 копеек, а также пени в размере 124 976 рублей 20 копеек.

2. Взыскать с АО «Усть-Луга Ойл» в пользу ООО «Экологические современные технологии атмосферы» расходы по оплате госпошлины в размере 26 747 руб.

Акционерное общество «Усть-Луга Ойл» обратилось со встречным иском о взыскании неустойки в размере 499 904 рубля 80 копеек.

В судебном заседании от 20 октября 2022 года объявлялся перерыв до 10 часов 00 минут 27 октября 2022 года, после перерыва судебное заседание продолжалось.

Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства:

10.04.2020 г. между ООО «Эста» (далее - Истец, подрядчик) и АО «УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ» (далее - Ответчик, заказчик) был заключен Договор подряда № 71/11-05/20 (далее - Договор), по условиям которого Истец обязался в установленный Договором срок выполнить по заданию Ответчика комплекс Работ, а Ответчик обязался Работы принять и оплатить.

Согласно п. 3.1. Договора цена Работ составляет 2 499 524 рубля 00 копеек.

В соответствии с п. 4.1. Договора, платежным поручением № 2988 от 13.05.2020 г. Ответчиком был выплачен аванс в размере 1 249 762 рубля 00 копеек.

В соответствии с п. 4.4. Договора оплата выполненных объемов Работ производится Заказчиком поэтапно, после исполнения Подрядчиком всех без исключения обязательств, перечисленных в пунктах 0-0 настоящего Договора, а именно: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после:

4.4.1.передачи Подрядчиком Заказчику оригинала счета на оплату выполненного объема Работ, подписанного Подрядчиком и скрепленного печатью Подрядчика и; 4.4.2.передачи Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры на сумму выполненного объема Работ и;

4.4.3.фактического выполнения Подрядчиком объема Работ, указанного в подписанном Сторонами Акте (Актах) о приемке выполненных работ и;

4.4.4.подписания Сторонами в установленном порядке надлежащим образом оформленного и подтвержденного Организацией, осуществляющей независимый технический надзор, Акта (Актов) о приемке выполненных работ по форме КС-2. за отчетный период, заполняемый Подрядчиком на основании Приложения №9 к настоящему Договору, и скрепления его печатями Сторон и;

4.4.5.подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3 Госкомстата России) за отчетный период и 4.4.6.передачи Подрядчиком Заказчику сформированного Подрядчиком полного пакета надлежащим образом оформленной Исполнительной документации на фактически выполненный объем работ и;

4.4.7.передачи Подрядчиком Заказчику отчета об израсходовании Материалов и Оборудования, использованных при выполнении объемов Работ, указанных в Актах и Справках упомянутых в пунктах 0 и 0 Договора (если Материалы или часть Материалов были предоставлены Заказчиком) и;

4.4.8.передачи Подрядчиком Заказчику Ведомости смонтированного Оборудования в ходе выполнения объемов Работ, указанных в Актах и Справках упомянутых в пунктах О и 0 настоящего Договора.

Согласно п. 21.1. Договора приемка Объекта (выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ), производится Заказчиком в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, условиями настоящего Договора после выполнения всех предусмотренных настоящим Договором работ.

Согласно п. 21.2. по результатам выполнения объемов Работ за отчетный период Сторонами подписывается Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3). Акт о приемке выполненных Работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период Подрядчик обязан предоставлять Заказчику не позднее 25 (Двадцать пятого) числа отчетного месяца.

В силу п. 21.3. Договора в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой получения от Подрядчика надлежаще оформленных Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их исполнения. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, согласованные Сторонами, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат Заказчику.

Согласно п. 21.7. Договора Заказчик формирует Рабочую (Приемочную) комиссию не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ в полном объеме. После формирования Приемочной комиссии, последняя приступает к работе.

В силу п. 21.8 Договора подписание Сторонами, указанных в пункте настоящего Договора форм КС-2 и КС-3, не является приемкой отдельных этапов Работ. Приемка Работ по настоящему Договору осуществляется Рабочей (Приемочной) комиссией после выполнения в полном объеме всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма № КС-11). Приемка Работ по настоящему объеме осуществляется после надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

07.12.2020 г. Истцом в адрес Ответчика по акту приема-передачи передана исполнительная документация.

07.12.2020 г. Сторонами подписан Акт об окончании пусконаладочных работ, которые прошли положительно.

10.12.2020 г. Сторонами подписан Акт приемки оборудования после комплексного опробования.

17.02.2020 г. по акту приема-передачи документации Истцом в адрес Ответчика были переданы для подписания Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (основные работы), Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 (дополнительные работы), Справка о стоимости выполненных работ по форме КСЗ.

10.03.2021 г. по акту приема-передачи документации Истцом в адрес Ответчика повторно была передана исполнительная документация, в том числе Акты технической готовности строительно-монтажных работ (КС-11) (п. 58-61 Акта).

В силу ст. 720 ГК РФ Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Согласно части 1 статьи 753 ГК РФ Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с частью 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В связи с отсутствием замечаний Ответчика к выполненным Работам последние считаются принятыми в полном объёме и надлежащем качестве.

В нарушение положений ст. 720, 753 ГК РФ, пп. 21.3., 21.7., 21.8. Договора до настоящего времени итоговая документация Ответчиком не подписана, работы оплачены не в полном объеме. 

При этом суд не принимает в качестве доказательства выполнения работ Акт КС2 №2 от 10.12.2020 г.на сумму 40761 рубль 18 копеек, т.к. выполнение данных работ не предусмотрено сметой к договору. В соответствии с п. 3.6 договора Подрядчик не вправе выполнять без предварительного письменного согласования с Заказчиком какие-либо дополнительные работы, не предусмотренные прямо в настоящем Договоре. Доказательств согласования данных работ истец не представил. 

Представленная электронная переписка с инженером ПТО  ФИО4 не соответствует требованиям п.3.6 Договора.

В соответствии с требованиями ст. 709 и 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре (п.п. 5, 6 ст. 709 ГК РФ и 3,4 ст. 743 ГК РФ)..

С учетом гарантийного удержания, предусмотренного п. 4.7 договора в размере 10% за выполненные объемы работ,  задолженность Ответчика составляет  963121  рубль 84 копейки. Пунктом 4.7 Договора предусмотрено удержание 10% ГО ( гарантийного обеспечения). В соответствии с п. 4.10 сумму ГО заказчик перечисляет на счет подрядчика только после исполнения Подрядчиком всех без исключения  обязательств, перечисленных в п.п. 4.10.2-4.10.11 являющихся основанием для выплаты ГО, а именно в течение 20 рабочих дней после:

4.10.1 полного выполнения подрядчиком всего объема работ, предусмотренных настоящим договором и 

4.10.2 передачи подрядчиком заказчику оригинала подписанного подрядчиком и скрепленного подписью подрядчика м счета на выплату суммы ГО 

4.10.3 подписания сторонами в установленном порядке надлежащим  образом оформленного и подтвержденного организацией, осуществляющей независимый технический надзор, Акта приемки законченного строительством объекта ( унифицированная форма КС-11 Госкомстат России).

4.10.4 устранения Подрядчиком в полном объеме всех отступлений от настоящего Договора и иных недостатков в результатах Работ и

4.10.5 передачи Подрядчиком Заказчику сформированного Подрядчиком полного пакета надлежащим образом оформленной Исполнительной документации на все Работы, выполненные в соответствии с настоящим Договором и

4.10.6 устранения Подрядчиком всех недостатков в оформлении Исполнительной документации и замечаний к Исполнительной документации, сделанных Заказчиком, Организацией, осуществляющей независимый технический надзор, и компетентными государственными органами и организациям и

4.10.7 возвращения Подрядчиком Заказчику остатка Материалов и Оборудования, предоставленных (поставленных) Заказчиком, либо возмещения их стоимости (в случаях и в сроки, установленные в настоящем Договоре) и;

4.10.8 возмещения Подрядчиком Заказчику ущерба, причиненного Заказчику вследствие утраты, порчи Материалов или Оборудования, предоставленных поставленных) Заказчиком, или результатов Работ и

4.10.9 возврата Подрядчиком Заказчиком суммы авансов, выданных "Подрядчику (за исключением случаев, когда суммы выданных авансов зачтены в счет оплаты выполненных объемов работ до подписания Акта приемки законченного строительством объекта) и

4.10.10 уплаты Подрядчиком Заказчику неустоек в случаях и размерах, установленных настоящим Договором и

4.10.11 надлежащего исполнения Подрядчиком всех иных обязательства, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.

Цена договора составляет 2499524 рубля, 10% от стоимости договора составляет 249952,4 рублей. Стоимость работ переданных по акту  КС-2 №1 от 10.12.2020 г. составляет 2458759 р.82 копейки. Заказчиком оплачен аванс в размере 1249762 рубля. Без учета аванса и стоимости работ, заявленных в акте КС-2 №2  стоимость предъявленных к принятию работ составляет 1208997,82 рублей. с учетом гарантийного обеспечения оплате подлежит сумма 959021 рублей 62 копейки.

Как следует из пункта 26.4.1. Договора в случае просрочки совершения Заказчиком платежа, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Договора, более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней, Подрядчик, Договору, вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная с двадцать первого дня просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы просроченного платежа.

Истец рассчитал неустойку с 08 апреля  2021 года по 13 июня 2022 , что составило 538 647 рублей 42 копейки и, с учетом ограничения в 10%, 124976 рублей 20 копеек.

С учетом вышеизложенного, а также Постановления Правительства Российской Федерации №497 от 28 марта 2022 года , размер неустойки составляет 95902,16 рублей. 

В соответствии с требованиями п. 26.3.1  если Подрядчик не выполнит все Работы, предусмотренные настоящим Договором, в срок, установленный пунктом 5.3 настоящего Договора, заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в  размере  0.15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от общей Цены Работ  по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 20% (Двадцати процентов) от Цены Работ по настоящему Договору.

В связи с тем, что работы подрядчиком по договору не выполнены в полном объеме, ответчик начислил  неустойку в размере 499904 рубля 80 копеек.

Суд оценивает заявление истца о том, что между сторонами была достигнута договоренность о выполнении только части работ, при этом часть работ, предполагаемых к выполнению по договору, была исключена сторонами. 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы в сроки, установленные законом или договором подряда. 

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение договорных обязательств истец вправе взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку.

С учетом положений договора об ограничении ответственности, фактических обстоятельств дела, отсутствия явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, суд не усматривает оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества «Усть- Луга Ойл» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экологические современные технологии атмосферы» 963121 рубль 84 копейки задолженности, 963312 рублей 18 копеек неустойки, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20612 рублей, в удовлетворении оставшейся части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экологические современные технологии атмосферы» в пользу акционерного общества «Усть-Луга Ойл» неустойку в размере 499904 рубля 80 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12998 рублей.

Окончательно, путем зачета, взыскать с акционерного общества «Усть- Луга Ойл» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экологические современные технологии атмосферы» 567144 рубля.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Михайлов П.Л.