АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-31360/23

20 ноября 2023 года

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Полимерспецстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к  Управлению коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о внесении изменений в муниципальный  контракт,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Полимерспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации  Аксайского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнить пункт 4.1.1.  муниципального контракта № ЭА-15-2021 от 20.07.2021 путем передачи обществу с  ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) земельного участка с кадастровым номером 61:02:0060101:3357 по  адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, х. Ленина, ул.  Онучкина, 42а, для строительства ВНС Ленина.  

Обязать Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации  Аксайского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключить с обществом с  ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) дополнительное соглашение о внесении изменений в муниципальный  контракт № ЭА-15-2021 от 20.07.2021 на следующих условиях:  

Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Срок выполнения работ: со дня заключения Контракта до 31 декабря 2024  года».  

Пункт 17.1. раздела 17 изложить в следующей редакции:  

«17.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по  31 января 2025 года, а в части принятых и неисполненных сторонами обязательств до их  полного исполнения».  

Приложение № 4 «График выполнения строительных работ» изложить в  следующей редакции:  

 и и  

то тто ад бароббаив  аарр и о ск адтсго еливачнь пм )и )илед оклилито  № (( 

Наименование комплекса   т 

обработ и (или) вида работ и  ар(или) части работ  

отдельного вида работ 

Физический объем  

работ 

Срок исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ 

Еидни- ца  

измерения  

Кол-во 

12 .л ю и 

 1 2. гв а 

 1 2. не с 

 1 2. тк о 

 1 2. яо н 

 1 2. ке д 

 2 2. вн я 

 2 2.в е ф 

 2 2.р а м 

 2 2. рп а 

 22 .й а м 

22 .н ю и 

22 .л ю и 

 2 2. гв а 

 2 2. не с 

 2 2. тк о 

 2 2. яо н 

 2 2. ке д 

 3 2. вн я 

 3 2.в е ф 

1 этап 

1 

Разбивка осей водопровода 

комплекс работ 

1 

2 

Рекультивация земель технический этап 

комплекс работ 

1 

3 

Рекультивация земель биологический этап 

комплекс работ 

1 

4 

Снос и компенсационная посадка зеленых насаждений 

комплекс работ 

1 

5 

Разбивка осей трассы. Автомобильная дорога к ВНС х. Верхнеподпольный 

комплекс работ 

1 

6 

Организация движения на период строительства 

комплекс работ 

1 

7 

Вынос сети водопровода с площадки ВНС х. Верхнеподпольный 

комплекс работ 

1 

8 

Водопровод 

комплекс работ 

1 

9 

Колодцы. Земляные работы 

комплекс работ 

1 

10 

Сборные ж.б. колодцы 

комплекс работ 

1 

11 

Монолитные прямоугольные колодцы № 1- № 10 

комплекс работ 

1 

12 

Монолитные прямоугольные колодцы № 11- № 20 

комплекс работ 

1 

13 

Монолитные прямоугольные колодцы МК-10, МК-12, МК-15, МК-18, МК-19 

комплекс работ 

1 

14 

Монолитные прямоугольные колодцы № 21- № 30 

комплекс работ 

1 

15 

Монолитные прямоугольные колодцы № 31- № 40 

комплекс работ 

1 

16 

Монолитные прямоугольные колодцы № 41- № 48 

комплекс работ 

1 

17 

Монолитные прямоугольные колодцы № 58- № 60 

комплекс работ 

1 

18 

Монолитные прямоугольные колодцы № 82- № 89 

комплекс работ 

1 

19 

Автоматизация комплексная. Водопровод 

комплекс работ 

1 

20 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Общестроительные работы  

комплекс  

работ 

1 

21 

Площадка ВНС х.  Верхнеподпольный.  

Внутренние сети  водопровода насосной  

станции 

комплекс  

работ 

1 

22 

Площадка ВНС х.  Верхнеподпольный.  

Внутренние сети  канализации насосной  

станции 

комплекс  

работ 

1 

23 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Технологические решения  

комплекс  

работ 

1 

24 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Электроснабжение 

комплекс  

работ 

1 

25 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Автоматизация комплексная 

комплекс  

работ 

1 

26 

Площадка ВНС х.  

Верхнеподпольный.  Система охранного  видеонаблюдения  

комплекс  

работ 

1 

27 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Автоматическая пожарная  сигнализация  

комплекс  

работ 

1 

28 

Площадка ВНС х.  

Верхнеподпольный.  Отопление, вентиляция и  

кондиционирование  

комплекс  

работ 

1 

29 

Комплектная  

трансформаторная  подстанция (КТП)  

комплекс  

работ 

1 

30 

Дизельная электростанция  (ДЭС)  

комплекс  

работ 

1 

31 

Электроснабжение 0,4 Кв  

комплекс  

работ 

1 

32 

Освещение территории  ВНС х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

33 

Внутриплощадочные сети  электроснабжения 10 кВ,  площадка ВНС х.  

Верхнеподпольный 

комплекс  

работ 

1 

34 

Сети связи. Вынос и 

защита сетей, площадка  ВНС х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

35 

Внутриплощадочные сети  автоматизации, площадка  ВНС х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

36 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения  

комплекс  

работ 

1 

37 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Колодцы водопроводные  

комплекс  

работ 

1 

38 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Внутриплощадочные сети  канализации  

комплекс  

работ 

1 

39 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Колодцы канализационные  

комплекс  

работ 

1 

40 

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. 

Электрохимическая защита  трубопроводов  

комплекс  

работ 

1 

41 

Резервуары чистой воды.  

Площадкка ВНС х.  Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

42 

Электролизная. Площадка  ВНС х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

43 

Выгреб, емк. 4 м3.  Площадка ВНС х.  Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

44 

Ограждение площадки  ВНС х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

45 

Вертикальная планировка  площадки ВНС х.  

Верхнеподпольный 

комплекс  

работ 

1 

46 

Элементы благоустройства  ВНС х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

47 

Подъездная автодорога к  площадке ВНС х.  

Верхнеподпольный 

комплекс  

работ 

1 

48 

Лестница. Площадка ВНС  х. Верхнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

2 этап 

49 

Разбивка осей трассы  водопровода  

комплекс  

работ 

1 

50 

Рекультивация земель  технический этап  

комплекс  

работ 

1 

51 

Рекультивация земель  биологический этап  

комплекс  

работ 

1 

52 

Снос и компенсационная  посадка зеленых  

насаждений 

комплекс  

работ 

1 

53 

Вынос и защита сетей  связи. Площадка ВНС х.  Ленина  

комплекс  

работ 

1 

54 

Вынос и защита сетей  связи. Площадка ВНС х.  Истомино  

комплекс  

работ 

1 

55 

Вынос сети водопровода.  Площадка ВНС х. Ленина  

комплекс  

работ 

1 

56 

Разбивка осей трассы.  Автомобильная дорога к  ВНС х. Ленина  

комплекс  

работ 

1 

57 

Разбивка осей трассы.  Автомобильная дорога к  ВНС х. Истомино  

комплекс  

работ 

1 

58 

Организация движения на  период строительства  дороги к ВНС х. Ленина  

комплекс  

работ 

1 

59 

Организация движения на  период строительства  

дороги к ВНС х. Истомино  

комплекс  

работ 

1 

60 

Водовод. 2 этап 

комплекс  

работ 

1 

61 

Колодцы. Земляные работы  

комплекс  

работ 

1 

62 

Сборные ж.б. колодцы  

комплекс  

работ 

1 

63 

Колодцы монолитные  прямоугольные МК-26,  

МК-26*, № 49 - № 54  

комплекс  

работ 

1 

64 

Колодцы монолитные  прямоугольные МК-26,  МК-26*, № 94 - № 100  

комплекс  

работ 

1 

65 

ВНС х. Ленина. 

Общестроительные работы  

комплекс  

работ 

1 

66 

ВНС х. Ленина. Внутренние сети водопровода 

комплекс  

работ 

1 

67 

ВНС х. Ленина. Внутренние сети канализации 

комплекс  

работ 

1 

68 

ВНС х. Ленина. Отопление,  вентиляция,  

кондиционирование 

комплекс  

работ 

1 

69 

ВНС х. Ленина. 

Технологические решения  

комплекс  

работ 

1 

70 

ВНС х. Ленина. Электроснабжение 

комплекс  

работ 

1 

71 

ВНС х. Ленина. Автоматика 

комплекс  

работ 

1 

72 

ВНС х. Ленина. АПС  

комплекс  

работ 

1 

73 

ВНС х. Ленина. Охранное  

комплекс  

1 

74 

ВНС х. Истомино. 

Общестроительные работы  

комплекс  

работ 

1 

75 

ВНС х. Истомино. Внутренние сети водопровода 

комплекс  

работ 

1 

76 

ВНС х. Истомино. Внутренние сети канализации 

комплекс  

работ 

1 

77 

ВНС х. Истомино. 

Отопление, вентиляция,  кондиционирование  

комплекс  

работ 

1 

78 

ВНС х. Истомино. 

Технологические решения  

комплекс  

работ 

1 

79 

ВНС х. Истомино.  Электроснабжение  

комплекс  

работ 

1 

80 

ВНС х. Истомино. Автоматика 

комплекс  

работ 

1 

81 

ВНС х. Истомино. АПС  

комплекс  

работ 

1 

82 

ВНС х. Истомино.  Охранное  

видеонаблюдение  

комплекс  

работ 

1 

83 

Водопровод. Автоматизаци  комплексная  

комплекс  

работ 

1 

84 

Сооружения и сети  

электроснабжения 

площадки ВНС х. Ленина.  Электроснабжение 0,4 кВ  

комплекс  

работ 

1 

85 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х. Ленина.  

Освещение территории  

комплекс  

работ 

1 

86 

Сооружения и сети  

электроснабжения 

площадки ВНС х. Ленина.  Внутриплощадочныесети  электроснабжения 10 кВ  

комплекс  

работ 

1 

87 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х. Ленина.  

КТП 

комплекс  

работ 

1 

88 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х. Ленина.  

ДЭС 

комплекс  

работ 

1 

89 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х.  Истомино.  

Электроснабжение 0,4 кВ  

комплекс  

работ 

1 

90 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х.  Истомино. Освещение  

территории 

комплекс  

работ 

1 

91 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х.  Истомино.  

Внутриплощадочныесети  электроснабжения 10 кВ  

комплекс  

работ 

1 

92 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х.  Истомино. КТП  

комплекс  

работ 

1 

93 

Сооружения и сети  электроснабжения  площадки ВНС х.  Истомино. ДЭС  

комплекс  

работ 

1 

94 

Внутриплощадочные сети  автоматизации, площадка  ВНС х. Ленина  

комплекс  

работ 

1 

95 

Внутриплощадочные сети  автоматизации, площадка  ВНС х. Истомино  

комплекс  

работ 

1 

96 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Ленина.  

Внутриплощадочные сети  водоснабжения  

комплекс  

работ 

1 

97 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Ленина. Колодцы  

водопроводные 

комплекс  

работ 

1 

98 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Ленина.  

Внутриплощадочные сети  канализации  

комплекс  

работ 

1 

99 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Ленина. Колодцы  

канализационные 

комплекс  

работ 

1 

100 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Ленина.  

Электрохимическая защита  трубопроводов  

комплекс  

работ 

1 

101 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Истомино.  

Внутриплощадочные сети  водоснабжения  

комплекс  

работ 

1 

102 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Истомино. Колодцы  

водопроводные 

комплекс  

работ 

1 

103 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Истомино.  

Внутриплощадочные сети  канализации  

комплекс  

работ 

1 

104 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Истомино. Колодцы  

канализационные 

комплекс  

работ 

1 

105 

Сети водоснабжения и  канализации площадки  ВНС х. Истомино.  

Электрохимическая защита  трубопроводов  

комплекс  

работ 

1 

106 

Сооружения  

водоснабжения и 

канализации площадки  

ВНС х. Ленина. Резервуары  чистой воды и  

воздухообменная установка  

комплекс  

работ 

1 

107 

Сооружения  

водоснабжения и 

канализации площадки  

ВНС х. Ленина.  Электролизная  

комплекс  

работ 

1 

108 

Сооружения водоснабжения и 

канализации площадки  ВНС х. Ленина. Выгреб,  емкостью 4м3  

комплекс  

работ 

1 

109 

Сооружения водоснабжения и 

канализации площадки  ВНС х. Истомино.  

Резервуары чистой воды и  воздухообменная установка  

комплекс  

работ 

1 

110 

Сооружения водоснабжения и 

канализации площадки  ВНС х. Истомино.  

Электролизная 

комплекс  

работ 

1 

111 

Сооружения водоснабжения и 

канализации площадки  ВНС х. Истомино. Выгреб,  

емкостью 4м3 

комплекс  

работ 

1 

112 

Благоустройство и  озеленение площадки ВНС  

х. Ленина. Ограждение с  

подпорной стеной  

комплекс  

работ 

1 

113 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Ленина. Вертикальная  

планировка 

комплекс  

работ 

1 

114 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Ленина. Элементы  

благоустройства 

комплекс  

работ 

1 

115 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Ленина. Подъездная  

автомобильная дорога в  ВНС  

комплекс  

работ 

1 

116 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Ленина. Лестница  

комплекс  

работ 

1 

117 

Благоустройство и  

озеленение площадки ВНС  х. Истомино. Ограждение с  подпорной стеной  

комплекс  

работ 

1 

118 

Благоустройство и  

озеленение площадки ВНС  х. Истомино. Вертикальная  планировка  

комплекс  

работ 

1 

119 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Истомино. Элементы  

благоустройства 

комплекс  

работ 

1 

120 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Истомино. Подъездная  автомобильная дорога в  

ВНС 

комплекс  

работ 

1 

121 

Благоустройство и 

озеленение площадки ВНС  х. Истомино. Лестница  

комплекс  

работ 

1 

3 этап 

122 

Разбивка осей 

комплекс  

работ 

1 

123 

Рекультивация земель  технический этап  

комплекс  

работ 

1 

124 

Рекультивация земель  биологический этап  

комплекс  

работ 

1 

125 

Снос и компенсационная  посадка зеленых  

насаждений 

комплекс  

работ 

1 

126 

Разбивка осей трассы.  Автомобильная дорога к х.  

Дивный 

комплекс  

работ 

1 

127 

Организация движения на  период строительства  

дороги к х. Дивный 

комплекс  

работ 

1 

128 

Водопровод 

комплекс  

работ 

1 

129 

Колодцы 

комплекс  

работ 

1 

130 

Автоматизация 

комплексная. Водопровод  

комплекс  

работ 

1 

131 

ВНС х. Дивный. 

Общестроительные работы  

комплекс  

работ 

1 

132 

ВНС х. Дивный. 

Внутриплощадочные сети  водопровода  

комплекс  

работ 

1 

133 

ВНС х. Дивный. 

Внутриплощадочные сети  канализации  

комплекс  

работ 

1 

134 

ВНС х. Дивный. 

Технологические решения  

комплекс  

работ 

1 

135 

ВНС х. Дивный. Электроснабжение 

комплекс  

работ 

1 

136 

ВНС х. Дивный. Автоматика 

комплекс  

работ 

1 

137 

ВНС х. Дивный. Система  охранного  

видеонаблюдения 

комплекс  

работ 

1 

138 

ВНС х. Дивный. 

Автоматическая пожарная  

комплекс  

1 

139 

ВНС х. Дивный. 

Отопление, вентиляция,  кондиционирование  

комплекс  

работ 

1 

140 

Комплектная  

трансформаторная  подстанция (КТП)  

комплекс  

работ 

1 

141 

Дизельная электростанция  (ДЭС)  

комплекс  

работ 

1 

142 

Электроснабжение 0,4 Кв  

комплекс  

работ 

1 

143 

Освещение территории  

комплекс  

работ 

1 

144 

Внутриплощадочные сети  электроснабжения 10 кВ,  площадка ВНС х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

145 

Сети связи. Вынос и  защита сетей связи  

комплекс  

работ 

1 

146 

Внутриплощадочные сети  автоматизации  

комплекс  

работ 

1 

147 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Дивный.  

Внутриплощадочные сети  водоснабжения  

комплекс  

работ 

1 

148 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Дивный. Колодцы  

водопроводные 

комплекс  

работ 

1 

149 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Дивный.  

Внутриплощадочные сети  канализации  

комплекс  

работ 

1 

150 

Внутриплощадочные сети  

водоснабжения и  водоотведения ВНС х.  

Дивный. Колодцы  канализационные  

комплекс  

работ 

1 

151 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Дивный.  

Электрохимическая защита  трубопроводов  

комплекс  

работ 

1 

152 

Резервуары чистой воды.  Площадка ВНС х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

153 

Электролизная. Площадка  ВНС х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

154 

Выгреб, емк. 4 м3. 

Площадка ВНС х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

155 

Ограждение площадки  

комплекс  

1 

156 

Вертикальная планировка  площадки ВНС х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

157 

Элементы благоустройства  ВНС х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

158 

Автомобильная дорога к  ВНС п. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

159 

Лестница. Площадка ВНС  х. Дивный  

комплекс  

работ 

1 

160 

4 этап 

161 

Разбивка осей 

комплекс  

работ 

1 

162 

Рекультивация земель  технический этап  

комплекс  

работ 

1 

163 

Рекультивация земель  биологический этап  

комплекс  

работ 

1 

164 

Снос и компенсационная  посадка зеленых  

насаждений 

комплекс  

работ 

1 

165 

Разбивка осей трассы.  Автомобильная дорога к  

ВНС х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

166 

Организация движения в  период строительства  

комплекс  

работ 

1 

167 

Водопровод 

комплекс  

работ 

1 

168 

Колодцы 

комплекс  

работ 

1 

169 

Автоматизация 

комплексная. Водопровод  

комплекс  

работ 

1 

170 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Общестроительные работы  

комплекс  

работ 

1 

171 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Внутренние сети  

водопровода 

комплекс  

работ 

1 

172 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Внутренние сети  

канализации 

комплекс  

работ 

1 

173 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Технологические решения  

комплекс  

работ 

1 

174 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Электроснабжение  

комплекс  

работ 

1 

175 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Автоматика  

комплекс  

работ 

1 

176 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Система охранного  

видеонаблюдения 

комплекс  

работ 

1 

177 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Автоматическая пожарная  сигнализация  

комплекс  

работ 

1 

178 

ВНС х. Нижнеподпольный.  Отопление вентиляция,  

кондиционирование 

комплекс  

работ 

1 

179 

Комплектная  

трансформаторная  подстанция (КТП)  

комплекс  

работ 

1 

180 

Дизельная электростанция  (ДЭС)  

комплекс  

работ 

1 

181 

Электроснабжение 0,4 Кв  

комплекс  

работ 

1 

182 

Освещение территории  

комплекс  

работ 

1 

183 

Внутриплощадочные сети  электроснабжения 10 кВ  

комплекс  

работ 

1 

184 

Сети связи. Вынос и защита сетей связи 

комплекс  

работ 

1 

185 

Внутриплощадочные сети  автоматизации  

комплекс  

работ 

1 

186 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Нижнеподпольный.  

Внутриплощадочные сети  водоснабжения  

комплекс  

работ 

1 

187 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Нижнеподпольный.  

Колодцы водопроводные  

комплекс  

работ 

1 

188 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Нижнеподпольный.  

Внутриплощадочные сети  канализации  

комплекс  

работ 

1 

189 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Нижнеподпольный.  

Колодцы канализационные  

комплекс  

работ 

1 

190 

Внутриплощадочные сети  водоснабжения и  

водоотведения ВНС х.  Нижнеподпольный.  

Электрохимическая защита  трубопроводов  

комплекс  

работ 

1 

191 

Резервуары чистой воды.  Площадка ВНС х.  

Нижнеподпольный 

комплекс  

работ 

1 

192 

Электролизная. Площадка  ВНС х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

193 

Выгреб, емк. 4 м3.  Площадка ВНС х.  Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

194 

Ограждение площадки  ВНС х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

195 

Вертикальная планировка  ВНС х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

196 

Элементы благоустройства  ВНС х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

197 

Автомобильная дорога к  ВНС х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

198 

Лестница. Площадка ВНС  х. Нижнеподпольный  

комплекс  

работ 

1 

5 этап 

199 

Разбивка осей 

комплекс  

работ 

1 

200 

Рекультивация земель  технический этап  

комплекс  

работ 

1 

201 

Рекультивация земель  биологический этап  

комплекс  

работ 

1 

202 

Снос и компенсационная  посадка зеленых  

насаждений 

комплекс  

работ 

1 

203 

Водопровод 

комплекс  

работ 

1 

204 

Колодцы 

комплекс  

работ 

1 

205 

Автоматизация 

комплексная. Водопровод  

комплекс  

работ 

1 

206 

Утилизация мусора  

м3 

13899,23 

 #Проект  

Взыскать с Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации  Аксайского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  «Полимерспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Украинцева Ю. В.