Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

02 12. 2021 года.                                              Дело № А40-151219/21-43-980

Резолютивная часть решения объявлена 29. 11. 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 02. 12. 2021 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФГБУ " Центр оценки качества зерна " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Велес Лаборатория " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании  1 135 161 руб. 18 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 239 от 23.07.2021 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя,  арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании  1 135 161 руб. 18 коп. – неустойки, на основании статей  309, 329, 330 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы не в полном объеме, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (Учреждение, Заказчик) 26.10.2017 с Обществом с ограниченной ответственностью «Велес Лаборатория» (Общество, Исполнитель) заключен Договор № 199-ЕП на выполнение работ по обновлению информационной системы (программного обеспечения) АСУ «Зерно».

Согласно пункту 1.1 Договора Исполнитель обязуется поэтапно выполнить работы по обновлению информационной системы (программного обеспечения подсистемы «Управления исследованиями» в составе АСУ «Зерно») и предоставить Заказчику предусмотренные Договором результаты по каждому этапу его исполнения, а Заказчик обязуется осуществить приемку и произвести оплату каждого этапа исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договорам.

Приложением № 2 Договора установлен следующий график выполнения работ и порядок оплаты:

Первый этап: Разработка частных технических заданий на подсистемы до 15.12.2017 - 7 817 490 рублей 00 копеек;

Второй этап: Разработка подсистемы «Геоинформационная система»- до 15.03.2018 - 1 630 500 рублей 00 копеек;

Третий этап: Разработка подсистем «Информационно-аналитическая система» и «Мобильное рабочее место руководителя» и Разработка мобильного приложения подсистемы «Клиент» до 15.08.2018 - 7 003 200 рублей 00 копеек;

Четвертый этап: Разработка подсистемы «Управление расценками», доработка подсистемы «Управление исследованиями», разработка модуля «Управление бланками строгой отчетности» и разработка модуля «Оценка эффективности филиалов» до 15.12.2018 - 1 043 000 рублей 00 копеек.

Дополнительным соглашение от 15.10.2018 № 3 к Договору внесены изменения в график выполнения работ и порядок оплаты, а именно:

Первый этап: Разработка частных технических заданий на подсистемы до 15.12.2017- 7 817 490 рублей 00 копеек;

Второй этап: Разработка подсистемы «Геоинформационная система» до 15.09.2018-  1 630 500 рублей  00 копеек;

Третий этап: Разработка мобильного приложения подсистемы «Клиент», комплексное обследование бизнес-процессов Заказчика на примере Ростовского и Новороссийского филиалов, комплексное обследование функционирования программного комплекса 1С Центра Сертификации, отчет «Описание процессов и схемы их автоматизации в Ростовском и Новороссийских филиалах ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» до 10.10.2018 – 5 003 200 рублей 00 копеек;

Четвертый этап: Разработка подсистем «Управление расценками» и Управление исследованиями, разработка модулей «Организационная структура» и «Договора», разработка модуля «Стандарты, показатели и измерения» до 20.12.2018 - 3 043 000 рублей 00 копеек.

Дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 4 изменен объем работ, предусмотренных четвертым этапом, а именно исключены следующие работы: a. Разработка подсистемы «Управление расценками»; b.Доработка подсистемы Управление исследованиями»; c.Разработка модуля «Стандарты, показатели и измерения».

В связи с уменьшением объема работ стоимость четвертого этапа составила 7 497 510 рублей 00 копеек.

В случае просрочки Исполнителем выполнения работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы нарушенного обязательства (п. 11.2. Договора).

Согласно положению, п. 1 ч. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

При выполнении работ Исполнителем допущено нарушение предусмотренных Контрактом промежуточных сроков выполнения работ, а именно:

срок выполнения первого этапа установлен до 15.12.2017, фактически работы выполнены и приняты 15.01.2018, просрочка выполнения первого этапа составила 31 день, размер неустойки по первому этапу составляет 34 331 руб. 81 коп.:

срок выполнения второго этапа - до 15.09.2018, фактически работы выполнены и приняты 20.09.2018, просрочка выполнения второго этапа составила 5 дней, размер неустойки по второму этапу составляет 1 154 руб. 94 коп.:

срок выполнения третьего этапа - до 10.10.2018, фактически работы выполнены и приняты 16.10.2018, просрочка выполнения третьего этапа составила 7 дней, размер неустойки по третьему этапу составляет 4 961  руб. 51 коп.:

срок выполнения четвертого этапа до 20.12.2018, фактически же работы выполнены и приняты 25.12.2020, просрочка выполнения четвертого этапа составила 736 дней, размер неустойки по четвертому этапу составляет 1 094 712 руб. 92 коп.

Общий размер неустойки составляет 1 135 161 руб. 18 коп. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 1 135 161 руб. 18 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Велес Лаборатория " (ОГРН 

<

***>) в пользу ФГБУ " Центр оценки качества зерна " (ОГРН 

<

***>) 1 135 161 руб. 18 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 24 352 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1