Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-10955/2020

г. Калининград

09 февраля 2021 

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170, 226-229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Утвердить Календарный график на выполнение работ, разработанный ООО «Пэтруско»  по форме Календарного графика Приложение № 2 к Контракту от 30.04.2020г.  

Обязать ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» исполнить  обязательства в натуре, внести изменения в директивный график строительства (Приложение   № 1 к Контракту № Ф.2018.481538-1 на выполнение работ по объекту «Областной  онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская область. Гурьевский  район, п.Родники) в части изменения лимитов финансирования выполнения работ, в  соответствии со сроками исполнения обязательств п.2.3 Контракта.  

Взыскать с ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области» в пользу ООО  «Пэтруско» 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его вынесения в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд.  

 Судья Т.В.Пахомова