Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-50/2023

20 мая 2024 года

город Якутск

Резолютивная часть объявлена 06.05.2024.

Полный текст изготовлен 20.05.2024.

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г. Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Еремеевой Л.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества Холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СГТ-Восток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 590 820,74 руб.,

с участием представителей:

от ответчика: ФИО1 по доверенности от 19.12.2022, в режиме онлайн,

от истца: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество Холдинговая компания "Якутуголь" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СГТ-Восток" о взыскании 590 820,74 руб. неустойки по договору на оказание услуг № 3004 от 21.12.2017.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Информация о движении дела опубликована своевременно на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru).

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие истца, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ.

29.04.2024 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве, в удовлетворении иска просит отказать в полном объеме.

Определение суда от 03.04.2024 истцом не исполнено.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено судом по имеющимся в деле доказательствам.

По существу заявленных требований суд установил следующие обстоятельства.

21.12.2017 между акционерным обществом Холдинговая компания «Якутуголь» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Современные горные технологии» (исполнитель) заключен договор на оказание комплекса услуг № 3004 (далее - договор), в соответствии с условиями которого (пункт 1.1.) исполнитель обязуется по заданию заказчика с использованием необходимой техники и оборудования (буровые установки, экскаваторы, автосамосвалы и пр., далее по тексту – техника) выполнять работы по бурению взрывных скважин и оказывать услуги по выемке – погрузке и перевозке горной массы (вскрышных пород, навалов) и складированию их в отвалы, содержанию дорог и отвалов, а заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты выполненных работ и оказанные услуги.

Согласно пункту 1.2. договора выполняемые исполнителем по договору работы и оказываемые им услуги включают и себя (далее по тексту при совместном упоминании все выполняемые по договору работы и оказываемые услуги именуются «услуги»):

1.2.1. работы по бурению взрывных скважин на соответствующий месяц (по форме приложения №1 к договору, далее по тексту – Заявка-1) для выполнения объема взорванной горной массы 6 820 тыс.куб.м. в 2018 году и 18 000 тыс.куб.м. в последующие годы при диаметре бурения от 215, 9 мм до 311 мм со средним выходом взорванной горной массы (ВГМ) с одного погонного метра по филиалу АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»: 

- для d = 215,9 мм – выход 30,75 м3/п.м.

- для d = 250 мм - выход 43,47 мЗ/п.м.

- для d = 279 мм - выход 53,38 мЗ/п.м.

- для d = 311 мм - выход 65,88 мЗ/п.м.;

1.2.2. услуги по выемке - погрузке горной массы (вскрышных пород, навалов, далее по тексту также именуются «грузы») экскаватором (минимальный объем ковша выемочной единицы – 12 куб.м.) в карьерные самосвалы согласно паспорта экскаваторного забоя в карьерные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 тонн (далее по тексту – услуги по экскавации) и по дальнейшей перевозке горной массы автосамосвалами в отвал (далее по тексту – услуги по перевозке) в объемах, указанных в Плане развития ФИО2 работ на календарный год (приложение №2 к договору, далее по тексту – План развития ФИО2 работ).

1.2.3. услуги по содержанию технологических автодорог и отвалов в месте оказания услуг (далее по тексту – услуги по содержанию дорог и отвалов), оказываемые исполнителем в соответствии с Положением о взаимодействии при оказании комплекса услуг в пределах горного и земельного отвода филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез Нерюнгринский (далее по тексту – Положение о взаимодействии).

Место оказания услуг: горный и земельный отвод Разреза «Нерюнгринский», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри (пункт 1.3. договора).

В соответствии с пунктом 1.4. договора исполнитель обязуется оказывать услуги по договору в следующие сроки:

- начало оказания услуг – в сроки, указанные в графике запуска оборудования исполнителя (приложения №14 к договору);

- окончания оказания услуг – 31 декабря 2022 года.

Согласно пункту 3.1.4. договора исполнитель обязан своевременно и в полном объеме выполнять буровые работы в соответствии с Заявкой – 1, согласованной сторонами на месяц. 

По пункту 3.1.5. договора исполнитель обязан своевременно и в полном объеме оказывать услуги по экскавации и услуги по перевозке в соответствии с Планом развития ФИО2 работ, а также заявкой заказчика на плановый объем выемки – погрузки и перевозки горной массы в отвал на соответствующий месяц (по форме приложения №3 к договору, далее по тексту – Заявка-2), согласованной сторонами на месяц. 

В пункте 3.1.7. договора предусмотрено, исполнитель обязан не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от заказчика Заявки-1 и Заявки-2 рассмотреть их, подписать со своей стороны и направить обратно заказчику.

По условиям пункта 3.3.2. договора заказчик обязуется предоставить исполнителю сведения об условиях выполненных буровых работ за 35 дней до начала планируемого месяца в форме Заявки-1.

Заказчик обязуется предоставить исполнителю сведения об условиях оказания услуг по экскавации и услуг по перевозке за 35 дней до начала планируемого месяца в форме Заявки-2. Предоставлять планы развития горных работ не позднее пяти календарных дней до начала месяца оказания Услуг (пункт 3.3.3. договора).

В соответствии с пунктом 6.2. договора стоимость буровых работ за соответствующий отчетный период (месяц) рассчитывается исполнителем исходя из фактически выполненных объемов бурения взрывных скважин и стоимости выполнения буровых работ за 1 куб.м., установленной в приложении №6 к настоящему договору.

Приемка выполненных буровых работ за отчетный период (месяц) осуществляется на основании сводного месячного Акта выполненных буровых работ (по форме приложения №7 к настоящему договору), составленного на основании промежуточных Актов приёма-передачи готовых скважин на блоке, подписанных Сторонами в соответствии с Положением о взаимодействии, утвержденным ими согласно пункту 2.1. настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.3. договора стоимость услуг по экскавации за соответствующий отчетный период (месяц) рассчитывается исполнителем исходя из фактически выполненных объемов по выемке и погрузке горной массы и стоимости оказанных услуг по экскавации за 1 куб.м., установленной в приложении №6 к настоящему договору.

Объем вынутой за отчетный период (месяц) горной массы в целике определяется как по производимой совместной маркшейдерской съемке заказчика и исполнителя с разбивкой на объёмы, погруженные в собственные самосвалы исполнителя и самосвалы заказчика, так и по данным оперативного учета с последующей корректировкой по маркшейдерскому замеру, и оформляется Актом оказанных услуг по экскавации (по форме приложения №8 к настоящему договору), подписанным сторонами.

В соответствии с пунктом 6.4. договора стоимость услуг по перевозке за отчетный период (месяц) рассчитывается исполнителем исходя из фактически выполненных объемов перевозки грузов и стоимости оказания услуг по перевозке за 1 м3, установленной в приложении № 6 к настоящему договору.

Объем услуг по перевозке за отчетный период (месяц) определяется:

1)           при загрузке самосвалов исполнителя экскаваторами исполнителя - по производимой совместной маркшейдерской съемке заказчика и исполнителя;

2)           при загрузке самосвалов исполнителя экскаваторами заказчика - по данным оперативного учета, опирающихся на паспорт загрузки самосвала и количество выполненных самосвалом рейсов, с последующей корректировкой по маркшейдерскому замеру;

3)           при загрузке самосвалов заказчика экскаваторами исполнителя - по данным оперативного учета, опирающихся на паспорт загрузки самосвала и количество выполненных самосвалом рейсов, с последующей корректировкой по маркшейдерскому замеру, и оформляется Актом оказанных услуг по перевозке (по форме приложения №9 к настоящему договору), подписанным сторонами.

В соответствии с пунктом 6.5. договора стоимость услуг по содержанию дорог и отвалов за соответствующий отчетный период (месяц) рассчитывается исполнителем исходя из фактически выполненного объёма горных работ комплексом исполнителя и стоимости оказания услуг за 1 куб.м., установленной в приложении № 6 к настоящему договору, и оформляется актом оказанных услуг по содержанию дорог и отвалов (по форме приложения №10 к настоящему договору), подписанным сторонами.

Ответственность исполнителя за неисполнение согласованного ежемесячного объема определена сторонами в пункте 8.2 договора.

В приложении № 1 к договору сторонами согласована форма Заявки на плановый объем бурения взрывных скважин на месяц, в приложении № 3 - форма Заявки на плановый объем выемки - погрузки и перевозки горной массы в отвал на месяц, в приложении № 7 - форма Акта выполненных работ буровых работ за месяц, в приложении № 8 - форма Акта оказанных услуг по экскавации за месяц, в приложении № 9 - форма Акта оказанных услуг по перевозке за месяц, в приложении № 10 - форма Акта оказанных услуг по содержанию дорог и отвалов за месяц.

28.12.2018 между акционерным обществом Холдинговая Компания «Якутуголь», обществом с ограниченной ответственностью «Современные горные технологии», обществом с ограниченной ответственностью «СГТ-Восток» заключено соглашение о замене стороны по договору № 3004 от 21.12.2017 на оказание комплекса услуг, заключенному между ООО «Современные горные технологии» и АО ХК «Якутуголь», по условиям которого (пункт 1) ООО «Современные горные технологии» добровольно и с согласия двух других сторон настоящего соглашения передает, а ООО «СГТ-Восток» принимает на себя по истечении 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего соглашения в полном объеме все права и обязанности по выполнению договора №3004 на оказание комплекса услуг от 21.12.2017, заключенного между ООО «Современные горные технологии» и АО ХК «Якутуголь», и вместо ООО «Современные горные технологии» становятся стороной по данному договору (исполнителем).

Истец, будучи заказчиком по договору №3004 от 21.12.2017, ссылаясь на то, что в ноябре 2019 года, феврале 2020 года, начиная с мая 2020 года по июль 2022 года, им поданы заявки на выполнение комплекса услуг (транспортировка, бурение, экскавация, экскавация уголь), однако ответчиком, будучи исполнителем по договору №3004 от 21.12.2017, услуги были оказаны не в полном объеме, обратился в суд с настоящим иском о взыскании неустойки.

Расчет неустойки произведен исходя из разницы между объемом услуг, указанных в заявках, и объемом фактически оказанных услуг.

Досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден направлением в адрес ответчика претензии от 26.09.2022, которая вручена последнему 03.10.2022, оставлена без ответа. Исковое заявление поступило в суд 10.01.2023, то есть по истечении срока, указанного в пункте 10.1. договора №3004 от 21.12.2017.

В материалы дела истцом представлены Заявки на плановый объем бурения взрывных скважин на февраль, ноябрь 2019 года, на февраль 2020 года, на январь, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, на январь 2022 года, Заявки на плановый объем выемки - погрузки и перевозки горной массы в отвал на ноябрь 2019 года, на февраль 2020 года, на январь, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, на январь 2022 года, переписка сторон,

а также Акты оказанных услуг по содержанию дорог и отвалов от 30.11.2019 за ноябрь 2019 года, от 29.02.2020 за февраль 2020 года, от 31.05.2020 за май 2020 года, от 30.06.2020 за июнь 2020 года, от 31.07.2020 за июль 2020 года, от 31.08.2020 за август 2020 года, от 30.09.2020 за сентябрь 2020 года, от 31.10.2020 за октябрь 2020 года, от 30.11.2020 за ноябрь 2020 года, от 31.12.2020 за декабрь 2020 года, от 31.10.2021 за октябрь 2021 года, от 30.11.2021 за ноябрь 2021 года, от 31.01.2021 за январь 2021 года, от 28.02.2021 за февраль 2021 года, от 31.03.2021 за март 2021 года, от 30.04.2021 за апрель 2021 года, от 30.06.2021 за июнь 2021 года, от 31.07.2021 за июль 2021 года, от 31.08.2021 за август 2021 года, от 30.09.2021 за сентябрь 2021 года, от 31.12.2021 за декабрь 2021 года, от 31.01.2022 за январь 2022 года, от 28.02.2022 за февраль 2022 года, от 31.03.2022 за март 2022 года, от 31.07.2022 за июль 2022 года, от 31.12.2022 за декабрь 2022 года;

Акты оказанных услуг по экскавации от 30.11.2019 за ноябрь 2019 года, от 29.02.2020 за февраль 2020 года, от 31.05.2020 за май 2020 года, от 30.06.2020 за июнь 2020 года, от 31.07.2020 за июль 2020 года, от 31.08.2020 за август 2020 года, от 30.09.2020 за сентябрь 2020 года, от 31.10.2020 за октябрь 2020 года, от 30.11.2020 за ноябрь 2020 года, от 31.12.2020 за декабрь 2020 года, от 31.10.2021 за октябрь 2021 года, от 30.11.2021 за ноябрь 2021 года, от 31.01.2021 за январь 2021 года, от 28.02.2021 за февраль 2021 года, от 31.03.2021 за март 2021 года, от 30.04.2021 за апрель 2021 года, от 31.05.2021 за май 2021 года,  от 30.06.2021 за июнь 2021 года, от 31.07.2021 за июль 2021 года, от 31.08.2021 за август 2021 года, от 30.09.2021 за сентябрь 2021 года, от 31.12.2021 за декабрь 2021 года, от 31.01.2022 за январь 2022 года, от 28.02.2022 за февраль 2022 года, от 31.03.2022 за март 2022 года, от 31.07.2022 за июль 2022 года, от 31.12.2022 за декабрь 2022 года;

Акты выполненных буровых работ от 30.11.2019 за ноябрь 2019 года, от 29.02.2020 за февраль 2020 года, от 31.05.2020 за май 2020 года, от 30.06.2020 за июнь 2020 года, от 31.07.2020 за июль 2020 года, от 31.08.2020 за август 2020 года, от 30.09.2020 за сентябрь 2020 года, от 31.10.2020 за октябрь 2020 года, от 30.11.2020 за ноябрь 2020 года, от 31.12.2020 за декабрь 2020 года, от 30.11.2021 за ноябрь 2021 года, от 31.01.2021 за январь 2021 года, от 28.02.2021 за февраль 2021 года, от 31.03.2021 за март 2021 года, от 30.04.2021 за апрель 2021 года, от 31.05.2021 за май 2021 года,  от 30.06.2021 за июнь 2021 года, от 31.07.2021 за июль 2021 года, от 31.08.2021 за август 2021 года, от 30.09.2021 за сентябрь 2021 года, от 31.12.2021 за декабрь 2021 года, от 31.01.2022 за январь 2022 года, от 28.02.2022 за февраль 2022 года, от 31.03.2022 за март 2022 года, от 31.07.2022 за июль 2022 года, от 31.12.2022 за декабрь 2022 года;

Акты оказания услуг по перевозке от 30.11.2019 за ноябрь 2019 года, от 29.02.2020 за февраль 2020 года, от 31.05.2020 за май 2020 года, от 30.06.2020 за июнь 2020 года, от 31.07.2020 за июль 2020 года, от 31.08.2020 за август 2020 года, от 30.09.2020 за сентябрь 2020 года, от 31.10.2020 за октябрь 2020 года, от 30.11.2020 за ноябрь 2020 года, от 31.12.2020 за декабрь 2020 года, от 31.10.2021 за октябрь 2021 года, от 30.11.2021 за ноябрь 2021 года, от 31.01.2021 за январь 2021 года, от 28.02.2021 за февраль 2021 года, от 31.03.2021 за март 2021 года, от 30.04.2021 за апрель 2021 года, от 31.05.2021 за май 2021 года,  от 30.06.2021 за июнь 2021 года, от 31.07.2021 за июль 2021 года, от 31.08.2021 за август 2021 года, от 30.09.2021 за сентябрь 2021 года, от 31.12.2021 за декабрь 2021 года, от 31.01.2022 за январь 2022 года, от 28.02.2022 за февраль 2022 года, от 31.03.2022 за март 2022 года, от 31.07.2022 за июль 2022 года, от 31.12.2022 за декабрь 2022 года;

Акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по услугам вспомогательной техники от 31.10.2021 за октябрь 2021 года, от 30.11.2021 за ноябрь 2021 года, от 30.09.2021 за сентябрь 2021 года, от 31.12.2021 за декабрь 2021 года, от 31.01.2022 за январь 2022 года, от 28.02.2022 за февраль 2022 года, от 31.03.2022 за март 2022 года;

Акты о заправке техники от 31.07.2022 за июль 2022 года, от 31.12.2022 за декабрь 2022 года.

По пояснения истца, все заявки были направлены по электронной почте.

В отзыве от 29.04.2024 ответчик с иском не согласился, оспаривает факт получения заявок и согласования установленных ими объемов; истец не представил пояснений о том, как определено невыполнение объемов экскавации и транспортировки, при том, что заявка была подана на плановый объем выгрузки-погрузки и перевозки горной массы в отвал.

Исследовав доводы и возражения сторон, представленные в материалы дела доказательства, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 ГК РФ названы договоры и иные сделки.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Проанализировав в порядке, установленном статьей 431 ГК РФ, условия договора № 3004 от 21.12.2017, суд приходит к выводу о том, что заключенный сторонами договор является смешанным; содержит элементы договора подряда и возмездного оказания услуг, в связи с чем, в силу пункта 3 статьи 421 ГК РФ, порядок исполнения договора регулируется нормами глав 37, 39 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

Пунктом 8.2. договора установлено, что в случае неисполнения исполнителем согласованного ежемесячного объема буровых работ согласно заявки-1, объемов услуг по экскавации и услуг по перевозке согласно плану развития горных работ и заявки-2, исполнитель обязуется по заявленному заказчиком требованию уплатить неустойку в размере 0,03% от стоимости соответствующих неуказанных услуг, но не более 5% от общей стоимости согласованного объема услуг. Исполнитель освобождается от ответственности по данному пункту договора, если докажет, что ежемесячный объем соответствующих услуг не был выполнен не по его вине.

При невыполнении исполнителем установленного месячного объема услуг менее чем на 10% от согласованного сторонами исполнитель вправе восполнить невыполненные в отчетном месяце объемы соответствующих услуг в следующем месяце, при этом общие объемы соответствующих услуг за все месяцы должны быть полностью выполнены исполнителем не позднее последнего месяца текущего года без применения к нему штрафных санкций.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. 

По смыслу данной нормы права буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений (буквальное толкование) определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

При этом условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениям ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ), в том числе таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения.

Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Согласно статье 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Проанализировав условия договор с позиции статьи 431 ГК РФ, суд приходит к выводу, что к исполнителю не применяются штрафные санкции при выполнении им всех объемов не позднее последнего месяца текущего года.

Как следует из материалов дела, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в связи с невыполнением согласованного ежемесячного объема буровых работ согласно заявке-1, объемов услуг по экскавации и услуг по перевозке согласно Плану развития горных работ и заявке-2, за ноябрь 2019 года, февраль 2020 года, начиная с мая 2020 года по июль 2022 года.

Таким образом, в предмет доказывания входит установление плановых объемов за 2019, 2020, 2021, 2022 года.

В соответствии с условиями договора, услуги оказываются ответчиком на основании согласованных сторонами на месяц заявок, форма которых утверждена соответствующим приложением к договору.

Так, согласно пунктам 3.3.2, 3.3.3 договора, заказчик обязался предоставить исполнителю сведения об условиях выполненных буровых работ, сведения об условиях оказания услуг по экскавации и услуг по перевозке за 35 дней до начала планируемого месяца в форме заявки-1 и заявки-2, а также предоставлять планы развития горных работ не позднее пяти календарных дней до начала месяца оказания услуг.

В соответствии с пунктом 3.1.7 договора, исполнитель обязан не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от заказчика заявки-1 и заявки-2 рассмотреть их, подписать со своей стороны и направить обратно заказчику.

Между тем истцом не представлены заявки на май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года, на февраль 2021 года, на февраль 2022 года, на май 2022 года.

Заявки на ноябрь 2019 года, на февраль 2020 года, на январь, март, июль, октябрь, декабрь 2021 года, на январь, июль 2022 года подписаны истцом в одностороннем порядке, доказательства направления данных заявок ответчику в материалы дела не представлены.

В письмах о принятии заявок ответчик предупредил истца о невозможности выполнения заявок в полном объеме на март, апрель, июнь 2022 года.

В материалы дела представлена подписанная исполнителем заявка на бурение на февраль 2019 года, однако истцом неустойка за этот период не заявлена.

Согласно письмам ответчика им подтверждены планируемые производственные показатели на апрель 2021 года:

экскавация - 1 500 000 м3,

транспортирование - 1 500 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 46 000 п.м.;

на май 2021 года:

экскавация - 1 450 000 м3,

транспортирование - 1 450 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 49 900 п.м.;

на июнь 2021 года:

экскавация - 1 600 000 м3,

транспортирование - 1 600 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 57 500 п.м.;

на июль 2021 года:

экскавация - 1 240 000 м3,

транспортирование - 1 240 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 41 900 п.м.;

на август 2021 года:

экскавация - 1 420 000 м3, при условии оказания содействия заказчиком по буровым работам в объеме 380 000 м3 в пересчете на взорванную горную массу и по транспортированию горной массы в отвал в объеме 300 000 м3,

транспортирование - 1 120 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 33 800 п.м.;

на сентябрь 2021 года:

экскавация - 1 900 000 м3, 

транспортирование - 1 900 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 56 200 п.м.;

на ноябрь 2021 года:

экскавация - 2 100 000 м3, 

транспортирование - 2 100 000 м3, на расстояние 3,5 км,

бурение - 63 000 п.м.

По актам выполненных буровых работ, оказанных услуг по экскавации и перевозке:

за апрель 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 572 906 м3, по экскавации 559 525,10 м3,

за май 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 1 157 754 м3, по экскавации 868 955,90 м3,

на июнь 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 751 733 м3, по экскавации 819 270,70 м3,

на июль 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 736 401 м3, по экскавации 1 015 886 м3,

на август 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 1 393 963 м3, по экскавации 1 049 154 м3,

на сентябрь 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 1 279 160 м3, по экскавации 1 324 836,90 м3,

на ноябрь 2021 года ответчиком выполнены, а истцом приняты работы по бурению скважин в объеме 1 745 190 м3, по экскавации 1 217 516,60 м3.

Возражая по иску, ответчик заявил, что объем фактически произведенных работ по бурению определен в кубических метрах, без указания на диаметр скважин, что не позволяет арифметически сопоставить запланированный объем бурения в погонных метрах с фактическим произведенным объемом.

Суд соглашается с доводами ответчика о невозможности определения объема невыполненных работ по бурению скважин без установления диаметра каждой скважины. Соответствующие пояснения с доказательствами истцом не представлены.

Поскольку истцом не подтвержден плановый объем выемки - погрузки и перевозки горной массы в отвал за период с января по март, октябрь и декабрь 2021 года, то есть весь плановый объем за 2021 год, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания неустойки за этот период.

Таким образом, истец не доказал, что в заявленный период ответчиком оказано услуг в меньшем объеме, чем указано в актах выполненных буровых работ, актах оказанных услуг по экскавации и по перевозке.

На основании изложенного, в удовлетворении иска судом отказано.

Истцом в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина в размере 14 816 руб. платежным поручением № 2041 от 17.02.2023. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина относится на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети интернет в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

 

Судья

Г.Л. Николаева