Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации   

 

Решение

Дело №А09-6578/2023

город Брянск

17 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2023 года.

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи  Фроловой М.Н.,                                                                                                          

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Споденейко О.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «БрянскЭлектро»

к Комитету по ЖКХ Брянской городской администрации

о взыскании 4 502 руб. 10 коп.,

 

при участии: 

от истца: ФИО1 - представитель (доверенность от 04.10.2023 № Д/87);

от ответчика: не явились, извещены; 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» (далее - ООО «БрянскЭлектро», истец) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к Комитету по ЖКХ Брянской городской администрации (далее - ответчик) о взыскании 4 502 руб. 10 коп. неустойки.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержа.

Ответчик письменный отзыв не представил.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Между ООО «БрянскЭлектро» (далее - Сетевая организация) и Комитетом по жилищному-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее - Заявитель) заключен договор об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям № 13-4703/2020/ф/БЕЖ от 07.04.2020 (далее - Договор).

В соответствии с условиями Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ЛЭП-0,23кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих электроэнергетики), с учетом следующих характеристик.

Пунктом 5 Договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Дополнительным соглашением к Договору от 30.11.2021 срок выполнения мероприятий был продлен до 31.12.2022.

В последствии, дополнительным соглашением к Договору от 30.12.2022, срок выполнения мероприятий был продлен до 31.03.2023.

В соответствии с пунктом 8 Договора Заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнять обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

Мероприятия по технологическому присоединению, которые должен был осуществить заявитель предусмотрены пунктом 11 Технических условий (Приложение № 1 к Договору).

Однако до настоящего времени Заявитель мероприятия, предусмотренные техническими условиями. не выполнил, срок выполнения мероприятий истек 31.03.2022.

На основании пункта 17 Договора истец начислил ответчику неустойку в размере 4 502 руб. 10 коп.

Ссылаясь на то, что претензия от 12.05.2023 об уплате неустойки была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с вышеуказанным иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, носит однократный характер и осуществляется на основании публичного договора, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Обязательством сетевой организации по такому договору является реализация мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, включая разработку и согласование технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Взимание платы по договору производится однократно с возможностью компенсации отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

Под технологическим присоединением понимается состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными правилами.

В соответствии с пунктом 16 Правил № 861 договор должен содержать существенные условия, к числу которых относятся: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III данных Правил); порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Согласно пункту 18 Правил № 861, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий, а также выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

Пунктом 19 Правил № 861 предусмотрено, что по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.

Как следует из материалов дела, ответчик в установленный пунктом 5 Договора срок уведомление о готовности осуществления проверки выполнения технических условий в адрес сетевой организации не направил.

В связи с чем акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения подписанием которых заканчивается процедура технологического присоединения не составлялись, то есть, процедура технологического присоединения в рамках вышеуказанного договора завершена не была.

Указанные обстоятельства ответчиком не опровергнуты.

Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий регламентирован положениями раздела IX Правил № 861.

В соответствии с пунктами 88, 89 Правил № 861 по результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в трехдневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению № 15 (акт о выполнении технических условий). При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

Пунктом 90 Правил № 861 установлен предельный срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий), который не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организации.

Подпунктом «а» пункта 16(6) Правил № 861 предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Таким образом, вышеуказанными нормами Правил № 861 установлено, что не направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления об окончании выполнения мероприятий по технологическому присоединению в установленный договором срок является нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Доказательств того, что в установленные договором сроки заявитель уведомлял сетевую организацию о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями и готовности для проведения проверки их выполнения, ответчиком в материалы дела не представлено.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ответственность Заявителя за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлена сторонами в пункте 17 Договора в виде неустойки в размере 0,25% за каждый день просрочки от общего размера платы, но не более размера неустойки, определенной за год просрочки.

Аналогичные правила определения размера неустойки установлены в абзаце 3 подпункта «в» пункта 16 Правил № 861, согласно которому неустойка начисляется за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, которые согласно пункту 18 Правил № 861 представляют собой исполнение обязательств по договору в натуре, то есть не являются денежным исполнением.

Поскольку Комитетом по ЖКХ Брянской городской администрации допущено нарушение срока выполнения мероприятий в рамках договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям № 13-4703/2020/ф/БЕЖ от 07.04.2020, требования истца о взыскании неустойки являются правомерными.

Истцом представлен расчет неустойки за период с 01.04.2023 по 23.06.2023 на сумму 4 502 руб. 10 коп. 

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд находит его соответствующим договору и фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию с последнего в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в пользу общества с ограниченной ответственностью «Брянскэлектро» 4 502 руб. 10 коп. неустойки, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца и может быть обжаловано в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд г.Тула, в месячный срок. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

 

Судья                                                                          М.Н. Фролова