Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-105403/2022

11 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  03 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  11 мая 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Новиковой Е.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация" (адрес:  Россия 191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9-Я СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 4-6, ЛИТЕР А, ОФИС 225А; Россия 191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Трофяная дорога,д.7,лит.Ф);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМКОМПЛЕКТ" (адрес:  Россия 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, ЧАЙКОВСКОГО УЛ., Д. 24, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 52-Н, ОФИС 3);

о взыскании

 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: не явился (извещен)

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Петербургская Строительная Корпорация» (далее - ООО «Петербургская Строительная Корпорация», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СтройРемКомплект» (далее - ООО «СтройРемКомплект», ответчик) о взыскании:

- по договору №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021: основной долг в размере 116724 руб. 07 коп., неустойку в размере 14901 руб. 92 коп.; 

-по договору № Б53—У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021: основной долг в размере 773530 руб. 94 коп., неустойку в размере 257328 руб. 02 коп.;

- основной долг по счетам/заявкам (Бабушкина ул., д. 53, ГП) по актам 2392 от 27.10.2021, 2697 от 30.11.2021, 450 от 28.02.2022 в размере 41968 руб. 29 коп. 

           В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ судом приняты уточнения исковых требований, согласно которым истец просит взыскать с ответчика:

 - по договору №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021: основной долг в размере 116724 руб. 07 коп., неустойку в размере 21998 руб. 50 коп.; 

-по договору № Б53—У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021: основной долг в размере 773530 руб. 94 коп., неустойку в размере 391988 руб. 10 коп.;

-основной долг по счетам/заявкам (Бабушкина ул., д. 53, ГП) по актам 2392 от 27.10.2021, 2697 от 30.11.2021, 450 от 28.02.2022 в размере 41968 руб. 29 коп. 

В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные требования.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

В силу положений части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, отсутствуют, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Арбитражный суд, в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, признав надлежащим уведомление ответчика, полагает возможным завершить предварительное судебное заседание и рассмотреть дело по существу.

           Как следует из материалов дела между ООО «Пек» (Генеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (Подрядчик) и ООО «СтройРемКомплект» (Субподрядчик) заключен договор субподряда №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021.

В соответствии с предметом договора Субподрядчик по заданию Подрядчика обязуется выполнить полный комплекс строительных работ по отделке помещений корпуса 2 (секции 2.1) (без ДОО) с устройством теплого пола в санузлах квартир (в т.ч. обогрев, необходимый для выполнения работ в технических помещениях), указанных в столбце «ООО «СтройРемКомплект» Акта разграничения объемов работ от 14.04.2021 (Приложение №22), на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными гаражами, объектом дошкольного образования на 250 мест», расположенном по адресу: 

<

...> на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0007125:228.

По условиям договора истец обязался создать ответчику необходимые условия для выполнения работ и оказать услуги по общей организации и координации работ на Объекте, перечень которых указан в разделе 4 и 9 договора, а ответчик обязался принять оказанные услуги и оплатить.

Так согласно п. 4.5. договора ответчик возмещает истцу следующие расходы:

- расходы за потребленные электроснабжение, водоснабжение, водоотведение (количество потребленных коммунальных услуг фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, стоимость определяется по тарифу, указанному в бухгалтерских документах поставщика коммунальных услуг (акт, счет-фактура));

- расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование и размещение. Объемы фиксируются ежемесячно в двухсторонних актах. В случае немотивированного отказа Субподрядчика (Ответчика) в подписании двухстороннего акта, акт подписывается в одностороннем порядке Гeнпoдpядчикoм (истцом) и имеет полную юридическую силу.

Согласно п. 4.6. договора субподряда истец оказывает ответчику услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых ответчиком и предоставляемых истцом ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость оплачивается ответчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной ответчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания». Количество фактической потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячна в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, а в случае отсутствия электросчетчиков - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по договору.

В соответствии п. 4.7. договора расходы истца, оказанные согласно п.п. 4.5-4.6 оплачиваются в следующем порядке:

-   оплата производится в период с даты начала выполнения работ по договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору;

-   оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании ycлуг, подписанных сторонами, и счетов, представляемых истцом ответчику. Вышеуказанный Акт об оказании услуг должен быть подписан ответчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта и не предоставления мотивированного отказа от подписания ответчиком истцу, Акт считается принятым без возражений и подписанным и подлежит оплате.

Оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта.

Ответчик компенсирует истцу расходы по использованию механизмов не указанных в подпунктах пункта 4.5.2., п.4.5.3. договора, а также затраты по оказанию услуг (за исключением услуг, обозначенных в п.п. 9.1.-9.18. договоров) на основании отдельного договора, заключенного между истцом и ответчиком.

Услуги, перечисленные в п.п. 9.1.-9.18., 9.20. договора, подлежат оплате ответчиком с момента начала выполнения работ по договору до даты фактического окончания выполнения работ. Оплата производится ежемесячно, в размере 0,5% от стоимости выполненных работ ответчиком, указанных в Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц (в соответствии с п. 4.8. договора).

В соответствии с п.п. 9.1.- 9.18., 9.20 договора истец обязался оказывать следующие услуги:

1. осуществлять общую организацию всех видов работ по строительству объекта и координации выполнения работ привлеченных субподрядных организаций;

2. обеспечивать Субподрядчика необходимой проектной (технической)документацией;         

3.передать по Акту-допуску строительную площадку;

4.передать площадку для размещения бытовок;

5. обеспечить своевременную передачу строительной площадки для производстваработ смежным подрядным организациям;           

6.осуществлять контроль за сроками выполнения полного комплекса работ;

7.осуществлять контроль за выполнением графика строительства объекта;

8. еженедельно согласовывать со всеми сторонами совмещенный графикпроизводства работ между всеми подрядными организациями на объекте;

9. проводить вводный инструктаж всех сотрудников подрядчика и привлеченных им третьих лиц;

10. осуществлять контроль за соблюдением технологии производства работ на объекте;

11. организовывать рациональное использование территории строительной площадки;

12. осуществлять контроль за выполнением Субподрядчиком мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и т.д.

13. уведомлять о назначении лица, ответственного за оказание услуг на объекте;

14. назначить должностных лиц, ответственных за электрохозяйство, пожарную безопасность, производственную санитарию и т.д.;

15. вести общий журнал производства работ;          

16. предоставлять заказчику на утверждение общий журнал производства работ;

17. согласовать проект производства работ (ППР);

18. участвовать совместно - с Подрядчиком в приемке работ, выполняемыхСубподрядчиком;

19. организовать и контролировать выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов;

20. производить уборку площадки и примыкающей уличной полосы;

21. обеспечить контроль выполнения работ в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами;

22. обеспечивает соблюдение порядка ведения работ на строительной площадке соответствии с требованиями органов государственного надзора;

23. обеспечить эксплуатацию постов мойки колес и контролировать доступ выезжающего транспорта;

24. контролировать привлечение к выполнению работ по договору только квалифицированных рабочих и специалистов;

25. контролировать соблюдение правил использования иностранной и иногородней рабочей силы;

26. обеспечивать возможность проведения представителями Подрядчика технического и авторского надзора и контроля выполнения работ;

27. обеспечить доступ на объект лицам, указанным Субподрядчиком и Подрядчиком;

28. сообщать Подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией;

29. обеспечить Субподрядчика электроэнергией, водой от постоянных источников электро- и водоснабжения.

Услуги, оказанные истцом, перечисленные в п. 9.1-9.18, 9.20 договора оплачиваются ответчиком ежемесячно на основании Актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставленных генеральным подрядчиком, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты предоставления Генеральным подрядчиком счета-фактуры и подписания Акта об оказанных услугах, согласно п. 5.2. договора.

На основании п. 4.7. трехстороннего договора субподряда ООО «ПСК» (Генеральный подрядчик) и ООО «СтройРемКомплект» (Субподрядчик) заключен договор на оказание услуг №Б53-У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021.

В соответствии с предметом договоров Генподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в разделе 3 договора (Полный перечень в Приложении № 1 к договору), а Субподрядчик принять эти услуги и оплатить.

Соглашено п. 3.1. договора истец обязался оказать ответчику следующие услуги:

1. Изготовление и перекодировка электронных пропусков;

2. Организация сбора, транспортирования, размещения или утилизация бытовых истроительных отходов;

3. Обеспечение водоснабжением;

4. Обеспечение электроэнергией;

5. Обеспечение электроэнергией от ДЭС;

6. Предоставление и обслуживание биотуалетов;

7. Предоставление строительной техники и иных подъемных механизмов, включаябашенные краны;

8. Восстановление порядка по ОТ и ТВ;

9. Подготовка мест под бытовой городок;

10. Мойка колес;

11. Устройство временного электроснабжения и электроосвещения строительной площадки; 

12. Содержание и текущий ремонт временных электрических сетей;

13. Обеспечение строительной площадки системой видеонаблюдения и т.д.Главой 2 договора на оказание услуг предусмотрен порядок оплаты. Субподрядчик производит оплату в период с начала выполнения работ на объекте и до даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ по Трехстороннему договору по ценам, указанном в Приложении № 1 к договору на основании представленных Генподрядчиком счета, счет-фактуры и Акта об оказанных услугах, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта оказания услуг.

Акт оказания услуг подписывается Субподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов приема-сдачи оказанных услуг, а в случае несоответствия сведений Субподрядчик направляет Генподрядчику мотивированный отказа в подписании Акта. В случае неполучения Генподрядчиком мотивированного отказа в срок, указанный в договоре, Акт приема-передачи оказанных услуг считается подписанным и подлежит оплате, в соответствии с главой 5 договора на оказание услуг.

Истец в обоснование надлежащего исполнения обязательств по договорам представил Акты:

- договор от 04.05.2021 №Б53-Отд2.1-1/2021 (Акт №1943 от 30.09.2021 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию на 31.08.21г. (получен 03.12.2021; Акт №799 от 30.09.2021 Генподрядные услуги за сентябрь 2021 (получен 03.12.2021); Акт № 951 от 30.11.2021 Генподрядные услуги за октябрь 2021 (получен 30.12.2021); Акт № 2911 от 31.12.2021 Возмещение расходов за потребленную электроэнергию с 31.08.2021 по 30.11.2021          (получен 13.03.2021);

-   договор от 04.05.2021 №Б53-У/Отд2.1-1/2021 (Акт №2004 от 30.09.2021 Услуги (получен 03.12.2021); Акт №2282 от 31.10.2021 Изготовление пропуска в сентябре (получен 08.12.2021); Акт №2283 от 31.10.2021 Перекодировка пропуска в октябре (получен 08.12.2021); Акт №2625 от 30.11.2021 Услуги (получен 13.03.2022), а также подтверждение о направлении в адрес ответчика вышеперечисленных документов, письма от 13.10.2021 исх. № 3489, от 19.11.2021 исх. № 3897, от 22.12.2021 исх. № 4354 и от 13.01.2022  исх. № 0121 с подтверждением отправки. Ответчик со своей стороны, мотивированного отказа в подписании в адрес истца не направил, оплату за оказанные услуги не произвел, в связи с чем, на стороне ответчика образовалась задолженность в размере:

по договору субподряда №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 в размере: 131625 руб. 99 коп.;

по договору на оказание услуг №Б53-У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 в размере: 1030858 96 коп.

Также истец просит взыскать с ответчика основной долг по счетам/заявкам (Бабушкина ул., д. 53, ГП) по актам 2392 от 27.10.2021, 2697 от 30.11.2021, 450 от 28.02.2022 в размере 41968 руб. 29 коп. 

Истцом, в адрес ответчика направлена претензия за исходящим номером № 0843 от 11.03.2022, которая последним была оставлена без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием истцу для обращения с настоящим иском.

Заслушав доводы представителя истца, изучив материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующему выводу. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми aктами.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенныe действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде применяются к договорам возмездного оказания услуг, если это не противоречит природе договора и статьям 779 -782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Положения статей 720, 753 ГК РФ связывают наступление обязанности заказчика по оплате с подписанием обеими сторонами акта выполненных работ. Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта.

Из материалов дела видно, что ответчик от подписания актов уклонился, доказательств мотивированного отказа в принятии результата работ в соответствии с требованиями статьи 753 ГК РФ не представил, оплату в установленном размере яе произвел. Указанные обстоятельства позволяют признать услуги истца оказанными и подлежащими оплате ответчиком.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которое ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание, что факт оказания спорных услуг подтверждены актами сдачи приемки работ, услуг, подписанным ответчиком без замечаний, направленными в адрес ответчика, соответствует ст.ст. 307, 309, 310, 779 ГК РФ, а также то обстоятельство, что ответчик не представил доказательства исполнения своих обязательств по он пате указанных услуг, исковые требования о взыскании общей задолженности в размере 131625 руб. 99 коп. по договору субподряда №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 и 1030858 руб. 96 коп. по договору на оказание услуг №Б53-У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п.13.2.24. договора субподряда №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 установлена ответственность Субподрядчика за несвоевременную оплату по предоставленным Генеральным подрядчиком услугам в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 7.2. договора на оказание услуг №Б53-У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней -размер пени увеличивается до 0,3%о от суммы за каждый день просрочки.

С учетом уточненных исковых требований истцом в материалы дела предоставлен расчет за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате за оказанные услуги. Истцом начислена неустойка:

по договору №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 в размере 21998 руб. 50 коп.;

по договору № Б53-У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 в размере 391988 руб. 10 коп.

В обоснование факта поставки товара истец ссылается на товарную накладную № б/н от 22.02.2022, а также универсальные передаточные документы № 425 от 28.02.2022, № 2886 от 30.1.2021, № 2566 от 27.10.2021, при этом никаких доказательств направления указанных документов ответчику истцом в материалы дела не представлено, также  отсутствует надлежащим образом оформленная доверенность, уполномочивающая представителя покупателя на принятие товара.

Согласно п. 1 ст. 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Согласно ст. 312 ГК РФ должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и он несет риск последствий не предъявления такого требования.

В силу ст. 182 ГК РФ полномочия представителя могут возникать на основании доверенности, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Виду пп. 1 п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возможность действовать от имени организации без доверенности предусмотрена только для ее единоличного исполнительного органа.

В п. 2.1.2 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом Роскомторга от 10.07.1996 N 1-794/32-5, указано, что накладная подписывается материально ответственными лицами, сдавшими и принявшими товар.

В силу п. 3 ст. 9 Закона N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.

Руководитель организации может передать часть своих полномочий (в частности, право подписи первичных документов) другому лицу.

Таким образом, вышеуказанная товарная накладная не была подписана уполномоченным лицом и соответственно, не может являться надлежащим доказательством поставки товара ответчиком.

Универсальные передаточные документы, на которые ссылается истец, не являются относимыми и допустимыми доказательствами по делу, поскольку не соответствуют утвержденным действующим законодательством Российской Федерации формам, не подписаны со стороны покупателя или подписаны неизвестными лицами, какие-либо реквизиты ответчика отсутствуют; отсутствуют существенные условия договора поставки, необходимые в силу ст. 424 и 506 ГК РФ.

Таким образом, в представленных документах отсутствуют обязательные для правоотношений сторон реквизиты документов, по которым можно установить наличие между сторонами отношений по поставке и приемке товара.

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания суммы основного долга по счетам/заявкам (Бабушкина ул., д.53, ГП) по актам 2392 от 27.10.2021, 2697 от 30.11.2021, 450 от 28.02.2022 с общества с ограниченной ответственностью ООО«СтройРемКомплект» (ИНН 

<

***>) пользу ООО «ПСК» (ИНН 

<

***>) вразмере 41968 рублей 29 копеек удовлетворению не подлежат.            

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлиныотносятся на ответчика.       

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Взыскать с общества   с   ограниченной   ответственностью   ООО   «СтройРемКомплект»   (ИНН 

<

***>) пользу общества с ограниченной ответственностью «ПСК» (ИНН 

<

***>):

- сумму основного долга по оплате услуг по договору субподряда №Б53 -Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 в размере 116724  руб. 07 коп.; сумму  договорной   неустойки   (пени)  за  просрочку  исполнение обязательств по оплате по договору субподряда №Б53-Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 в размере 21998 руб. 50 коп.;

- сумму основного долга по оплате услуг по договору на оказание услуг №Б53-У/Отд2.1-1/2021 от 04.05.2021 размере 773530 руб. 94 коп.; сумму договорной неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по оплате по договору на оказание услуг №Б53-У/Отд2.1-1/202 от 04.05.2021 в размере 391988 руб. 10 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 25045 руб.

В остальной части в удовлетворении иска - отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Новикова Е.В.