Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-19598/2020

17 мая 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 17 мая 2021 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения муниципального образования город Нягань "Управление городского хозяйства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 625049, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский 

<

...>/1) о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 10.06.2019 № 0187300008119000126, без участия представителей сторон,

установил:

муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягани "Управление городского хозяйства" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" (далее - ответчик) о взыскании 234 080,86 руб. неустойки (штрафа) по муниципальным контрактам от 10.06.2019 № 0187300008119000126, № 0187300008119000143, № 0187300008119000144, № 0187300008119000146, № 0187300008119000150, № 0187300008119000151, от 13.06.2019 № 0187300008119000162, № 0187300008119000166.

Рассмотрение исковых требований к ответчику по муниципальным контрактам от 10.06.2019 №№ 0187300008119000143, 0187300008119000144, 0187300008119000146, 0187300008119000150, 0187300008119000151, от 13.06.2019 №№ 0187300008119000162, 0187300008119000166 выделены в отдельное производство.

В рамках настоящего дела рассматриваются исковые требования, уточненным истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с ответчика 9 932,95 руб. неустойки по муниципальному контракту от 10.06.2019 № 0187300008119000126 (далее - контракт).

Протокольным определением от 25.03.2021 рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 11.05.2021.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено судом в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания. 

Ответчик о наличии возражений относительно заявленного иска не сообщил; расчет истца не оспорил; мотивированные аргументы и доказательства не представил; отзыв на иск и ходатайств, направленных на сбор дополнительных доказательств, не заявил.

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего. 

Как следует из материалов дела, в рамках заключенного сторонами контракта подрядчик обязуется выполнить собственными силами работы по демонтажу временных строений в вагон - городке КлТПС на территории муниципального образования город Нягань в 2019 году (далее - работы), по заявке муниципального заказчика, в соответствии с условиями Муниципального контракта (далее - контракта), технического задания (приложение № 1), в сроки, предусмотренные пунктом 3.1 муниципального контракта, а муниципальный заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом (пункт 1.1 контракта).

Согласно пункту 7.1 контракта подрядчик обязан произвести демонтаж строений по письменной заявке муниципального заказчика с указанием адреса выполняемых работ и срока выполнения не более 10-ти календарных дней. 

Подрядчик обязуется завершить работы в предусмотренном контрактом порядке и сроки (пункт 1.4 контракта).

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического задания и в сроки, предусмотренные контрактом (пункт 10.1 контракта).

Стоимость работ по контракту установлена сторонами в сумме 3 547 484,24 руб. и включает в себя все издержки подрядчика (пункт 4.1 контракта).

Сдача и приемка результатов работ проводятся в течение 10 рабочих дней со дня предоставления подрядчиком документов, подтверждающих исполнение контракта, в пределах сроков, установленных пунктом 3.1. контракта (пункт 10.2 контракта).

Муниципальный заказчик принимает выполненные работы на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 10.6 контракта).

Датой выполнения работ по контракту считается дата подписания муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 10.7 контракта).

Во исполнение пункта 7.1 контракта истец 09.09.2019 передал ответчику заявку на демонтаж вагонов №№ 61, 167, 237, 318 (далее - объекты) в срок до 16.09.2019 (л.д. 42).

В установленный срок работы по демонтажу объекта не выполнены, что отражено в актах от 16.09.2019, от 10.10.2019 (л.д. 43-44).

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательства по контракту, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 9 932,95 руб. неустойки за период с 29.09.2019 по 10.10.2019.

В связи с нарушением ответчиком договорного обязательства и неисполнением им требования об уплате неустойки в добровольном порядке, истец обратился с рассматриваемым иском в суд.

Отношения сторон, возникшие на основании спорного контракта, подлежат регулированию нормами Федерального закона № 44-ФЗ, главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде и условиями контракта.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 13.6 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства.

В силу статьей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условием обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ по контракту, определенных в заявке от 09.09.2019, подтверждены совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе актами от 16.09.2019, от 10.10.2019, ответчиком не оспорен.

Поскольку неустойка предусмотрена контрактом, факт нарушения сроков выполнения работ установлен судом и подтверждается материалами дела, ответчиком не опровергнут, суд находит требование истца о взыскании с ответчика договорной неустойки обоснованным. 

Расчет истца судом проверен, арифметически верный, прав ответчика не нарушает, возражений относительно размера и периода начисления неустойки, ходатайство о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик не заявил, контррасчет неустойки не представил.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании с ответчика неустойки подлежат удовлетворению в заявленном к взысканию размере - 9 932,95 руб.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся судом на истца; излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" в пользу муниципального казенного учреждения муниципального образования город Нягань "Управление городского хозяйства" 9 932,95 руб. неустойки, а также 2 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить муниципальному казенному учреждению муниципального образования город Нягань "Управление городского хозяйства" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 682 руб., уплаченную по платежному поручению от 24.11.2020 № 1484.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья  С.Г. Касумова