АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело №А27-11534/2024

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

 

23 июля 2024г.                                                                                                   г. Кемерово

Резолютивная часть решения оглашена 15 июля 2024г.

Решение  в  полном объеме изготовлено 23 июля 2024г. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Кормилиной Ю.Ю.                    при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем судебного заседания Ионовой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителя  заявителя ФИО1 (доверенность от 09.01.2024, диплом, паспорт)

дело по заявлению Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, город Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу "Ваганово" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)

о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения предусмотренного частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

инспекция государственного строительного надзора Кузбасса (далее – заявитель, административный орган, инспекция) обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной  акционерного общества "Ваганово"    (далее – общество, АО «Ваганово») по части 6 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее  – КоАП РФ). 

Определением суда от 19.06.2024 заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 15.07.2024.

В предварительном судебном заседании суд в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)), пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству,  перешел к  судебному разбирательству в судебном заседании. 

Представитель административного  органа требования поддержал.

АО "Ваганово", уведомленное по правилам статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание представителя не направило,  возражений  против перехода к судебному разбирательству не заявило. 

В письменном  отзыве  общество указало, что поскольку по результатам проверки исполнения предыдущего предписания №01-44-23-01 от 14.02.2024 административным  органом вынесено новое предписание  №04-44-23-03 от 06.05.2024, то предписание №01-44-23-01 от 14.02.2024 утратило силу, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности  в виде приостановления  деятельности.

Изучив материалы дела,  суд установил следующее.

В период с 24.04.2024   02.05.2024  главным консультантом - главным государственным инспектором отдела строительного надзора № 4   на основании решения Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 08.04.2024 №145/04 проведена выездная внеплановая проверка при строительстве объекта капитального строительства: «Животноводческий комплекс молочного направления на 2400 (две тысячи четыреста) голов коров с доильным залом по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ «Чебулинское» (I-II этапы строительства)», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх-Чебула.

В ходе проведения проверки установлено, что застройщиком на объекте является АО «Ваганово», разрешение на строительство № 42-515-08-2023 от 25.12.2023 (срок действия до 25.06.2023), выдано отделом архитектуры и градостроительства Чебулинского муниципального округа; договор аренды земельных участков от 16.11.2022.

 Лицом, осуществляющим строительство, является ООО «СДС-Строй», ИНН 

<

***>, на основании заключенного с застройщиком АО «Ваганово» договора генерального подряда №1571-23 от 01.12.2023.

На момент проведения проверки выполнены следующие работы: смонтировано ограждение строительной площадки из профлиста, на въезде/выезде установлен контрольно-пропускной пункт, на территории строительной площадки расположен строительный городок с бытовыми, инвентарными и административными помещениями;

- проходная с санпропусником (номер на плане 1) устройство фундаментов, монтаж металлического каркаса, монтаж стеновых панелей, устройство кровли, заполнение оконных и дверных проемов, отделочные работы, внутренние инженерные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, наружные инженерные сети водоснабжения и водоотведения;

- родильное отделение (номер на плане 2) устройство фундаментов, монтаж металлического каркаса, устройство кровли, устройство колодцев навозоудаления, монтаж металлических ворот, внутренние и наружные инженерные сети водоснабжения, водоотведения, устройство стеновых сэндвич -панелей, кровли, устройство подшивного потолка;

- коровник №1 (номер на плане 3.1) забивка свай, устройство металлического каркаса здания и кровли;

- коровник №2 (номер на плане 3.2) устройство фундаментов, монтаж металлического каркаса, монтаж стеновых панелей, устройство кровли, устройство колодцев навозоудаления, заполнение оконных и дверных проемов, ворот, устройство перегородок, подшивного потолка, устройство полов, внутренние инженерные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, наружные инженерные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- доильно-молочный блок с АБК (номер на плане 4.1) устройство фундаментов, монтаж металлического каркаса, монтаж стеновых панелей, устройство кровли, устройство подшивного потолка, устройство полов, кирпичной кладки стен, плит перекрытия здания АБК, устройство кровли, заполнение оконных, дверных проемов, внутренние и наружные инженерные сети, устройство полов, отделочных, облицовочных работ;

- доильно-молочный блок (номер на плане 4.2) забивка свай, устройство ростверков, устройство металлического каркаса, стеновых панелей, кровли, подшивного потолка, основания полов;

- прогон для скота №2 (номер на плане 5.2) устройство фундаментов, монтаж металлического каркаса, устройство кровли, устройство колодцев навозоудаления, устройство полов;

- прогон для скота №3, № 4 (номер на плане 5.3, 5.4) устройство фундаментов, монтаж металлического каркаса,  монтаж стеновых панелей, устройство кровли, устройство колодцев навозоудаления, устройство полов;

- прогон для скота №5 (номер на плане 5.5), забивка свай, устройство ростверков;

- навозоприемник № 1 (номер на плане 6.1) устройство основания, монолитной плиты, монолитный железобетонный резервуар, утепление стен, обратная засыпка, монтаж металлического каркаса,            устройство     стеновых сэндвич-панелей, кровли, заполнение дверных проемов, внутренние и наружные инженерные сети, монтаж оборудования;

- навозоприемник №2 (номер на плане 6.2) устройство основания, монолитной плиты, монолитный железобетонный резервуар, утепление стен, обратная засыпка, монтаж металлического      каркаса,            устройство     стеновых сэндвич - панелей, кровли, заполнение дверных проемов, внутренние и наружные инженерные сети;

- насосная станция 2-го подъема (номер на плане 7) устройство котлована, кладка наружных стен из блоков бетонных, гидроизоляция;

- резервуар для воды (номер на плане 8) устройство котлована, монолитной плиты, устройство ж/б конструкции резервуара, гидроизоляция;

- силосно-сенажные траншеи (номер на плане 11) устройство монолитных ж/б конструкций подпорных стен траншеи 5 штук, устройство бетонного пола;

- навозохранилище №1 (номер на плане 12.1) устройство основания, устройство геотекстиля, геомембраны;

- навозохранилище №2 (номер на плане 12.2) устройство основания, устройство геотекстиля, геомембраны;

- навозохранилище №3 (номер на плане 12.3,) устройство основания, устройство геотекстиля, геомембраны;

- блочно-модульная котельная (номер на плане 14) устройство основания, фундаментной плиты, сборка модуля;

- трансформаторная подстанция №1, №2 (номер на плане 15.1, 15.2)- устройство оснований, фундаментов, монтаж модульных сооружений на фундаменты;

 -            дизель-генераторная №1, № 2 (номер на плане 16.1, 16.2) - устройство основания, фундаментов;

- выполнены наружные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения выполнено до здания АБК и санпропусника.

На момент проведения проверки велись работы по устройству внутренних инженерных сетей вентиляции, системы АПС, электроснабжения, облицовочные и отделочные работы родильного отделения (номер на плане 2); устройству стен фасада здания АБК; армированию полов в доильно-молочном блоке (номер на плане 4.2); устройству стеновых панелей в прогоне для скота №2 (номер на плане 5.2); пусконаладочным работам в навозоприемнике № 1 (номер на плане 6.1); установке оборудования в навозоприемнике № 2 (номер на плане 6.2); армирование стены силосно - сенажной траншеи (номер на плане 11); монтаж оборудования, пусконаладочные работы по блочно -модульной котельной (номер на плане 14); устройство кровли, стеновых сэндвич панелей, армирование и бетонирование цокольных панелей, отсыпка основания в коровнике №1 (номер на плане 3.1); армирование цокольных стеновых панелей прогона для скота №5 (номер на плане 5.5), устройству гидроизоляции фундаментов под ДГУ, устройству наружных сетей электроснабжения.

На момент проведения проверки в строящихся зданиях: коровника №2 (номер на плане 3.2) находился крупно-рогатый скот (коровы); административно-бытового комплекса (поз. 4.1) расставлена мебель, компьютерная техника, на организованных рабочих местах работали сотрудники; силосно-сенажные траншеи (номер на плане 11) заполнены кормом для скота.

На момент проведения проверки на строительной площадке продолжается возведение объектов капитального строительства, не относящихся к строительству объекта капитального строительства: «Животноводческий комплекс молочного направления на 2400 (две тысячи четыреста) голов коров с доильным залом по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ "Чебулинское" (I-II этапы строительства)», а именно:

- возведение объекта капитального строительства, где выполнены работы по устройству фундаментов, монтажу металлического каркаса, монтажу стеновых панелей, устройству кровли, подшивного потолка, монтаж металлических ворот, устройству наружных и внутренних инженерных сетей, устройство полов, отделочных работ, со слов подрядчика объект капитального строительства относится к III этапу строительства, предположительно телятник №1;

- возведение объекта капитального строительства, где выполнены работы по устройству фундаментов, монтажу металлического каркаса, монтажу стеновых панелей, устройству кровли, подшивного потолка, монтаж металлических ворот, устройству наружных и внутренних инженерных сетей, устройство полов, отделочных работ, со слов подрядчика объект капитального строительства относится к III этапу строительства, предположительно телятник №2;

- возведение объекта капитального строительства, где выполнены работы по устройству фундаментов, монтажу металлического каркаса, устройству кровли, со слов подрядчика данный комплекс работ относится к III этапу строительства, предположительно телятник №3;

-           возведение объекта капитального строительства, где выполнены работы по устройству фундаментов, монтажу металлического каркаса, со слов Подрядчика данный комплекс работ не относится к I, II этапу строительства, предположительно навес для телят №1;

- забиты сваи к объектам капитального строительства, со слов подрядчика данные работы не относятся к I, II этапу строительства, предположительно навесы для телят №2, №3, №4;

 -            забиты сваи по объекту капитального строительства, со слов подрядчика данные работы не относятся к I, II этапу строительства, предположительно здание молодняка.

На момент проверки велись работы, не относящиеся к строительству объекта капитального строительства: «Животноводческий комплекс молочного направления на 2400  голов коров с доильным залом по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ "Чебулинское" (I-II этапы строительства)», а именно, устройство полов, стеновых сэндвич панелей в телятнике № 3, устройство работ по монтажу навеса для телят №1.

На момент проведения проверки в строящихся зданиях: телятника №1, №2 находился молодой крупно - рогатый скот (телята).

Отделом архитектуры и градостроительства Чебулинского муниципального округа в инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса предоставлено разрешение на строительство №42-515-08-23 от 25.12.2023,  внесены изменения   от 29.03.2024, а именно: исключено строительство II этапа, внесены корректировки по разбивке объектов капитального строительства I этапа, где в разделе 7 «проектные характеристики объекта капитального строительства» разрешения на строительство I этапа входят: проходная с санпропускником (номер на плане поз. 1), доильно-молочный блок с АБК (поз. 4.1), коровник №2 (поз. 3.2), прогон для скота №2 (поз. 5.2), прогон для скота № 3 (поз. 5.3), навозоприемник № 1 (поз 6.1), насосная станция 2-го подъема (поз. 7), резервуар для воды (поз. 8), дезбарьер № 1 с подогревом дезраствора (поз. 9.1), дезбарьер № 2 (поз. 9.2), дезбарьер № 3 (поз. 9.3), жижесборник №1 V=50 м? (поз.17.1), жижесборник №2 V=25 м?  (поз. 17.2), жижесборник №3 V=25 м? (поз. 17.3), блочно-модульная котельная (поз. 14) (приложение № 1- разрешение на строительство №42-515-08-23 от 25.12.2023 с внесенными изменениями от 29.03.2024).

Административным органом в ходе проверки  установлено, что  застройщиком АО «Вагоново» не исполнено предписание  №04-44-23-01  от 26.01.2024 об устранении  нарушений  при строительстве  от 14.02.2024, со сроком устранения  до 23.04.2023,  выданное  инспекцией  в  рамках проведения внеплановой проверки  в период с 08.02.2024 по 14.02.2024 на основании  решения  инспекции от 26.01.2024 №30/04-ОС.

В  соответствии с пунктом 1 предписания  АО «Ваганово»  необходимо было устранить нарушение  требований  пункта  13  решений о  проведении внеплановых проверок  инспекции от 26.01.2024 №30/04-ОС,   выразившееся в  представлении не в полном объеме исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования скрытых работ, общего и (или) специального журналов, документов, подтверждающих качество строительных материалов;  непредставлении  документов, подтверждающих оценку соответствия выполняемых работ в процессе строительства, результатов их выполнения и применяемых строительных материалов;

В  пункте 2 предписания зафиксировано  нарушение застройщиком АО «Ваганово» части 1 статьи 55, части 2 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), а именно: эксплуатация объекта капитального строительства: «Животноводческий комплекс молочного направления на 2400  голов коров с доильным залом по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ "Чебулинское" (I-II этапы строительства)», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх- Чебула (кадастровый номер земельного участка 42:16:0102001:336), без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в период проведения проверки в строящемся здании коровника №2 (номер на плане 3.2) и на выгуле в зоне строительной площадки находился крупно - рогатый скот (коровы и телята), силосно - сенажные траншеи (номер на плане 11) заполнены кормом для скота, предположительно сеном.             

В пункте 3 предписания зафиксировано нарушение застройщиком АО «Ваганово» части 2 статьи 51 ГрК РФ, а именно: строительство объектов капитального строительства III этапа, предположительно телятников №1, №2, № , расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх-Чебула (кадастровый номер земельного участка 42:16:0102001:336), в отсутствии разрешения на строительство, дата начала работ по разработке котлована телятника, III этапа строительства - 26.07.2023, что подтверждается записями общего журнала работ. Согласно пункту 13 части 1 ГрК РФ под строительством понимается создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). Выполненный котлован является основанием здания или сооружения, то есть массивом  грунта, воспринимающим нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта (пункт  13 статьи  2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ).

В пункте 4 предписания зафиксировано нарушение застройщиком АО «Ваганово» части 5 статьи 52 ГрК РФ, а именно: извещение о начале строительства объектов капитального строительства III этапа предположительно телятники №1, №2, №3, расположенные по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх- Чебула (кадастровый номер земельного участка 42:16:0102001:336) в Инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса не поступало. В соответствии с ч. 5 ст. 52 ГрК РФ, если при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик          заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещение о начале таких работ. Согласно записям журнала общих работ (разработка котлована телятника), дата начала работ - 26.07.2023.

Во исполнение пунктов 3, 4  предписания № 04-44-23-01 от 14.02.2024 застройщик АО «Ваганово» направил в адрес Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса разрешение на строительство №42-515-01-2024 от 17.05.2024, извещение о начале строительства (вх. № изв.177/24 от 22.05.2024) объектов капитального строительства III этапа, предположительно телятники №1, №2, №3, расположенные по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх-Чебула.

В предписанный срок (23.04.2024) застройщик АО «Ваганово» не направил необходимую документацию и не уведомил инспекцию  об исполнении пунктов 1, 2 предписания.

По факту неисполнения АО «Ваганово»  пунктов 1,2  предписания  от  14.02.2024,   главным консультантом главным государственным инспектором отдела строительного надзора №4 инспекции государственного строительного надзора Кузбасса  составлен протокол от  23.05.2024 №04-44-23-10 об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

На основании статьи 23.1 КоАП РФ и статьи 203 АПК РФ инспекция обратилась  в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении общества к административной ответственности.

В соответствии с частью 6 статьи  205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Процессуальных нарушений при   составлении  протокола  об административном  правонарушении не допущено.

В  соответствии с  пунктом 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ  поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются  непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Протокол составлен в пределах компетенции  административного  органа и  должностного лица. 

О времени и месте составления  протокола  общество было извещено по электронной почте уведомлением от 23.01.2024.  Адрес  электронной  почты размещен на официальном сайте   АО «Ваганово»,  а также    совпадает с адресом, указанным в  письменном  отзыве,  представленном в  арбитражный суд.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные доказательства и фактические обстоятельства дела,  заслушав  пояснения представителя заявителя, суд считает заявленное требование  обоснованным и  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.          

Частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность  за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Факт невыполнения АО «Ваганово» предписания  №04-44-23-01 от 14.02.2024 в установленный административным органом срок подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами,  и обществом  в судебном заседании документально не опровергнут. 

С учётом требований, изложенных в предписании №04-44-23-01, период времени с 14.02.2024  вплоть до проверки исполнения  предписания, проводимой в  период с  24.04.2024 по 02.05.2024, являлся  разумным и достаточным для его исполнения.

Доводы общества об утрате  силы  предписания №01-44-23-01 от 14.02.2024, в  связи с    выдачей по результатам проверки его  исполнения  нового предписания №04-44-23-03 от 06.05.2024,  срок действия которого продлен, судом  отклонены. 

Выдача нового предписания   №04-44-23-03 от 06.05.2024 и установление в нем сроков исполнения, а также  продление сроков   его исполнения решением №343/04-ОС об отсрочке исполнения решения (предписания), в т.ч. относительно части спорного пункта 1 предписания, не  влечет утраты силы  ранее выданного  предписания, и не является основанием  для освобождения  лица от ответственности за неисполнение его  в установленные сроки.

 Поскольку предписание в установленном законом порядке в установленный срок в полном объеме не  выполнено, суд приходит к выводу  о наличии в  действиях АО «Ваганово» события вменяемого правонарушения и привлечении его к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина общества в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, установлена, так как у него имелась возможность для выполнения предписания инспекции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по своевременному выполнению указанного предписания.

Суд приходит к выводу о доказанности состава административного  правонарушения, ответственность за которое установлена частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Основания для  признания  совершенного  правонарушения малозначительным   и применения положений статьи 2.9 КоАП РФ  отсутствуют.  

В соответствии с п.п. 18, 18.1  постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится исходя из оценки конкретных обстоятельств его совершения при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Оценив характер правонарушения с учетом объекта его посягательства, степени вины правонарушителя и общественной опасности, суд не усматривает оснований для признания  правонарушения  малозначительным и  освобождения   общества от административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ.  

Доказательства наличия  исключительных обстоятельств,  при которых возможно освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, в  деле отсутствуют.

Частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено административное наказание на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

В силу ч. 2 ст. 4.1.1 настоящего Кодекса административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного  статьей  19.5 КоАП РФ.

АО «Ваганово» не относится к числу субъектов,  административное наказание  для которых   назначается по правилам статьи 4.1.2 КоАП РФ.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие  административную  ответственность,   в протоколе об административном   правонарушении не указаны и судом не установлены. 

Оценив в совокупности все обстоятельства дела, суд считает необходимым применить к АО «Ваганово»   административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией статьи -  50000 руб. 

Избранная мера наказания в виде административного штрафа в указанном размере принята, исходя из характера совершенного правонарушения и обстоятельств дела,  а также принципа соразмерности наказания вменяемому правонарушению.

Руководствуясь статьями 137, 167-170, 176, 180, 181, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

заявленные требования удовлетворить.

Привлечь  акционерное общество "Ваганово" (ОГРН  

<

***>, дата присвоения ОГРН - 03.09.2002, ИНН 

<

***>, адрес: 652395, Кемеровская область - Кузбасс, 

<

...>) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

Доказательства уплаты штрафа в пятидневный срок представить административному органу и арбитражному суду.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Реквизиты для перечисления штрафа:

«Номер казначейского счета: 03100643000000013900;

Единый казначейский счет: 40102810745370000032;

Получатель: УФК по Кемеровской области – Кузбассу (Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>)

ИНН получателя:  4200000206 

КПП получателя:  420501001

Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово

БИК 013207212 

ОКТМО 32701000

КБК 498 1 16 01191 01 0005 140

УИН 49842052404250000197».

 

        Судья                                                                                              Ю.Ю. Кормилина