АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул Дело № А03-4247/2024  

Резолютивная часть решения объявлена 2 октября 2024 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 3 октября 2024 года.  

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., при ведении  протокола секретарем Гулькиной Е.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая  компания Алтайкрайэнерго», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 33 082 руб. 83 коп. неустойки за  нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении  технологического присоединения № 2128/21-02 от 11.10.2021,  

при участии: 

от истца - ФИО2, представитель по доверенности № 5 от 01.02.2024,  диплом АлтГУ № 267 от 31.05.2005;  

от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности от 10.06.2024,  диплом АлтГУ № 076 от 30.04.2015 (в режиме веб-конференции);  

У С Т А Н О В И Л 

Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее – сетевая  компания) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к  индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее –  предприниматель) о взыскании 33 082 руб. 83 коп. неустойки за нарушение сроков  выполнения мероприятий по договору № 2128/21-02 об осуществлении технологического  присоединения от 11.10.2021.  

Исковые требования обоснованы ссылкой на статьи 309, 310, 329, 330  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы  нарушением ответчиком сроков выполнения мероприятий по технологическому  присоединению, что явилось основанием для начисления ему неустойки.  

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что несвоевременное исполнение  обязательства связано с невыполнением сетевой компанией мероприятий по  технологическому присоединению, так как согласно пункту 2.1 договора об  осуществлении технологического присоединения № 2128/21-02 от 11.10.2021, сетевая  организация обязалась, помимо прочего, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий, но  

не ранее выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому  присоединению до границ участка заявителя, осуществить проверку выполнения  технических условий заявителем, провести с заявителем осмотр (обследование)  присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.  

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, проанализировав  обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд  установил следующее.  

Между сетевой компанией и предпринимателем (заказчик) заключен договор №  2128/21-02 об осуществлении технологического присоединения от 11.10.2021 (далее –  договор).  

В соответствии с пунктом 1.5 договора, срок выполнения мероприятий по  технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.  

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с  решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и  тарифов № 505 от 18.12.2020 и составляет 51 894 руб. 64 коп., в том числе НДС 20% в  сумме 8 649 руб.11 коп. (пункт 3.1 договора).  

В соответствии с пунктом 2.3 договора предприниматель обязался надлежащим  образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных  на него мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических  условиях, а также по направлению в адрес сетевой компании уведомления о выполнении  технических условий, со своей стороны.  

Мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой компании  выполнены в полном объеме, что подтверждается актом о выполнении технических  условий от 07.03.2023 № 2128/21-02 и актом об осуществлении технологического  присоединения от 07.03.2023 № 2128/21-02.  

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек  08.06.2022.  

Уведомление о выполнении ответчиком технических условий и готовности его  электроустановок к технологическому присоединению поступило в адрес сетевой  компании 20.02.2023, что подтверждается штампом входящей корреспонденции.  

Учитывая, что мероприятия по технологическому присоединению, а также  уведомление сетевой компании о выполнении технических условий выполнены  ответчиком с нарушением срока, установленного договором, истец начислил ему  неустойку в размере 33 082 руб. 83 коп., с учетом периода уточнения, с 10.06.2022 по  20.02.2023.  

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об  электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение  энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических  лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством  Российской Федерации, и носит однократный характер. Указанный порядок  регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные  условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для  присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют  право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств  

(энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической  возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.  

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств  юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических  установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее -  Правила № 861).  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об  осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства,  заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Данный договор  является публичным.  

По условиям указанного договора сетевая организация обязана реализовать  мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения, а  заявитель обязан выполнить свою часть мероприятий по технологическому  присоединению и внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1,  пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта  16, пункты 16(2) 16(4), 17, 18 Правил № 861).  

Факт технологического присоединения подтверждается материалами дела и не  оспаривается ответчиком.  

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях  применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые  уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного  самоуправления.  

Как предусмотрено абзацем восьмым части 4 статьи 23.1 Закона об  электроэнергетике плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки,  определяющие ее величину, подлежат государственному регулированию.  

По положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

Согласно пункту 5.5 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с абзацем 3 подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 сторона  договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренного договором, обязана уплатить другой стороне  неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое  присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупность размера такой  неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому  присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в  предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.  

В связи с нарушением предпринимателем принятых на себя обязательств по  договору, сетевая компания начислила ему неустойку за период с 10.06.2022 по 20.02.2023  в размере 33 082 руб. 83 коп. (51 894 руб. 64 коп. *255 дней*0,25)/100).  

Расчет неустойки судом проверен, признан верным. 

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на иск, подлежат отклонению в силу  того, что из условий договора не следует, что выполнением мероприятий по  технологическому присоединению со стороны ответчика поставлено в зависимость от  выполнения мероприятий сетевой компанией.  

Особенностью договора технологического присоединения является его  взаимообязывающий для характер, когда каждая из сторон выполняет свою часть  обязательства независимо от другой стороны и вправе требовать от последней  соответствующего исполнения, итогом которого является общий для всех результат -  присоединение энергопринимающих устройств объекта к электрическим сетям.  

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в полном  объеме.  

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом  соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается  рассмотрение дела по существу (часть 1 статья 112 АПК РФ).  

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в  размере 2 000 руб., в связи с чем она подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в  возмещение его расходов.  

Руководствуясь статьями 27, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в  пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 33 082 руб. 83 коп.  неустойки и 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.В. Хворов