ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-45157/2021

город Ростов-на-Дону

16 сентября 2022 года

15АП-14180/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 сентября 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ереминой О.А.

судей Сороки Я.Л., Шапкина П.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 17.11.2021;

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 02.10.2019;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобуООО «Астарта» на решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.06.2022 по делу № А53-45157/2021

по иску ООО «Астарта»

к ответчику - АО «Почта России»

о взыскании задолженности, процентов 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Астарта» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к акционерному обществу «Почта России» о взыскании задолженности в размере 578314 руб. 02 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.01.2019 по 29.11.2021 в размере 152658 руб. 88 коп. (с учетом увеличения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – т. 1 л.д. 9).

Решением от 28.06.2022 в удовлетворении иска отказано.

Решение мотивировано тем, что между сторонами заключены договорына изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиляФГУП «Почта России» от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170, от 21.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/179, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/177, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/178, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/176, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/180, от 16.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/198, от 18.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/189, от 18.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/185. Во исполнение условий договоров, ООО «Астарта» предоставило заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств в общей сумме 578314 руб. 02 коп. Подрядчиком исполнены работы по договорам от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170, 21.12.2017№ 1.5.6.8.5.1.2-07/179. Приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 16.11.2020 по делу № 1-87/2020, вступившим в законную силу, установлено, что по договору от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170 результат работ не передавался, элементы фирменного стиля, подлежавшие изготовлению и доставке в указанное отделение почтовой связи, не обнаружены, при этом по указанному договору АО «Почта России» причинен ущерб в размере 1563714 руб. 76 коп. По договору от 21.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/179 работы выполнены с нарушением установленного срока выполнения работ. Доказательств исполнения обязательств по иным договорам ООО «Астарта» в материалы дела не представлено, в связи с чем заказчиком начислены штрафные санкции. Договоры расторгнуты АО «Почта России» в одностороннем порядке, денежные средства удержаны с ООО «Астарта» на основании пункта 9.4 договоров. В суде первой инстанции АО «Почта России» заявлено о зачете обеспечительных платежей по всем спорным договорам в счет штрафных санкций. Поскольку ООО «Астарта» в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о выполнении принятых на себя обязательств по договорам в полном объеме и в предусмотренные сроки, зачет обеспечительных платежей в счет штрафных санкций по договорам принят судом первой инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил его отменить, применить срок исковой давности к заявлению ответчика о зачете обеспечительных платежей, взыскать задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что в пункте 8.7 спорных договоров предусмотрены основания для освобождения от уплаты неустойки. При этом договорами не предусмотрено произвольное и бесспорное взыскание неустойки. Ответчик не направлял истцу требования об уплате неустойки по спорным договорам. Претензия от 06.08.2018 направлена истцу с требованием об уплате неустойки по иным договорам, которые являлись спорными по делу№ А53-27983/2018. Неправомерно отказано в применении срока исковой давности к заявлению о зачете АО «Почта России». Ответчик не вправе в одностороннем порядке удерживать обеспечительные платежи, ответчик лишен возможности взыскать зачтенную неустойку вследствие пропуска срока исковой давности. В направленных ответчиком соглашениях о расторжении договоров, претензии отсутствовали, требования о взыскании неустойки не заявлялись. Акты приемки выполненных работ по договору от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170 содержат указание на отсутствие у заказчика претензий.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ООО «Астарта» доводы жалобы поддержал, дал пояснения по существу спора.

Представитель АО «Почта России» в судебном заседании отклонил доводы жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 14.12.2017 между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/170 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России» (т. 1 л.д. 98-108), по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 346789 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 437679 руб. 33 коп., является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 346789, Ростовская область, г. Азов, ул. Димитрова, 34. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 43767 руб. 93 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 14.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/165 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 347931 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 442885 руб. 32 коп., является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 347931, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 44288 руб. 53 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 21.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/179 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 346631 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 384000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 346631, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 51517 руб. 99 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 15.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/179 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 344113 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 600000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 344113, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 65542 руб. 97 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 15.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/178 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 346480 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 739000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 346480, Ростовская область, пгт. Каменоломни, ул. Калинина, 10. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 90285 руб. 84 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 15.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/176 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 347932 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 565000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. им. С.И. Шило, 167/3. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 64361 руб. 09 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 15.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/180 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 344003 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 596000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 344003, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 61370 руб. 09 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 16.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/198 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 344038 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 396748 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 344038, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 74414 руб. 57 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 18.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/189 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 344065 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 575000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 3440658, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 69898 руб. 61 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Между АО «Почта России» (заказчик, ранее – ФГУП «Почта России») и ООО «Астарта» (подрядчик) 18.12.2017 заключен договор № 1.5.6.8.5.1.2-07/185 на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России», по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению элементов фирменного стиля с логотипом ФГУП «Почта России» для ОПС № 344101 в рамках проекта «ОПС Будущего» и сдать их результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 1.1 договора).

Конкретный перечень выполняемых работ и их объем, сроки, результат работ, а также требования к их выполнению устанавливаются техническим заданием (приложения № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора (пункт 1.2 договора).

Срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания).

Цена договора составляет 510000 рублей, является твердой и изменению не подлежит (пункты 3.1, 3.2 договора).

Стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе, включая расходы по доставке результатов работ в адрес заказчика (пункт 3.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик передает результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выполнения работ по адресу: 344101, 

<

...>. Стоимость доставки результата работ по указанному адресу включена в цену, установленную разделом 3 договора.

Заказчик осуществляет оплату в течение 10 дней с момента предоставления счета, выставленного подрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к договору), акта отчуждения исключительных прав (приложение № 4 к договору) и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (пункт 3.4 договора).

В пункте 5.3 договора указано, что заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, акта отчуждения исключительных прав и товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или отказаться от приемки результата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. Подрядчик перечисляет денежные средства в размере, установленном пунктом 9.2 договора, на счет заказчика, указанный в разделе 17 договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на указанный счет. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

По условиям пункта 9.2 договора, подрядчик предоставляет заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору в размере 57154 руб. 93 коп., НДС не облагается, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора.

За нарушение сроков выполнения обязательств (включая, но не ограничиваясь: нарушение сроков выполнения работ, сроков гарантийных обязательств) подрядчик уплачивает заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока выполнения подрядчиком обязательств. Неустойка составляет 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки (пункт 8.2 договора).

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договора).

Во исполнение условий договоров, ООО «Астарта» предоставило заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств в общей сумме578314 руб. 02 коп.

ООО «Астарта» в адрес заказчика 29.11.2021, 26.12.2021 направлены претензии с требованиями о возврате обеспечительных платежей.

Ссылаясь на то, что работы по договорам выполнены в полном объеме, обеспечительный платеж заказчиком не возвращен, ООО «Астарта» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как указано ранее, между сторонами заключены договоры на изготовление продукции, содержащей элементы корпоративного стиля ФГУП «Почта России» от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170, от 21.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/179, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/177, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/178, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/176, от 15.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/180, от 16.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/198, от 18.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/189, от 18.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/185.

Согласно пункту 9.4 договоров способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик возвращает денежные средства подрядчику по истечении срока, установленного пунктом 9.3 указанного раздела договора и предъявления письменного требования подрядчика о возврате денежных средств.

Во исполнение условий договоров, ООО «Астарта» предоставило заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств в общей сумме578314 руб. 02 коп.

В обоснование своих требований ООО «Астарта» ссылается на то, что подрядчиком работы по договорам выполнены в полном объеме, заказчик обязан возвратить денежные средства, перечисленные в счет исполнения обязательств.

Судом первой инстанции установлено, что по договору от 14.12.2017№ 1.5.6.8.5.1.2-07/170 подрядчиком работы выполнены, что подтверждается представленным актом сдачи-приемки выполненных работ от 01.03.2018, товарной накладной от 01.03.2018 № 11 (т. 1 л.д. 60-65). Размер обеспечения исполнения подрядчиком обязательств составил 43767 руб. 93 коп.

Согласно пункту 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 16.11.2020по делу № 1-87/2020 установлено, что по договору от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170 результат работ не передавался, элементы фирменного стиля, подлежавшие изготовлению и доставке в указанное отделение почтовой связи, не обнаружены, при этом по указанному договору АО «Почта России» причинен ущерб в размере 1563714 руб. 76 коп. Указанный приговор вступил в законную силу.

На основании претензии от 06.08.2018 № 9.1.15.1-08/711 (т. 1 л.д. 36-39)о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств АО «Почта России» произведен зачет обеспечения в счет штрафных санкций по договору от 14.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/170 в порядке пункта 9.4 договора.

По договору от 21.12.2017 № 1.5.6.8.5.1.2-07/179 работы ООО «Астарта» выполнены в полном объеме, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 08.06.2018 № 39, товарной накладной от 08.06.2018 № 38(т. 1 л.д. 44-45). Размер обеспечения исполнения подрядчиком обязательств составил 51517 руб. 99 коп.

АО «Почта России» произведена оплата выполненных работ в размере 384000 рублей (платежное поручение от 26.06.2018 № 36333 – т. 1 л.д. 141).

Согласно пункту 1 раздела «Дополнительные требования» технического задания к указанному договору срок выполнения работ (с учетом доставки и монтажа) – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, заказчиком в порядке пункта 8.2 договора начислена неустойка в размере 56832 рублей, которая зачтена в порядке пункта 9.4 договора.

Доказательств исполнения обязательств по иным договорам ООО «Астарта» в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 13.2 договоров заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или договором, а также в случае существенного нарушения подрядчиком настоящего договора, которое влечет для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на то вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора.

Договоры расторгнуты АО «Почта России» в одностороннем порядке в связи с нарушением подрядчиком принятых на себя обязательств (уведомленияот 08.04.2019 № 9.1.13.1-09/1723, № 9.1.13.1-09/1722, № 9.1.13.1-09/1727,№ 9.1.13.1-09/1728, № 9.1.13.1-09/1726, № 9.1.13.1-09/1729, № 9.1.13.1-09/1730 –т. 1 л.д. 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97), денежные средства удержаны с ООО «Астарта» на основании пункта 9.4 договоров.

В апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что в пункте 8.7 спорных договоров предусмотрены основания для освобождения от уплаты неустойки. При этом договорами не предусмотрено произвольное и бесспорное взыскание неустойки, требования об уплате неустойки по спорным договорам в адрес ответчика не поступало.

В пункте 8.7 договоров указано, что в случае если одна из сторон докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине противоположной стороны, то указанная сторона освобождается от уплаты неустойки.

В данном случае ООО «Астарта» такие обстоятельства не приведены. 

Судом первой инстанции установлено, что подрядчик самостоятельно передал первичную документацию, был осведомлен о нарушении спорных договоров. При этом в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о выполнении подрядчиком взятых на себя обязательств по иным договорам в полном объеме и в предусмотренные сроки.

Руководствуясь вышеизложенным, ссылка заявителя жалобы на то, что в направленных ответчиком соглашениях о расторжении договоров, претензии отсутствовали, требования о взыскании неустойки не заявлялись, признается несостоятельной судом апелляционной инстанции.

АО «Почта России» 08.04.2019 уведомило ООО «Астарта» о расторжении договоров в одностороннем порядке в связи с нарушением подрядчиком принятых на себя обязательств (уведомления от 08.04.2019 № 9.1.13.1-09/1723, № 9.1.13.1-09/1722, № 9.1.13.1-09/1727, № 9.1.13.1-09/1728, № 9.1.13.1-09/1726, № 9.1.13.1-09/1729, № 9.1.13.1-09/1730 – т. 1 л.д. 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97).

Как отмечено судом первой инстанции, направленные заказчиком проектыо расторжении спорных договоров (т. 1 л.д. 142-159) не были подписаны подрядчиком надлежащим образом, заказчику не возвращены.

Довод заявителя жалобы о том, что неправомерно отказано в применении срока исковой давности к заявлению о зачете АО «Почта России», ответчик не вправе в одностороннем порядке удерживать обеспечительные платежи, отклоняется судом апелляционной инстанции.

АО «Почта России» в судебном заседании первой инстанции 28.04.2022 заявлено о зачете обеспечительных платежей по всем спорным договорам в счет штрафных санкций (протокол – т. 1 л.д. 46).

В суде первой инстанции ООО «Астарта» заявлено о применении срока исковой давности (возражения на отзыв – т. 1 л.д. 130-132).

Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с пунктом 9.4 договора способом обеспечения обязательств подрядчика является внесение денежных средств на счет заказчика. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки и иные платежи, подлежащие уплате заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору.

В случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, а также в случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств заказчиком), заказчиком взыскивается неустойка в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора (пункт 8.5 договоров).

Уведомления о расторжении договоров направлены АО «Почта России» 08.04.2019 (уведомления от 08.04.2019 № 9.1.13.1-09/1723, № 9.1.13.1-09/1722,№ 9.1.13.1-09/1727, № 9.1.13.1-09/1728, № 9.1.13.1-09/1726, № 9.1.13.1-09/1729,№ 9.1.13.1-09/1730 – т. 1 л.д. 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97).

Отзыв на иск АО «Почта России» (т. 1 л.д. 78-79), с соответствующей позицией о зачете обеспечительных платежей, представлен в суд первой инстанции 29.03.2022, следовательно, срок исковой давности для заявления о зачете встречных однородных требований не пропущен.

Таким образом, поскольку ООО «Астарта» не представлены доказательства, свидетельствующие о выполнении обязательств по договорам в полном объеме и в предусмотренные сроки, зачет обеспечительных платежей в счет штрафных санкций по договорам правомерно принят судом первой инстанции.

Судом первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано обоснованно, оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.06.2022 по делу№ А53-45157/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий                                                                              Еремина О.А.

 

Судьи                                                                                                               Сорока Я.Л.

 

                                                                                                                           Шапкин П.В.