АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-31024/2020

19 июля 2022 года

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального казенного  учреждения «Управления Федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального  дорожного агентства (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью научно-производственное предприятие «Энерготехсервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о понуждении устранить недостатки,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, акционерного общества «Уралавтодор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью  «Техконсалтингвтк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью научно-производственное  предприятие «Энерготехсервис» (ИНН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня  вступления решения суда в законную силу устранить дефекты, которые зафиксированы в  актах освидетельствования выполненных работ и выявленных дефектов от 29.04.2019 и от  18.07.2019, путем выполнения следующих работ:  

 № 

п/п  

Наименование работ 

Ед.  изм.  

Количество  

1. Подготовительные работы 

 

1 

Демонтаж существующего барьерного ограждения  

м 

263 

2 

Демонтаж существующих портальных стенок и откосных  крыльев, демонтаж существующих звеньев трубы, демонтаж  

существующего сборного железобетонного фундамента, разборка  существующего асфальтобетонного покрытия, разборка  

основания и земполотна, с погрузкой и транспортировкой  

м3  

199,95  

3 

Снятие растительного слоя бульдозером с перемещением, в  полосу отвода (для укрепительных работ)  

м3  

126 

4 

Организация движения на период выполнения работ 

п.м.  

100,8  

5 

Устройство временной дорожной одежды на обочине на период ремонта с последующим демонтажем 

м2  

200 

2. Земляные работы 

 

6 

Разработка выемки, экскаватором с последующим  разравниванием в полосе отвода бульдозером  

м3  

1316  

7 

Разработка выемки, экскаватором с погрузкой в автосамосвалы с  транспортировкой на склад временного хранения  

м3  

3231  

8 

Устройство насыпи, погрузка и транспортировка грунта со склада  временного хранения автосамосвалами с разгрузкой  

м3  

3231  

 

Сопутствующие работы 

 

9 

Разравнивание насыпи бульдозером, уплотнение грунта насыпи  катками  

м3 

3231 

10  

Планировка откосов насыпи и верха земляного полотна  

м2 

1428 

3. Укрепительные работы 

 

11  

Укрепление откосов насыпи засевом трав по слою растительного  грунта толщиной 0,15м  

м2 

840 

12  

Очистка существующего лотка дна трубы от ила, грязи вручную  

м3 

6 

13  

Выравнивание поверхностей лотков раствором на основе  безусадочной быстротвердеющей сухой смеси тиксотропного  

типа, содержащую полимерную фибру 

м2 

15,12 

4. Дорожная одежда 

 

Устройство дорожной одежды по типу 1-68  

 

14  

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,26 м  

м3 

173 

15  

Устройство основания из фракционированного щебня фр.40-70мм 

с заклинкой толщиной 0,20м с розливом битума БНД 90/130 по  щебеночному основанию из расчета 0,7 л/м2  

м2 

352 

16  

Устройство основания из горячего черного щебня фр. 20-40 мм с  заклинкой м, толщиной- 0,1 м с розливом битума БНД 90/130 по  слою черного щебня из расчета 0,3 л/м2  

м2 

320 

17  

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой  

крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки, толщиной  

0,07 м с розливом битума по покрытию из расчета 0,3л/м2,  устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной  

мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип А, II марки ,  толщиной 0,05 м  

м2 

320 

18  

Устройство присыпной обочины из щебеночно-песчаной смеси ,  толщиной 0,2 м -41м3, укрепление обочин фракционированным  щебнем фр.40-70мм с заклинкой толщиной 0,22м  

м3 

173 

5. Искусственные сооружения  

 

Устройство тела трубы 

 

19  

Погружение шпунта в грунт с последующим демонтажом  

т 

4,6 

20  

Разработка котлована экскаватором с последующим  разравниванием в полосе отвода бульдозером  

м3 

117,5 

21  

Устройство цементно-грунтового экрана 

м3 

60,4 

22  

Устройство подушки из щебеночно-песчаной смеси  

м3 

178,6 

23  

Засыпка тела трубы щебеночно-песчаной смесью  

м3 

402,9 

24  

Устройство горизонтальных цементогрунтовых упоров  

м3 

186,1 

25  

Устройство трубы стеклопластиковой d=1,4 м  

м 

108 

Укрепительные работы 

 

26  

Укрепление откосов насыпи у входного и выходного оголовка  матрасами рено с заполнением каменной наброской  

м2 

144 

27  

Устройство монолитного упора укрепления из бетона В20, F300  

м3 

2,6 

6. Дорожные устройства и обстановка дороги  

 

28  

Установка ранее демонтированного барьерного ограждения  

м 

263 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья К.В. Михайлов