850/2023-274689(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   № 09АП-61524/2023

Дело № А40-95353/23

г. Москва

03 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 03 октября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи П.А. Порывкина, судей: Новиковой Е.М., Фриева А.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ФГУП "РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2023 по делу № А40-95353/23 

по исковому заявлению ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (109012, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  15.10.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (105064, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  19.12.2002, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 19 955 378,97 руб. 

При участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 30.09.2021, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 17.07.2023. 

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с иском к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ  ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - ответчик) о  взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ неустойки по  договорам от № 04/12/20 от 04.12.2020, № 35-06-20ЕП от 04.06.2020, № 36-06- 20ЕП от  04.06.2020, № 40-6-20ЕП от 04.06.2020, № 41-06-20ЕП от 04.06.2020, № 42-06-20ЕП от  

04.06.2020, № 43-6-20ЕП от 04.06.2020, № 138-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 139-12-20 ЕП  от 22.12.2020, № 140-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 141- 12-20 ЕП от 22.12.2020, № 142- 1220 ЕП от 24.12.2020, № 143-12-20 ЕП от 24.12.2020 в размере 19 955 378 руб. 97 коп.  

 Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2023 исковые  требования удовлетворены частично.  

 Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 19.07.2023,  ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по  делу новый судебный акт.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив  законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы  дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной  жалобы и возражений на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от  19.07.2023 не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (далее - Заказчик, Истец) и ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"  УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее -  Проектировщик, Ответчик) заключены Договоры от № 04/12/20 от 04.12.2020, № 35-0620ЕП от 04.06.2020, № 36-06- 20ЕП от 04.06.2020, № 40-6-20ЕП от 04.06.2020, № 41-0620ЕП от 04.06.2020, № 42-06-20ЕП от 04.06.2020, № 43-6-20ЕП от 04.06.2020, № 13812¬20 ЕП от 22.12.2020, № 139-12-20 ЕП от 22.12.2020, № 140-12-20 ЕП от 22.12.2020,   № 141- 12-20 ЕП от 22.12.2020, № 142- 12-20 ЕП от 24.12.2020, № 143-12-20 ЕП от  24.12.2020.  

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами  строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

По первому контракту: в соответствии с условиями контракта № 04/12/20 от  04.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 31.12.2020г.  

Цена контракта составляет 464 075,58руб. (дополнительное соглашение № 1 от  29.09.2022г.). Работы приняты по Актам от 26.12.2020г. №№ 1,2, от 05.10.2022г.   №№ 3,4,5.  

Оплата произведена п/п 856913 от 30.12.2020 в сумме 225 812,55 руб., п/п  164594 от 17.10.2022 в сумме 238 263,03 руб.  

С 01.01.2021г. по 05.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Претензия истца от 02.03.2022г. № 37-01-11/478 оставлена ответчиком без  удовлетворения.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 27 102,42руб. 

По второму контракту: в соответствии с условиями контракта № 35-06-20ЕП от  04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  

Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта  составляет 6 742 486,73руб (соглашение от 17.10.2022г). Работы приняты по Актам от  05.10.2022г. №№ 1,2,3.  

Оплата произведена п/п 255869 от 07.07.2020 в сумме 2 527 966,07руб. (аванс  30%), п/п 173319 от 24.12.2020 в сумме 2 084 672,76руб. (аванс 20%), п/п 481161 от  11.10.2022 в сумме 2 129 847,9 руб.  

С 22.12.2020г. по 05.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 784 026,3 руб.  

По третьему контракту: в соответствии с условиями контракта № 36-06-20ЕП от  04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта  составляет 6 559 32,13руб. Работы приняты по Актам от 03.10.2022г. №№ 1,2.  

С 22.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 855 370,03руб.  

По четвертому контракту: в соответствии с условиями контракта № 40-06-20ЕП  от 04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта  составляет 50 367 688,34 руб. (дополнительное соглашение от 30.09.2022 № 8).  

Работы приняты по Актам от 01.09.2021г. № 1, от 07.10.2022 №№ 2,3. 

С 22.12.2020 по 07.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 3 735 148,85руб.  

По пятому контракту: в соответствии с условиями контракта № 41-06-20ЕП от  04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта  составляет 10 776 616,63 руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 6).  

Работы приняты по Актам от 24.12.2020 №№ 1,2,3, от 27.12.2020 №№ 4,5, от  01.09.2021 № 6, от 13.10.2022 №№ 7,8,9,10,11.  

С 22.12.2020 по 31.03.2022г. (в период с 01.04.2022г. по 01.10.2022г. пени не  начислялись).  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 1 074 445,21руб.  

По шестому контракту: в соответствии с условиями контракта № 42-06-20ЕП от  04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта  составляет 10 988 949,24 руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 6). Работы  приняты по Актам от 01.09.2021 № 1, от 13.10.2022 №№ 2,3.  

С 22.12.2020 по 13.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 950 828,15руб.  

По седьмому контракту: в соответствии с условиями контракта № 43-06-20ЕП от  04.06.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 20.12.2020г. Цена контракта  составляет 10 987 874,95 руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 6). Работы  приняты по Акту от 13.10.2022 № 1.  

С 22.12.2020 по 13.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 1 304 060,97руб. (расчет  прилагается).  

По восьмому контракту: в соответствии с условиями контракта № 138-12-20 ЕП  от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта  составляет 1 613 202,53руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 1). Работы  приняты по Актам от 26.12.2020 № 1, от 13.10.2022 №№ 2,3,4,5.  

С 30.12.2020 по 13.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 175 950,58руб.  

По девятому контракту: в соответствии с условиями контракта № 139-12-20 ЕП  от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта  составляет 34 151 270,81руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 1). Работы  приняты по Актам от 05.10.2022 №№ 1,2.  

С 30.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 3 877 721,69 руб. (расчет  прилагается).  

По десятому контракту: в соответствии с условиями контракта № 140-12-20 ЕП  от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта  составляет 1 327 171,34руб. (дополнительное соглашение от 21.10.2022). Работы  приняты по Акту от 05.10.2022 № 1.  

С 30.12.2020 по 05.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 150 855,76 руб.  

По одиннадцатому контракту: в соответствии с условиями контракта № 14112¬20 ЕП от 22.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта  565 728,58 руб. (соглашение от 21.10.2022г.). Работы приняты по Акту от 06.10.2022   № 1.  

С 30.12.2020 по 06.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 60 560,42 руб.  

По двенадцатому контракту: в соответствии с условиями контракта № 142-12-20  ЕП от 24.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта  составляет 45 224 715,47руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 1).  

Работы приняты по Актам от 03.10.2022 №№ 1,2,3. 

С 30.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 5 148 423,38 руб.  

По тринадцатому контракту: в соответствии с условиями контракта № 143-12-20  ЕП от 24.12.2020г. ФГУП «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя  

обязательства по проведению работ по комплексному капитальному ремонту объектов  Санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 29.12.2020г. Цена контракта  составляет 23 024 484,61руб. (дополнительное соглашение от 29.09.2022 № 2).  

Работы приняты по Актам от 01.09.2021 № 1, от 03.10.2022 №№ 1,2.  

С 30.12.2020 по 03.10.2022г. учреждением начислены пени, за исключением  периода с 01.04.2022г. по 01.10.2022г., в этот период пени не начислялись.  

Размер пени Генерального подрядчика составляет 1 810 885,21 руб.  

На основании п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться  неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской  гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав, прямо  предусмотренный ст. 12 ГК РФ, по своей сути является реализацией одной из мер  ответственности за нарушение обязательства.  

В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения.  

Согласно ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее-Закон № 44-ФЗ) в случае просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения  или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику  (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

В силу ч.7 ст.34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,  исполнителем).  

Согласно подпунктам «а», «б» пункта 3 Правил списания сумм неустоек  (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не  списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов,  пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом» списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней), утвержденных осуществляется заказчиком в следующих случае и  порядке:  

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не  превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных  и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев,  предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта.  

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)  превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены  контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных  

сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев,  предусмотренных «в» - «д» настоящего пункта.  

В соответствии с п. 4 Правил списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика,  имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам  неустоек (штрафов, пеней).  

В соответствии с п. 7 Правил, в случае если поставщик (подрядчик,  исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек  (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.  

В претензии от 02.03.2023г. № 37-01-11/478 истец просил ответчика подтвердить  размер пени по указанным контрактам, направив акты сверки расчетов. Ответчик акты  сверки не подписал, 50% суммы пени не оплатил.  

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что нарушение сроков завершения  работ по контрактам произошло ввиду ненадлежащего исполнения истцом встречных  обязательств по контракту № 143-12ЕП от 19.12.2018г по согласованию, утверждению и  передаче проектно-сметной документации, необходимой для выполнения работ, и  ссылается на ст. ст. 328 и 719 ГК РФ.  

С данным утверждением истец не согласен. 

В соответствии с условиями контракта № 143-12ЕП от 19.12.2018г. ФГУП  «Ремонтно-строительное управление» приняло на себя обязательства по разработке  проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта объектов  санатория «Янтарный берег» со сроком окончания работ 31.12.2019г. Цена контракта  составляет 79 00 000руб. Работы приняты по Актам от 03.04.2020 № 1, 31.07.2020 № 2,  25.12.2020 № 3, 07.02,2020 № 4, 22.08.2022 № 5. Отдельные разделы проектной  документации принимались поэтапно, фактически по ним производство работ  осуществлялось Ответчиком (Он же проектировщик по контракту № 143-12ЕП от  19.12.2018г.), который фактически владел проектно-сметной документацией и по ней  производил подрядные работы на объекте: LV-2012, Латвия, 

<

...>.  

Ответчик являлся единственным исполнителем, что указано в преамбуле  контракта № 143-12ЕП от 19.12.2018г., проектно-сметная документация по объекту  после её разработки и утверждения Истцом использовалась Ответчиком, что  подтверждается принятыми объёмами работ на дату расторжения контрактов или  окончания срока их действия.  

Ответчик также в ходе проведения подрядных работ по спорным контрактам  своим правом на приостановку их ввиду отсутствия проектной документации со  штампом Заказчика «в производство работ» в соответствии со ст. 719 ГК РФ во  взаимосвязи с п.1,2 ст.716 ГКРФ не воспользовался и претензий в ходе исполнения  контрактов Истцу не направлял.  

Кроме того, при подписании дополнительных соглашений между Истцом и  Ответчиком, а также соглашений о расторжении контрактов, являющихся предметом  рассмотрения, замечаний от Ответчика по порядку и срокам исполнения встречных  обязательств Истца не указывалось.  

В апелляционной жалобе Ответчик считает, что при расчете суммы неустойки и  определении размера неустойки судом необоснованно включен период просрочки до  16.05.2023, что привело к увеличению размера взыскания. Ответчик также ссылается на  необходимость расчета неустойки исходя из промежуточных сроков выполнения работ.  

Поскольку Ответчик не воспользовался правом, предусмотренным ст. 719 ГК  РФ и не уведомил Истца о приостановке начатых им работ, ссылка на  

необоснованность включения в период временного промежутка до передачи Истцом  утвержденной документации, - несостоятельна.  

Касательно промежуточных сроков выполнения работ: указанные контракты  имеют начальный и конечный срок выполнения работ, этапы выполнения работ  контрактами не предусмотрены.  

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что  судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и  имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению  нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы ответчика,  изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы  юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на  обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда  первой инстанции.  

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания,  предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, для отмены или изменения решения суда от 19.07.2023 г.  

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2023 по делу № А4095353/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть  обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в  Арбитражный суд Московского округа.  

Председательствующий судья: П.А. Порывкин 

Судьи   А.Л. Фриев  

Е.М. Новикова