Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-128834/2018

21 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  16 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  21 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСФЕРА СПБ" (адрес:  Россия 199226, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул НАХИМОВА 7/3/33, ОГРН:  1089847129470);

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "Лиговка" (адрес:  Россия 191040, Санкт-Петербург, пр.Лиговский 1,лит.А,пом.1-Н, ОГРН:  );

о взыскании 887 103 руб. 50 коп. 

при участии

-от истца: ФИО1 по доверенности от 01.02.19,

-от ответчика: ФИО2 по доверенности от 18.03.19,

установил:

ООО "ЭНЕРГОСФЕРА СПБ" после уточнения исковых требований просит взыскать ООО "Лиговка" 565 500 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 266 750 руб. 00 коп. пеней за нарушение сроков финансирования на основании договора №6/16 от 02.08.16.

Ответчик иск отклонил.

Определением от 17.12.18 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №6/16 от 02.08.16 на выполнение работ по восстановлению внутреннего водопровода и канализации по адресу: СПб, Лиговский пр., д. 1, лит. А, помещение 1-Н.

Цена работ составляет 3 315 500 руб. 00 коп. Истец отрицает заключение дополнительного соглашения от 16.12.16 об изменении цены договора.

Истец – подрядчик выполнил работы в полном объеме, что подтверждается актами сдачи – приёмки работ формы КС-2, КС-3 и С-1 от 30.12.16.

Акты вручены директору ответчика ФИО3 с сопроводительным письмом от 20.12.16, однако до настоящего времени не подписаны. Мотивированного отказа от их подписания ответчиком не направлено.

Учитывая изложенное, на основании ст. 753 ГК РФ работы считаются принятыми.

С учетом перечисленного аванса задолженность ответчика по оплате выполненных работ в настоящее время составила 565 500 руб. 00 коп.

При расчете неустойки на основании п. 5.3 договора истец не учел 10% ограничение от просроченной суммы, поэтому пени составят 56 550 руб. 00 коп.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лиговка" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСФЕРА СПБ" 622 050 руб. 00 коп., из них: 565 500 руб. 00 коп. основного долга и 56 550 руб. 00 коп. неустойки, а также 15 441 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.