СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, г. Томск,634050, http://7aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Томск Дело № А45-31344/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 06 марта 2025 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 20 марта 2025 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующегоВагановой Р.А.,

судейЗахаренко С.Г., 

 ФИО1

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Питимировой Д.Е. в судебном заседании в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ТСП-СИБ» (№07АП-207/2025) на решение от 06.12.2024 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-31344/2024 (судья О.В. Суворова),   

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ЗапСибэнергосервис» (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТСП-СИБ» (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 2 136 854 рублей 78 копеек,

без участия лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ЗапСибэнергосервис» (далее – ООО НПФ «ЗапСибэнергосервис», истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТСП-СИБ» (далее - ООО «ТСП-СИБ», ответчик, апеллянт) о взыскании с учетом уточнения, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), задолженности по оплате работ, выполненных по 17 договорам, в общем размере 2 136 854 рублей 78 копеек.

Решением от 06.12.2024 Арбитражного суда Новосибирской области исковые требования удовлетворены частично, с ООО «ТСП-СИБ» в пользу ООО НПФ «ЗапСибэнергосервис» взыскана задолженность в размере 2 136 854 рублей 72 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 684 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «ТСП-СИБ» в апелляционной жалобе просит решение суда отменить в части взыскания задолженности в сумме 1 117 525,26 руб. В обоснование доводов жалобы апеллянт указывает, что у ответчика не возникло обязанности по оплате работ в сумме 1 019 329,46 руб., поскольку истцом работы выполнены некачественно, что повлекло за собой непредставление необходимой для прокладки кабельных линий документации.

ООО НПФ «ЗапСибэнергосервис» в порядке статьи 262 АПК РФ представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором полагало необоснованными доводы апелляционной жалобы, просило оставить решение суда без изменения.

Участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, явку своих представителей в судебное заседание апелляционной инстанции не обеспечили.

ООО НПФ «ЗапСибэнергосервис» ходатайствовало об участии своего представителя в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, ходатайство было удовлетворено апелляционным судом, обеспечена техническая возможность участия представителя в онлайн-заседании, однако представитель истца не обеспечил надлежащего подключения.

В порядке части 1 статьи 266, частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, проверив в соответствии со статьей 268 АПК РФ законность и обоснованность решения, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 17.08.2023 между ООО «ТСП-СИБ» (заказчиком) и ООО НПФ «ЗапСибэнергосервис» (подрядчиком) заключен договор № 08-01И на проведение подрядных работ, по условиям которого подрядчик обязуется в течение срока действия договора выполнить работы по испытаниям электрооборудования согласно техническому заданию, а заказчик принять и оплатить работы.

Стоимость работ по договору не может превышать 380 000 рублей, НДС не облагается. В стоимость договора включены затраты на материалы и оформление документов, необходимых для исполнения договорных обязательств подрядчиком. Расчет по договору производит заказчик ежемесячно в следующем порядке: стоимость работ оплачивается по факту выполнения работ после подписания сторонами актов приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ и зависит от фактического выполнения объемов работ (пункт 4.1 договора).

Оплата производится на основании выставленного подрядчиком и полученного заказчиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 4.3 договора).

Сроки начала работ - с даты подписания договора. Сроки завершения работ - не позднее 05.09.2023 (пункт 5.1 договора).

Стоимость работ по договору составила 376 112 рублей 77 копеек.

Истец указал, что работы сданы 14.09.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2023.

Претензий по качествам и срокам выполненных работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 376 112 рублей 77 копеек.

03.10.2022 между сторонами заключен договор подряда № 372 ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы для вновь проложенной кабельной линии (далее - КЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (далее - TП) до вводного распределительного устройства (далее - ВРУ) жилого дома № 3 и № 4 объекта: «Многоквартирные многоэтажные дома (№ 3 и № 4 - по генплану) по ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе г. Новосибирск. 2 очередь», а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 117 147 рублей 38 копеек, НДС не облагается (пункт 2.1 договора).

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в следующем порядке: заказчик обязуется произвести предоплату в размере 82 003 рублей 17 копеек в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора (пункт 3.1 договора).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами каждого акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с предоставлением счета и счета-фактуры (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).

Окончание работы - 5 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 08.06.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 08.06.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.06.2023.

Претензий по качествам и срокам выполненных работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 117 147 рублей 40 копеек.

07.11.2022 между сторонами заключен договор подряда № 376 ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы для вновь проложенной кабельной линии (далее - КЛ) 10кВ для объекта: «1 очередь 1 этап. «Магазин №2 по ул. Тюленина в Калининском районе г. Новосибирск (кадастровый номер земельного участка: 54:35:041030:1176 по адресу: Новосибирская область, городской округ 

<

...> з/у 317)», а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 23 096 рублей 65 копеек (пункт 2.1 договора).

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в следующем порядке: заказчик обязуется произвести предоплату в размере 16 167 рублей 66 копеек в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).

Окончание работы - 5 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 30.11.2022, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2022, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2022.

Претензий по качествам и срокам выполненных работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, заказчиком частично произведена оплата в размере 16 167 рублей 66 копеек. 

Таким образом, задолженность составляет 6 928 рублей 99 копеек.

10.04.2023 между сторонами заключен договор подряда № 393/1ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить испытание КЛ-10 кВ РП4520 яч.3 - ПС Мочище ф.11-741 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 8 000 рублей (пункт 2.1 договора).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). Окончание работы - 31.12.2023 (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 14.12.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 14.12.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.12.2023.

Претензий по качествам и срокам выполненных работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 8 000 рублей.

30.06.2023 между сторонами заключен договор подряда № 407ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы после прокладки кабельной линии (далее - КЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (далее - ТП) до вводного распределительного устройства (далее - ВРУ) жилого дома № 6 объекта: «Многоквартирные многоэтажные дома по ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе г. Новосибирск. 1 очередь 2 этап (многоквартирный многоэтажный дом №6)» ЖК Основатели, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 144 018 рублей 03 копеек (пункт 2.1 договора).

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в следующем порядке: Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 100 812 рублей 62 копеек в течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора.

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами каждого акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с предоставлением счета (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора (пункт 4.1 договора).

Окончание работы - 30 рабочих дней с даты начала работ (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 17.11.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 17.11.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.11.2023.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 144 018 рублей 03 копейки.

06.07.2023 между сторонами заключен договор подряда № 408СМР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства после прокладки кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ на объекте: «Многоквартирный многоэтажный дом №1 с подземной автостоянкой, многоквартирный многоэтажный дом №2 по ул. Лобачевского в Заельцовском районе г. Новосибирск (кадастровый номер земельного участка: 54:35:000000:37649)» ЖК Рафинад, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 27 131 рублей 49 копеек.

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - 10 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 17.07.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 17.07.2023.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 27 131 рубль 49 копеек.

03.04.2023 между сторонами заключен договор № 408/1ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ от ТП-4042 яч.8 до ТП-4738 яч.2 по ул. Ядринцевская, 53/1 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 8 000 рублей (пункт 2.1 договора).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 30.11.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2023, справкой стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2023.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний.

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 8 000 рублей.

08.06.2023 между сторонами заключен договор подряда № 408/2ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ от РП-100 яч.П - ТП-4066 яч.6 ул. Кубовая, 112 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 15 000 рублей (пункт 2.1 договора).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).  

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 07.08.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 07.08.2023, справкой стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 07.08.2023. 

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 15 000 рублей.

13.06.2023 между сторонами заключен договор подряда № 408/3ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ от РП-550 яч.15 до ТП-4537 яч.7 ул. Дуси Ковальчук, 77 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 25 000 рублей (пункт 2.1 договора). 

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 07.08.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 07.08.2023.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 25 000 рублей.

17.05.2023 между сторонами заключен договор подряда № 408/4ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ от РП-4531 яч.4 до ТП-213 яч.3 по ул. Дуси Ковальчук г. Новосибирск, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость. 

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 16 000 рублей (пункт 2.1 договора). 

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).  

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 21.02.2024, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 21.02.2024, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.02.2024.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 16 000 рублей.

17.05.2023 между сторонами заключен подряда № 408/4СМР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонта кабельной линии (далее - КЛ) 10кВ на отрезке от трансформаторной подстанции (далее -ТП) №4531 яч.4 до ТП-213 яч.3 по ул. Дуси Ковальчук в г. Новосибирск, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 28 413 рублей 19 копеек (пункт 2.1 договора). 

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора). 

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - не позднее 31.12.2023 (пункт 3.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 22.02.2024, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 22.02.2024, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 22.02.2024.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 28 413 рублей 19 копеек.

06.07.2023 между сторонами заключен договор подряда № 408/5ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ от ТП-5301 яч.9 до ТП4342 яч.8 ул. Кочубея, 4 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 15 000 рублей (пункт 2.1 договора).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора). 

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).        

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 08.08.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 08.08.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.08.2023.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 15 000 рублей.

14.06.2023 между сторонами заключен договор подряда № 408/7ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ от ПС-Ефремовская до РП-4220 ул. Сибиряков-Гвардейцев в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 8 000 рублей (пункт 2.1 договора). 

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора).

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора).

Истец указал, что работы сданы 31.07.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2023.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 8 000 рублей.

01.08.2023 между сторонами заключен договор подряда № 409/1СМР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту отмостки РП-4220 по ул. Вертковская, 8 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 15 470 рублей 95 копеек (пункт 2.1 договора). 

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора). 

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - 20 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 25.08.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.08.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.08.2023. 

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 15 470 рублей 95 копеек.

03.08.2023 между сторонами заключен договор подряда № 410/1ПНР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить поиск повреждения кабельной линии (далее - КЛ) 10 кВ Ф.11-171 от ПС Мочище яч.7 до РП-4520 в г. Новосибирске, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 8 000 рублей (пункт 2.1 договора). 

Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (пункт 3.1 договора). 

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - 30 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 14.08.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 14.08.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.08.2023. 

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 8 000 рублей.

09.08.2023 между сторонами заключен договор подряда № 412СМР, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по установке (фундаментная плита, котлован, отмостка) для двухтрансформаторной комплектной подстанции наружного типа (далее - 2КТПН) 2х400кВА для электроснабжения объекта: «Здание бассейна с физкультурно-оздоровительным комплексом по ул. Охотской в Заельцовском районе г. Новосибирска кадастровый номер земельного участка: 54:35:031355:1375)», а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 299 302 рублей 46 копеек (пункт 2.1 договора). 

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик обязуется произвести предоплату в размере 209 511 рублей 70 копеек, в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора; расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами каждого акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с предоставлением счета и счета-фактуры (пункт 3.1 договора). 

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора). 

Начало работ - позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора).

Окончание работы - 20 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора). 

Истец указал, что работы сданы 30.11.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.11.2023. 

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 299 302 рублей 50 копеек.

01.09.2023 между сторонами заключен договор подряда № 414СМР, по условиям которого, подрядчик обязуется выполнить по строительству железобетонных лотков под прокладку кабельной линии (далее КЛ) 0,4кВ для электроснабжения объекта: «Многоквартирные многоэтажные дома по ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе г. Новосибирск 2 очередь: 1 этап - многоквартирный многоэтажный дом №7 и подземная автостоянка, 2 этап - многоквартирный многоэтажный дом №8», расположенные по адресу: 2 очередь: 

<

...> (кадастровый номер земельного участка 54:35:031080:390) ЖК Основатели», а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную договором стоимость.

Стоимость работ по договору составляет сумму в размере 720 426 рублей 50 копеек (пункт 2.1 договора). 

Финансирование и расчеты по договору заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: заказчик обязуется произвести предоплату в размере 504 298 рублей 55 копеек в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора; расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента подписания сторонами каждого акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с предоставлением счета и счета-фактуры (пункт 3.1 договора). 

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 3.2 договора).

Начало работ - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора (пункт 4.1 договора). 

Окончание работы - 20 рабочих дней с момента начала работ (пункт 4.2 договора).

Стоимость договора составила 1 019 329 рублей 46 копеек.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.09.2023 сторонами установлен срок окончания работ - не позднее 31.12.2023.

Истец указал, что работы сданы 19.12.2023, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 19.12.2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.12.2023. 

Претензий по качеству и срокам выполненных работ от ответчика не поступало, акт подписан ответчиком без замечаний. 

При этом, как указывает истец, задолженность ответчиком не оплачена, сумма долга составила 1 019 329 рублей 46 копеек.

Таким образом, общая сумма задолженности, по расчету истца, составила 2 136 854 рублей 78 копеек. 

Претензией от 05.08.2024 истец предложил ответчику в добровольном порядке произвести оплату долга за выполненные работы. Претензия осталась без ответа, что и послужило основанием для обращения в суд.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции соглашается с правильностью выводов суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, исходит из следующих норм права и обстоятельств по делу.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в Кодексе.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Также стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Согласно разъяснениям пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какойлибо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьями 702, 708, 709 и 720 ГК РФ обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену (статья 328 ГК РФ).

Из положений статей 702, 740, 746 ГК РФ следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Ответчик наличие задолженности не оспорил, в отзыве на исковое заявление указал на несогласие с суммой исковых требований, так как истец не подтвердил задолженность на сумму 3 887 рублей 17 копеек. Истец уточнил размер исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии оснований для оплаты работ по договору подряда № 414СМР ввиду непередачи заказчику документации, необходимой заказчику для прокладки кабельных линий, отклоняются апелляционной коллегией за необоснованностью.

Так, раздел 3 договора № 414СМР содержит условия об авансе и расчете после приемки работ. Пунктом 1 дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2023 к договору № 414СМР стороны изменили объёмы работ, скорректировав их стоимость (1 019 329,46 руб.), а также пунктом 4.2. изменен срок выполнения работ (до 31.12.2023).

Таким образом, в связи с увеличением объема работ, изменилась общая сумма работ по договору, а также срок сдачи работ, при этом порядок оплаты, указанный в пункте 3 договора № 414СМР от 01.09.2023, дополнительным соглашением не изменялся.

Работы приняты ответчиком без замечаний и возражений, что подтверждается актами КС-2, КС-3 от 13.12.2023, ответчиком не оспаривается факт выполнения работ истцом, в апелляционной жалобе ответчик ссылается на непредставление подрядчиком документации, однако не конкретизируя её; после приемки работ прошло более года, в случае непередачи истцом какой-либо документации, необходимой ответчику для выполнения иных работ, разумно предположить, что за это время ответчик должен был обратиться к подрядчику с требованием о передаче документации. Вместе с тем, соответствующий довод заявлен заказчиком лишь при обращении с апелляционной жалобой, обратного из материалов дела не следует.

Исходя из вышеизложенного суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истца в сумме 2 136 854,72 руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, установлены судом первой инстанций правильно, доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями АПК РФ.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении заявленного требования по существу.

Принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено. Основания для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренные АПК РФ, не установлены.

В связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по правилам статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной инстанции относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 06.12.2024 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-31344/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ТСП-СИБ» – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий Р.А. Ваганова

Судьи С.Г. Захаренко 

 Я.А. Смеречинская