Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-46621/24-14-350

г. Москва

12 августа 2024 года

Резолютивная часть объявлена                                                                 26 июля 2024 г.

Дата изготовления решения в полном объеме                                    12 августа 2024 г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.

Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Елиной А.С., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "2Б ПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>)

к ответчику ООО "ГСП" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 7 124 548,16 руб.

 

в судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по доверенности от 07.11.2023г.

в судебное заседание не явились:

от ответчика – извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «2Б проект» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ГСП» о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 6240900 руб., неустойки в размере 441733,67 руб., штрафа в размере 300000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 23.12.2024 г. по 15.02.2024 г. в размере 141914,49 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с 15.02.2024 г. по момент фактического исполнения обязательства.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в заседание суда первой инстанции не явился. Отзыв не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил.

Выслушав представителя истца, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению полностью по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Как установлено судом и следует из материалов дела, «20» июля 2023 года между Обществом с ограниченной ответственностью «2Б проект» (далее - ООО «2Б проект», «Подрядчик», «Истец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ГСП» (далее - ООО «ГСП», «Субподрядчик», «Ответчик») был заключен Договор субподряда № 11-Колпакова на выполнение работ по изготовлению и монтажу теневых навесов на объекте: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство)» (далее - «Договор») во исполнение Муниципального контракта № 0148200005422000435-1 от «17» августа 2022 г. (далее - «Контракт») на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство)» (ИКЗ: 223502914734050290100140014120414), заключенного «17» августа 2022 г. между ООО «2Б проект» и Управлением капитального строительства Администрации городского округа Мытищи (далее - «Государственный заказчик»),

В соответствии с пунктом 1.1. Договора Субподрядчик обязуется поставить и передать в собственность Подрядчика изделий (далее - «Изделия»), а также выполнить работы по монтажу теневых навесов (далее - «Работы») на объекте капитального строительства: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство)» (далее - «Объект»), в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией на изготовление и монтаж теневых навесов, в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) (далее - «График выполнения работ») и передать результат работ Подрядчику в обусловленные Договором сроки, а Подрядчик обязуется принять и оплатить и результат работ, в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Согласно пункту 2.1. Договора Цена Договора является твердой, определена в Смете Договора (Приложение № 1 к Договору) на весь срок исполнения Договора и включает в себя стоимость монтажных работ, поставку изделий, в т.ч. расходных и крепежных, непредвиденные расходы, прибыль Субподрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (Цена работ) составляет 9 673 000 руб. (девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) 1 612 166 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

«24» июля 2023 года Сторонами было подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору. В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору от «24» июля 2023 года к Договору Стороны согласовали внести изменения в пункт 2.3.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «Подрядчик перечисляет в адрес Субподрядчика авансовый платеж в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в размере до 100 % (сто процентов) от стоимости Материалов, а именно 6 240 900 (шесть миллионов двести сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 1 040 150 (один миллион сорок тысяч сто пятьдесят ) рублей 00 копеек».

Во исполнение принятых на себя обязательств по Договору, Подрядчик произвел оплату авансового платежа на общую сумму 6 240 900 (Шесть миллионов двести сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, что подтверждается следующими платежными документами:

1. Платежное поручение № 6369 от 27.07.2023 года - на сумму 2 000 000 (Два миллиона рублей) 00 копеек;

2. Платежное поручение № 6537 от 01.08.2023 года - на сумму 4 240 900 (Четыре миллиона двести сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Согласно пунктам 3.1-3.3. Договора, Субподрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению и монтажу теневых навесов, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

- начальный срок - дата заключения настоящего Договора.

- конечный срок - «20» сентября 2023 года.

Срок исполнения обязательств по Договору по выполнению работ, включая промежуточные сроки определяется в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).

Субподрядчик выполняет работы в порядке согласно Графику выполнения работ и в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и Договором.

Согласно пунктам 5.1.1.-5.1.3. Договора Подрядчик вправе: Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, в том числе ранее принятых Подрядчиком работ; Требовать от Субподрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и Договором, требованиями законодательства Российской Федерации; Запрашивать у Субподрядчика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

Согласно разделу 5.4. Договора Субподрядчик обязан: до начала производства работ по Договору передать Подрядчику проект производства работ (ППР) на согласование; в законодательно установленный срок счета-фактуры и составлять первичные документы (справки, акты приема-передачи, спецификации, товарные и товарно-транспортные накладные и т.д.); качественно выполнить все работы в соответствии с Технической (рабочей/проектной) документацией, действующими нормами, ГОСТ, СНиП, техническими условиями, правилами приёмки в эксплуатацию тепловых пунктов, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результаты выполненных работ в установленном Договором порядке Подрядчику; обеспечить представителям Подрядчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования; своевременно направлять Подрядчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе перечисленные в Приложении к Договору; Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Подрядчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

В пунктах 4.1. - 4.3. Договора Стороны предусмотрели порядок сдачи и приемки Работ:

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании проектной документации, рабочей документации, Сметы Договора, Графика выполнения работ, условий Договора, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ (КС-2), оформленный и подписанный в установленном Договором порядке (далее также - «Документ о приемке»).

Подрядчик осуществляет приемку выполненных работ, в том числе приемку результата работ по Договору, после получения от Субподрядчика соответствующего комплекта документов.

Однако, в нарушение предусмотренных Договором порядка и сроков выполнения Работ Субподрядчиком встречного исполнения принятых обязательств по Договору произведено не было - Работы по Договору исполнены Субподрядчиком не были.

По причине существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора в части нарушения сроков выполнения Работ и выполнения Работ в целом, а также в целях мирного разрешения возникшей ситуации, ООО «2Б проект» направило в адрес Субподрядчика Претензию исх. № 1306-ИСХ.-2БП-23 от «03» ноября 2023 года.

Данное обстоятельство подтверждается квитанцией и описью вложения почтового отправления с идентификатором 11904989213672. В соответствии с текстом Претензии ООО «2Б проект» просило ООО «ГСП» обратить внимание на необходимость соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с Графиком и в течение 5 (пяти) дней со дня получения претензии выполнить предусмотренные Договором работы, по завершении направив Подрядчику отчетные документы.

По истечении сроков ответа на Претензию от Субподрядчика не поступило ответа. Работы по Договору выполнены не были.

В соответствии с пунктом 8.1. Договора Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с пунктом 8.2. Договора Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении обязательств, принятых Субподрядчиком по Договору, в том числе:

1) Неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков поставки оборудования и выполнения работ;

2) Неоднократного нарушения Субподрядчиком порядка выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором, а также выполнения работ ненадлежащего качества;

3) Неоднократной поставки Субподрядчиком оборудования ненадлежащего качества;

4) Неоднократного нарушения Субподрядчиком условий Договора;

5) Нарушения Субподрядчиком миграционного и иного законодательства Российской Федерации;

6) Несвоевременной и/или ненадлежащей сдачи результатов выполненных работ и отчетов, предусмотренных настоящим Договором, допущенных Субподрядчиком неоднократно;

7) Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

8) Если Субподрядчиком не устранены недостатки в сроки, установленные Подрядчиком;

9) В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ввиду существенного нарушения сроков выполнения работ, а также при наличии иных существенных нарушений условий Договора со стороны Субподрядчика, в том числе, выразившихся в отсутствии факта выполнения Работ по Договору, ООО «2Б проект» направило в адрес ООО «ГСП» Досудебную претензию-требование с Уведомлением о расторжении Договора субподряда № 11-Колпакова на выполнение работ по изготовлению и монтажу теневых навесов на объекте: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство)» от «20» июля 2023 года (исх. № 1561-ИСХ.-2БП-23 от «22» декабря 2023 года).

Факт отправки подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения почтового отправления с идентификатором 11904990223455, а также скриншотом о направлении Досудебной претензии-требования с Уведомлением о расторжении Договора на электронный адрес ООО «ГСП» - gsp.info@bk.ru.

В соответствии с пунктом 8.3. Договора расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем направления Подрядчиком в адрес Субподрядчика Уведомления о расторжении Договора, содержащим в себе обоснованные причины принятия такого решения. Уведомление направляется заказным письмом с описью, датой расторжения Договора признается дата получения Уведомления Субподрядчиком. При этом, Подрядчик имеет право направить Уведомление в электронном виде на электронный адрес Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре, с последующим направлением письменного Уведомления заказным письмом с описью, в таком случае датой расторжения Договора будет считаться дата направления электронного письма на электронную почту Субподрядчика.

Таким образом, с учетом того, что на электронную почту ООО «ГСП» Досудебная претензия-требование с Уведомлением о расторжении Договора была направлена «25» декабря 2023 года, Договор субподряда № 11-Колпакова на выполнение работ по изготовлению и монтажу теневых навесов на объекте: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство)» от «20» июля 2023 года считается расторгнутым в одностороннем порядке с «25» декабря 2023 года.

После уведомления Истцом в одностороннем порядке об отказе от договора, подрядчик вызывается на объект для сдачи фактически выполненных работ; по состоянию на дату отказа от договора также не явился.

В соответствии с пунктом 8.6. Договора Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику на счет, реквизиты которого указаны в Договоре, разницу полученного аванса и отработанной суммы, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора (если Договором предусмотрена выплата аванса).

Соответственно, в связи с тем, что Договор считается расторгнутым с «22» декабря 2023 года, а доказательств исполнения обязательств по Договору со стороны Субподрядчика предоставлено не было, а также в условиях, что фактически Работы по Договору ООО «ГСП» не выполнены, ООО «2Б проект» имеет право требовать, а ООО «ГСП» обязано возвратить ООО «2Б проект» сумму неотработанного аванса в общем размере 6 240 900 (Шесть миллионов двести сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 8.7. Договора расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, которые имели место до расторжения Договора.

В соответствии с пунктом 7.3.1. Договора в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 7.3.2. Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Как указано ранее, согласно пункту 3.1. Договора конечный срок исполнения Субподрядчиком принятых на себя обязательств по Договору - «20» сентября 2023 года, соответственно, первый день просрочки - «21» сентября 2023 года.

Субподрядчик в предусмотренный Договором срок не исполнил принятые обязательства по Договору, в связи с чем, Договор был расторгнут в одностороннем порядке «25» декабря 2023 года.

Цена Договора - 9 673 000 рублей 00 копеек.

На основании изложенного, а также пункта 7.3.2. Договора, ООО «2Б проект» начисляет ООО «ГСП» неустойку в размере 441 733,67 руб. за период с 21.09.2023 по 25.12.2023 г.

По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

При этом допускается как применение нескольких неустоек в указанных формах (пени или штраф), начисляемых независимо друг от друга за различные нарушения, так и применение комбинации штрафа и пени как способа определения размера неустойки, применяемой за одно нарушение. Природа установленной в договоре либо законе неустойки и ее цели (покрытие возможных убытков кредитора или наказание должника) устанавливаются путем толкования соответствующих положений.

Неисполнение Субподрядчиком взятых на себя обязательств по Договору свидетельствует как о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока выполнения работ), так и о нарушении условий Договора в целом, что позволяет начислять Субподрядчику как пени за просрочку исполнения обязательства, так и фиксированный штраф за сам факт частичного неисполнения Договора.

В соответствии с пунктом 5.4.11. Договора Субподрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, технику, оборудование и механизмы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и передачу для выполнения работ. При этом применяемые для работ материалы, изделия, конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, гарантийные паспорта (талоны) и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

В соответствии с пунктом 5.4.20. Договора Субподрядчик обязан своевременно управлять Подрядчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе перечисленные в Приложении к Договору.

В соответствии с пунктом 5.4.26. Договора Субподрядчик обязан оформлять и передавать Подрядчику Акты по форме КС-2 и КС-3 по фактически выполненным за отчетный период объемам работ, а также исполнительную документацию, соответствующую объему выполненных работ за период и в соответствии с Приложениями к Договору. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате MS Excel.

В соответствии с пунктом 5.4.42. Договора Субподрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

В соответствии с п. 7.3.7. Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

На основании изложенного, ООО «2Б проект» начисляет ООО «ГСП» штрафы за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору в общем размере 300 000 (Триста тысяч рублей) 00 копеек:

1. На основании пункта 5.4.11. Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

2. На основании пунктов 5.4.20., 5.4.26. Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

3. На основании пункта 5.4.42. Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе РФ.

В силу требований ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

В настоящем споре обязательства сторон возникли в связи с заключением договора субподряда № 16-Сабурово-ДС-310 от 20.07.2023 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные § 1 Гл. 37 ГК РФ «Общие положения о подряде», применяются, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров (ч. 2 ст. 702 ГК РФ).

По правилам ч.ч. 1, 2 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

На основании пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (статья 709 ГК РФ).

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со статьей 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (п. 3 ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу п. 1. ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2. ст. 1102 ГК РФ Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с п. 3 ст. 1103 ГК РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим обязательством.

При расторжении договора сумма неотработанного аванса, составляющая разницу между размером перечисленных денежных средств и стоимостью принятых и подлежащих оплате работ, является суммой неосновательного обогащения (Определение ВАС РФ от 19.04.2013 № ВАС-5192/13 по делу № А32-40843/2011).

Президиум ВАС РФ в п. 1 информационного письма от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснил, что положения п. 4 ст. 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне Ответчика имела бы место необоснованная выгода.

Поскольку Договор прекратил свое действие, а доказательства встречного исполнения обязательств отсутствуют, у Ответчика отсутствуют правовые основания для удержания сумм, перечисленных ему Истцом в рамках Договора в сумме 6 240 900 (Шесть миллионов двести сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в связи с чем, указанная сумма неосновательного обогащения подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Пунктом 2 ст. 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

В соответствии с п. 37 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Учитывая тот факт, что Договор считается расторгнутым с 25.12.2023 г., расчет процентов производится со следующего дня (26.12.2023 г.) по день подачи настоящего Иска в суд (15.02.2024 г.). На основании изложенного, расчет процентов по ст. 395 ГК РФ составляет 141 914,49 руб.

Согласно п.48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, ответчиком доказательств, подтверждающих возврат неосновательного обогащения, уплаты пени и задолженности, процентов, суду не представлено.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленные истцом доказательства, суд руководствуется позицией ВАС РФ изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013 г. по делу № А46-12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Суд исходит из того, что по смыслу положений ст. 268 АПК РФ доказательства должны быть представлены в суд первой инстанции, который разрешает спор по существу.

 

Данных, подтверждающих возврата неосновательного обогащения, уплаты пени, штрафа, процентов полностью, суду также представлено.

Принимая во внимание изложенное, суд удовлетворяет исковые требования в полном объёме.

В силу ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ГСП" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "2Б ПРОЕКТ" (ОГРН 

<

***>) 6 240 900руб. – неосновательного обогащения, 441 733,67руб. – неустойки, 300 000руб. – штрафа, 141 914,49руб. – процентов, дальнейшее взыскание процентов производить путем начисления на сумму неосновательного обогащения начиная с 16.02.2024г. по день фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды и 58 623руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

 

Судья:                                                                                                 О.В. Лихачева