АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Смоленск                                                                      

05.02.2019                                                                     Дело № А62-6368/2018

 

Резолютивная часть решения объявлена 29.01.2019

Полный текст решения изготовлен 05.02.2019

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи         Яковенковой В. В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи                          Павловой О.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью СК «ОСНОВА»                               (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о понуждении исполнения гарантийных обязательств, 

при участии: 

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 11.01.2019, 

от ответчика – ФИО2, представителя по доверенности от 04.07.2018, 

 

УСТАНОВИЛ:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее – истец, УЖКХ) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью СК «ОСНОВА»  (далее – ответчик, ООО СК «ОСНОВА») об обязании исполнить  гарантийные обязательства по муниципальному контракту. 

В обоснование исковых требований истец указал следующее. 

Между УЖКХ (заказчик) и ООО  СК «ОСНОВА» (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 06.09.2017 № 99 на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов в              соответствии с подпрограммой «Формирование современной городской среды» на 2017 год в рамках реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016 – 2020 годы (далее – контракт).  

Согласно пункту 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить  работы,  определенные в техническом задании (приложение № 1), согласно действующим СНиПам, в соответствии с заявкой на участие в запросе котировок, поданной подрядчиком и сдать заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

В соответствии с пунктами 6.3.1, 6.3.2 контракта подрядчик в соответствии с требованиями настоящего контракта передает заказчику выполненные работы, а также документацию согласно приложению № 2. Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет, уточняет и пописывает справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Заказчик имеет право не подписывать указанные документы до предоставления подрядчиком исполнительной документации, необходимой для их подписания. 

Работы по контракту выполнены подрядчиком и приняты заказчиком, о чем 10.12.2017 сторонами  подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы  КС-3. 

Согласно пунктам 7.2, 7.3 контракта гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, оборудования, конструкций и изделий устанавливается с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работ и составляет пять лет. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки/дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, он обязан их устранить за свой счет в установленные заказчиком сроки. В указанном случае заказчик в письменной форме вызывает представителя подрядчика. 

В период гарантийного срока заказчиком были выявлены недостатки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий домов                            № 25 А по ул. Кирова, № 7 по ул. Октябрьской  Революции, № 23 В по                         ул. Нормандия-Неман в городе Смоленске, о чем составлены дефектные ведомости от 06.06.2018. 

Истцом ответчику 14.06.2018 направлена претензия  от 09.06.2018        № 20/1773  о необходимости безвозмездно устранить указанные в дефектных ведомостях от 06.06.2018 недостатки в срок до 10.07.2018.

Поскольку ответчиком не совершено никаких действий по устранению недостатков выполненных работ,  истец обратился  в суд с рассматриваемым исковым заявлением. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что заказчик в нарушение пункта 7.4 контракта не уведомил подрядчика о проведении осмотра объекта, составлении совместного акта, фиксирующего дефекты; 14.08.2018 ответчиком истцу вручен ответ на претензию от 09.06.2018, в котором ответчик выразил несогласие с содержанием дефектных ведомостей от 06.06.2018, так как в них указаны работы,  не включенные в акты о приемке выполненных работ и не относящиеся к гарантийным обязательствам подрядчика. В связи с этим извещением от 24.09.2018 истец вызвал ответчика на 27.09.2018 для составления рекламационного акта. Вместе с тем, рекламационный акт от 27.09.2018 составлен в помещении УЖКХ, без выезда на место проведения работ; в рекламационном акте указано на недостатки в соответствии с дефектной ведомостью от 06.06.2018. Подрядчик предлагал заказчику провести совместный осмотр, однако заказчик ответил отказом.  В связи с этим ответчик не располагает сведениями о конкретных местах участков работ, подлежащих устранению в рамках гарантийных обязательств.   

         Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в   материалах дела документы, заслушав доводы представителей  истца и ответчика, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям статей 708, 709 ГК РФ в договоре подряда указываются сроки выполнения работ и цена договора. 

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 

В соответствии с положениями статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).  Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно пункту 1 статьи 724 ГК РФ если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 

Пунктом 3 данной статьи предусмотрено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.   

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне. Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Пунктами 1.4, 1.5 контракта предусмотрено, что гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, оборудования, конструкций и изделий устанавливается с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ и составляет пять лет. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

Как следует из материалов дела, в обоснование своих требований  истец ссылается на дефектные ведомости от 06.06.2018 и рекламационный акт от 27.09.2018. 

Ответчик оспаривает  дефектные ведомости от 06.06.2018 и рекламационный акт от 27.09.2018, указывает, что они  не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств, подтверждающих факт нарушения подрядчиком договорных обязательств, так как составлены без  осмотра объекта заказчиком в одностороннем порядке, т.е. заинтересованной стороной, без вызова и привлечения подрядчика; в них не указаны   конкретные места участков работ, подлежащих устранению в рамках гарантийных обязательств.   

Суд, оценив представленные истцом доказательства, приходит к   выводу о том, что истцом в материалы дела не представлено допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих  факт нарушения подрядчиком договорных обязательств. 

При этом представленные истцом   дефектные ведомости от 06.06.2018 и рекламационный акт от 27.09.2018, в которых указаны подлежащие устранению недостатки, противоречат  представленным истцом дефектным ведомостям от 24.10.2018, акту обследования территорий от 24.10.2018 и актам осмотра дворовых территорий от 22.01.2019, в которых указаны иные недостатки выполненных работ. Кроме того, в этих документах по-прежнему отсутствуют   сведения о местах выявленных недостатков. 

Ходатайство о проведении  экспертизы с целью установления недостатков, подлежащих устранению, истцом не заявлено.   

Таким образом, поскольку истцом допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих  факт нарушения подрядчиком договорных обязательств, в материалы дела не представлено,  требования истца удовлетворению не подлежат.   

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации ответчики признаются плательщиками государственной пошлины в случае, если решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты.

Истцом при предъявлении иска не оплачивалась государственная пошлина в связи с тем, что истец освобожден от ее уплаты.  

 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                       В. В. Яковенкова