Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-306940/19-83-1661

11 марта 2020 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 11 марта 2020 года

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1661), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ГК КАМЕНАРЬ" (ИНН 9701036763) к ООО НПО "НАФТА-ТЕХНИКА" (ИНН 7203257830)

о взыскании денежных средств 

при участии:

от истца – ФИО2 на основании доверенности от 14.11.2020 г.

от ответчика –  Жила С.Н. на основании доверенности №35 от 11.11.2019 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ГК КАМЕНАРЬ" обратилось в суд с требованиями о взыскании с ООО НПО "НАФТА-ТЕХНИКА"  задолженности по договору № 121-К от 12.01.2018 г. на выполнение подрядных работ в размере 2 788 453 рубля 94 копеек, неустойки, предусмотренной п. 5.4 Договора, в размере 371 868 рублей 47 копеек.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Ответчик требования не признал согласно доводам отзыва.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что 12.01.2018 г. между ООО «ГК Каменарь» и ООО НПО «Нафта-Техника» был заключен Договор № 121-К на выполнение подрядных работ, в соответствии с которым Истец (Подрядчик) обязался в установленный Договором срок выполнить работы по строительству административных, производственных и хозяйственных зданий и сооружений по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Зарубино, а Ответчик (Заказчик) обязался своевременно производить оплату выполненных и принятых работ в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 1.1 договора в соответствии с Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по строительству административных, производственных и хозяйственных зданий и сооружений, по адресу; Костромская область, Костромской р-н, п. Зарубиио.

Согласно п. 1.2 договора Подрядчик выполняет указанные в Договоре Работы по этапам, в соответствии с разработанной проектной документацией, действующими нормами и правилам  ГОСТами, техническими регламентами, а также в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами, регулирующими строительную и иную деятельность на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Истцом указано на то, что согласно пункта 3.2 Договора оплата производится в следующем порядке: первый авансовый платеж в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1220 338 (один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копейки, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора; второй авансовый платеж в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 610169 (шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей, 49 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения первого авансового платежа; дальнейшие расчеты по Работам осуществляются поэтапно, с предоплатой 50% (пятьдесят процентов) от сметного расчета каждого этапа в течение 5 (пять) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату; оплата работ по законченному этапу производится Заказчиком в течение 5 (пять) банковских дней со дня подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ» (форма №КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и при представлении Подрядчиком счета на оплату.

Истцом указано на то, что Ответчик нарушил вышеназванные условия оплаты, в связи с чем, задолженность перед Истцом на 13.08.2019 г. составила 3 688 453 рублей 94 копеек, что подтверждается подписанными актами выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ КС-3.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

05.11.2019 г. Ответчик произвел оплату в размере 900 000 рублей 00 копеек.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, ссылаясь на то, что у Ответчика имеются претензии к Истцу относительно исполнения последним своих обязательств по Договору на выполнение подрядных работ от 12 января 2018г. № 121 -К, что в адрес Истца 13.08.2019 года исх. № НТ-019-165 была направлена претензия с требованием (в соответствии со статьями 748, 751 ГК РФ) направить в адрес ООО НП «Нафта-Техника» копии документов, подтверждающих надлежащее качество выполненных работ, а также безопасность результата таких работ: Паспорта и сертификаты на использованные при производстве работ по Договору материалы и изделия; Журналы производства работ по видам работ; Исполнительная документация (в т.ч. по СП 68.13330 и РД 10-02-2006), в том числе, но не ограничиваясь: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций, исполнительные геодезические схемы и т.д., Чертежи КМД; Товарные накладные (УПД) на приобретение металлопрофиля с указанием объема, соответствующего проекту и предписанного адреса доставки на стройплощадку; Документы по ОТ и ТБ на специалистов подрядчика, привлеченных к выполнению работ по договору.

Ответчиком указано на то, что 28.11.2019г. в адрес ООО «ГК Каменарь» направлена претензия по качеству (количеству) результата выполненных работ с требованием направить полномочного представителя для участия в осмотре, приемке работ и результата работ по качеству (количеству) и составления акта о выявленных недостатках. Основанием для направления претензии явилось выявление недостатков, подтвержденных Заключением по визуальному и измерительному контролю № 3/01-11-19 от 15.11.2019г., выполненному лабораторией ООО «КВАРЦ Групп» по результатам выборочного контроля сварных соединений.

Ответчиком указано на то, что согласно указанному Заключению по результатам выборочного контроля сварных соединений металлоконструкций установлены многочисленные дефекты сварочных соединений, которые в соответствии с РД 34.15.132-96 являются недопустимыми и подлежат исправлению путем ремонта, что на текущий момент имеются признаки ненадлежащего исполнения ООО «ГК Каменарь» обязательств по Договору на выполнение подрядных работ от 12 января 2018г. № 121-К, следствие которого является возникновение соответствующих прав у ООО НПО «Нафта-Техника» как у Заказчика.

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В материалах дела отсутствуют надлежащие (относимые и допустимые) доказательства выполнения Подрядчиком строительных работ на заявленную ко взысканию сумму.

Истцом не представлено доказательств, что для Ответчика как Заказчика по Договору возникли обязательства по оплате, что Истцом как Подрядчиком выполнены строительные работы согласно предусмотренным Договором этапам работ. 

Истцом не представлено доказательств, что результат работ передан Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными Договором, и считается принятым либо используемым Заказчиком.

При этом, в материалах дела имеются доказательства наличия таких критических и значительных дефектов результата строительных работ, которые создают аварийную ситуацию снижения эксплуатационных характеристик до недопустимого уровня надежности и представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, внезапного обрушения, что в силу положений п. 3 ст. 723 ГК РФ дает Заказчику право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Заказчик (Ответчик) воспользовался своим правом на отказ от договора и результата работ и предъявил требование Подрядчику (Истцу) на возврат полученных авансов.

В соответствии со ст. 742 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Как следует из условий Договора (пункт 1.1 Договора) Заказчик (ООО НПО «Нафта-Техника») поручает, а Подрядчик (ООО «ГК Каменарь») принимает на себя обязательство    по    строительству    административных,    производственных    и хозяйственных зданий и сооружений по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Зарубино.

Подрядчик выполняет указанные в Договоре работы по этапам, в соответствии с разработанной проектной документацией, действующими нормами и правилами, ГОСТами, техническими регламентами, а также в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами, регулирующими строительную и иную деятельность на территории Российской Федерации (пункт 1.2 Договора).

Как следует из пунктов 2.3.1 - 2.3.24 Договора Подрядчик обязан:

- назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий;

- до начала производства работ представить Заказчику копии документов по охране труда на ответственных по электробезопасности с приложением копий удостоверений о прохождении обучения, ответственных за пожаробезопасность с приложением копий удостоверений о прохождении обучения, журнал инструктажа на рабочем месте;

- выполнить работы по Договору и сдать их Заказчику в установленном порядке;

- нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее качества работ, достоверность объемов и стоимости работ, включенных в «Акты о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3), правильность оформления и полноту исполнительной, технической и отчетной документации, подтверждающей качество, объемы и стоимость выполненных работ и произведенных затрат;

- предоставить на поставляемые для производства работ материалы, изделия, конструкции и оборудование технические паспорта, сертификаты соответствия, другие документы,  подтверждающие  соответствие  проекту  и  надлежащее  качество. Применение на объекте строительных материалов и оборудования без вышеназванных документов не допускается;

- известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности скрытых работ. Без освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций и оформления соответствующих актов последующее выполнение работ не допускается. Работы, не подтвержденные надлежаще оформленной исполнительной и технической документации, освидетельствованию и приемке не подлежат;

- по окончании производства работ предоставить исполнительную документацию в количестве 4 (четырех) экземпляров согласно условиям Договора и действующих технических норм РФ (СП 68.13330.2011; РД 10-02-2006);

- регулярно информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению Договора;

- обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 3.1 Договора общая стоимость работ, выполняемых по Договору, определена на основании проектной документации по договору и указана в Сводном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору). Стоимость работ подлежит уточнению путем подписания сторонами локальных смет.

Согласно пункту 4.3. Договора Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется поэтапно в следующем порядке: Подрядчик по окончании этапа Работ направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3) с указанием объемов и стоимости предъявляемых к приемке Работ, Одновременно с. вышеуказанными документами передается необходимая надлежаще оформленная исполнительная документация, предусмотренная действующими техническими нормативными актами, подтверждающая объемы и качество выполненных Работ, примененных материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительным нормам и стандартам. При не предоставлении (несвоевременном предоставлении) Подрядчиком надлежаще оформленной исполнительной документации, «Акт о приемке выполненных работ» (форма №КС-2) и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3) к рассмотрению не принимаются.

Согласно п. 4.3.2 договора при соблюдении Подрядчиком условий, изложенных в п. 4.3.1. Договора, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленные «Акты о приемке выполненных работ» (форма № КС-2), «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3), исполнительную документацию, в этот же срок при необходимости назначает представителю Подрядчика время для приемки предъявленных к приемке Работ непосредственно на объекте.

Согласно п. 4.3.3 договора при отсутствии нарушений и дефектов выполненных Работ, надлежащим образом оформленной исполнительной документации, Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3). При наличии нарушений и/или дефектов в срок, указанный в п. 4.3.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке Работ.

Согласно п. 4.3.4 договора Записи па формах «Актов о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) о наличии нарушений в объемах, качестве и стоимости включенных в них работ, выполненные представителем Заказчика, имеют силу мотивированного отказа, и после вручения   представителю   Подрядчика   являются   обязательными   для   исполнения Подрядчиком и/или его субподрядчиками. Подрядчик обязан устранить указанные в настоящем пункте выявленные нарушения в течение 7 (Семи) календарных дней, если иной срок не согласован Заказчиком.

Согласно п. 4.3.5 договора после устранения нарушений и дефектов, изложенных в мотивированном отказе представителя Заказчика, подрядчик повторно представляет Заказчику исправленные «Акты о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) в порядке, установленном п. 4.3.1 Договора.

Согласно п. 4.3.6 договора представители Заказчика и представители Подрядчика совместно в пятидневный срок с даты повторного получения документов, указанных в п. 4.3.5. Договора, проверяют устранение ранее указанных нарушений, после чего, в случае их устранения. Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» (форма № КС- 2) и направляет их Подрядчику.

Как следует из пункта 3.2 Договора оплата по Договору производится в следующем порядке: авансовые платежи в сумме 8 000 000,00 руб. и 4 000 000,00 руб. в течение 5 банковских дней со дня подписания договора и в течение 10 банковских дней с момента получения первого авансового платежа, соответственно.

Дальнейшие расчеты по Договору производятся поэтапно, с предоплатой 50% от сметного расчета каждого этапа в течение 5 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату. Оплата работ по законченному этапу производится Заказчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма № КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 3 ст. 723 ГК РФ, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В ходе выполнения Подрядчиком (Истцом) строительных работ, Заказчик (Ответчик) неоднократно предъявлял претензии по качеству работ и исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

В связи с отсутствием надлежащих сведений от Подрядчика о привлечении к производству строительных работ компетентных лиц, Заказчиком было получено заключение специалистов - Заключение по визуальному и измерительному контролю № 3/01-11-19 от 15.11.2019г., выполненному лабораторией ООО «КВАРЦ Групп» по результатам выборочного контроля сварных соединений.

Согласно указанному Заключению по результатам выборочного контроля сварных соединений металлоконструкций установлены многочисленные дефекты сварочных соединений, которые в соответствии с РД 34.15.132-96 являются недопустимыми и подлежат исправлению путем ремонта.

18.12.2019 года в адрес Подрядчика направлено Извещение о времени и месте работы комиссии по качеству и составлении акта, в котором содержалось требование направить полномочного представителя для участия в работе комиссии.

Подрядчик уклонился от направления представителя.

По результатам работы комиссии по приемке результатов строительных работ по качеству (количеству) с участием специалистов Торгово-Промышленной палаты Костромской области изготовлено Заключение экспертов № 12905/00003 от 20.01,2020г. по результатам работы комиссии по приемке результата работ по качеству (количеству) по Договору на выполнение подрядных работ от 12 января 2018г. № 121 -К, заключенного между ООО «ГК Каменарь» (Подрядчик) и ООО НПО «Нафта-Техника» (Заказчик).

Как следует из заключения экспертов, результат выполненных строительных работ имеет критические и значительные дефекты, создающих аварийную ситуацию снижения эксплуатационных характеристик до недопустимого уровня надежности и представляющих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, внезапного обрушения, проведение ремонтных работ является нецелесообразным и невозможным.

Экспертами выделен значительный перечень недопустимых недостатков результата работ и их производства, изложенный по тексту Заключения экспертов.

Также экспертами отмечено отсутствие предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

Обязательство предоставить исполнительную документацию одновременно с предоставлением «Акта о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3) предусмотрена пунктами 2.3.7, 2.3.17, 4.3, Договора, действующим законодательством.

Пунктом 11 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016, установлено, что исполнительная документация необходима как для безопасной эксплуатации объекта, так и для проведения ремонтных работ. Обязанность подрядчика, выполняющего работы по договору строительного подряда, обеспечить ведение исполнительной документации, предусмотрена частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской   и   пунктом   6.13   СП  48.13330.2011.   «Свод  правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Заключение экспертов одновременно с претензией об отказе от договора и результатов работ по договору, а также с требованием возвратить уплаченные денежные средства направлено Заказчиком в адрес Подрядчика письмом исх. № НТ-020-031 от 03.02.2020г. Получено Подрядчиком 04.02.2020г.

С учетом изложенного выше, у Ответчика отсутствуют правовые основания для принятия строительных работ и результата работ от Подрядчика, с учетом критического характера выявленных недостатков Заказчик вправе только отказаться от результата работ (но не требовать выполнения ремонта). Подрядчик (Истец), при этом, обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Поскольку без передачи указанных выше документов ответчик не сможет воспользоваться результатом выполненных ответчиком работ, и отсутствие таких документов будет препятствовать завершению строительства, сдаче объекта и дальнейшей его эксплуатации, на истца правомерно возложена обязанность, предусмотренная указанной выше нормой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В учетом вышеуказанного, суд на основе совокупности представленных доказательств и установленных обстоятельств, пришел к выводу, об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Требования о взыскании суммы неустойки также не подлежат удовлетворению в связи с отказом во взыскании суммы задолженности, на которую она была начислена.

Расходы по госпошлине распределены на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании статей 307-309, 330, 702, 711, 740, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований - отказать. 

Взыскать с ООО "ГК КАМЕНАРЬ" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 38 802 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

               Судья                                                                                    В.П. Сорокин