АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-10542/2021

г. Чебоксары

16 февраля 2022 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи           Кисаповой Н.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению

отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно - коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики, 

429826, г. Алатырь, Чувашская Республика, ул. Первомайская, д. 87, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, 

429570, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика, ОГРНИП 315213500000957, ИНН 

<

***>

о взыскании 58819 руб. 18 коп. (с учетом уточнений), 

установил:

отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно - коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики (далее – истец, Отдел) обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, Предприниматель) о взыскании 35108 руб. 34 коп. неустойки.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по выполнению работ в рамках муниципального контракта № 0115300044221000010_322077 на ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов №11 и №13 по улице Комсомола в городе Алатыре Чувашской Республики.

  Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 01.12.2021 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Ответчику предложено в срок до 23.12.2021 представить отзыв, до 20.01.2022 сторонам предложено представить дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленного требования. 

Копия определения суда о принятии заявления к производству выслана сторонам по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, уведомление от которых вернулось в суд с отметкой о ее вручении. 

При таких обстоятельствах ответчик считается надлежащим образом извещенным о возбуждении производства по делу в порядке упрощенного производства, представлении возражений относительно суммы задолженности и возможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о совершении процессуальных действий по делу размещена на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuvashia.arbitr.ru, и на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации www.arbitr.ru в разделе "Картотека арбитражных дел".

Ходатайством от 26.01.2022 истец уточнил исковые требования, просил взыскать 58819 руб. 18 коп. неустойки за период с 01.07.2021 по 20.01.2022.

Суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает уточнения исковых требований.

В порядке части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова лиц, участвующих в деле, по истечении сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов.

09.02.2022 от истца в суд поступило ходатайство о составлении мотивированного решения.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

05.04.2021 между Отделом (заказчик) и Предпринимателем (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0115300044221000010_322077 на ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов №11 и №13 по улице Комсомола в городе Алатыре Чувашской Республики, по условиям которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по ремонту дворовой территории многоквартирных жилых домов №11 и №13 по улице Комсомола в городе Алатыре Чувашской Республики, с надлежащим качеством в соответствии с условиями контракта, с  календарным  планом (приложение № 2) и разработанной сметной  документацией (приложение №1) и сдать их  результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить работы.

Работы по контракту выполняются в соответствии со сметной документацией, утвержденной заказчиком, и  календарным планом. 

Согласно календарного плана ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов №11 и №13 по улице Комсомола в городе Алатыре Чувашской Республики: начало работ с даты подписания  муниципального контракта, завершение работ 30.06.2021.

Согласно пункта 3.1. контракта цена контракта составляет 1 017 633 руб. 02 коп. НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

 Оплата заказчиком стоимости работ подрядчику осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 с приложением счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

за счет средств бюджета города Алатыря Чувашской  Республики, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год в сумме 137 294 (сто тридцать семь тысяч двести девяносто четыре) руб. 02 коп, по коду бюджетной классификации: 932 0409 Ч2103S4210  244,КОСГУ 225, код цели R04S.

за счет средств бюджета города Алатыря Чувашской Республики переданных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год в сумме 880 339 (восемьсот восемьдесят тысяч триста тридцать девять) руб. 00 коп, по коду бюджетной классификации: 932  0409 Ч2103S4210 244,  КОСГУ 225, код цели R04.Оплата производится в безналичной форме платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. Авансирование не предусмотрено (пункт 3.4. контракта).

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с проектно - сметной документацией  утвержденной заказчиком и  календарным планом, являющимся  его неотъемлемой частью к контракту. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать заказчику их результат в установленном контракте порядке (пункты 4.1., 4.2. контракта).

Истец неоднократно направлял письма в адрес ответчика оп просрочке выполнения работ (л.д.19-22).

12.09.2021 истец направил в адрес ответчика претензию, об уплате пени за просрочку выполнения работ.

Во исполнении принятых на себя обязательств ответчик выполнил часть работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ и затрат от 22.12.2021 №1 на сумму 444733 руб., от 22.12.2021 №№ на сумму 79139 руб.

Неисполнение ответчиком обязательств по выполнению работ послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании пункта 1 статьи 708 Кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 Кодекса подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательные работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику. Государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Кодекса).

Согласно, календарного плана к контракту, ремонт дворовой территории должен был быть  завершен 30.06.2021. 

Факт ненадлежащего исполнение Предпринимателем обязательств по контракту, подтвержден представленными в материалы дела документами.

В рамках настоящего дела истец просит взыскать с ответчика неустойку в сумме 58819 руб. 18 коп. за период с 01.07.2021 по 20.01.2022.

Поскольку ответчик выполняет работы с просрочкой, таким образом, истец вправе требовать уплату неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 7.10 контракта Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

По правилам части 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 7 статьи 34 Закона о контрактной системе).

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд, признает его, арифметически не верным, поскольку истцом в расчете не учтены выполненные 22.12.2021 ответчиком работы на сумму общую 523872 руб. Неустойка подлежит взысканию за период с 01.07.2021 по 20.01.2022 в сумме 54514 руб. 71 коп.

Государственная пошлина относится на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина с истца не подлежит взысканию, поскольку последний освобожден от ее уплаты.

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно - коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики 44 253 (Сорок четыре тысячи двести пятьдесят три) руб. 57 коп. пени за период с 01.07.2021 по 20.01.2022 за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту № 0115300044221000010_322077 от 05.04.2021.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 1 770 (Одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –Чувашии.

 

Судья

Н.В. Кисапова