Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

08. 04. 2024 года.                                            Дело № А40-273303/23-43-2154

Резолютивная часть решения объявлена 02. 04. 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 08. 04. 2024 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Техноново " (ОГРН 

<

***>) к ООО " СтройКомплект " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 376 251 руб. 33 коп. – долга, процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга,

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – ФИО1, доверенность б/н от 01.12.2023 г. 

Заслушав представителя, изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 1 376 251 руб. 33 коп. – долга, процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга, на основании статей 165.1, 307, 309, 310, 702, 711, частью 1 статьи 740, пунктом 4 статьи 753 ГК РФ.

Истец не направил в судебное заседание представителя, представил истребованные судом документы не в полном объеме, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; письмом № 26-03/24-1 от 26.03.2024 г., поступившим в суд по электронной почте 31.03.2024 г. заявил об уменьшении размера исковых требований до 825 986 руб. 43 коп., в том числе: 712 422 руб. 19 коп. - долга, 113 564 руб. 24 коп. - процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга, в связи с уточнением расчётов, каких-либо иных ходатайств не заявил.

Ответчик направил представителя в судебное заседание, который первоначально заявленный иск не признал полностью по основаниям изложенным в отзыве на исковое заявление, после принятия судом заявления истца об уменьшении размера исковых требований о каких-либо возражениях против иска не сообщил; истребованные судом документы, опровергающие, по его мнению, первоначальный иск предъявил; первоначальный расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве; каких-либо ходатайств не заявил.

Заявление истца об уменьшении размера исковых требований до 825 986 руб. 43 коп., в том числе: 712 422 руб. 19 коп. - долга, 113 564 руб. 24 коп. - процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга, соответствует требованиям ст. 49 АПК РФ, является правом истца и принимается судом к рассмотрению.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом и ответчиком, в отсутствие представителя истца.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что между ООО «СтройКомплект» и ООО «Технологии и Нововведения» (ООО «Техноново») был заключен договор строительного подряда №04-03/РГ-23 от 24 марта 2023 г., по условиям которого, Подрядчик обязуется своими силами и/или силами привлеченных им субподрядных организаций комплекса работ по инъекционной гидроизоляции, в соответствии с утвержденным Заказчиком протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору), по объекту, расположенному по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п. 2.1. Договора стоимость работ по договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена в Приложении №1 к настоящему Договору и составляет 497 244 рубля 30 коп., в т.ч. НДС 20% - 82 874 рубля 05 коп.

В соответствии с п. 3.1. Договора оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:  авансовый платеж 70 (семьдесят) % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в сумме 348 071 рубль 01 коп., в т.ч. НДС 20% - 58 011 рублей 84 коп., осуществляется Заказчиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора; окончательный платеж 30 (тридцать) % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в размере 149 173 рубля 29 коп., в т.ч. НДС 20% - 24 862 рубля 22 коп., осуществляется Заказчиком в течение 2-х (двух) банковских дней после приемки Заказчиком всего объема работ по Договору и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п. 4.2. Договора, сроки выполнения работ по Договору составляют 10 (десять) рабочих дней от даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика, в размере, указанном в п.3.1.1. настоящего Договора.

Заказчиком, в рамках Договора, были произведены следующие платежи: платежным поручением № 682 от 27.03.2023г.- 348 071.01 рублей.

В рамках договора Подрядчиком выполнен объем работ на общую сумму 497 244 рубля 30 коп., в т.ч. НДС 20% - 82 874 рубля 05 коп., что подтверждается подписанными Сторонами Актом КС-2 №1 от 19.04.2023г. 

Таким образом, сумма неоплаченных работ по Договору составила 149 173.29 руб., в т.ч. НДС 20% 24 862.22 руб. 

06.04.2023г. сторонами было подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору строительного подряда № 04-03/РГ-23 от 24.03.2023 г. на проведение дополнительных работ, ранее не включенных в предмет Договора, но требующих их выполнения. 

В соответствии с п. 1.Доп. соглашения, Заказчик обязуется оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: инъекционной гидроизоляции на объекте «Спортивно- оздоровительный комплекс с гостиницей, автостоянкой и инженерными коммуникациями», расположенному по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п. 4. Соглашения, стоимость Дополнительных работ, выполняемых на основании настоящего Соглашения, определена в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 2 563 606 рублей, 50 копеек, в т.ч. НДС 20% - 427 267 рублей, 75 копеек.

В соответствии с п. 3. Соглашения, стороны установили следующие сроки выполнения работ по настоящему Дополнительному соглашению: Начало выполнения работ - не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения. Окончание выполнения работ - 40 рабочих дней с момента начала производства работ.

Заказчиком в рамках Доп. соглашения , были произведены следующие платежи: платежным поручением № 829 от 13.04. 2023г.- 1 400 000,00 рублей.

 В рамках Доп. соглашения Подрядчиком выполнен объем работ на общую сумму 2 563 606 рублей, 50 копеек, в т.ч. НДС 20% - 427 267 рублей, 75 копеек., что подтверждается подписанными Сторонами Актом КС-2 №1 от 05.05.2023г. 

Таким образом, сумма неоплаченных работ по Доп. соглашению №1 от 06.04.2023г. составила 1 163 606.50 руб., в т.ч. НДС 20% 193 934.42 руб. 

05.05.2023г сторонами было подписано Дополнительное соглашение № 2 к Договору строительного подряда № 04-03/РГ-23 от 24.03.2023 г. на проведение дополнительных работ, ранее не включенных в предмет Договора, но требующих их выполнения. 

В соответствии с п. 1. Доп. соглашения, Заказчик обязуется оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: инъекционной гидроизоляции на объекте «Спортивно- оздоровительный комплекс с гостиницей, автостоянкой и инженерными коммуникациями», расположенному по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п. 4. Соглашения, стоимость Дополнительных работ, выполняемых на основании настоящего Соглашения, определена в Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению и составляет 524 790 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 87 465 рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 3. Соглашения, стороны установили следующие сроки выполнения работ по настоящему Дополнительному соглашению: Начало выполнения работ - не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения. Окончание выполнения работ - 14 рабочих дней с момента начала производства работ.

Заказчиком в рамках Доп. соглашения , были произведены следующие платежи: платежным поручением № 2074 от 12.07.2023г.- 524 790 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 87 465 рублей 00 копеек.

В рамках Доп. соглашения Подрядчиком выполнен объем работ на общую сумму 524 790 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 87 465 рублей 00 копеек., что подтверждается подписанными Сторонами Актом КС-2 №1 от 15.05.2023г. 

Таким образом, сумма неоплаченных работ по Договору и Доп. соглашению №1 от 06.04.2023г. составила 1 312 779.79 руб., в т.ч. НДС 20% 218 796.63 руб. 

29.05.2023г. года Сторонами подписан Акт сверки взаимных расчетов, в котором сумма задолженности ООО «СтройКомплект» подтверждена. 

Исх. 151 от 20.07.2023г. ООО «СтройКомплект» было направлено гарантийное письмо с подтверждением суммы задолженности и гарантией оплаты в срок до 10.08.2023г. 

В целях мирного урегулирования спора, Истец обращался к Ответчику с требованием об оплате долга. 02.10.2023 года Ответчику также была направлена досудебная претензия (Исх.27-09/23 от 27.09.2023г.) с требованием об оплате задолженности по Договору № № 04-03/РГ-23 от 24 марта 2023 г., которая также была им получена 18.10.2023г. (РПО 12549350051966).

В связи с уточнением расчета, сумма исковых требований была уточнена истцом. Сторонами заключен договор № 04-03/РГ-23 от 24.03.2023 г., в соответствии с которым истец выполняет по заданию ответчика комплекс работ по инъекционной гидроизоляции на общую сумму 497 244,30 руб. (348 071,01+149 173,29). Так же сторонами в рамках указанного договора заключено дополнительное соглашение № 1 от 24.04.2023 г., в соответствии с которым истец обязуется выполнить дополнительные работы на сумму 2 536 606,50 руб. и дополнительное соглашение № 2 от 05.05.2023 г. на производство дополнительных работ на сумму 524 790,00 руб. Таким образом, общая сумма договора составила 497 244,30 руб. + 2 536 606,50 руб. +524 790,00 руб. = 3 585 640,80 руб.

Ответчик осуществил оплаты на общую сумму 2 872 861,01 руб., в том числе: платежным поручением № 592 от 27.03.2023 г. на сумму 348 071,01 руб.; платежным поручением № 829 от 13.04.2023 г. на сумму 1 400 000,00 руб.; платежным поручением № 2047 от 12.07.2023 г. на сумму 524 790,00 руб.; платежным поручением № 4614 от 08.12.2023 г. на сумму 600 000,00 руб.

Таким образом, сумма задолженности составляет 3 585 640,80 руб. - 2 872 861,01 руб. = 712 779,79 руб. Уточненная сумма требования Ответчиком не оспорена.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 712 422 руб. 19 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Согласно представленного Истцом расчета проценты составляют 113 564 руб. 24 коп.

Расчет процентов судом проверен, признан верным.

Требование истца о взыскании процентов в сумме 113 564 руб. 24 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответствующие периоды от 712 422 руб. 19 коп. за каждый день просрочки платежа в период с 19.05.2023 г. по день фактической уплаты суммы долга, также подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок, в соответствии с  п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. Уплаченная по платежному поручению № 502 от 17.11.2023 г., госпошлина в сумме 7 243 руб. 27 коп., в связи с уменьшением истцом размера исковых требований, подлежит возврату.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 395, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Заявление истца об уменьшении размера исковых требований до 825 986 руб. 43 коп., в том числе: 712 422 руб. 19 коп. - долга, 113 564 руб. 24 коп. – процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга принять.

Взыскать с ООО " СтройКомплект " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Техноново " (ОГРН 

<

***>) 825 986 руб. 43 коп., в том числе: 712 422 руб. 19 коп. - долга, 113 564 руб. 24 коп. – процентов, проценты за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответствующие периоды от 712 422 руб. 19 коп. за каждый день просрочки платежа в период с 19.05.2023 г. по день фактической уплаты суммы долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 19 519 руб. 73 коп.

В остальной части иск оставить без удовлетворения в связи с уменьшением истцом размера исковых требований.

Возвратить ООО " Техноново " (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета РФ, уплаченную по платежному поручению № 502 от 17.11.2023 г., госпошлину в сумме 7 243 руб. 27 коп., в связи с уменьшением истцом размера исковых требований.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

О.В. Романов