АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-20434/2017

12 января 2018 года

город Омск

Резолютивная часть решения изготовлена 22.12.2017 г., решение в полном объеме составлено 12.01.2018 г.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А., 

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ОмскМонолит» (ИНН 5503245711, ОГРН 1135543045604) 

к обществу с ограниченной ответственностью «АВ-Конструкция» (ИНН 5507096309, ОГРН 1155543002449) 

о взыскании 400 940руб. 14коп.,

без вызова участвующих в деле лиц,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ОмскМонолит» (далее – ООО «ОмскМонолит», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АВ-Конструкция» (далее – ООО «АВ-Конструкция», ответчик) о взыскании  400 940 руб. 14 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору № 13-10/2016 от 13.10.2016.          

Определением Арбитражного суда Омской области от 08.11.2017 года исковое заявление ООО «ОмскМонолит» принято, возбуждено производство по делу № А46-20434/2017, определено рассмотреть дело в порядке упрощенного производства.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда, в сроки, установленные в определении суда от 08.11.2017 года, отзыв на иск не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

В обоснование иска, истец указывает, что 13.10.2016 года ООО «АВ-Конструкция» («Заказчик») и ООО «ОмскМонолит» («Исполнитель») заключили договор подряда № 13-10/2016 на выполнение работ по устройству кровли на 8 жилых домах (3х этажных с техническим этажом («объект»), расположенных на земельных участках:

- 55:36:070107:8541, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 73м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8542, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 73м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8544, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 81м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8545, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 81м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8548, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 92м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8549, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 92м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8550, местоположение установлено относительно ориентира. расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 103м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155;

- 55:36:070107:8551, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 103 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, ФИО1, ул. Красный Путь, д. 155.

В соответствии с п. 1.2. заключенного договора Заказчик принимает и своевременно оплачивает услуги исполнителя согласно условиям договора.

Срок выполнения работ, как предусмотрено пунктом 1.4. договора, составляет 2 календарных месяца с момента перечисления заказчиком аванса исполнителю.

Пунктом 3.1. согласована стоимость работ, выполняемых на «объекте», в соответствии с калькуляцией (приложение № 1 к договору), что составляет 2 628 802 руб. 60 коп., включая НДС 18 % - 401 003 руб. 79 коп.

Согласно с п. 3.2. договора, заказчик в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора оплачивает исполнителю аванс в размере 1 314 401 руб. 30 коп., в том числе НДС 18 % - 200 501 руб. 89 коп.

Очередные платежи заказчик производит ежемесячно в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами промежуточного акта на 13 число каждого календарного месяца, в размере, согласно выполненным объемам работ и выставления соответствующего счета на оплату данных (п. 3.3. договора).

Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не позднее 5 календарных дней после подписания сторонами итогового акта выполненных работ (КС2, КС3), за вычетом произведенных ранее платежей по договору и выставления соответствующего счета за неоплаченные работы (п. 3.4. договора).

10 января 2017 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 13-10/2016 от 13.10.2016 г., где срок выполнения работ в связи с увеличением объема работ составляет 14 календарных дней с момента оплаты 100 % стоимости работ. Стоимость работ составляет  89 432 руб. 44 коп. (п. 2 дополнительного соглашения № 1).

Далее, 29.05.2017 года между ООО «АВ-Конструкция» и ООО «ОмскМонолит» было подписано дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 13-10/2016 от 13.10.2016 г., согласно которому стоимость работ составляет, исходя из калькуляции (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2), 238 374 руб. 00 коп, включая НДС 18 % - 36 362 руб. 14 коп., а срок их выполнения – 14 календарных дней после оплаты 100 % стоимости работ.

ООО «ОмскМонолит» свои обязательства исполнило надлежащим образом, работы, предусмотренные договором подряда № 13-10/2016 от 13.10.2016 г. и дополнительными соглашениями к нему № 1 от  10.01.2017 г., № 2 от 29.05.2017 г. выполнило в полном объеме на общую сумму 2 151 341 руб. 44 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 14.12.2016 г. на сумму 983 925 руб. 00 коп., № 2 от 20.01.2017г. на сумму 478 025 руб. 00 коп., № 1 от 13.03.2017г. на сумму 59 222 руб. 44 коп., № 3 от 04.05.2017г. на сумму 364 523 руб. 00 коп., № 4 от 30.05.2017 г. на сумму 265 646 руб. 00 коп., а также справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 14.12.2016г. на сумму 983 925 руб. 00 коп., № 2 от 20.01.2017 на сумму 478 025 руб. 00 коп., № 2 от 13.03.2017г. на сумму 59 222 руб. 44 коп., № 3 от 04.05.2017г. на сумму 364 523 руб. 00 коп., № 4 от 30.05.2017г. на сумму 265 646 руб. 00 коп., подписанными обеими сторонами без претензий и замечаний.

ООО «АВ-Конструкция» обязательства по оплате выполненных работ в полном объеме не исполнило, произвело платежи исполнителю в размере 1 750 401 руб. 30 коп., что подтверждается платежными поручениями № 159 от 02.11.2016г. на сумму 1 314 401 руб. 30 коп., № 55 от 06.03.2017г. на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 111 от 21.04.2017г. на сумму 136 000 руб. 00 коп., № 135 от 18.05.2017г. на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 232 от 10.08.2017 г. на сумму 100 000 руб. 00 коп., приложенными к материалам дела.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по договору подряда № 13-10/2016 от 13.10.2016 г. и дополнительными соглашениями к нему № 1 от  10.01.2017 г., № 2 от 29.05.2017 г., согласно акту сверки взаимных расчетов  за период с 01.01.2016г. по 25.09.2017г., подписанным ООО «ОмскМонолит» и ООО «АВ-Конструкция», составляет 400 940 руб. 14 коп., что и послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Пунктом 4.5 договора подряда № 13-10/2016 от 13.10.2016 г. предусмотрен претензионный порядок разрешения споров и разногласий между сторонами, согласно которому срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента ее получения. Во исполнении названного пункта договора, истец 27.09.2017 года направил в адрес ответчика претензию с требованием оплаты суммы долга в размере 400 940 руб. 14 коп.

Ответчик указанную претензию получил, однако оплату не произвел, ответ на претензию не представил.

Оценив материалы дела, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Материалами дела установлено, что к оговоренному сроку согласованные работы заказчиком в полном объеме не оплачены.

Доказательств оплаты выполненных работ на сумму долга в размере 400 940 руб. 14 коп. обществом с ограниченной ответственностью «АВ-Конструкция» в материалы дела не представлено, иск по существу ответчиком не оспорен. 

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании 400 940 руб. 14 коп. основного долга является обоснованным, подтвержденным материалами дела и подлежит удовлетворению в полном объеме.

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошлины следует отнести на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВ-Конструкция» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОмскМонолит» 400 940 руб. 14 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору № 13-10/2016 от 13.10.2016, а также 11 019руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Омской области.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                В.А. Баландин