Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

« 13 » июля 2020 г.

Дело № А12-8332/2020

Резолютивная часть решения объявлена 09  июля 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2020 года.  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Электроналадкасервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ВМК - СТР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств

в отсутствие лиц,  участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Электроналадкасервис» (далее – истец, ООО «ЭНС») обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВМК - СТР» (далее – ответчик, ООО «ВМК – СТР») о взыскании суммы основного долга в размере 2 400 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 35 000 руб.                                                                           

Стороны, извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, не явились.

Истцом представлено  ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Ответчик письменный мотивированный отзыв на иск в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил, возражений по существу иска не заявил.

Изучив материалы дела, оценив доводы истца, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 25.03.2019г. между истцом (Субподрядчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №11/2019 (далее - договор).

В соответствии с п. 1.1 договора Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу силовой части системы электрообогрева трубопроводов (далее по тексту - Работы) Комбинированной установки переработки нефти, Евро + расположенных по адресу: 109429, г. Москва, 2- й квартал Капотни, стр. 2, территория АО «Газпромнсфть-МНПЗ» (далее - Объект).

Объем, поручаемых Субподрядчику Работ на Объекте, определяется рабочей документацией на выполнение Работ, выданной Подрядчиком. При этом допуск и нахождение Субподрядчика на Объекте и выполнение Работ осуществляется Субподрядчиком при наличии заключенного Договора субподряда и документов, согласно Договора (п. 1.2 договора).

Согласно п. 1.3 договора, Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 2.1 договора, цена договора является открытой и определяется стоимостью выполненных и принятых Подрядчиком работ, указанных в приложении №4 к настоящему Договору. На стоимость Работ в текущих ценах начисляется НДС -20%.

В соответствии с п. 3.2 договора сроки выполнения Работ: начало Работ: «25» марта 2019 года; окончание Работ: «10» июля 2019 года.

Согласно п. 2.2 договора расчеты за выполнение Работы производятся на основании следующих документов:

- Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Сторонами;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, подписанной Сторонами;

- Счета -фактуры;

- Справки Субподрядчика об уплате налога на добавленную стоимость (НДС) за период предшествующих работ, подписанной Генеральным директором и главным бухгалтером. (Предоставляется 1 (Один) раз в квартал)).

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней с момента выставления счета-фактуры Субподрядчиком, при условии перечисления денежных средств Генподрядчиком на расчетный счет Подрядчика.

Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ производится Подрядчиком после получения от Субподрядчика счета и счет-фактуры, подписанного уполномоченным лицом Субподрядчика с подтверждением полномочий, а также при условии погашения Субподрядчиком задолженности перед Подрядчиком по оплате услуг и иных расходов предусмотренных Договором, и выполнения Субподрядчиком требований Подрядчика по оплате Субподрядчиком штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий Договора.

Субподрядчик обязан представить Подрядчику счет и счет-фактуру в течение 5 (Пяти) дней со дня подписания Подрядчиком акта приемки выполненных работ- по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 6.2 договора сдача Работ Субподрядчиком производится на основании следующих документов оформленных надлежащим образом: «Журнала учета выполненных работ» по форме № КС-ба, актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, реестра актов выполненных работ по форме № КС-2, исполнительную документацию на выполненные объемы работ, иные документы первичного учета (счета-фактур и т.д.), которые Подрядчик рассматривает и подписывает в течение 10 (Десяти) рабочих дней при условии подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ Заказчиком.

В соответствии с п. 6.3 договора по окончании выполнения Работ, определенных Договором, Стороны подписывают Акт сдачи- приемки результата выполненных работ. Акт сдачи-приемки результата выполненных работ Сторонами оформляется в произвольной форме и должен содержать наименование Сторон, указание о лицах, выступающих от имени Сторон, наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения и т.д.

Приемка Работ производится Подрядчиком и/или Заказчиком на основании проектно-сметной документации, наряд-заказов и возможных замечаний Подрядчика и/или Заказчика о качестве Работ (п. 6.4 договора).

Пунктом 6.5 договора предусмотрено, что в случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки Работ с обоснованием несоответствия выполненных работ требованиям проектно-сметной документации и СНиП, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Истец указывает, в рамках данного договора Субподрядчиком всего выполнено и принято работ на сумму 5 003 550,98 руб., что подтверждается актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, журналом выполненных работ, актом сверки подписанными в двухстороннем порядке, счет-фактурами.

Истец отметил, что частично сумма выполненных работ Ответчиком оплачена, в размере 2 503 479,97 руб. Частично из этой суммы проведены взаимозачеты на генуслуги в размере 100 071,01 руб. 

Остаток неоплаченных работ составляет:

5 003 550,98 - 2 503 479,97 - 100 071,01 = 2 400 000 руб.

Согласно п.2.2 договора оплата выполненных работ производится не позднее 40 (Сорока) календарных дней после предоставления Субподрядчиком соответствующих первичных учетных документов и подписания Актов сдачи-приемки. 

Истец ссылается на то, что в период исполнения обязательств по данному договору в адрес истца от ответчика не поступало претензий по качеству и объемам выполненных работ. Все работы выполнены в срок и оформлены в полном соответствии с условиями Договора, все документы на оплату выполненных работ подписаны обеими сторонами и сданы ответчику.

Претензия истца с требованием погасить задолженность оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с рассматриваемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса).

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в срок не позднее 40 (Сорока) календарных дней с момента выставления счета-фактуры Субподрядчиком, при условии перечисления денежных средств Генподрядчиком на расчетный счет Подрядчика.

Данный пункт договора в части установления условия об оплате работ, выполненных Субподрядчиком, при перечислении денежных средств на расчетный счет Подрядчика от Генподрядчика, является ничтожным (ст. ст. 166, 168 ГК РФ) в силу противоречия ст. 308, ч. 3 ст. 401, 711 ГК РФ, поскольку Генподрядчик стороной по договору субподряда не является, а закон содержит императивное предписание о том, что не является обстоятельством, исключающим ответственность за нарушение обязательства, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника. Согласно ст. 711 ГК РФ оплате подлежат фактически выполненные работы

Таким образом, в соответствии с п. 2.2 договора субподряда ответчик обязан оплатить выполненные истцом работы в течение 40 календарных дней с момента выставления счета-фактуры Субподрядчиком, после представления акта приема-передачи выполненных работ форма N КС-2 и справки форма N КС-3, подписанных Подрядчиком и субподрядчиком.

Ответчик выполненные по договору субподряда работы оплатил частично, задолженность составила 2 400 000 руб.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Как усматривается из материалов дела, в подтверждение выполнения работ истцом представлены акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, журнал учета выполненных работ, подписанные обеими сторонами.

Претензий от ответчика по объему, качеству и стоимости выполненных работ в адрес истца не поступало, акты сдачи-приемки выполненных работ подписаны без замечаний и возражений.

Сторонами был подписан акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019 – 14.01.2020, которым задолженность в размере 2 753 334, 13 руб. ответчиком также подтверждается.

Поскольку по указанным актам работы приняты, в силу требований пункта 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации на стороне заказчика возникло обязательство по оплате принятых результатов работ.

Ответчик обязательства по оплате выполненных работ в размере 2 400 000 руб.  не исполнил, в связи с чем, образовалась задолженность.

Ответчик в порядке ст. 65 АПК РФ доказательств погашения взыскиваемой задолженности суду не представил, равно, как и не представил возражений относительно факта оказания истцом спорных услуг в заявленном объеме.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ,  а  также  положений  статей  65,  66 АПК РФ,  лицо, не  реализовавшее  свои  процессуальные  права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий. 

В силу положений статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Такие обстоятельства, в случае принятия их арбитражным судом, не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

На основании указанной нормы, учитывая отсутствие отзыва ответчика и непредставление доказательств, опровергающих обоснованность заявленных требований, суд считает обстоятельства, на которых истец основывает заявленные требования, признанными ответчиком.

В связи с этим, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВМК - СТР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электроналадкасервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере в размере 2 400 000 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 35 000 руб.

Решение  может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.    

Судья                                                                                     Стрельникова Н.В.